		제323회 도의회 임시회 2020. 7. 14. ~ 7. 24.

- 2020년 -

주요업무추진 상황보고

	종합건설사업소

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 □ 기구 및 기능 □ 예산현황 Ⅱ. 주요업무 추진상황 □ 총 평 □ 분야별 추진실적 및 계획 Ⅲ. 도의회 관련사항 처리상황 □ 2019년도 행정사무감사결과 처리상황 Ⅳ. 참고사항 □ 주요 사업별 예산확보 및 추진 현황 □ 간부명단

Ⅰ. 기본 현황

□ 기구 및 기능

【1】기  구 : 4과 2지소 22팀

								소 장
행정관리과				도로건설과				공공건축과						하천개발과					공주지소				홍성지소
서무팀				시설1팀				건축팀						지역개발팀					서무팀				서무팀
계약팀				시설2팀				건축TF						하천1팀					보수1팀				보수1팀
보상1팀								시험팀						하천2팀					보수2팀				보수2팀
보상2팀																			구조물 관리팀				구조물 관리팀
																			단속팀				단속팀

【2】정 ‧ 현원 현황

부서․지소별		계	일 반 직(정원/현원)
			4급	5급	6급	7급	8급	9급	비고 (운영직)
합 계		109/101	1/1	6/6	22/23	37/31	29/17	6/15	8/8
본소		56/54	1/1	4/4	12/13	24/23	12/7	3/6	-
	행정관리과	18/18	1/1	1/1	4/4	8/9	4/0	0/3	-
	도로건설과	12/11	-	1/1	2/2	4/4	3/3	2/1	-
	공공건축과	16/15	-	1/1	3/4	8/7	3/3	1/0	-
	하천개발과	10/10	-	1/1	3/3	4/3	2/1	0/2	-
공주지소		27/25	-	1/1	5/5	6/6	9/5	2/4	4/4
홍성지소		26/22	-	1/1	5/5	7/2	8/5	1/5	4/4

※ 공무직(73명) : 도로보수원 54, 사무보조 3, 과적단속요원 16

【3】주요 기능

	- 행정관리과
	❍조직, 예산, 청사관리 및 직원후생복지 ❍각종 건설공사 입찰 및 계약, 관급자재 구매, 보상업무
	- 도로건설과
	❍지방도 사업 집행계획 수립 및 조정 ❍국가지원지방도 및 지방도 확‧포장사업 시행
	- 공공건축과
	❍공공 건축물의 신축 및 보수사업 ❍건설공사 자재 및 현장 품질검사 시험
	- 하천개발과
	❍지방하천 집행계획 수립 및 정비사업시행 ❍지역개발 기반시설사업 시행
	- 공주∙홍성지소
	❍지방도∙위임국도 유지관리 및 보수사업 시행 ❍재해대책(풍∙수해) 수립 시행, 과적차량 단속

□ 2020년도 예산규모

세입 세출
		∙ [세 입 예 산] 12,337백만원 - 세외수입 344, 지방교부세 1,193, 보전수입등 및 내부거래 등 10,800 ∙ [세 출 예 산] 29,387백만원 - 사업예산 16,082, 행정운영경비 13,305

❍ 재배정 예산 사업 : 285,926백만원

(단위 : 백만원)

도로 확･포장	공공건축	하천정비	지역개발	도로유지 관리
123,861	42,409	60,852	10,092	48,712

Ⅱ. 주요업무 추진상황

□ 총   평

	총 평
❖ 충남 건설경기 활성화 및 도민 중심 건설 행정 구현 - 도내 건설업체 계약 및 자재구매를 통한 지역경제 자생력 강화 ❖ 과적차량 단속 및 계도를 통한 도민이 편안한 도로 환경 조성

주요성과

사업분야

상반기 주요업무 추진성과

□ 도로건설 사업 분야

체계적인 사업관리를 통한 효율적 예산집행

안전한 도로건설 환경 구축

고품질 도로건설 실현을 위한 기술자문위원회 실시

□ 공공건축 사업 분야

11개소 공공건축사업 준공(14,871백만원)

사전검증시스템(공공건축심의)을 통한 공공건축사업 추진

맞춤형 품질시험에 따른 최고의 행정서비스 제공

□ 하천 지역개발 사업 분야

지방하천 정비사업 추진으로 주민생활안전 기반 조성

신속한 예산 집행으로 도로망 구축에 전력

자연재해 예방과 자연친화형 하천 조성

□ 도로유지 보수 사업 분야

신속한 지방도 유지보수사업 시행 / 220지구

	앞으로
❖ 지역경제 특성을 반영·연계한 미래지향적 건설행정 추진 -「지역경제 우선」지역건설업체 참여율 및 관내자재 사용비율 제고 - 선제적인 도로관리를 통한「신뢰 받는 충청남도 이미지 구축」

□ 분야별 추진실적 및 계획

1		지역경제 활성화(코로나19 극복)를 위한 재정집행 지속추진

【1】지역경제 활성화를 위한 건설공사 계약 추진

지역건설업체 참여 증진 및 지역 생산자재 우선 구매

- 신속한 계약업무 추진으로 지역경제 활성화

❍ 지역건설업체를 우선적으로 보호하는 계약업무 수행

- 건설공사 지역의무공동도급(49%)으로 지역업체 보호

- 건설공사 자재 구매 시 도내 생산업체 우선 선정 구매(직무성과계약연계)

<공사자재 계약 체결 내역>

(단위: 백만원,%)

구 분	계약금액			금액대비 추진실적	비고
종합 건설사업소	전체	도내	도외
	34,836	32,099	2,737	92.1%	2020.6.30.기준

※ 100% 미 달성사유 : 도내 생산업체 부재, 다수공급자 2단계 경쟁 등

❍ 신속 집행 적극 추진을 통한 지역경제 활성화 기여

- 건설공사 사업예산 집행현황 관리 등으로 지속적인 예산관리

- 직무성과 계약과제와 연계하여 통합적인 관리 시스템 구축

- 공사관계자와 공정도 향상대책 논의, 대금지급 요청 독려 추진

- 신속집행을 위한 특례 적용 등 다각도 제도 활용하여 적극 추진

	<신속집행 특례 활용>
▶ (선금 지급률) 최대 선금지급 한도 70% → 80%상향 조정 집행 ▶ (선금 추가지급) 사유 발생 시 추가지급 → 최대선금 지급한도 범위 내에서 추가지급 ▶ (선금 기준액) 해당연도 이행금액 기준 → 총 계약금액 기준 선금 지급(기준액 증액)

앞으로
			• 지역 업체를 살리기 위한 계약 업무 수행 • 신속하고 체불 없는 공사로 지역경제 활성화

2		공정하고 투명한 보상업무 추진

【1】합리적이고 신속한 보상업무 추진으로 도민편익 증대

공익사업에 편입되는 사유재산에 대한 합리적이고 신속한 보상으로 관련 민원발생 최소화 및 다가가는 보상협의로 도민편의 제공

[ 보상계획 :  26지구 / 193,152백만원 ]

(단위 : 백만원)

지구 수	보상 대상(A)		기보상 실적(B)		비율 (%)	미보상현황		비고
	건수	금액	건수	금액		건수	금액
26지구	17,514	193,152	15,154	162,438	84	2,360	30,714

※ 하반기 신규 보상추진 : 20개 지구(4개 사업조사 지구 및 16개 하반기 추가 사업고시 예정)

❍ 손실보상대상 토지 및 물건의 정확한 현장조사로 민원발생 사전방지

- 현지조사 시 공간정보(항공영상, 드론 촬영) 및 GNSS 장비 이용

⇒ 보상 전반에 대한 기초자료로 보상의 공정성 및 정확성 확보

【 활용 현황 : 드론(무인항공기) 구입에 따른 사업지구 직접 촬영 등 적극 활용】
도로건설 사업지구	하천정비 사업지구	공공건축 분야(행정협업)	손실보상 분야(물건조사 등)

❍ 도민 편의적 보상협의 추진으로 협의율 제고 및 적극행정 실현

- 사업별 협의기간 중 매주 또는 수시로 현장 방문 협의‧민원상담

- 보상절차 단계별 사전 안내 및 주민보상설명회 개최

❍ 사업별 보상자료 체계적 관리 및 효율적 활용

- 보상프로그램 구입, 보상자료 통합 관리 및 활용

앞으로
			• 신속하고 정확한 행정절차 이행으로 토지수용 기간 단축 - 협의보상 및 수용재결, 공탁 처리 등 일련의 행정절차를 체계적으로 수행하여 각종 공익사업의 조속한 추진 도모 ※ 협의불능 토지 등은 재결에 의한 공탁 및 수용으로 연말까지 보상추진율 100%달성 노력

3		지역발전을 선도하는 도로교통 인프라 구축

【1】적극적인 도로건설사업 추진으로 지역경제 활성화 도모

원활한 교통인프라 구축으로 지역 간 균형발전 도모 및 삶의 질 향상

[2020년 도로사업 추진계획: 32지구 / 123,861백만원]

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	32	123,861	6	19,836	23	102,239	3	1,786
국지도	5	39,003	1	-	3	38,217	1	786
지방도	20	63,331	3	7,729	15	54,602	2	1,000
기 타	7	21,527	2	12,107	5	9,420	-	-

❍ 지역 건설사 참여확대 방안 모색 등 지역경제 성장 동력 제고

- 추정가격 100억원 미만 주계약자 관리방식 사업 확대 추진

❍ 체계적인 사업관리를 통한 효율적인 예산 집행

- 현장별 공정계획 사전 점검을 통한 선택과 집중형 예산 투자

- 지속적 점검·관리를 통한 공정 추진(6월 말 기준 53%, 657억원 집행)

앞으로
			• 공정진행 부진지구 지속 점검·관리 추진 • 지역건설사 하도급 참여 확대를 위한 도급사 합동 간담회 추진

4		견실시공을 통한 쾌적하고 안전한 도로건설 환경 구축

【1】견실시공 및 도로건설의 완성도 향상을 위한 행정서비스 구축

청렴하고 전문적인 건설행정 서비스 구현으로 고품질 도로건설 실현

❍ 지역 주민의견 적극수렴을 통한 주민 참여형 도로건설 추진

- 주민설명회를 통한 의견수렴으로 지역주민과 소통하는 건설사업 추진

❍ 고품질·고효율의 공법 선정 및 시공을 위한 전문가 자문 실시

- 공정하고 투명한 기술자문위원회를 운영, 분야별 외부전문가 자문을 통해 현장과 부합되는 설계 및 시공 추진

-‘20년 기술자문위원회 4회, 외부전문가 20명 참석

앞으로
			• 수시 현장방문을 통한 의견교류 활성화 및 공정관리 강화 추진

【2】쾌적하고 안전한 도로건설 환경 구축 및 이용자 중심 도로 건설

쾌적하고 안전한 도로환경 구축 및 이용자 중심 도로건설

❍ 건설현장 안전관리 철저로 인명사고 제로화 등 무재해 달성

❍ 지역특성을 반영한 경관디자인 및 교통약자를 배려한 도로 건설

❍ 가로수 식재, 휴게쉼터 조성 등 이용자 중심의 도로 건설

❍ 미세먼지 발생 저감을 위한 건설현장 관리 철저

- 세륜시설 설치 및 분진마스크 착용 등

앞으로
			• 지속적 관리를 통한 안전사고 예방 철저 • 비산먼지 발생 저감을 위한 현장관리 철저

5		사용자 중심의 맞춤형 공공건축사업 추진

【1】사전 사업추진 프로세서 구축을 통한 우수공공건축물 건립

맞춤형 공공건축물 건립을 위한 사전 검증시스템 구축 및 운영

사업에 적합한 설계공모방식 추진을 통한 랜드마크형 공공건축물 건립

[건축 사업: 26건 / 42,409백만원]

(단위 : 백만원)

총 괄		준공사업		계속사업		신규사업
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
26	42,409	7	-	11	40,922	8	1,487

❍ 발주 전 사업계획서 사전검토를 통한 효율적인 공공건축사업 추진

- 사업계획서 및 과업지시서 작성 등 관련 전문연구기관 사전검토

- 공공건축심의를 통한 사업의 적합성・타당성 등 방향성 검토

❍ 공공건축물 심의를 통한 설계공모방식 결정 및 엄격 심사 시행

- 분야별 심사위원 위촉 및 심사를 통한 최상의 과업범위 선정

※관련법령 : 건축서비스진흥법 제22조의3(공공건축심의위원회),제23조(공공건축계획 사전검토)

앞으로
			• 사전검증시스템을 통한 효율적인 공공건축물 건립 추진 • 공공건축사업 발주전 규모별 설계공모방식 체계 구축

【2】안전하고 편리한 사용자 중심 친환경 설계 및 시공

BF인증 및 설계의 안전성 검토 등 각종 인증을 통한 튼튼한 공공건축물 건립

무해한 친환경 자재 사용 및 시공을 통한 사용자 만족도 제고

❍ 환경친화적 설계 및 시공을 통한 사용자 중심의 공공건축물 건립

❍ 취약계층 등 사회적 약자를 고려한 무장애 시설 계획․시공

❍ 범죄예방디자인(셉테드) 적용을 통해 사고 없는 안전한 생활공간 조성

❍ 제로에너지 및 에너지 효율 등급 등 신재생에너지 인증을 통한 친환경 건축

※ BF(Barrier Free) : 장애물 없는 생활환경 인증으로, 장애인 등이 대상시설을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 편의시설의 설치운영을 유도하기 위한 인증임

앞으로
			•사용자 중심의 안전설계 및 시공을 통한 안전한 공공건축물 건립 •친환경 자재를 사용하여 사용자의 업무환경 질적 만족도 제고

6		철저한 건설공사 품질시험 기반 마련

【1】건설공사 품질 향상을 위한 품질시험 실시

「건설기술 진흥법」에 의한 품질관리계획 및 시험계획 수립 현장의

품질시험 대행을 통한 도내 건설현장 품질향상 기여

❍ 시험대상 : 3개 분야

- 총 공사비 5억원 이상 토목공사, 총 공사비 2억원 이상 전문공사

- 연면적 660㎡이상인 건축물의 건축공사

※ 건설기술 진흥법 제55조 제2항, 시행령 제91조

❍ 시험종목 : 성토용 흙, 아스콘, 콘크리트 등 총19분야 102종목

- 매년 2월 충청남도 건설공사 품질시험 종목 및 수수료 공고

❍ 시험추진목표 : 400건 / 2,000종목 (’19년도 실적 : 447건 / 1,877종목, 129백만원)

- 6월말 실적 : 172건 / 943종목, 68백만원

❍ 품질시험 신뢰성, 정밀성 향상을 위한 품질시험기기 교정검사 실시

- 국가표준기본법에 의거, 총18종 49기기 교정검사 실시(매년 4월)

앞으로
			• 철저한 품질시험으로 건설공사 원가절감 및 신뢰성 확보 • 맞춤형 품질시험 응대로 최고의 행정서비스 제공

【2】건설공사 현장 품질·안전점검을 통한 안전사고 제로화

공사현장에 대한 지속적인 지도 및 교육으로 사업장별 체계적인

품질·안전관리 시스템 구축

❍ 품질·안전관리단 구성 및 상시운영으로 고품질 건설공사 추진

- (구 성) 단장(종합건설사업소장) 및 단원(2개반 운영)

❍ 운 영 : 연간 품질·안전 점검 계획 수립 및 시행(매년 1월)

❍ 정기점검 및 해빙기, 우기, 동절기 등 계절적 요인에 따라 실시(월 1회)

- 소 내 추진사업 중 총공사비10억 이상, 공정률 10%이상의 건설현장 점검

❍ 장마철 우기대비 시설물 붕괴 여부 및 위험성 조사 등을 위한 수시점검 실시

❍ 점검 시 발생한 지적사항은 감독부서에 즉시 통보하여 시정 조치토록 반영

앞으로
			• 우기대비 등 건설현장 안전관리 점검 강화로 품질 및 안전사고 제로화 적극 추진

7		무재해 지방하천 조성 및 내포지역 활성화 기틀 마련

【1】친환경적인 하천정비 추진

지방하천 정비사업 추진으로 주민 생활안전 기반 조성

[하천 사업 : 28지구 / 60,852백만원]                       (단위 : 백만원)

총 괄		준공사업		계속사업		신규사업
지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
28	60,852	5	20,347	19	37,286	4	3,219

❍ 친환경 지방하천 정비사업 추진

- (설계지구)17개 중 4개 용역 착수(5월), 2개 설계완료(6월), 11개 지구 정상추진 중

- (공사지구)11개 중 하반기 4개 준공 예정, 7개 지구 공사 정상 추진 중

⇨ 지방하천 정비사업의 조기 준공을 위해 행정력 집중

앞으로
			• 견실 시공 및 장마철 집중호우 대비 안전관리 철저 • 수생태계 보전 및 주변 경관과 조화되는 친환경 하천조성

【2】내포지역 활성화 기반 구축

내포 신도시 접근성 향상으로 지역경제 활성화

[지역개발 사업 : 2지구 / 10,092백만원]                    (단위 : 백만원)

연번	지구명	총사업비	기시행	2020년	장차	공사기간	진도 (%)	비고
		89,812	43,711	10,092	36,009
1	도시첨단 산업단지 진입도로 개설공사	53,166	36,332	4,992	11,842	‘18. 03 ∼ ’22. 4.	60	공사중
2	태안기업도시 연결도로 개설공사	36,646	7,379	5,100	24,167	‘20. 02 ∼ ’23. 2.	4	공사중

❍ 내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설공사

- 공사 착공(18.3월), 토지보상 99%, 공정률 60%

⇨ ‘21년 하반기 조기 준공을 위해 역점 추진(사업기간 : ′18. 3. ~ ′22. 4)

❍ 태안기업도시 연결도로 개설공사

- 공사 착공(20. 2)

⇨ 서해안 관광산업 및 지역경제 활성화로 지역 균형발전 기여

앞으로
			• 내포 도시첨단산업단지 진입도로 공정율 제고로 내포지역 활성화 기여 • 서산웰빙특구 및 태안기업도시 연결도로 개설로 서해안 거점지역 육성

8		효율적인 도로유지 관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 구축

【1】지방도 유지 ․ 보수사업 시행

적기 도로유지보수사업 시행으로 원활한 도로환경 유지

재해(설해, 수해 등) 취약구간 중점 관리로 원활한 교통흐름 유지

[도로 유지보수 사업 :  220 지구 / 87,098백만원]

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	220	87,098	61	21,779	159	65,319
자체사업	100	19,833	23	4,978	77	14,855
재배정사업	103	48,712	29	14,616	74	34,096
균특사업	-	-	-	-	-	-
위임국도	17	18,553	9	2,185	8	16,368

❍ 지방도 유지․보수사업

- 신규사업 : 평라도로 보수공사 등 159지구/65,319백만원

- 계속사업 : 황교도로 선형개량 등 61지구/21,779백만원

※ 주요공사 : 포장보수, 도로표지판정비, 안전시설, 위험도로개량

❍ 여름철 호우 및 태풍대비 자연재해대책 수립으로 선제적 대응

- 급경사지, 낙석도로 등 취약구간 중점 점검 및 예찰활동 강화(6~9월)

- 재해발생 대비 재해복구를 위한 유관기관 협조체계 구축

※ 여름철 자연재난 대책기간(‘20. 5. 15. ~ 10. 15.)

앞으로
			• 추진중인 도로 유지보수 사업 연내 마무리 • 설해(수해)재해대책반 운영 및 재해 대비 긴급 동원체계 유지

【2】운행제한 위반차량 강력 단속

운행제한 위반차량 강력단속 및 과적예방 활동 강화로 도로파손방지 등 효율적인 도로유지 관리

❍ 도로파손 방지 등 유지관리를 위한 과적차량 단속 강화

- 과적 근원지(대형공사장 등) 및 위험교량 노선 수시 이동단속 실시

- 과적단속 효율성 제고를 위한 이동·고정단속 병행실시

※ 고정검문소 : 국지도 68호선(부여군 세도면 청포리) 설치·운영

⇨ 상반기 총 6,335대 검차하여 201대 적발, 과태료 119백만원 부과

❍ 유관기관 간 합동단속 실시

- 시·군, 경찰서, 국토관리사무소 등 유관기관 간 합동단속

⇨ 상반기 13회 실시(17개 기관)하여 320대 검차, 15대 적발

❍ 대형공사장 방문 등 과적예방 사전계도

- 대형공사장 등 과적발생지 방문을 통한 과적예방 사전계도

- 화물차량 운전자에 과적예방 홍보물 배포

❍ 과태료 체납자 체납액 징수

- 체납자 재산조회·압류조치 등 체납액 징수

⇨ 체납액 329백만원 중 상반기 34백만원(10%) 수납 / 현재 295백만원 체납

앞으로
			• 대형공사장, 위험교량, 골재채취장 주변 노선 집중단속 • 매월 과태료 체납자 재산조회 및 압류조치 등 징수추진

Ⅲ. 도의회 관련사항 처리상황

□ 2019년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황

< 총  괄 >

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
계	6		6
시정요구
처리요구	1		1
제안사항	5		5

< 추진중인 사항 >

① 현장경험과 행정경험이 많은 인력 확보 필요(처리요구)

- 사업소 조직진단 실시 및 인사부서 경력직 우선배치 요구

- 격무부서 지정으로 직원 인센티브 제공 및 사기진작 기회 마련

부서	팀명	비고
도로건설과	시설1팀	격무부서 지정내역
도로건설과	시설2팀
공주지소	보수1팀
홍성지소	보수1팀

- 자체 조직진단 실시 결과 인사부서 제출 및 정원 조정 요청

< 정원조정 요청내역 >

(단위 : 명)

구 분	계	행정관리과	도로건설과	공공건축과	하천개발과	공주지소	홍성지소
기 존	109	18	12	16	10	27	26
변경요청	121(12)	18	12	22(6)	12(2)	29(2)	28(2)

□ 공공건축과 : 6급(건축)2명, 7급(건축)2명, 7급(공업)1명, 7급(방통)1명

□ 하천개발과 : 7급(토목)2명

□ 공주·홍성지소 : 7급(토목)4명

② 과적차량 단속을 위한 강력한 대책 필요(제안사항)

- 관할 지자체 및 경찰서, 국토관리사무소와 유관기관 단체와 합동단속

- 단속 업무협약을 통한 공조단속[공주지소/논산국토](수시)

- 대형공사장, 위험교량, 골재채취장 주변 노선 집중단속(연중)

- 과적 근원지, 공사장 등 과적 유발업체 방문을 통한 과적예방 홍보(연중)

- 과태료 체납자 차량, 예금, 토지 등 재산압류를 통한 과적인식 개선

③ 통계자료 활용으로 적절한 예산 편성 및 배정(제안사항)

- 지역별 행사 및 민원요구사항 등을 고려, 통계자료를 활용하여 우선순위에 따른 보수시행으로 쾌적한 도로환경을 조성하겠음.

④ 도내 업체 및 도내에서 생산되는 자재 활용 방안 마련

- (설계시)지역생산 자재 및 규격을 적용

- (공사시) 본사, 지사, 공장이 도내에 등록된 업체 생산품 우선 구매 및 지역가점 부여

⑤ 예산확보를 위한 적극적인 노력 필요(제안사항)

<3년간 예산확보 현황>

(단위: 백만원)

구 분	2018년	2019년	2020년	비 고
합 계	257,019	262,644	327,800
도로건설	99,600	91,995	123,861	도로건설과
공공건축	31,894	36,476	44,963	공공건축과
하천정비	64,651	70,812	72,513	하천개발과
도로유지관리	60,874	63,361	86,463	지소

※ 18년도 대비 27.5% 예산편성 확대

- 미 발주 사업에 대해선 예산배정 부처·부서와 협의를 통해 보상 등 우선 예산 투입지구 발굴하여 적극적으로 대처

- 사업별 변경 요인 발생 시 담당부서, 중앙부처와 적극적인 협의를 통해 예산확보 노력

⑥ 부진사업 최소화 노력 필요(제안사항)

- 보상비 조기배정 및 예정공정에 따른 사업비 확보로 이월액 최소화

- 사업계획 수립 시 연차별 집행계획 수립으로 이월 및 불용액 최소화

Ⅳ. 참고사항

□ 주요 사업별 예산확보 및 추진 현황

【1】 분야별 사업추진 총괄 내역

분야별		지구수	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
총 계		308	301.74	324,312
도 로	계	32	163.88	123,861	도로건설과
	국 지 도	5	61.79	39,003
	지 방 도	20	91.94	63,331
	기타도로	7	10.15	21,527
공공건축		26	-	42,409	공공건축과
지방하천정비		28	133.35	60,852	하천개발과
지역개발		2	4.51	10,092
도로유지관리		115	-	50,848	공주지소
		105	-	36,250	홍성지소

【2】도로 확포장사업 현황

(단위 : 백만원, 2020. 7. 1. 현재)

총 괄		20년 준공지구		계 속 지 구		20년 신규지구
◀ 32건 / 123,861백만원 ▶		◀ 6건 / 19,836백만원 ▶		◀ 23건 / 102,239백만원 ▶		◀ 3건 / 1,786백만원 ▶
․국지도 5 / 39,003		․국지도 1 / -		․국지도 3 / 38,217		․국지도 1 / 786
․지방도 20 / 63,331		․지방도 3 / 7,729		․지방도 15 / 54,602		․지방도 2 / 1,000
․기 타 7 / 21,527		․기 타 2 / 12,107		․기 타 5 / 9,420		․기 타 - / -

사 업 명			사업량	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
				전 체	기시행	2020년	장 차
총 계			32지구 (163.88㎞)	1,670,688	590,316	123,861	956,511
국 지 도			5지구 (61.79km)	508,498	272,857	39,003	196,638
준공지구	연번	소계	1지구 (11.34km)	157,033	157,033	-	-
	1	선장-염치	연장=11.34km 폭=20.0m	157,033	157,033	-	-	2010.03.03. ～ 2020.07.31.	99	공사중
계속지구		소 계	3지구 (40.15km)	252,365	115,324	38,217	98,824
	2	청양～ 신양IC	연장=16.2km 폭=10.0m	52,714	37,094	5,269	10,351	2017.05.29. ∼ 2023.06.25.	43	공사중
	3	이호～양곡	연장=4.85km 폭=10.0m	24,151	18,310	1,874	3,967	2018.09.17. ～ 2023.08.21.	18	공사중
	4	당진～서산	연장=19.1km 폭=17.5m	175,500	59,920	31,074	84,506	2019.04.08. ～ 2027.04.05	1	공사중
신규지구		소 계	1지구 (10.3km)	99,100	500	786	97,814
	5	성환-입장	연장=10.3km 폭=17.5m	99,100	500	786	97,814	2019-2029	-	공사 신규
지 방 도			20지구 (91.94km)	988,393	201,999	63,331	723,063
준공 지구		소 계	3지구 (15.8km)	97,454	89,725	7,729	0
	6	충화～구룡	연장=5.80km 폭=10.0m	31,209	31,209	-	-	2013.12.31. ～ 2020.05.01.	100	준공
	7	순성～송악	연장=5.80km 폭=10.0m	26,561	25,378	1,183	-	2013.11.06. ～ 2020.08.28.	93	공사중
	8	국방대 진입도로	연장=4.2km 폭=20.0m	39,684	33,138	6,546	-	2015.12.15. ～ 2020.10.30.	86	공사중
계속지구		소 계	15지구 (66.78km)	742,639	112,044	54,602	575,993
	9	서산～부석	연장=8.40km 폭=21.5m	99,852	77,286	22,566	-	2010.11.16. ～ 2021.05.12.	80	공사중
	10	규암～청남	연장=2.29km 폭= 10.0m	27,320	9,852	6,600	10,868	2018.03.19. ～ 2022.09.17.	31	공사중
	11	대술～정안	연장=4.8km 폭= 9.5～11.7m	21,752	7,013	4,000	10,739	2019.07.22. ～ 2023.07.20	7	공사중
	12	어천～공주 (4차)	연장=3.95km 폭= 10.0m	22,449	3,740	9,296	9,413	2016. ～ 2022.	-	보상중
계속지구	13	오천우회	연장=3.98km 폭= 9.5m	22,449	2,710	3,685	16,054	2016. ～ 2026.	-	보상중
	14	삭선～원북	연장=6.08km 폭= 20.0m	46,514	2,050	2,510	41,954	2017. ～ 2030.	-	설계 완료
	15	기지시～한진	연장=9.3km 폭= 18.0m	155,000	3,700	245	151,055	2017. ～ 2025.	-	설계중
	16	무창포IC ～ 웅천	연장=1.46km 폭=21.75-23.0m	10,028	405	1,410	8,213	2018. ～ 2024.	-	공사중
	17	두마～노성	연장=9.25km 폭=10.0m	116,590	2,000	460	114,130	2018. ～ 2027.	-	설계중
	18	화성～장곡	연장=2.4km 폭=10.0m	11,375	330	505	10,540	2018. ～ 2025.	-	설계 완료
	19	구룡～용두	연장=1.3km 폭=10.0m	10,495	350	505	9,640	2018. ～ 2025.	-	설계 완료
	20	밀두～대음	연장=3.58km 폭=18.75m	49,170	805	310	48,055	2018. ～ 2025.	-	설계중
	21	산동～상덕	연장=7.74km 폭=19.5m	128,659	836	2,510	125,313	2018 ～ 2027	-	설계중
	22	왕암도로	연장=1.0km 폭=10.0m	11,200	300	-	10,900	2019. ～ 2022	-	설계중
	23	반계도로	연장=1.25km 폭=10.0-19.2m	9,786	667	-	9,119	2017. ～ 2022.	-	보상중
신규지구		소 계	2지구 (9.36km)	148,300	230	1,000	147,070
	24	서면～비인	연장=4.9km 폭=17-20m	41,200	110	500	40,590	2019 ～ 2027	-	설계중
	25	복수～진산	연장=4.46km 폭=19.5m	107,100	120	500	106,480	2019 ～ 2029	-	설계중
기타도로사업			7지구 (10.15km)	173,797	115,460	21,527	36,810
준공지구		소 계	2지구 (2.64km)	93,798	81,002	12,107	689
	26	복수～대전 (2차)	연장=1.04km 폭=19.5m	66,751	61,394	5,357	-	2010.12.30. ～ 2020.12.31.	96	공사중
	27	신온～창기	연장=1.6km 폭=10～18.5m	27,047	19,608	6,750	689	2016.09.20. ～ 2020.11.30.	89	공사중
계속지구		소 계	5지구 (7.51km)	79,999	34,458	9,420	36,121
	28	안면도 관광지 연결도로	연장=2.9km 폭=27.0m	45,000	33,900	5,000	6,100	2018.03.05. ～ 2021.03.23.	51	공사중
	29	원청사거리	연장=0.7km 폭=3.5～20m	14,075	0	500	13,575	2017. ～ 2023.	-	보상중
	30	웅천산단 진입도로	연장=1.01km 폭=19.7m	7,111	225	1,600	5,286	2019 ～ 2023	-	보상중
	31	정산지구	연장=1.5km 폭=13.0-15.0m	8,190	190	1,320	6,680	2018. ～ 2021.	-	설계 완료
	32	장평지구	연장=1.4km 폭=16.5-17.4m	5,623	143	1,000	4,480	2019.12.20. ～ 2021.12.31.	15	공사중

【3】공공 건축사업 현황

(단위 : 백만원, 2020. 7. 1. 현재)

총 괄		계속사업		준공사업		신규사업
◀ 26개소 42,409백만원 ▶		◀ 11개소 40,922백만원▶		◀ 7개소 - 백만원 ▶		◀ 8개소 1,487백만원

사 업 명			사업량	위치	사업비				사업기간	투자 공정 (진도)	비고
					전체	기시행	2020년	장차
합 계			26개소		519,125	57,743	42,409	418,973
계속사업	연번	소 계	11개소		180,637	42,872	40,922	96,843
	1	소방복합시설 조성사업	9개동/ 연면적 17,444㎡	청양군 비봉면	79,023	13,000	17,510	48,513	2017.09 ~ 2023.12		설계중
	2	충남 지식산업센터 신축공사	지하1/ 지상6층 연면적 12,486㎡	천안시 불당동	29,346	5,636	3,862	19,848	2018.11 ~ 2021.12	-	착 공 준비중
	3	충남 공감마루 신축공사	지하1/ 지상3층 연면적 3,057㎡	내포 업무구역 4블럭	10,252	3,629	5,823	800	2018.02 ~ 2020.12	25%	공사중
	4	보령 오천119안전센터 신축공사	지상2층/ 연면적 780㎡	보령시 오천면	1,918	1,918	0	0	2018.10 ~ 2020.12	25%	공사중
	5	계룡소방서 청사 신축	지하1/ 지상3층 연면적 3,608.48㎡	계룡시 엄사면	10,079	10,079	0	0	2017.07 ~ 2020.08	90%	공사중
	6	양념채소연구소생활관 증축공사	지상3층/ 연면적 350㎡	태안군 남면	940	940	0	0	2019.02 ~ 2020.07	70%	공사중
	7	홍성지소 청사 증축 및 리모델링	증축/ 100㎡ 리모델링 2,087㎡	홍성군 홍성읍	927	-	927	0	2020.04 ~ 2022.12		설계중
	8	지방도 터널 LED조명 교체공사	터널LED 조명등 654개	금산군 복수면 샛고개 굴길	350	0	200	150	2020.04 ~ 2020.09		설계중
	9	충남 스포츠센터 조성사업	지하1/ 지상2층 연면적 13,344㎡	예산군 삽교읍	33,000	4,760	3,000	25,240	2018.08 ~ 2022.10		설계중
	10	내포 자연놀이뜰 조성공사	지하1/ 지상3층 연면적 3,370㎡	내포 신도시 RB5 구역	12,400	2,800	9,600	0	2018.11 ~ 2021.12		착 공 준비중
	11	직산119 안전센터 신축공사	지상3층/ 연면적 980㎡	천안시 서북구 직산읍	2,402	110	0	2,292	2020.02 ~ 2021.12		설계중
준공사업	소 계		7개소		14,871	14,871	0	0
	12	수산자원연구소 귀어학교 기숙사 증축공사	지상2층/연면적 558㎡	보령시 신흑동	1,326	1,326	0	0	2018.10. ~ 2020.05	100%	공사 완료
	13	과채연구소 회의실 및 창고 증축공사	증축/ 연면적 333㎡	부여군 규암면	690	690	0	0	2019.02 ~ 2020.06	100%	공사 완료
	14	재래흑염소 사육사 신축공사	지상1층/ 연면적 999㎡	청양군 정산면	1,000	1,000	0	0	2018.07 ~ 2020.04	100%	공사 완료
	15	교통연수원 내부개선공사	지상2층/연면적4,664.3㎡	공주시 금흥동	605	605	0	0	2019.09 ~ 2020.07	100%	공사 완료
	16	축산물융복합 검사기반 증축공사	지하1층/지상3층 연면적 3,563㎡	홍성군 금마면	10,000	10,000	0	0	2017.08 ~ 2020.05	100%	공사 완료
	17	성거119 안전센터 증축공사	지상2층/ 연면적 290㎡	천안시 서북구	870	870	0	0	2018.03 ~ 2020.05	100%	공사 완료
	18	공무원교육원 차고지 증축공사	지상1층/ 연면적 249.72㎡	공주시연수원길	380	380	0	0	2019.01 ~ 2020.06	100%	공사 완료
신규 예정사업	소 계		8개소		298,617	0	1,487	297,130
	19	대천항 관공선 통합사무실 건립공사	지상2층/ 연면적 1,370㎡	보령시 신흑동	3,917		87	3,830	2020.08 ~ 2022.06		미의뢰
	20	육아종합 지원센터	지하1층지상3층/연면적 3,306㎡	예산군 삽교읍RB5 구역	13,100	0	1,000	12,100			미의뢰
	21	청소년진흥원	지상4층/연면적 2,500㎡	예산군 삽교읍 신리	7,800	0	400	7,400			미의뢰
	22	충남 컨벤션센터	지하1층 지상4층/ 연면적 51,900㎡	천안시 서북구 불당동	180,000		0	180,000			미의뢰
	23	수산종자 연구센터	지상3층/ 연면적 2,100㎡	보령시 웅천읍	7,000		0	7,000			미의뢰
	24	장애인 가족힐링센터	지하1층 지상2층/ 연면적 8,900㎡	태안군 안면읍	26,900		0	26,900			미의뢰
	25	도립미술관	지하2층 지상2층/ 연면적 12,675㎡	예산군 삽교읍	59,900		0	59,900			미의뢰
											미의뢰
								미정
							0
					미정
				예산군 삽교읍
			지상5층 연면적 2,500㎡
	26	여성가족플라자

【4】지방하천 정비사업 현황

(단위 : 백만원, 2020. 7. 1. 현재)

총 괄		준공지구		계속지구		신규지구
◀ 28건 60,852백만원 ▶		◀ 5건 20,347백만원 ▶		◀ 19건 37,286백만원 ▶		◀ 4건 3,219백만원 ▶

<총  괄>

구 분	지구 수	사업량 (km)	사 업 비(백만원)				비고
			계	기시행	2020년	장차
합 계	28지구	133.35	627,967	205,310	60,852	361,805
지방하천 정비사업	28지구	133.35	627,967	205,310	60,852	361,805	준공 5, 계속 19, 신규 4

<지방하천 정비사업 세부 내역>

구분	지구명			위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
				시군	읍면		계	기시행	2020년	장차
계	28지구					133.35	627,967	205,310	60,852	361,805
준 공 지 구	연번		소계 (5지구)			46.08	146,161	122,327	20,347	3,487
	1		성환천	천안	부대 성환	10.52	49,731	40,702	9,029	0	2016.05.10.∼ 2020.11.23.	74	준공
	2		정안천	공주	정안 의당	13.54	36,296	32,894	1,948	1,454	2015.09.03.∼ 2020.05.26.	100	준공
	3		금 천	부여	옥산 장암	10.1	32,786	23,312	7,945	1,529	2016.05.10∼ 2020.12.18.	78	준공
	4		웅 천	논산	양촌	4.7	9,784	8,355	1,425	4	2018.01.02∼ 2020.12.16.	86	준공
	5		태안천	태안	태안	7.22	17,564	17,064	0	500	2016.10.25.∼ 2020.09.04.	95	준공
계 속 지 구			소계 (19지구)			72.87	389,430	82,983	37,286	269,161
	6		마곡천	공주	사곡	3.30	13,705	11,068	2,633	4	2017.12.12.∼ 2021.04.06.	73	공사중
	7		신암천	논산	연산	2.20	17,393	13,855	3,313	225	2018.05.18∼ 2021.04.26.	26	공사중
	8		연산천	계룡 논산	엄사 연산	6.79	30,368	18,981	4,565	6,822	2018.03.29.∼ 2022.03.07.	42	공사중
	9		화산천	서천	기산 화양	4.28	35,862	16,054	2,100	17,708	2018.03.29∼ 2023.05.01	50	공사중
	10		도당천	서산	해미 운산	2.73	10,625	5,655	3,800	1,170	2018.07.02.∼ 2021.08.24.	58	공사중
	11		석남천	서산	예천 석남	2.66	20,173	9,310	5,000	5,863	2017.05.19.∼ 2022.08.29.	51	공사중
	12		병천천	천안	병천	8.3	24,778	1,336	2,150	21,292	2017.12.25.∼ 202312.31.	-	공사 발주
	13		광기천	천안	병천	3.4	29,641	860	2,150	26,631	2018.01.03.∼ 202312.31.	-	공사 발주
	14		주교천	부여	주교	3.0	25,685	800	2,250	22,635	2018.01.01.∼ 2022.12.31.	-	공사 발주
	15		명천 석림천	서산	석림	0.9	4,195	800	1,000	2,395	2018.01.01.∼ 2022.12.31.	-	공사 발주
	16	중산천		공주	금흥	0.72	18,656	400	2,255	16,001	2018.04.23.∼ 2022.12.31.	-	공사 발주
	17	장승천		청양	청양	3.29	15,901	800	2,250	12,851	2018.01.01.∼ 2022.12.31.	-	공사 발주
	18	천안천		천안	백석 불당	1.5	20,000	400	2,023	17,577	2019.02.20. 202312.31.	-	공사 발주
	19	신양천		논산	연무	4.3	25,555	546	400	24,609	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	20	와룡천		홍성	갈산 결성	7.5	25,247	700	0	24,547	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계 중지중
	21	도마천		서천	문산	7.3	18,246	300	400	17,546	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	22	용요천		태안	근흥	3.3	23,779	450	397	22,932	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	23	왕대천		계룡	두마	2.7	6,497	168	200	6,129	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	24	간치천		보령	주산	4.7	23,124	500	400	22,224	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
신 규 지 구	소계 (4지구)					14.4	92,376	-	3,219	89,157
	25	판교천		서천	종천 서천	2.6	14,376	0	504	13,872	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계 발주
	26	청지천		서산	장홍 석림	3.4	29,431	0	905	28,526	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계 발주
	27	왕암천		논산	가야곡	5.4	24,870	0	905	23,965	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계 발주
	28	오봉천		당진	송악 신평	3.0	23,699	0	905	22,794	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계 발주

【5】지역개발 사업 현황

(단위 : 백만원, 2020. 7. 1. 현재)

총 괄		준공지구		계속지구		신규지구
◀ 2건 10,092백만원 ▶		◀ - ▶		◀ 2건 10,092백만원 ▶		◀ - ▶

구분	지구명		위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				공사기간	진도 (%)	비고
			시군	읍면		계	기시행	2020년	장차
합 계			2지구		4.51	89,812	43,711	10,092	32,323
계속지구	1	도시첨단 산업단지 진입도로 개설공사	홍성 홍성	홍북 홍성	연장=3.90 (폭=20.0m)	53,166	36,332	4,992	11,842	2018.03.02. ～ 2022.02.08.	60	공사중
계속지구	2	태안기업도시 연결도로 개설공사	태안 서산	태안 부석	연장=0.61 (폭=25.0m)	36,646	7,379	5,100	24,167	2020.02.28. ～ 2023.02.11.	4	공사중

【6】도로 유지관리사업 현황

총 괄		계속지구		신규지구
◀ 220지구 87,098백만원 ▶		◀ 61지구 21,779백만원 ▶		◀ 159지구 65,319백만원 ▶
․자체사업 100 / 19,833		․자체사업 23 / 4,978		․자체사업 77 / 14,855
․재배정사업 103 / 48,712		․재배정사업 29 / 14,616		․재배정사업 74 / 34,096
․위임국도 17 / 18,553		․위임국도 9 / 2,185		․위임국도 8 / 16,368

<공주․홍성지소>                                                 (단위 : 백만원, 2020. 7. 1. 현재)

사업 구분	총계		계속지구						신규지구
			합계		공주		홍성		합계		공주		홍성
계	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	220	87,098	61	21,779	37	13,913	24	7,866	159	65,319	78	36,935	81	28,384
자체사업	100	19,833	23	4,978	16	1,607	7	3,371	77	14,855	39	6,533	38	8,322
재배정사업	103	48,712	29	14,616	16	11,456	13	3,160	74	34,096	35	22,313	39	11,783
위임국도	17	18,553	9	2,185	5	850	4	1,335	8	16,368	4	8,089	4	8,279

<공주지소>                                                (단위 : 백만원, 2020. 7. 1. 현재)

사업명				위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
				시･군	읍･면
총 계				115개 지구			50,848
계(신규지구)				78개 지구			36,645
신규지구	소계	자 체 사 업		39개 지구			6,533
	자체사업	1	국지도57호 기로도로 지반조사용역	천안	성거	L=0.8km	50	20.01∼06	100	준공
		2	지693호 장산도로 갓길정비공사	천안	수신	L=0.8km	50	20.01∼06	100	준공
		3	지691호 용원도로 갓길정비공사	천안	성남	L=0.6km	50	20.01∼06	100	준공
		4	지624 상덕도로 배수로정비공사	천안	직산	L=0.4km	50	20.01∼06	30	공사중
		5	국지70호 도하도로 배수로 및 도하교 연석정비공사	천안	성환	L=0.15km	50	20.01∼06	100	준공
		6	국지57호 오곡도로 배수로 정비공사	천안	북	L=0.1km	50	20.01∼06	100	준공
		7	덕학리 외1개소 배수로 정비공사	공주	정안	L=0.5km	22	20.01∼06	100	준공
		8	부곡도로 포장도 보수공사	공주	사곡	L=2.5km	200	20.01∼06	100	준공
		9	하대도로 포장도 보수공사	공주	하대	L=0.7km	68	20.01∼06	100	준공
		10	신기도로 배수로 정비공사	논산	양촌	L=0.3km	30	20.01∼04	100	준공
		11	대촌도로 배수로 정비공사	논산	상월	L=0.3km	30	20.01∼04	100	준공
		12	청동도로 배수로 정비공사	논산	연산	L=0.2km	20	20.01∼03	100	준공
		13	산성도로 인도설치공사	논산	상월	L=2.0km	170	20.01∼09	20	공사중
		14	구석도로 배수로 정비	금산	구석	L=0.3km	60	20.01∼09	20	공사중
		15	서대도로 배수로 정비	금산	서대	L=0.9km	50	20.01∼12	20	공사중
		16	역평도로 배수로 정비	금산	남이	L=0.2km	40	20.01∼06	100	준공
		17	예미도로 배수로 정비	금산	부리	L=0.3km	30	20.01∼06	100	준공
		18	교원도로 포장도 보수공사	부여	홍산	L=2.0km	190	20.01∼05	100	준공
		19	상황도로 배수로 정비공사	부여	장암	L=0.05km	10	20.01∼05	100	준공
		20	장항도로 배수로 정비공사	부여	외산	L=0.18km	40	20.01∼06	100	준공
		21	장암도로 차선도색공사	부여	장암	L=1.5km	20	20.01∼05	100	준공
		22	둔덕도로 배수시설 정비	서천	서천	L=0.3km	40	20.01∼06	100	준공
		23	지현도로 포장도 보수공사	서천	지현	L=2.6km	210	20.01∼06	100	준공
		24	동강도로 배수시설 정비공사	청양	동강	L=0.1km	20	20.01∼06	100	준공
		25	금정도로 차선도색공사	청양	남양	L=4.0km	40	20.01∼06	100	준공
		26	중묵도로 포장도 보수공사	청양	비봉	L=1.3km	40	20.01∼06	100	준공
		27	신정도로 보행환경 개선사업	청양	화성	L=0.7km	80	20.01∼06	100	준공
		28	양촌도로 배수로 정비사업	논산	양촌	L=0.5km	30	20.07∼12	-	-
		29	소내 폐기물 처리사업	공주지소		폐기물처리	30	20.01∼06	100	준공
		30	천안, 공주, 논산 포장도 보수공사 실시설계용역	천안, 공주, 논산		실시설계	20	20.01∼06	100	준공
		31	부여,금산,청양,서천 포장도 보수공사 실시설계용역	부여, 금산, 청양, 서천		실시설계	20	20.01∼06	100	준공
		32	국지68호 동산도로 포장도보수	논산	연무	L=0.3km	20	20.01∼06	100	준공
		33	PMS관련 포장도보수	전노선		7개시군	2,243	20.01∼07	60	공사중
		34	긴급 지방도 보수공사	전노선		7개시군	300	20.01∼12	10	사업중
		35	제초작업	전노선		7개시군	500	20.01∼10	50	사업중
		36	유지보수 자재구입	전노선		7개시군	340	20.01∼12	-	-
		37	터널 및 교량관리	전노선		7개시군	200	20.01∼06	-	-
		38	도로안전시설물(소방안전)	전노선		7개시군	593	20.01∼12	-	-
		39	재해대책추진	전노선		7개시군	527	20.01∼12	-	-
	소계	재 배 정 사 업		35개 지구			22,313
	재 배 정 사업	40	협소교량 인도설치	전노선		1식	20	20.01∼12	10	발주
		41	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	20.01∼12	-	-
		42	도로표지(LED) 개선사업	전노선		1식	150	20.01∼12	100	준공
		43	지방도 표지판정비	전노선		1식	100	20.01∼12	100	준공
		44	마을주민 보호구역 정비사업	전노선		1식	265	20.01∼12	70	공사중
		45	교량 안전진단(정밀점검)	전노선		1식	1,177	20.01∼12	30	공사중
		46	KTX 공주역 진입도로 선형개량공사	공주	이인	L=1.7km	2,000	19.08∼21.06	40	공사중
		47	지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선		1식	1,000	20.01∼12	70	공사중
		48	지방도 635호 구례도로 포장	금산	복수	L=2.3km	300	20.01∼12	20	공사중
		49	지방도635호 흑암도로 인도설치공사	금산	남이	L=0.2km	200	20.01∼12	100	준공
		50	국지도98호 육곡도로 인도설치공사	논산	가야곡	L=0.8km	500	20.01∼12	20	공사중
		51	국지도70호 매주도로 인도정비공사	천안	성거, 입장	L=2km	200	20.01∼12	100	준공
		52	중묵도로 인도설치공사	청양	중묵	L=0.35km	130	20.01∼12	100	준공
		53	국지도68호 천내도로 인도설치공사	금산	제원	L=0.1km	100	20.01∼12	10	정지중
		54	국지도70호 석곡도로 인도설치공사	천안	직산	L=0.4km	200	20.01∼12	100	준공
		55	지방도 교량유지관리	전노선		1식	2,100	20.01∼12	20	공사중
		56	지방도 교량 내진성능 보강	전노선		1식	1,600	20.01∼12	20	공사중
		57	저곡지구 급경사지 정비공사	금산	제원	1식	3,362	19.01.18∼21.2.27	30	공사중
		58	저석지구 급경사지 정비공사	부여	부여	L=0.1km	1,176	19.12.19. ∼ 21.02.18	30	공사중
		59	가화지구 급경사지 정비공사	부여	충화	L=0.4km	450	20.01∼12	10	공사중
		60	역평지구 급경사지 정비공사	금산	남이	L=0.5km	400	20.01∼12	-	발주중
		61	상가지구 급경사지 정비공사	금산	금성	L=0.5km	400	20.01∼12	-	발주중
		62	건천1지구 급경사지 정비공사	금산	남이	L=0.4km	300	20.01∼12	-	공사중
		63	은곡지구 급경사지 정비공사	서천	문산	L=0.4km	200	20.01∼12	-	발주중
		64	광금지구 급경사지 정비공사	청양	대치	L=0.05km	150	20.01∼12	-	설계중
		65	교통사고 잦은 곳 개선사업	논산	광석	교차로개선	690	20.01∼12	10	공사중
		66	우곤도로 선형개량사업	논산	성동	L=1.85km	2,835	17.09.-22.04	30	정지중
		67	양전도로 선형개량사업	금산	금성	L=0.64km	586	18.05.25-21.05.09	30	정지중
		68	주항도로 선형개량사업	서천	서	L=1.03km	612	18.11.08. -21.06.21	30	공사중
		69	석막도로 선형개량사업	금산	진산	L=0.7km	400	20.03.23. -20.09.18	-	설계중
		70	천을도로 선형개량사업	금산	군북	L=1.0km	400	19.12.06. -20.06.05	-	설계중
		71	한성도로 배수로정비공사	서천	마서	L=0.5km	100	20.7~20.12	-	설계중
		72	천내도로 선형개량공사	금산	제원	1식	120	20.7~20.12	-	보상협의중
		73	용천도로교차로개선	청양	비봉	L=0.5km	20	20.7~20.12	-	설계증
		74	용마도로 갓길정비공사	청양	남양	L=1.5km	50	20.7~20.12	-	설계증
	소계	위 임 국 도		4개 지구			8,089
	위임국도	75	도로 안전환경개선	전노선		1식	5,749	20.01∼12	30	공사중
		76	도로 유지보수	전노선		1식	2,340	20.01∼12	30	공사중
		77	도로 병목지점 개선	전노선		1식	-	20.01∼12
		78	위험도로개선	전노선		1식	-	20.01∼12
계(계속지구)				37개 지구			13,913
계속지구	소계	이 월 사 업		16개 지구			1,607
	자체 예 산	79	[부여]지방도651호 정동2교차로 교통안전시설 정비사업	부여	부여	1식	38	19.12∼20.12	10	공사중
		80	[부여]지방도651호 정동2교차로 교통안전시설 정비사업(전기)	부여	부여	1식	33	19.12∼20.06	100	공사중
		81	지방도601호선 천을도로 선형개량공사 실시설계용역	금산	군북	1식	43	19.12∼20.12	10	정지중
		82	[공주]안양리 외1개소 배수시설 정비공사	공주	우성	1식	28	19.12∼20.12	100	준공
		83	삼가교 재가설공사	금산	진산	1식	900	19.12∼20.12	10	공사중
		84	상황도로 포장도 보수공사	부여	상황	L=1.3km	40	19.12∼20.06	100	준공
		85	송정도로 포장도 보수공사	부여	송정	L=1.3km	110	19.12∼20.06	100	준공
		86	서천지구 지방도유지관리사업 실시설계용역	서천		1식	16	19.12∼20.01	100	완료
		87	청양지구 지방도유지관리사업 실시설계용역	청양		1식	16	19.12∼20.01	100	완료
		88	부여지구 도로 유지관리사업 실시설계용역	부여		1식	16	19.12∼20.01	100	완료
		89	금산지구 도로 유지관리사업 실시설계용역	금산		1식	16	19.12∼20.01	100	완료
		90	천안지구 지방도유지관리사업 실시설계용역	천안		1식	18	19.12∼20.01	100	완료
		91	공주지구 지방도유지관리사업 실시설계용역	공주		1식	16	19.12∼20.01	100	완료
		92	논산지구 지방도유지관리사업 실시설계용역	논산		1식	16	19.12∼20.01	100	완료
		93	사동교 내진성능보강공사	부여		1식	286	19.11∼ 20.03	100	완료
		94	지691호 방호울타리정비사업	공주		1식	15	19.11∼ 20.01	100	완료
	소계	이 월 사 업		16개 지구			11,456
	재배정사업	95	노성도로 선형개량	논산		L=0.7km	98	19.04∼20.12	10	명시
		96	매당도로 인도설치공사	천안	광덕	L=1.0km	563	19.02∼20.09	100	명시
		97	가야곡도로 인도설치공사	논산	가야곡	L=0.8km	389	20.01.∼20.12	10	명시
		98	KTX 공주역 진입도로 선형개량	공주	이인	L=3.0km	9	19.08∼21.06	100	명시
		99	제원대교 인도교 설치공사	금산	제원	L=0.36km	22	20.01.∼20.12	100	명시
		100	지방도 교량 내진성능 보강 (구만교, 제원대교)	금산, 부여		1식	887	19.02∼20.09	20	명시
		101	매주도로 인도설치공사	천안	성환	L=0.35km	509	19.08∼20.09	30	사고
		102	호계도로 인도설치공사	공주	사곡	L=0.69km	333	19.12∼20.07	70	사고
		103	광금도로 선형개량공사	청양	대치	L=0.58km	322	19.12∼21.12	10	사고
		104	서천화력발전소 주진입도로 확포장	서천	서, 문산	L=1.0km	1,000	19.12∼20.11	30	사고
		105	신천도로 인도설치공사	금산	남일	L=0.46km	238	19.12∼20.09	20	사고
		106	강경천교 등 5개교 보수보강공사	공주지소 관내		1식	278	19.01∼20.12	10	사고
		107	저곡지구 급경사지 정비사업	금산	천내	1식	3,483	19.01∼21.6	20	명시+ 사고
		108	우곤도로 선형개량사업	논산	성동	L=1.85km	1,750	16.03∼20.12	30	명시+ 사고
		109	주항도로 선형개량사업	서천	서	L=1.06km	300	16.03∼20.12	30	명시+ 사고
		110	양전도로 선형개량사업	금산	금성	L=0.94km	1,275	16.03∼20.12	30	명시+ 사고
	소계	이 월 사 업		5개 지구			850
	위임국도	111	도로 안전환경개선	전노선		1식	16	19.01∼12	100	준공
		112	도로 유지보수	전노선		1식	46	19.01∼12	100	준공
		113	도로 구조물기능개선	전노선		1식	17	19.01∼12	100	준공
		114	도로 병목지점 개선	전노선		1식	767	19.01∼12	20	공사중
		115	위험도로 개선	전노선		1식	4	19.01∼12	80	이관

<홍성지소>                                                (단위 : 백만원, 2020. 7. 1. 현재)

사업명				위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
				시･군	읍･면
총 계				105개 지구			36,250
계(계속지구)				24개 지구			7,866
계속지구	소계	자 체 사 업(이월)		7개 지구			3,371
	자체사업	1	지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	1개소	69	19.11-20.12	0	용역중
		2	서원교 재가설공사	아산	염치	1개소	555	20.04-21.04	5	공사중
		3	신창교 재가설공사	서산	해미	1개소	800	19.12-21.07	5	용역완료
		4	용현교 재가설공사	서산	운산	1개소	800	19.12-21.07	5	용역완료
		5	신원교 내진보강공사	예산	예산	1개소	383	19.11-20.02	100	준공
		6	삼송교 재가설공사	서산	해미	1개소	546	19.11-20.12	30	공사중
		7	검암교 외 2개교 내진보강공사	홍성지소		3개소	218	19.12-20.6	100	준공
	소계	재배정 사업(이월)		13개 지구			3,160
	재배정사업	8	지방도647호 용장도로 인도설치공사	서산	운산	L=0.3km	40	19.03.-20.12	30	공사중
		9	황교도로 선형개량공사	보령	웅천	L=0.3km	136	18.02∼20.12	5	보상중
		10	마교도로 선형개량공사	예산	봉산	L=0.66km	604	17.02∼20.12	90	공사중
		11	지방도 교량유지관리(수당교외 6개교)	홍성지소		1식	406	19.02-20.04	100	준공
		12	2020년 홍성지소 인도설치공사 실시설계용역	홍성지소		1식	100	19.12-20.3.	100	준공
		13	지방도603호 포지도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.84km	31	19.03-20.12	0	용역중
		14	지방도로 접속도로 교차지점개선(신창도로)	서산	운산	1식	67	19.03-20.5	100	준공
		15	지방도615호 삼봉도로 인도설치공사	당진	석문	L=400m	93	20.01-20.07	80	공사중
		16	지방도649호 천의도로 인도설치공사	당진	정미	L=500m	202	20.01-20.07	90	공사중
		17	대운산교 내진보강공사	당진	정미	1개소	121	19.08-20.01	100	준공
		18	칠성암삼거리 회전교차로 설치공사	예산	신양	1개소	444	19.06-20.12	10	공사중
		19	송악동화지구 급경사지 정비사업	아산	송악	L=112m	186	18.04∼20.04	100	준공
		20	지방도610호 장곡지구 급경사지 정비공사	보령	청소	L=120m	730	18.02∼20.12	30	공사중
	소계		위 임 국 도(이월)	4개 지구			1,335
	위임국도	21	도로 안전환경개선	전노선		1식	12	19.01-20.12	70	공사중
		22	도로 유지보수	전노선		1식	6	19.01-20.12	80	공사중
		23	도로 구조물 기능개선	전노선		1식	136	19.01-20.12	50	공사중
		24	위험도로개선	전노선		1식	1,181	19.01-20.12	50	공사중
계(신규지구)				81개 지구			28,384
신규지구	소계	자 체 사 업		38개 지구			8,322
	자체사업	25	지방도617호 평라도로 포장도 보수공사	보령	미산	L=2.0km	200	20.01∼12	100	준공
		26	지방도606호 수부도로 포장도 보수공사	보령	웅천	L=1.5km	150	20.01∼12	100	준공
		27	지방도610호 성연도로 포장도 보수공사	보령	청소	L=2.0km	200	20.01∼12	100	준공
		28	지방도610호 신산도로 포장도 보수공사	보령	청라	L=1.0km	100	20.01∼12	100	준공
		29	국지도70호 쌍룡도로 포장도 보수공사	아산	음봉	L=2.0km	140	20.01∼06	100	준공
		30	지방도616호 송악도로 포장도 보수공사	아산	송악	L=2.0km	140	20.01∼06	100	준공
		31	지방도624호 탕정도로 배수로정비	아산	탕정	1개소	250	20.01∼12	70	공사중
		32	지방도623호 현대자동차교차로 개선사업	아산	인주	1개소	100	20.01∼06	100	준공
		33	지방도628호 도로구역 변경용역	아산	영인면	L=2.0km	20	20.01∼12	90	용역중
		34	국지도70호 갈산도로 포장도 보수공사	서산	운산	L=2.0km	200	20.01∼06	100	준공
		35	운산면 배수로 정비	서산	운산	4개소	150	20.01∼07	70	공사중
		36	지방도649호 부산도로 포장도 보수공사	서산	운산	1개소	100	20.01∼06	100	준공
		37	지방도649호 명천교차로 개선사업	서산	성연	1개소	200	20.01∼07	40	공사중
		38	지방도647호 천의도로 포장도 보수공사	당진	정미	L=1.0km	150	20.01∼20.06	100	준공
		39	지방도647호 천의도로 갓길포장공사	당진	정미	L=1.0km	50	20.01∼20.06	100	준공
		40	지방도615호 장항도로 포장도 보수공사	당진	고대	L=2.0km	300	20.01∼20.06	100	준공
		41	국지도70호 송산도로 정비공사	당진	우강	L=0.1km	150	20.01∼20.06	100	준공
		42	지방도647호 장정도로 포장보수공사	당진	대호지	L=1km	100	20.01∼20.06	100	준공
		43	국지도96호 단아래사거리 교차로 개선공사	홍성	광천	1개소	250	20.01∼20.06	100	준공
		44	국지도96호 광리도로 포장도 보수공사	홍성	서부	L=1.0km	200	20.01∼06	100	준공
		45	지방도609호 봉신도로 방음벽 설치공사	홍성	홍성	1개소	200	20.01∼12	-	사업변경
		46	지방도619호 노화도로 포장도 보수공사	예산	응봉	L=2.0km	200	20.01∼06	100	준공
		47	국지도70호 가지도로 포장도 보수공사	예산	신양	L=2.0km	200	20.01∼06	100	준공
		48	지방도616호 배수로정비	예산	신양	2개소	50	20.01∼06	100	준공
		49	지방도619호 상중도로 포장도 보수공사	예산	대흥	L=2.0km	200	20.01∼06	100	준공
		50	국지도96호 근흥도로 포장도 보수공사	태안	근흥	L=2.0km	200	20.01∼06	100	준공
		51	지방도634호 황촌도로 포장도 보수공사	태안	원북	L=2.0km	200	20.01∼05	100	준공
		52	지방도603호 관리도로 포장도 보수공사	태안	이원	L=2.0km	200	20.01∼06	100	준공
		53	태안도로 배수로정비	태안	근흥	1개소	50	20.01∼06	100	준공
		54	안전시설 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	600	20.01∼12	50	추진중
		55	긴급도로보수공사	전노선		1식	150	20.01∼12	-	추진중
		56	자방도 제설 및 제초용역	전노선		1식	500	20.01∼12	50	추진중
		57	도로유지보수 자재구입	전노선		1식	340	20.01∼12	50	추진중
		58	도로유지보수 폐기물처리	전노선		1식	50	20.01∼12	30	추진중
		59	재해대책추진	전노선		1식	527	20.01∼12	50	추진중
		60	터널 및 교량관리	전노선		1식	100	20.01∼20.12	74	추진중
		61	청사유지관리	홍성지소		1개소	905	20.01∼21.12	-	용역중
		62	국지도70호 음암도로 포장도 보수공사	홍성지소		L=0.8km	500	20.07-20.12	0	용역중
	소계	재배정사업		39개 지구			11,783
	재배정사업	63	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	20.01∼06	100	준공
		64	협소교량 인도설치	서산 당진	해미 우강	L=37m L=22m	180	20.01∼20.12	100	준공
		65	지방도 표지판정비	전노선		1식	100	20.01∼06	100	준공
		66	지방도로 접속도로 교차지점 개선	아산	배방	1개소	104	20.01∼12	10	공사중
		67	지방도 교량안전진단	전노선		19개소	407	20.01∼20.12	74	용역중
		68	도로표지(LED) 개선사업	전노선		1식	150	20.01∼07	90	공사중
		69	지방도변 마을주민 보호구역 정비사업	아산,당진,예산		3개소	120	20.01∼07	100	준공
		70	운행방향 유도레인 설치	전노선		1식	30	20.01∼06	100	준공
		71	터널 재난방송 중계기 설치	봉산, 홍북터널		1식	150	20.01∼20.06	100	준공
		72	지방도603호 포지도로 개선사업	태안	이원	L=0.9km	500	20.01∼12	-	용역중
		73	지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선		1식	1,000	20.01∼12	50	추진중
		74	자살위험 교량 생명의 문구설치	선인교, 선우대교		2개소	10	20.01∼20.12	-	검토중
		75	로드킬 방지 시설	전노선		1식	100	20.01∼12	100	준공
		76	국지도96호(태안, 서산) 포장도 보수	태안 서산	근흥 부석	L=10km	1,000	20.01∼06	100	준공
		77	AB방조제 측구설치공사	서산	부석	L=3km	300	20.01∼07	80	공사중
		78	지방도624호 산동사거리 개선공사	아산	음봉	1개소	250	20.01∼12	50	공사중
		79	지방도610호 영보리 도로선형개량공사	보령	오천	L=0.48km	670	20.01-21.12	0	행정절차 진행 중
		80	지방도610호 은포리 접속도로 개선공사	보령	주교	1개소	200	20.01∼12	10	용역중
		81	지방도606호 대천도로 인도설치공사	보령	웅천	L=0.5km	100	20.01∼12	5	공사중
		82	지방도610호 성연도로 인도설치공사	보령	청소	L=0.7km	400	20.01∼12	5	공사중
		83	지방도623호 선창도로 인도설치공사	아산	선장	L=0.8km	300	20.01∼12	10	공사중
		84	지방도647호 용장도로 인도설치공사	서산	운산	L=0.3km	200	20.01∼12	45	공사중
		85	지방도634호 고남도로 인도설치공사	서산	성연	L=0.3km	150	20.01∼07	50	공사중
		86	지방도615호 삼봉초도로 인도설치공사	당진	석문	L=0.3km	150	20.06∼20.10	10	공사중
		87	지방도616호 덕정도로 인도설치공사	홍성	금마	L=0.2km	100	20.01∼07	70	공사중
		88	지방도616호 죽림도로 인도설치공사	홍성	금마	L=1.3km	210	20.01∼07	70	공사중
		89	지방도609호 봉림도로 인도설치공사	예산	봉산	L=0.5km	300	20.01∼12	0	공사중
		90	지방도618호 신원도로 인도설치공사	예산	오가	L=1.0km	540	20.01∼12	0	발주중
		91	지방도634호 방갈도로 인도설치공사	태안	원북	L=0.25km	150	20.04∼06	100	준공
		92	서원교 재가설공사	아산	염치	1개소	600	20.04∼21.04	5	공사중
		93	삼송교 재가설공사	서산	해미	1개소	600	19.11∼20.12	40	공사중
		94	문봉교 보수보강공사	당진	면천	1개소	200	20.06∼20.09	5	공사중
		95	지방도 교량유지관리	선인교,창리교, 종현교,강월교		4개소	542	20.06∼20.09	5	공사중
		96	송악강장 1지구 급경사지 정비공사	아산	송악	1개소	200	20.07∼20.09	5	공사중
		97	송악강장 2지구 급경사지 정비공사	아산	송악	1개소	200	20.07∼20.10	5	공사중
		98	고산지구 급경사지 정비공사	서산	운산	1개소	150	20.07∼20.10	5	공사중
		99	화봉지구 급경사지 정비공사	홍성	은하	1개소	300	20.01∼20.09	5	용역완료
		100	지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.98km	700	20.01-22.12.	-	용역중
		101	지역교통 안전환경개선사업	아산, 홍성		2개소	400	20.01-20.12.	20	추진중
	소계	위 임 국 도		4개 지구			8,279
	위임국도	102	도로 안전환경개선	전노선		1식	4,156	20.01∼12	30	추진중
		103	도로 유지보수	전노선		1식	2,932	20.01∼12	30	추진중
		104	도로 병목지점 개선	전노선		1식	691	20.01∼12	30	추진중
		105	위험도로개선	전노선		1식	500	20.01∼12	30	추진중

□ 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
종합건설사업소	소 장	지방기술서기관	김응백	2020.01.01.
	행정관리과장	지방행정사무관	최평근	2020.07.01.
	도로건설과장	지방시설사무관	김진수	2018.06.30.
	공공건축과장	지방시설사무관	김재균	2020.07.01.
	하천개발과장	지방시설사무관	이재원	2020.07.01.
공주지소	지 소 장	지방시설사무관	전상근	2020.02.24.
홍성지소	지 소 장	지방시설사무관	원종성	2020.07.01.