		제333회 도의회 정례회 2021. 11. 5. ~ 12. 16.

- 2021년 행정사무감사 -

주요업무 추진상황 보고

	종합건설사업소

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 □ 기구 및 기능 □ 2021년 예산규모 Ⅱ. 주요업무 추진상황 □ 총 평 □ 분야별 추진실적 및 계획 Ⅲ. 도의회 관련사항 처리상황 □ 2020년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황 □ 5분 발언 추진상황 Ⅳ. 참고사항 □ 당면 현안사항 □ 간부명단 □ 주요 사업별 예산확보 및 추진 현황

Ⅰ. 기본 현황

1		기구 및 기능

【1】기 구 : 4과 2지소 23팀

【2】정․현원 현황

구 분		계	일 반 직(정원/현원)
			4급	5급	6급	7급	8급	9급	운영직
합 계		114/105	1/1	6/6	23/27	35/30	34/16	9/20	6/5
본소		61/60	1/1	4/4	13/17	19/17	17/11	7/10	-
	행정관리과	13/13	1/1	1/1	2/2	4/5	4/3	1/1	-
	도로건설과	15/15	-	1/1	3/4	4/3	5/3	2/4	-
	공공건축과	21/19	-	1/1	4/6	8/7	5/1	3/4	-
	하천개발과	12/13	-	1/1	4/5	3/2	3/4	1/1	-
공주지소		27/22	-	1/1	5/5	8/7	9/3	1/5	3/1
홍성지소		26/23	-	1/1	5/5	8/6	8/2	1/5	3/4

※ 공무직(71명) : 도로보수원 53, 사무보조 4, 과적단속요원 14

※ 휴직자(1명)  : 질병휴직(행정6급 1명)

【3】주요 기능

	- 행정관리과
	❍ 조직, 예산, 청사관리 및 직원 후생복지 ❍ 각종 건설공사 입찰 및 계약, 관급자재 구매
	- 도로건설과
	❍ 지방도 사업 집행계획 수립 및 조정 ❍ 국가지원지방도 및 지방도 확‧포장사업 시행 ❍ 국가지원지방도 및 지방도 도로사업 보상업무
	- 공공건축과
	❍ 공공 건축물의 신축 및 보수사업 ❍ 건설공사 자재 및 현장 품질검사 시험
	- 하천개발과
	❍ 지방하천정비 및 재해복구사업 추진 ❍ 지역개발 기반시설사업 시행 ❍ 지방하천 정비사업 보상업무
	- 공주 · 홍성지소
	❍ 지방도∙위임국도 유지관리 및 보수사업 시행 ❍ 재해대책(풍∙수해) 수립 시행, 운행제한차량 단속

2		2021년 예산규모

세입 세출
		∙ [세 입 예 산] 14,600백만원 - 수수료 100, 과태료 210, 지난연도 수입 210, 소방안전교부세 1,850, 예수금 수입 12,230 ∙ [세 출 예 산] 31,818백만원 - 사업예산 19,717, 행정운영경비 12,101

❍ 재배정 예산 사업 :			318,450			(단위 : 백만원)
도로 확･포장	공공건축	하천정비		지역개발	재해복구사업	도로유지 관리
99,830	39,647	55,109		15,491	32,631	75,742

Ⅱ. 주요업무 추진상황

1		총 평

안전하고 행복한 충청남도 실현을 위한 3대 과제 추진

① 코로나19로 침체된 지역 내 경제 활성화

② 끊임없는 소통을 통한 주민 만족의 건설 현장

③ 체계적인 현장 관리시스템 구축으로 안전사고 사각지대 제로화

□ 주요성과로는

사업분야

주요업무 추진성과

도 로 건 설

안전한 도로환경 구축으로 이용자중심 도로 건설 추진

공사관계자 역량 강화로 현장 안전 ․ 품질관리 제고

공 공 건 축

공정하고 투명한 설계공모 추진(6건, 유튜브중계)

철저한 품질시험 및 안전관리로 신뢰성 확보(211건)

하천·지역개발

자연과 어우러진 하천정비사업 추진

지역발전을 선도하는 도로사업 조기 추진

도로유지 보수

스마트 도로유지관리 시스템을 통한 실시간 모니터링

포트홀 처리 등 신속한 지방도 유지보수 시행 / 262지구

□ 아쉬웠던 점은

❍ 코로나19 확산 위험으로 현장소통 및 지역주민 의견수렴 기회 축소

	앞으로
지역경제·지역별 특성을 고려한 지속가능한 건설사업 추진 - 지역업체 우선계약으로 경제선순환 구조 구축 - 찾아가는 보상서비스, 주민설명회 확대 등 도민 편의 제고 - 도민이 행복하고 신뢰할 수 있는 미래지향적 공공 건설사업 추진

2		분야별 추진실적 및 계획

【1】지역경제를 우선하는 계약 추진

지역의무공동도급 공사 발주 및 지역 생산 자재 우선 구매

신속집행 특례에 따른 신속한 대가지급 및 선금 집행률 향상

❍ 지역업체를 우선적으로 보호하는 계약업무 수행

- 소규모 공사‧용역 발주시 현장과 근접한 시‧군 업체 계약

※ 추정가격 1천만원 이하인 경우 1인 수의계약 추진

- 대형공사 발주시 지역의무공동도급 계약 및 도내업체 생산제품 우선 구매원칙으로 지역업체 수주율 확대

- 금년도 공사·용역·물품 발주 1,819건 중 지역업체 수주 1,632건(89.7%)

※ 지역의무공동도급 등 공동계약에 따라 일부는 지역외 업체 수주

- 정기적인 공사관계자 회의를 통하여 하도급관리계획이 없거나 추가되는 신규 공종에 대해서는 지역업체 하도급 계약 적극 권고

- 금년도 하도급 41건/290억원 중, 지역업체 32건/205억원

※ 원도급사의 협력사 및 특허업체로 인하여 일부는 지역외 업체 수주

❍ 신속집행 특례제도 적극활용을 통한 지역경제 활성화

- 신속집행 특례에 따라 착수전 또는 계약금액 대비 최대 80% 선금지급

- 계속비‧이월사업의 경우에는 해당연도 이행금액 기준이 아닌 총계약금액을 기준으로 선금지급

- 조달청(G2B) 나라장터를 통한 신속한 비대면 대가집행

앞으로		• 지역업체 성장과 보호를 근간으로 하는 건설공사 계약 추진 • 직무성과 계약과제와 연계하여 공사발주 및 관급자재 구매시 지역업체 참여율 85% 달성

【2】도민에게 신뢰받는 이용자중심 명품도로 건설사업 추진

안전한 도로 환경 구축 및 이용자 중심 도로 건설

청렴하고 전문적인 건설행정서비스 구현으로 명품 도로 건설 실현

□ 2021년 도로사업 현황 : 35지구 / 99,830백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		준공사업		계속사업		신규사업
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	35	99,830	1	8,814	25	88,191	9	2,825
국지도	7	43,376	-	-	4	42,218	3	1,158
지방도	21	42,850	-	-	17	41,950	4	900
기 타	7	13,604	1	8,814	4	4,023	2	767

※ (당초) 94,722 → (변경) 99,830 (증 5,108) / 1회추경 변경 반영(당진∼서산 등 5개지구)

❍ 쾌적하고 안전한 도로건설 환경 구축 및 이용자중심 도로건설 추진

- 총 35지구, 준공 1지구, 공사 12지구, 보상 4지구, 설계 18지구

(국지도) 7개 지구(L=64.7km) 중 공사추진 3지구, 설계 4지구

(지방도) 21개 지구(L=82.9km) 중 공사추진 5지구, 보상 4지구, 설계 12지구

(기타도로) 7개 지구(L=8.9km) 중 공사추진 5지구, 설계 2지구

❍ 지역주민의견 적극수렴을 위한 주민설명회 개최(24회/387명)

- 기본계획 수립시 1회 이상, 계획확정시 1회, 보상시 1회, 필요시 수시

❍ 체계적인 사업관리를 통한 효율적인 예산집행 / 상반기 40%, 하반기 70% 목표

- 총사업비 99,830백만원 중 52,415백만원(53%) 집행 완료 [9월말 기준]

앞으로		• 공정계획에 따른 금년도 공사목표 달성 및 예산이월 최소화 • 지역주민의 만족도 향상을 목표로 이용자 중심의 도로 건설 지속 추진

【3】무사고 도로건설현장 실현을 위한 안전관리 강화

상시점검체계 구축을 통한 빈틈없는 현장관리로 무재해 목표 실현

기상특보 발효시 공사관계자 상시대응체계 구축(SNS 안전문자 등)

❍ 계절특성 고려 취약시기 특별안전점검 실시

- 여름철 폭염 대응 안전점검(7월) 실시(청양~신양IC 등 9개 현장)

⇨ 열사병 예방 3대(물, 그늘, 휴식) 기본수칙 준수여부 등 점검(모든 현장 적정)

- 태풍 및 우기 대비 안전점검(8, 9월) 실시(청양~신양IC 등 8개 현장)

⇨ 사면안전 및 배수상태 점검, 낙하물의 위험지역 안전망 설치여부 점검 등

❍ 현장 상주인력을 활용한 상시 안전점검체계 구축

- 현장 상주인력(감리, 현장소장) 1일 1회 사업장 안전순찰 실시

- 상시안전보고체계 구축 / SNS활용 - 자연재해대응 단톡방 운영

⇨ 자연재해대응 15회 보고 실시

앞으로		• 동절기 이전 사업장 안전점검 실시 및 후속조치 이행 • 근로자 안전의식 제고를 위한 지속적인 안전교육 추진

【4】견실한 도로사업추진을 위한 공사관계자 역량 강화

청렴하고 전문적인 건설행정서비스 구현 목표

지속적 교육을 통한 공사관계자 및 감독 역량강화 추진

❍ 고품질ㆍ고효율 공법 선정 및 시공을 위한 외부전문가 자문실시

- 상·하반기 기술자문위원회 4회 실시, 외부전문가 22명 참석

❍ 현장소통 활성화 및 공정관리 강화 위한 분기별 공사관계자 회의 개최

- 1분기 : 청렴교육, 안전의식 고취교육 실시 / 참여인원 34명

- 2분기 : 지하안전성, 재해복구사업 관련 교육실시 / 참여인원 56명

- 3분기 : 청렴교육, 중대재해법 및 사망사고 예방 안전교육 실시 / 참여인원 35명

앞으로		• 하반기 공사관계자 역량강화 지속관리 (4분기 실시예정) • 실무자 역량강화을 위한 수시 교육 및 직무연찬 실시

【5】공정·적정한 보상 추진으로 도민편익 증대

도로·하천사업에 편입되는 사유재산에 대한 객관적이고 공정한 보상

민원발생 최소화 및 찾아가는 보상협의로 도민편의 제공

□ 2021년 도로·하천 보상계획 : 35지구 / 56,352 백만원

(단위 : 백만원)

구분	전체보상대상		21년 보상계획(A)		21년 보상실적(B)		21년 미보상 현황 (A-B)		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계	21,892	188,425	3,871	56,352	1,810	44,377	2,061	11,975
21지구 (도로)	14,411	145,971	1,627	43,616	1,538	42,895	89	721
14지구 (하천)	7,481	42,454	2,244	12,736	272	1,482	1,972	11,254

※ 총보상대상 21,892건(1,884억원) 중 11,174건(1,071억원) 집행하여 보상대상 금액 중 57% 추진

❍ “성실한 협의 보상” 추진으로 보상률 제고 및 적극 행정 실현

- 신규 사업에 대한 주민 보상설명회 개최(5회, 코로나-19로 서면 2회 포함)

⇨  ’21년 9월말 기준 443억원 집행으로 ’20년 동기 대비 297% 집행(149억원)

↳ ’21년 보상팀 조직개편(도로·하천보상 분리)에 따른 보상업무 효율성 증대

❍ 보상대상의 신속·정확한 현장조사로 민원발생 사전 방지

- 물건조사시 소유자 입회 및 실시설계시 지장물 사전조사 병행 시범추진

⇨ 사전 물건조사(설계사, 공사감독, 보상담당자)로 주민의견 청취 및 유대감 형성

❍ 원활한 보상업무 추진을 위한 지속적인 업무개선 추진

- 고시면적과 분할면적 불일치로 인한 보상지연 등 각종 문제발생에 따라 도로·하천 구역선을 지적분할선과 일치하도록 실시설계추진

⇨ 지적분할선이 일치됨에 따라, 구역지정 재측량 등이 불필요하여 절차 기간단축

↳ 업무효율성 증대(보상기간 약 4-5개월 단축) 및 민원최소화

앞으로		• 연말까지 미보상지구 잔여보상 마무리(계획 대비 100% 추진) • 신속·정확한 행정절차 이행으로 공익사업의 적기 추진 지원

【6】충남을 대표하는 품격있는 공공건축물 건립

충남을 대표하는 아름답고 품격있는 공공건축물 건립

공공가치를 구현하는 공간조성으로 도민의 삶의 질 향상

□ 2021년 공공건축사업 현황 : 27지구 / 39,647백만원

(단위 : 백만원)

총 계		준공사업		계속사업		신규사업
지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
27	39,647	5	4,949	7	23,957	15	10,741

※ (당초) 34,688 → (변경) 39,647 (증 4,959) / 3분기 신규사업 5개 지구 추가

❍ 공정하고 투명한 설계공모를 통해 최적의 건물 디자인 선정 완료(6건)

- 심사위원 사전공개, 심사과정 생중계(유튜브), 과도한 제출물 지양

⇨ 투명한 심사와 우수한 응모작품 참여 확대로 충남 대표 건축물 건립

❍ 철저한 현장 및 품질관리를 통한 공공건축사업 추진

- 총 27개소 : 준공 3, 공사 5, 설계 14, 착공준비 5

▪ 준공(3개소) : 인수인계 철저 및 하자관리 만전

▪ 공사(5개소) : 견실시공 및 품질관리 철저로 완벽시공

▪ 설계 및 준비중(19개소) : 내구성․기능성․실용성 설계 반영 및 사업의 조기 완공 추진

❍ 공공건축업무 전문성 강화를 위한 지식동아리 운영(11회)

- 제로에너지건축물의 이해, 건축물 해체공사 사례, 설계용역 연찬 등

⇨ 설계‧시공 및 행정 관련 경험 공유로 업무능력 향상

❍ 공공건축 품질 향상을 위하여 사업의뢰 전 기획단계부터 적극 대응(8건)

- 공공건축심의, 사업계획 사전검토, 과업내용서 검토 등

⇨ 적정 사업비 편성, 행정절차 간소화 등 내실 있는 공공건축 기획 달성

앞으로		• 연말까지 2개소 준공으로 계획 준공사업(5개소) 마무리 • 추후 5개소 착공하여 견실시공 및 품질관리 철저

【7】품질관리 및 안전점검을 통한 부실시공 예방 추진

건설공사의 품질향상 및 안전성 강화를 위한 지속적 지도점검

□ 건설공사 품질향상을 위한 품질시험 실시

❍ 시험종목 : 성토용 흙, 아스콘, 콘크리트 등 총 20분야 104종목

- 시험추진 목표 : 400건 / 1,700종목(’20년도 실적: 383건 / 1,614종목)

- 추진실적 : 211건 / 1,267종목(’21년 목표 중 52%달성 / 동 기간내 ’20년 대비 79%)

구분(건/종목)	합계	성토용 흙	아스콘	콘크리트	기타
총실적	211/1,267	43/305	74/754	54/54	40/154
불합격	10/66	3/27	2/21	1/3	4/15

※불합격 10건 중 4건 재시험 후 적합 통보, 3건 의뢰 예정, 3건 타기관 의뢰 예정

⇨ 공정한 품질시험으로 건설공사 신뢰성 확보

□ 건설공사 현장 품질·안전점검을 통한 안전성 강화(분기별 1회)

❍ 1분기(해빙기) : 총 25개소 현장 중 16개소 / 28건 지적사항 발생

-  안전보건관리책임자 교육 미이수, 법면보호 미흡 등 ⟶ 조치완료

❍ 2분기(우기) : 총 25개소 현장 중 12개소 / 21건 지적사항 발생

-  법면 세굴 및 보호 미흡, 수방자재 확보 미흡 등 ⟶ 조치완료

❍ 3분기(폭염) : 총 25개소 현장 중 11개소 / 22건 지적사항 발생

-  근로자 쉼터 미설치, 자재 정리 및 보관 미흡 등 ⟶ 조치완료

앞으로		• 하반기 건설현장 무사고·무재해 달성 및 안전사고 예방 총력 • 동절기 대비 안전점검 추진

【8】자연과 어우러진 하천정비사업 추진

자연환경과 조화를 이루는 지방하천 정비사업 추진

집중호우로 인한 제방유실 및 범람 등 피해지역 재해복구사업 추진

□ 2021년 지방하천 정비사업 현황 : 34지구 / 55,109백만원

(단위 : 백만원)

총 계		준공사업		계속사업		신규사업
지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
34	55,109	6	14,185	23	37,068	5	3,856

❍ 추진실적

- 4개지구 준공(성환천, 마곡천, 금천, 도당천), 5개지구 발주(둔포천, 판정천, 초대천, 양촌천, 솔리천), 계속지구 23개는 정상 추진 중

❍ 향후 추진계획

-  2개 사업 준공(연산천, 신암천) 등 ’21년분 사업 완료

□ 2021년 지방하천 재해복구사업 현황 : 3지구 / 32,631백만원

(단위 : 백만원)

사업명	사업지		사업량 (km)	사 업 비				비고
	시군	읍면		합 계	기시행	2021년	장 차
계			8.2	68,277	3,023	32,631	32,623
금곡천	아산	배방	1.8	9,045	1,000	4,439	3,606
약봉천		송악	2.9	21,853	1,023	12,146	8,684
온양천		송악	3.5	37,379	1,000	16,046	20,333

❍ 추진실적

- 행안부 사전심의, 설계완료, 공사착공 및 감리용역 착수

❍ 향후 추진계획

- 신속한 재해복구를 위한 사전 보상협의, 공정계획 수립 추진

앞으로		• 신속한 보상협의 등 공사추진을 통한 금년 사업 완료 • 자연과 조화로우며 재해에 안전한 하천정비사업 추진

【9】지역발전을 선도하는 도로사업 추진

내포 신도시 및 태안기업도시 접근성 향상으로 지역경제 활성화

□ 2021년 지역개발사업 현황 : 2지구 / 15,491백만원

(단위 : 백만원)

연번	사업명	총사업비	기시행	2021년	장차	공사기간	진도 (%)	비고
계		89,812	57,152	15,491	17,169
1	도시첨단 산업단지 진입도로 개설공사	53,166	42,824	5,491	4,851	‘18. 03 ∼ ’22. 2.	95	공사중
2	태안기업도시 연결도로 개설공사	36,646	14,328	10,000	12,318	‘20. 02 ∼ ’23. 2.	42	공사중

❍ 지역개발사업 추진실적

- 내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설공사(토지보상 100%, 공정률 95%)

⇨ 본선 3.9km 중간층 포장 및 시점부 회전교차로 공사 추진

- 태안기업도시 연결도로 개설공사(공정률 42%)

⇨ 공사용 가도성토 완료 및 교각말뚝 항타작업 완료

❍ 향후 추진계획

- 내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설공사 조기준공 및 개통

- 태안기업도시 연결도로 개설공사(공정률 60%)

⇨ 하반기 교량 거더거치 작업 추진(36본)

앞으로		• 내포 도시첨단산업단지 진입도로 연내 조기개통을 통한 지역교통 여건 개선 및 산업단지 활성화 • 서산웰빙특구 및 태안기업도시 연결도로 개설로 서해안 지역발전 및 관광 활성화

【10】도로 유지·보수사업 추진

신속한 도로 유지보수로 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

철저한 재해대책 추진으로 도민의 생명과 재산 보호

□ 2021년 도로 유지보수사업 현황 : 262지구 / 94,895백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		계속사업		신규사업
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	262	94,895	42	22,737	220	72,158
공주지소	143	54,177	22	20,460	121	33,717
홍성지소	119	40,718	20	2,277	99	38,441

❍ 도로 유지보수사업 추진현황 : 준공 168건, 추진중 94건

- 준  공 : 삼송교 재가설공사 등 168건 20,051백만원

- 추진중 : KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 등 94건 74,844백만원

❍ 스마트 도로유지관리시스템을 활용한 체계적 도로정비 추진

- 노후‧파손된 도로 덧씌우기 등 포장도 보수 추진 55건

- 도로보수원, 유지보수사업을 활용한 포트홀 처리 2,400개소

□ 재해대책 추진

❍ 여름철 호우에 따른 도로 응급복구사업 추진

- 지방도609호(홍성), 지방도616호(예산) 수해 응급복구공사 등 4건

❍ 겨울철 제설대책(‘21. 11. 15.~ ’22. 3. 15.) 준비 철저

- 제설자재 사전확보 : 소금 6,764톤, 염화칼슘 1,621톤 등

- 제설장비 임차계획 : 덤프(15톤) 42대, 굴삭기 2대

앞으로		• 추진 중인 사업(94건)의 철저한 품질 관리를 통한 완벽 마무리 • 제설대책 기간 비상근무 및 신속한 제설‧제빙작업 실시 • 철저한 도로관리 체계 구축, 포트홀 발생 예방으로 안전한 도로환경 조성

【11】운행제한 위반차량 강력 단속

교량의 수명단축과 도로파손 주범인 운행제한 위반차량의 단속강화로 대형교통사고예방 및 쾌적한 도로환경 조성

❍ 도로파손 방지 및 원활한 도로유지관리를 위한 단속 실시

- 주요 과적 근원지(대형공사장 등) 및 위험교량노선 이동단속

- 휴일·조간·야간 불시 이동단속

⇨ ’21. 9월 기준 총 7,723대 검차하여 344대 적발, 과태료 167백만원 부과

※ 유관기관 합동단속 포함

❍ 유관기관 합동단속 실시

- 국토관리사무소, 시·군, 경찰서 등 유관기관 합동단속

⇨ ’21. 9월 기준 18회(30개 기관) 실시하여 390대 검차, 20대 적발

❍ 대형공사장 방문 등 과적예방 사전계도

- 대형공사장 등 과적발생지 방문을 통한 과적 예방 사전 계도 5회

⇨ ’21. 03. 11.(목)/ 금산군 폐기물 및 석산 개발업체

⇨ ’21. 03. 11.(목)/ 당진시 합덕읍 철판운반업체

⇨ ’21. 03. 23.(화)/ 홍성군 내포지역 공사장

⇨ ’21. 07. 27.(화)/ 천안시 서북구 직산읍 부근 공사장

⇨ ’21. 08. 13.(금)/ 보령시 웅천읍 석산 공사장

- 합동단속 및 이동단속 시 화물차량 운전자에 운행제한 홍보물 배포

❍ 운행제한 위반차량 체납액 징수 활동 실시

- 체납자 재산조회(예금·차량·부동산)를 통한 압류실시

⇨ ’21. 9월 기준 체납 312건에 대한 정기적인 재산조회 실시(압류조치 24건)

- 체납고지서 수시 발송 및 전화·문자·거주지 방문 등을 통한 징수 활동 강화

앞으로		• 대형공사장, 위험교량, 골재채취장 주변노선 집중단속 운행제한 위반차량 근절을 위한 과적예방 홍보 활동 강화 • 체납 과태료 징수강화 및 징수불가 체납액 결손처분

Ⅲ. 도의회 관련사항 처리상황

1		2020년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황

< 총  괄 >

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
계	7	6	1	-
시정요구	-	-	-	-
처리요구	2	1	1	-
제안사항	5	5	-	-

< 완료사항 >

① 보상절차 이행시 철저한 확인 필요(처리요구사항)

❍ 앞으로 보상절차 이행시 사전조사 단계에서 드론 촬영, 주민의견 청취, 관계기관 협의 등 면밀한 확인을 통하여 보상 추진

참고사항	연산천 지방하천 정비사업 양식장(철갑상어) 보상 건
❍ 보상대상자가 보상금(91백만원)을 극대화하기 위한 사건이었으나, 수사결과 “혐의없음”으로 종결 처리됨 - (논산경찰서) ’20. 08. “혐의없음”으로 검찰에 송치 - (논산지청) ’20. 09. 불기소 처분, (대전고등법원) ’20. 11. 항고 기각결정 - (감사원) ’20. 10. 불기소 처분에 따른 민원 종결 - (道 감사위원회) ’21. 01. 자체 조사 후 민원 종결 - (국민권익위원회) ’21. 03. 부패신고 조사 후 사건 종결

② 지역경제 활성화를 위한 지역업체 참여 활성화 방안 필요(제안사항)

❍ 지역업체 참여율 향상을 위해 전문건설업의 시공능력평가액·실적 등 전문적 관리 필요

❍ 지역건설산업활성화를 위한 도의회 및 유관기관, 건설협회 등 협력체계구축, 입찰공고 시 지역업체 참여 명문화 추진

❍ 직무성과 계약과제와 연계하여 분기별 계약대장 관리를 통한 지역업체 참여율 실적 관리 실시

③ 교통사고 사망자를 줄이기 위한 포트홀 관리 철저(제안사항)

❍ 철저한 포트홀 관리 및 사전 방지를 위하여 아스팔트 포장 시 품질관리를 철저히 하여 포트홀 발생을 최소화하고

❍ 스마트 도로유지관리 시스템 도입으로 포장도 노후정도에 따른 우선순위 결정 및 보수공사 추진 등 포장도 유지관리 추진체계 구축

❍ 앞으로도 포트홀 발생에 따른 도로 불편사항 해소를 위하여 지속적인 도로순찰과 신속한 보수작업을 추진하고, 노후정도가 큰 대상지는 보수공사를 통해 안전한 도로환경 조성에 최선을 다하겠음.

④ 안전하고 아름다운 도로행정 추구(제안사항)

❍ 실시설계시 도로기본시설 외 이용자 중심 편의시설(휴게시설, 조망시설 등) , 경관시설(가로수, 조명시설 등) 등 계획반영을 통해 안전하고 주변경관과 어울리는 특색있는 도로건설 적극 추진

※ 주요 적용 사례 : 안면도 관광지 연결도로 건설사업

- 중앙분리대 및 인도 구간 녹지 조성, 지역특색 고려 가로수종 선정, 주차시설 반영

⑤ 도로유지관리 철저(제안사항)

❍ 대형 안전사고 예방을 위하여 철저한 안전점검(정기점검 2회/1년, 정밀점검 1회/2년, 안전진단·성능평가 1회/5년)을 시행하고 있으며,

❍ 점검결과에 따른 연차별 보수보강 계획을 수립, 시행하여 안전한 도로 환경개선에 최선을 다하겠음

⑥ 소관부처가 다른 하천사업 추진시 중간 역할 필요(제안사항)

❍ 충남도는 자연재해를 예방하기 위하여 지방하천을 정비하고, 재해가 발생한 지방하천에 대한 재해복구사업을 추진하고 있음

❍ 시군에서 추진하고 있는 생태하천, 자연재해위험지구 등에 대한 요구사항은 道 담당부서(물관리정책과, 자연재난과) 및 시군에 통보하여 조치토록 하겠음.

< 추진중인 사항 >

① 미납 과태료에 대한 적극적 조치 필요(처리요구사항)

❍ 체납자 차량·예금·토지 등 재산압류를 통한 재산권 제약으로 체납 과태료 징수·과적인식 개선·과적심리 근절 도모

- 재산조회 : 차량·예금·토지 등 / 수시

- 압류조치 : 차량·예금·토지 등 / 발견즉시

- 징수활동 강화 : 문자, 전화, 방문을 통한 납부 독려 / 수시

※ 체납자에 대하여 지속적인 납부 독려 및 거주지 방문 등 징수추진

❍ 행방불명, 무재산, 파산 등 징수불가 체납액 결손처분

- 결손처분 후 압류재산 발견 시 처분취소 등 사후관리 철저

2		5분 발언 추진상황

< 총  괄 >

연도	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
계	1	-	1	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	1		1	-

< 추진중인 사항 >

① 빌바오 효과를 아십니까?

제329회 여운영 의원

□ 빌바오 효과

❍ 한 도시의 건축물이 그 지역에 미치는 영향이나 현상으로, 스페인 북부 소도시 빌바오에서 비롯됨. 당시 쇠락을 거듭하던 빌바오에 구겐하임미술관이 설립되면서 관광업 호황이 이루어졌고, 이후 도시의 세계적 건축물이 도시경쟁력을 높이는 효과를 나타내는 말로 사용됨

□ 충남미술관 사업개요

❍ 위    치 : 홍성군 홍북읍 도청대로 577(내포신도시 문화시설부지)

❍ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 26,680㎡(미술관 및 공영주차장)

❍ 사업기간 : 2021. 04. ~ 2024. 12.

❍ 총사업비 : 93,300백만원[국비 13,500 / 도비 79,800(부지매입비 13,300 포함)]

□ 추진상황

❍ ’21. 07. 19.  설계공모 작품 심사 및 당선자 결정

□ 향후 추진계획

❍ ’21. 10.     설계용역 계약 체결 및 착수

❍ ’22. 07.     기본 및 실시설계 완료

❍ ’24. 12.     공사준공(예정)

Ⅳ. 참고사항

1		당면 현안사항

【1】견실한 지방도 사업추진을 위한 '22년 예산확보 총력 경주

’22년도 코로나19 극복 경제회복 및 민생안정 중점투자 예산편성 기조로, 지방도 정비사업 등 전반적인 SOC사업 예산규모 축소검토로 인한 사업지연 등 우려

※ ’21년 21지구 426억원 → ’22년 21지구 347억원(79억원 감) *예산실 검토중

[공사 5지구, 보상 4지구, 설계 12지구] → [공사 5지구, 보상 6지구, 설계 10지구]

❍ 현재 추진 중인 21개 지구 사업의 원활한 추진과 ‘22년도 본격적인 착수단계 대규모 사업(기지시~한진 1,432억/두마~노성 1,034억)의 원활한 보상 추진을 위해 예산규모 확대 필요(※ ’22년 769억원 요구)

❍ 예산규모 축소로 인해 사업 지연시 간접비용(공사 간접비, 추가 감리비용, 지가상승에 따른 보상비 증액 등) 발생이 불가피할 것으로 예상

❍‘22년 지방도예산 769억원 요구하였으나 전반적인 예산규모 축소(347억원)로 추가예산 확보를 위한 예산실 등 관련부서 지속 협의 추진

【2】지방하천 재해복구사업의 신속한 추진

’20년 8월 집중호우로 아산지역 3개하천(온양천, 아산천, 금곡천)의 제방이 유실되고 범람하여 ’22년말까지 재해복구사업을 완료하기 위하여 보상 사전협의, 빠른 공정계획 수립 등 추진

<공사 개요>

지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
	시군	읍면		계	기시행	2021년	장차
3지구			8.2	68,277	3,023	32,631	32,623
금곡천	아산	배방	1.8	9,045	1,000	4,439	3,606	’20.11.∼’22.12.	1	보상중
약봉천	아산	송악	2.9	21,853	1,023	12,146	8,684	’20.11.∼’22.12.	2	보상중
온양천	아산	송악	3.5	37,379	1,000	16,046	20,333	’20.11.∼’22.12.	2	보상중

❍ ’21년 상반기에 설계를 완료하였고, 7월부터 공사 및 감리용역을 착수하여 ’22년말까지 공사준공을 목표로 사업을 추진

【3】도로 유지보수용 공용차량 및 장비 교체 추진

노후화된 공용차량 및 장비를 적기에 교체하여 안전사고 예방 및 효율적인 도로 유지관리 도모

□ 공용차량 및 장비 운영현황

❍ 양 지소에서 운영하는 총 227대의 공용차량 및 장비 중 45대가 노후장비 교체기준(내구연한)을 초과

- 공주지소 24대(차량 7, 건설기계 4, 제설장비 3, 기타 10)

- 홍성지소 21대(차량 4, 건설기계 1, 제설장비 7, 기타 9)

□ 문제점 및 대책

❍ 내구연한 초과로 인한 작업자 사고위험 증가 및 수리비* 과다 발생

* ’20년 공용차량 및 장비 수리비 127백만원(공주지소 74, 홍성지소 53)

❍ 잦은 고장으로 도로 유지보수 작업이 지연되어 이용자 불편 가중

⇨ (단기) 노후화가 심한 장비 교체를 위해 22년 본예산 편성 추진

(장기) 노후장비 교체계획을 수립하여 체계적인 장비 관리 도모

【4】신속한 고품질 건설공사 추진을 위한 인력충원 노력

정원 대비 현원에 결원이 많고 신규직원이 많아, 계약·감독 및 민원 대응 등 현장수요에 따른 적극적인 증원 필요

□ 정·현원 현황

구 분	정 원	현 원	과부족	비 고
합 계	114	105	9
4 급	1	1	-
5 급	6	6	-
6 급	23	27	4
7 급	35	30	△5
8 급	34	16	△18
9 급	9	20	11
운영직	6	5	△1

❍ 9급 신규 위주의 인사발령(11명 과원)으로 7, 8급 인력(△23) 부족

❍ 자체조직진단(2021.5.7.) 및 관련부서(인사·조직부서) 수시 건의를 통한 계약·공사·보상업무 전반에 대한 지속적인 경험있는 인력 충원 협의

2		간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
종합건설사업소	소 장	지방기술서기관	최동석	2021.01.01.
	행정관리과장	지방행정사무관	최평근	2020.07.01.
	도로건설과장	지방시설사무관	이창로	2021.01.01.
	공공건축과장	지방시설사무관	김재균	2020.07.01.
	하천개발과장	지방시설사무관	이재원	2020.07.01.
공주지소	지 소 장	지방시설사무관	김정흠	2021.07.01.
홍성지소	지 소 장	지방시설사무관	임형균	2021.07.01.

3		주요 사업별 예산확보 및 추진현황

【1】 분야별 사업추진 내역

분야별		지구수	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
총 계		363	-	337,603
도 로	계	35	156.5	99,830	도로건설과
	국 지 도	7	64.7	43,376
	지 방 도	21	82.9	42,850
	기타도로	7	8.9	13,604
공공건축		27	-	39,647	공공건축과
지방하천정비		37	147.9	87,740	하천개발과
지역개발		2	4.5	15,491
도로유지관리		143	-	54,177	공주지소
		119	-	40,718	홍성지소

【2】도로 확·포장사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 9. 30. 기준)

총 계		’21년도 준공사업		계 속 사 업		’21년도 신규사업
35건 / 99,830		1건 / 8,814		25건 / 88,191		9건 / 2,825
국지도 7 / 43,376		국지도 - / -		국지도 4 / 42,218		국지도 3 / 1,158
지방도 21 / 42,850		지방도 - / -		지방도 17 / 41,950		지방도 4 / 900
기 타 7 / 13,604		기 타 1 / 8,814		기 타 4 / 4,023		기 타 2 / 767

사 업 명		사업량	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
			전 체	기시행	2021년	장 차
총 계		35건 (156.5㎞)	1,464,903	262,617	99,830	1,102,456
국 지 도		7건 (64.7km)	471,221	157,226	43,376	270,619
계 속 사업	소 계	4건 (50.5km)	366,621	157,226	42,218	167,177
	청양～ 신양IC	연장=16.2km 폭=10.0m	52,714	43,012	4,213	5,489	’17.05.∼’23.06.	59	공사중
	이호～양곡	연장=4.9km 폭=10.0m	24,307	20,337	2,834	1,136	’18.09.～’23.08.	54	공사중
	당진～서산	연장=19.1km 폭=17.5m	175,500	93,091	32,528	49,881	’19.04.～’27.03.	1	정지
	성환∼입장	연장=10.3km 폭=17.5m	114,100	786	2,643	110,671	2018.～2028.	-	대전청 설계중
신규사업	소 계	3건 (14.2km)	104,600	-	1,158	103,442
	우성∼이인	연장=0.7km 폭=10.0m	35,000	-	386	34,614	2019.～2029.	-	대전청 설계중
	장척∼목현	연장=3.7km 폭=17.5m	19,900	-	386	19,514	2019.～2029.	-	대전청 설계중
	임천∼강경	연장=9.8km 폭=10.5m	49,700	-	386	49,314	2019.～2029.	-	대전청 설계중
지 방 도		21건 (82.9km)	894,672	64,981	42,850	786,841
계 속 사업	소 계	17건 (68.2km)	784,172	64,681	41,950	677,541
	규암～청남	연장=2.3km 폭=10.0m	27,320	16,452	7,350	3,518	’18.03.～’22.09.	73	공사중
	대술～정안	연장=4.8km 폭=9.5～11.7m	21,752	10,780	4,000	6,972	’19.07.～’23.07.	34	공사중
	어천～공주 (4차)	연장=4.0km 폭=10.0m	48,900	12,736	4,610	31,554	’20.12.～’26.12.	2	공사중
계 속 사업	오천우회	연장=4.0km 폭=9.5m	22,449	6,395	4,210	11,844	’20.10.∼’26.10.	18	공사중
	삭선～원북	연장=5.8km 폭=20.0m	46,514	4,460	3,300	38,754	2017.～2027.	-	보상중
	기지시～한진	연장=9.3km 폭=18.0m	143,171	3,595	6,350	133,226	2017.～2027.	-	설계중
	무창포IC～ 웅천	연장=1.5km 폭=21.8∼23.0m	8,200	1,185	5,070	1,945	’20.06～’24.06.	1	정지
	두마～노성	연장=9.3km 폭=10.0m	103,453	2,000	850	100,603	2018.～2027.	-	설계중
	화성～장곡	연장=2.4km 폭=10.0m	13,306	395	3,005	9,906	2018.～2025.	-	보상중
	구룡～용두	연장=1.3km 폭=10.0m	10,795	375	1,205	9,215	2018.～2025.	-	보상중
	밀두～대음	연장=3.6km 폭=18.8m	49,170	835	300	48,035	2018.～2025.	-	설계중
	산동～상덕	연장=7.7km 폭=19.5m	128,659	3,130	-	125,529	2018.～2027.	-	설계중
	왕암도로	연장=1.0km 폭=10.0m	11,500	300	150	11,050	2019.～2022.	-	설계중
	반계도로	연장=1.3km 폭=10.0∼19.2m	9,783	663	-	9,120	2017.～2023.	-	보상중
	보산원도로	연장=0.5km 폭=9.5m	3,000	100	100	2,800	2017.～2023.	-	설계중
	서면～비인	연장=4.9km 폭=19.5m	29,100	610	400	28,090	2019.～2027.	-	설계중
	복수～진산	연장=4.5km 폭=19.5m	107,100	670	1,050	105,380	2019.～2029.	-	설계중
신규사업	소 계	4건 (14.7km)	110,500	300	900	109,300
	광시～운곡	연장=5.0km 폭=10.0m	35,300	90	200	35,010	2020.～2030.	-	설계 발주
	노화～평촌	연장=3.7km 폭=19.5m	30,000	90	200	29,710	2020.～2030.	-	설계 예정
	동해～부곡	연장=5.0km 폭=10.0m	35,200	120	250	34,830	2020.～2030.	-	설계 예정
	고암～역재	연장=1.0km 폭=20.0m	10,000	-	250	9,750	2020.～2030.	-	타당성 조사중
기타도로사업		7건 (8.9km)	99,010	40,410	13,604	44,996
준공사업	소 계	1건 (2.9km)	45,124	36,310	8,814	-
	안면도 관광지 연결도로	연장=2.9km 폭=27.0m	45,124	36,310	8,814	-	’18.03.～’21.12.	84	공사중
계 속 사업	소 계	4건 (4.3km)	34,686	4,100	4,023	26,563
	장평지구	연장=1.4km 폭=16.5∼17.4m	5,500	1,147	502	3,851	’19.12.～’22.06.	32	공사중
	원청사거리	연장=0.9km 폭=3.5～20m	14,075	600	755	12,720	’20.07.～’23.07.	1	정지
	웅천산단 진입도로	연장=1.0km 폭=19.7m	7,111	1,143	1,766	4,202	’20.06.～’23.06.	1	정지
	정산지구	연장=1.0km 폭=13.0∼15.0m	8,000	1,210	1,000	5,790	’20.08.～’23.08.	38	공사중
신 규 사업	소 계	2건 (1.7km)	19,200	-	767	18,433
	합곡지구	연장=1.0km 폭=10.0m	18,000	-	267	17,733	2021.～2025.	-	설계 발주
	효제교차로	연장=0.7km 폭=10.0m	1,200	-	500	700	2021.～2023.	-	설계 예정

【3】공공건축사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 9. 30.기준)

총 계		’21년도 준공사업		계 속 사 업		’21년도 신규사업
27건 / 39,647		5건 / 4,949		7건 / 23,957		15건 / 10,741

사 업 명			사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
				전체	기시행	2021년	장차
합계			27건	530,608	51,147	39,647	439,814
준공사업	소계		5건	26,200	21,251	4,949	-
	1	직산119 안전센터	지상3층 993㎡	2,392	103	2,289	-	’19.11.～’21.12.	65	공사중
	2	재래흑염소 사육사 증축공사	지상1층 967㎡	998	998	-	-	’20.06.～’21.07.	100	준공
	3	홍성지소 증축및 리모델링	지상1층 153㎡	900	900	-	-	’20.01.～’21.04.	100	준공
	4	충남 공감마루	지하1층 지상3층 2,920㎡	9,450	9,450	-	-	’18.02.～’21.05.	100	준공
	5	내포자연 놀이뜰	지하1층 지상2층 2,622㎡	12,460	9,800	2,660	-	’18.11.～’21.10.	95	공사중
계속사업	소계		7건	337,450	29,896	23,957	283,597
	6	충남국제전시 컨벤션센터	지하1층 지상4층 51,900㎡	160,300	2,607	2,100	155,593	’20.10.～25.06.	-	설계중
	7	충남소방 복합시설	10개동 17,042㎡	76,649	8,046	6,538	62,065	’17.10.～’23.12.	-	공사 발주
	8	충남 스포츠센터	지하1층 지상2층 13,344㎡	47,500	7,760	7,500	32,240	’18.08.～’23.06.	4	공사중
	9	충남지식산업센터	지하1층 지상6층 12,486㎡	29,350	9,498	6,133	13,719	’18.11.～’22.09.	13	공사중
	10	육아종합 지원센터	지하1층 지상3층 3,230㎡	13,034	984	-	12,050	’20.10.～’23.03.	-	설계중
	11	수산종자 연구센터	지상3층 2,024㎡	6,700	987	1,000	4,713	’20.09.～’22.12.	-	공사 발주 준비중
	12	대천항 관공선 통합사무실	지상2층 1,370㎡	3,917	14	686	3,217	’20.08.～’23.01.	-	공사 발주 준비중

사 업 명			사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
				전체	기시행	2021년	장차
신규사업 신규사업	연번	소 계	15건	166,958	-	10,741	156,217
	13	금산소방서 청사 증축공사	지하1층 지상4층 2,300㎡	7,269	-	110	7,159	’21.01.～’24.12.	-	군관리계획 결정(변경) 용역 중
	14	공무원교육원 연결통로 지붕교체공사	지붕교체 184㎡	298	-	298	-	’21.01.～’21.12.	14	공사중
	15	천안서북소방서 다목적훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사	지상4층 427㎡	784	-	784	-	’21.03.～’22.08.	-	설계중
	16	계룡소방서 다목적훈련탑 증축공사	지상4층 279㎡	304	-	304	-	’21.03.～’22.06.	-	공사 발주 준비중
	17	공주소방서 다목적 훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사	지상4층 432㎡	610	-	610	-	’21.03.～’22.08.	-	설계중
	18	태안소방서 다목적 훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사	지상4층 455㎡	610	-	610	-	’21.03.～’22.03.	-	설계중
	19	충남미술관 건립공사	지하2층 지상4층 6,680㎡	80,000	-	2,995	77,005	’21.03.～’24.12.	-	설계 준비중
	20	청양구기자 연구소 증축공사	지상2층 398㎡	714	-	714	-	’21.04.～’22.06.	-	설계중
	21	서해안기후환경 연구소 / 충남교통연수원 태양광발전장치	태양광 발전장치 25·45kW	132	-	132	-	’21.05.～’21.12.	-	공사 발주
	22	충남 사회적경제 혁신타운	지하1층 지상3층 7,500㎡	28,000	-	1,300	26,700	’21.06.～’24.06.	-	설계중
	23	당진소방서 증축공사	지하1층 지상4층 2,300㎡	6,858	-	394	6,464	’21.07.～’23.09.	-	설계공모 준비중
	24	충남노인회관 옥상방수 보수공사	옥상방수 보수공사	100	-	100	-	’21.09.～’21.12.	-	설계중
	25	당진 합덕119 안전센터 증축공사	지상1층 75㎡	850	-	850	-	’21.09.～’22.06.	-	설계중
	26	장애인 힐링센터	지하1층 지상3층 6,250㎡	26,929	-	840	26,089	’21.07.～’24.12.	-	설계공모 준비중
	27	안면도 지방정원 가든센터	지상2층 2,035㎡	13,500	-	700	12,800	’21.07.～’24.06.	-	설계공모 준비중

<참고 – 신규예정사업>

(단위 : 백만원, 2021. 9. 30.기준)

사 업 명			사업량	사업비				사업 기간	공정률 (%)	비고
				전체	기시행	2021년	장차
신규 예 정 사업	연번	소 계	1건	19,800	-	-	19,800
	1	충남탄소 중립연수원 조성사업	리모델링 4동 신축 2동 1,250㎡	19,800	-	-	19,800	미정	-	’21.11. 의뢰예정

【4】지방하천 정비사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 9. 30. 기준)

총 계		’21년도 준공사업		계 속 사 업		’21년도 신규사업
37건 / 87,740		6건 / 14,185		26건 / 69,699		5건 / 3,856
지방하천 34 / 55,109		지방하천 6 / 14,185		지방하천 23 / 37,068		지방하천 5 / 3,856
재해복구 3 / 32,631		재해복구 - / -		재해복구 3 / 32,631		재해복구 - / -

<총  괄>

구 분	사업수	사업량 (km)	사 업 비				비고
			계	기시행	2021년	장차
합 계	37건	147.9	804,639	198,239	87,740	517,960
지방하천 정비사업	34건	139.7	736,362	195,216	55,109	485,337	준공 6, 계속 23, 신규 5
지방하천 재해복구	3건	8.2	68,277	3,023	32,631	32,623	계속 3

<지방하천 정비사업>

구분	사업명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2021년	장차
계	34건			139.7	736,362	195,916	55,109	485,337
준 공 사업	소계 (6건)			35.3	159,240	145,055	14,185	-
	성환천	천안	부대 성환	10.5	49,731	47,731	2,000	-	’16.05.∼’21.01.	100	준공
	마곡천	공주	사곡	3.3	13,736	13,509	227	-	’17.12.∼’21.04.	100	준공
	연산천	계룡 논산	엄사 연산	6.8	32,006	25,471	6,535	-	’18.03.∼’22.03.	84	공사중
	금 천	부여	옥산 장암	10.1	32,786	32,632	154	-	’16.05.∼’21.01.	100	준공
	도당천	서산	해미 운산	2.7	11,552	9,915	1,637	-	’18.07.∼’21.08.	100	준공
	신암천	논산	연산	1.9	19,429	15,797	3,632	-	’18.05.∼’21.12.	65	공사중
계 속 사 업 계 속 사업	소계 (23건)			85.6	469,879	50,861	37,068	381,950
	화산천	서천	기산 화양	4.3	37,820	18,456	5,815	13,549	’18.03.∼’23.05.	67	공사중
	석남천	서산	예천 석남	2.7	21,216	14,480	5,454	1,282	’17.05.∼’22.08.	78	공사중
	병천천	천안	병천	8.3	22,010	1,710	5,064	15,236	’17.12.∼’23.12.	5	공사중
	광기천	천안	병천	3.4	25,823	2,030	3,000	20,793	’18.01.∼’23.12.	15	공사중
	주교천	부여	주교	3.0	24,020	1,055	2,000	20,965	’20.12.∼’24.03.	5	공사중
	명천천	서산	성연	1.1	3,047	634	100	2,313	’18.01.∼’22.12.	-	공사중
	석림천	서산	석림	0.3	711	169	111	431	’18.01.∼’22.12.	-	공사중
	중산천	공주	금흥	0.7	17,271	870	5,596	10,805	’20.10.∼’23.03.	14	공사중
	장승천	청양	청양	3.3	15,961	877	3,736	11,348	’20.12.∼’23.05.	4	공사중
	천안천 (장재천)	천안	백석 불당	1.5	23,170	521	1,303	21,346	’19.02.∼’24.08.	-	공사중
	신양천	논산	연무	4.3	25,555	646	643	24,266	’19.01.∼’24.08.	-	공사중
	와룡천	홍성	갈산 결성	9.6	25,247	1,326	350	23,571	2019.～2023.	-	설계중
	도마천	서천	문산	7.3	18,246	774	500	16,972	2019.～2023.	-	설계중
	용요천	태안	근흥	3.3	40,669	847	495	39,327	2019.～2025.	-	설계중
	왕대천	계룡	두마	2.7	6,497	295	200	6,002	2019.～2023.	-	설계중
	간치천	보령	주산	4.7	23,124	878	500	21,746	2019.～2023.	-	설계중
	판교천	서천	종천 서천	2.6	14,376	504	250	13,622	2020.～2024.	-	설계중
	청지천	서산	장홍 석림	3.4	29,431	905	200	28,326	2020.～2024.	-	설계중
	왕암천	논산	가야곡	5.4	24,870	725	400	23,745	2020.～2024.	-	설계중
	오봉천	당진	송악 신평	3.0	23,699	765	301	22,633	2020.～2024.	-	설계중
	칠산천	부여	임천	3.0	25,373	1,093	300	23,980	2019.～2023.	-	설계중
	진산천	금산	진산	1.7	7,420	501	250	6,669	2019.～2023.	-	설계중
	유등천	금산	복수	6.0	14,323	800	500	13,023	2018.～2022.	-	설계중지 (하천과)
신규 사업	소계 (5건)			18.8	107,243	-	3,856	103,387
	둔포천	아산	둔포	4.5	40,222	-	843	39,379	2021.∼2025.	-	용역 착수
	솔리천	서천	장항	1.3	4,997	-	800	4,197	2021.∼2025.	-	기본계획 (하천과)
	초대천	당신	신평	6.3	37,394	-	1,009	36,385	2021.∼2025.	-	용역 착수
	양촌천	논산	양천	3.4	15,832	-	702	15,130	2021.∼2025.	-	용역 착수
	판정천	천안	입장	3.3	8,798	-	502	8,296	2021.∼2025.	-	용역 착수

<지방하천 재해복구사업>

(단위 : 백만원, 2021. 9. 30. 기준)

구분	사업명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2021년	장차
계	3건			8.2	68,277	3,023	32,631	32,623
계속사업	금곡천	아산	배방	1.8	9,045	1,000	4,439	3,606	’20.11.∼’22.12.	1	공사중
	약봉천	아산	송악	2.9	21,853	1,023	12,146	8,684	’20.11.∼’22.12.	2	공사중
	온양천	아산	송악	3.5	37,379	1,000	16,046	20,333	’20.11.∼’22.12.	2	공사중

【5】지역개발사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 9. 30. 기준)

연번	사업명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				공사기간	진도 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2021년	장차
합 계		2건		4.5	89,812	57,152	15,491	17,169
계속사업	도시첨단 산업단지 진입도로 개설공사	홍성 홍성	홍북 홍성	연장=3.9 (폭=20.0m)	53,166	42,824	5,491	4,851	’18.03.～’22.02.	95	공사중
	태안 기업도시 연결도로 개설공사	태안 서산	태안 부석	연장=0.6 (폭=25.0m)	36,646	14,328	10,000	12,318	’20.02.∼’23.02.	42	공사중

【6】도로 유지관리사업 현황

□ 공주․홍성지소

(단위 : 백만원, 2021. 9. 30. 기준)

총 계		계 속 사 업		’21년도 신규사업
262건 / 94,895		42건 / 22,737		220건 / 72,158
자체사업 143 / 19,153		자체사업 11 / 1,279		자체사업 132 / 17,874
재배정사업 106 / 54,741		재배정사업 26 / 19,999		재배정사업 80 / 34,742
균특사업 -		균특사업 -		균특사업 -
위임국도 13 / 21,001		위임국도 5 / 1,459		위임국도 8 / 19,542

□ 공주지소

구 분	총 계		계속사업		신규사업
계	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	143	54,177	22	20,460	121	33,717
자체사업	85	8,525	7	498	78	8,027
재배정사업	54	35,483	14	18,819	40	16,664
균특사업	-	-	-	-	-	-
위임국도	4	10,169	1	1,143	3	9,026

□ 홍성지소

구 분	총 계		계속사업		신규사업
계	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	119	40,718	20	2,277	99	38,441
자체사업	58	10,628	4	781	54	9,847
재배정사업	52	19,258	12	1,180	40	18,078
균특사업	-	-	-	-	-	-
위임국도	9	10,832	4	316	5	10,516

□ 공주지소

(단위 : 백만원, 2021. 9. 30. 현재)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
총 계			143건			54,177
계(계속사업)			22건			20,460
계속사업계속사업	소계	자 체 사 업	7건			498
	자체사업	병암도로 안전시설정비공사	논산	가야곡	1식	20	’20.12.∼’21.01.	100	준공
		샛고개터널(상) 외 3개소 정밀안전점검 용역	금산	복수	1식	29	’20.12.∼’21.02.	100	준공
		지방도799호선 십자사거리 회전교차로 설치공사 실시설계용역	부여	석성	1식	8	’20.12.∼’21.02.	100	준공
		[서천]랑평리 외 2개소 도로정비공사	서천	종천	1식	17	’20.12.∼’21.01.	100	준공
		삼가교 재가설공사	금산	진산	1식	386	’19.12.∼’21.02.	100	준공
		공주지소 경관조형물 설치용역	공주지소		1식	18	’20.12.∼’21.02.	100	준공
		재해대책 추진	공주지소		1식	20	’20.11.∼’21.03.	100	준공
	소계	재배정 사업	14건			18,819
	재배정사업재배정	KTX공주역 진입지방도 선형개량사업	공주	이인	1식	2,650	’19.01.∼’21.12.	40	공사중
		광금도로 선형개량공사	청양	대치	1식	1,366	’19.12.∼’23.02.	30	공사중
		광덕도로 선형개량공사	천안	광덕	1식	1,409	’21.01.∼’21.12.	70	공사중
		지방도 교량 내진성능보강	논산	양촌	1식	452	’20.12.∼’21.12.	90	공사중
		국지도68호 황산대교 내진성능보강(성립전)	논산	강경	1식	452	’20.10.∼’21.08.	100	준공
		지방도 7.28∼8.11 수해복구 사업	공주지소		5개소	1,701	’20.10.∼’21.12.	-	설계중
		우곤도로 선형개량공사	논산	성동	1식	1,838	’17.06.∼’22.02.	60	공사중
		주항도로 선형개량공사	서천	서	1식	428	’18.08.∼’21.06.	100	준공
		양전도로 선형개량공사	금산	금성	1식	524	’18.05.∼’21.09.	80	공사중
		석막도로 선형개량공사	금산	진산	1식	1,790	’20.12.∼’23.11.	30	공사중
		천을도로 선형개량공사	부여	군북	1식	910	’20.01.∼’23.12.	-	공사 정지중
		지방도 정비사업(양촌도로)	논산	양촌	1식	202	’21.05.∼’21.06.	100	준공
		저곡지구 급경사지 붕괴위험지역 정비	금산	제원	1식	5,049	’19.01.∼’21.11.	50	공사중
		이동식 과속단속부스 설치공사	공주지소		1식	48	’19.12.∼’21.03.	100	준공
	소계	위 임 국 도	1건			1,143
	위임	병목지점개선	전노선		1식	1,143	’21.01.∼’21.12.	40	공사중
계(신규사업)			121건			33,717
신규사업신규사업신규사업신규사업신규사업	소계	자 체 사 업	78건			8,027
	자체사업자체사업자체사업자체사업	국지70호 성월도로 배수로	천안	성환	L=0.2km	23	’21.03∼’21.05.	100	준공
		국지23호 성거지구 배수로	천안	성거	L=0.7km	30	’21.03∼’21.05.	100	준공
		국지70호 율금도로 배수로	천안	성환	L=0.2km	9	’21.03∼’21.04.	100	준공
		지629호 매당도로 배수로	천안	광덕	L=0.2km	75	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지691호 천정도로 배수로	천안	목천	L=0.1km	19	’21.09∼’21.12.	10	공사중
		지691호 대정도로 배수로	천안	성남	L=0.1km	33	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지691호 대정도로 배수시설 정비	천안	성남	L=0.1km	22	’21.09∼’21.12.	10	공사중
		국지57호 오곡도로 배수로	천안	북	L=0.1km	19	’21.01∼’21.06.	100	준공
		효계도로 포장도	천안	입장	L=1.7km	123	’21.04∼’21.06.	100	준공
		저리도로 포장도	천안	성거	L=1.3km	81	’21.01∼’21.06.	100	준공
		요방도로 포장도	천안	성거	L=0.2km	80	’21.10∼’21.12.	-	발주중
		지장도로 포장도	천안	광덕	L=0.9km	139	’21.01∼’21.06.	100	준공
		백자도로 포장도	천안	수신	L=1.2km	84	’21.01∼’21.06.	100	준공
		보성도로 포장도	천안	풍세	L=1.0km	63	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지697호 반송도로 배수로	공주	이인	L=0.1km	40	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지697호 경천도로 배수로	공주	계룡	L=0.2km	30	’21.01∼’21.06.	100	준공
		삼각도로 배수로	공주	탄천	L=0.2km	30	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지629호 마곡사로 배수로	공주	사곡	L=0.2km	30	’21.01∼’21.06.	100	준공
		국지도96호 대학도로 포장도	공주	탄천	L=1.0km	80	’21.01∼’21.06.	100	준공
		대산도로 포장도	공주	정안	L=2.2km	216	’21.01∼’21.06.	100	준공
		만수도로 포장도	공주	이인	L=1.6km	168	’21.01∼’21.06.	100	준공
		복룡도로 포장도	공주	이인	L=1.0km	106	’21.01∼’21.06.	100	준공
		국지68호 벌곡도로 배수로	논산	벌곡	L=0.4km	39	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지697호 연산도로 배수로	논산	연산	L=0.4km	76	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지691호 석종도로 배수로	논산	상월	L=0.1km	23	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지643호 삼전도로 배수로	논산	가야곡	L=0.1km	19	’21.01∼’21.06.	100	준공
		국지68호 벌곡도로 사면정비	논산	벌곡	L=0.1km	34	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지643호 가야곡도로 옹벽	논산	가야곡	L=0.1km	19	’21.01∼’21.06.	100	준공
		성덕도로 배수로	논산	은진	L=0.1km	18	’21.01∼’21.06.	100	준공
		국방대 신호 연동화	논산	양촌	1식	6	’21.01∼’21.06.	100	준공
		국지68호 야촌도로 배수로	논산	가야곡	L=0.1km	8	’21.01∼’21.06.	100	준공
		논산지구 소음영향조사	논산	강경	1식	7	’21.06∼’21.07.	100	준공
		주내사거리 회전교차로 설치공사 실시설계용역	논산	상월	1식	20	’21.02∼’21.07.	100	준공
		국지68호 동산도로 외 1개소 포장도	논산	연무	L=0.9km	62	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지697호 양촌도로 포장도	논산	양촌	L=4.0km	369	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지601호 역평도로 배수로	금산	남이	L=0.4km	76	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지601호 서대도로 외1 배수로	금산	추부	L=0.4km	32	’21.03∼’21.05.	100	준공
		지601호 예미도로 배수로	금산	부리	L=0.1km	23	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지635호 삼가도로 외1 배수로	금산	진산	L=0.5km	28	’21.01∼’21.06.	100	준공
		건천도로 접속도로 개선	금산	남이	1식	12	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지635호 신정도로 외1 배수로	금산	남일	1식	27	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지635호 대둔산로 포장(상)	금산	복수	1식	120	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지635호 대둔산로 포장(하)	금산	복수	1식	262	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지601호 군북로 포장도	금산	군북	1식	120	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지606호 외산도로 배수로	부여	외산	L=0.3km	70	’21.02∼’21.03.	100	준공
		지625호 장암도로 배수로	부여	장암	L=0.1km	29	’21.02∼’21.03.	100	준공
		지723호 팔충도로 배수로	부여	충화	L=0.2km	20	’21.02∼’21.03.	100	준공
		지723호 내성도로 배수로	부여	양화	L=0.2km	27	’21.02∼’21.03.	100	준공
		지613호 금천도로 배수로	부여	남	L=0.5km	112	’21.02∼’21.03.	100	준공
		지799호 석성도로 배수로	부여	석성	L=0.2km	55	’21.02∼’21.03.	100	준공
		지651호 정동도로 포장도	부여	부여	L=1.7km	140	’21.04∼’21.05.	100	준공
		지723호 수원도로 포장도	부여	양화	L=0.9km	100	’21.04∼’21.05.	100	준공
		지799호 응평도로 포장도	부여	초촌	L=0.3km	48	’21.04∼’21.05.	100	준공
		지613호 상천도로 포장도	부여	홍산	L=1.0km	99	’21.04∼’21.05.	100	준공
		은곡리 배수시설 정비	서천	문산	L=0.1km	23	’21.01∼’21.06.	100	준공
		태월리 포장도 보수	서천	서천	L=1.9km	265	’21.01∼’21.06.	100	준공
		동산도로 옹벽설치	서천	한산	L=0.1km	29	’21.01∼’21.06.	100	준공
		동산도로 정비공사	서천	한산	L=0.3km	40	’21.01∼’21.06.	100	준공
		한산도로 포장도	서천	한산	L=2.5km	343	’21.09∼’21.12.	-	설계중
		지610호 화강도로 배수로	청양	화성	L=0.4km	71	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지625호 왕진도로 정비	청양	청남	L=0.1km	24	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지723호 화산도로 포장도	청양	장평	L=0.3km	38	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지645호 작천도로 배수로	청양	대치	L=0.1km	33	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지610호 구룡도로 배수로	청양	남양	L=0.1km	24	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지604호 광암도로 정비	청양	운곡	L=2.8km	73	’21.01∼’21.06.	100	준공
		효제도로 노견정비	청양	운곡	L=0.7km	5	’21.01∼’21.06.	100	준공
		광암도로 정비공사 외 4개지구 폐기물	청양	운곡	1식	39	’21.01∼’21.06.	100	준공
		국지 96호 농소도로 포장도	청양	대치	L=0.4km	74	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지645호 중산도로 포장도	청양	청남	L=0.2km	40	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지625호 인양도로 포장도	청양	청남	L=0.4km	56	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지610호 산정도로 포장도	청양	화성	L=0.3km	223	’21.01∼’21.06.	100	준공
		제초작업	전노선		1식	500	’21.01∼’21.12.	95	공사중
		긴급 보수공사	전노선		1식	500	’21.01∼’21.12.	50	공사중
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	’21.01∼’21.12.	50	추진중
		안전시설물 정비사업	전노선		1식	1,000	’21.01∼’21.12.	50	공사중
		교량 및 터널 정비사업	전노선		1식	200	’21.01∼’21.12.	50	공사중
		재해대책 추진 장비임차료	전노선		1식	300	’21.01∼’21.12.	50	추진중
		재해대책 추진 자재구입	전노선		1식	227	’21.01∼’21.12.	90	추진중
	소계	재배정사업	40건			16,664
	재배정사업재배정사업	지방도 교량안전진단	공주지소		1식	1,127	’21.01∼’21.12.	70	추진중
		도로대장 유지관리	공주지소		1식	20	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지방도변 마을주민 보호구역	공주지소		1식	240	’21.01∼’21.12.	80	공사중
		운행방향 유도레인 설치	공주지소		1식	30	’21.01∼’21.06.	100	준공
		터널방재시설 설치(곡두터널)	천안	광덕	1식	200	’21.01∼’21.12.	-	설계중
		지방도 안전시설(방호울타리)정비	공주지소		L=4.0km	1,000	’21.01∼’21.12.	70	공사중
		로드킬 방지시설 설치공사	공주지소		L=1.9km	150	’21.01∼’21.06.	100	준공
		606호 용마도로 갓길정비공사	청양	님양	L=2.3km	500	’21.01∼22.12.	-	발주중
		유구도로 안전시설 설치사업	공주	유구	1식	100	’21.01∼’21.06.	100	준공
		지방도 인도설치공사	공주지소		9개소	1,413	’21.01∼’21.12.	80	공사중
		지방도 표지판 정비	공주지소		1식	100	’21.01∼’21.11.	80	공사중
		도로표지(LED) 개선사업	공주지소		1식	50	’21.01∼’21.08.	100	준공
		횡단보도 바닥 매립형 유도등 설치사업	공주지소		1식	50	’21.01∼’21.08.	100	준공
		611호 장항-서천 명품도로 개설사업	서천	장항,서천	1식	500	’21.06∼’21.12.	-	설계중
		지방도611호 마서-계동 배수로정비	서천	마서	L=0.5km	130	’21.01∼’21.10.	90	공사중
		지방도629호 용경도로 교차로 개선공사	천안	광덕	L=0.2km	340	’21.01∼’21.12.	90	공사중
		국지도96호 용천도로 교차로 개선공사	청양	비봉	L=0.3km	350	’21.01∼’21.07.	100	공사중
		지방도611호 서천(군사)오거리 교차로개선공사	서천	서천	L=0.6km	400	’21.05∼’21.12.	10	공사중
		지방도799호 십자사거리 포장도보수공사	부여	석성	L=0.2km	300	’21.01∼’21.08.	100	준공
		계룡 중장지구 회전교차로 설치공사 설계용역	공주	계룡	1식	50	’21.01∼’21.09.	100	준공
		지방도606호 남양사거리 교차로 개선공사	청양	남양	1식	360	’21.01∼’21.12.	30	공사중
		마서계동도로 선형개량공사	서천	마서	1식	119	’21.01∼’21.12.	-	설계중
		안당도로(필당고개) 선형개량공사	서천	마산	1식	110	’21.01∼’21.12.	-	설계중
		둔덕도로 위험도로 정비공사	서천	서천	1식	113	’21.01∼’21.12.	10	공사중
		수성도로 선형개량공사	서천	판교	1식	400	’21.01∼’21.12.	20	공사중
		탄천 덕지도로 선형개량공사 실시설계용역	공주	탄천	1식	60	’21.01∼22.12.	100	준공
		신풍 봉갑지구 선형개량공사	공주	신풍	1식	200	’21.01∼’21.12.	10	공사중
		현내도로 선형개량공사	부여	석성	1식	700	’21.01∼’21.12.	10	공사중
		종천도로 선형개량공사	서천	종천	1식	248	’21.01∼’21.12.	10	공사중
		지방도606호 남양 봉우티고개 오르막차로 설치공사	청양	남양	1식	500	’21.01∼’21.12.	-	설계중
		청양 비봉 중묵도로 위험구간 개선공사	청양	비봉	1식	100	’21.01∼’21.12.	-	설계중
		국지도57호 기로도로 위험구간 개선공사	천안	입장	1식	250	’21.01∼’21.08.	100	준공
		지방도 교량 유지관리	공주지소		1식	4,133	’21.01∼’21.12.	60	공사중
		내진보강공사	공주지소		2개소	450	’21.01∼’21.12.	90	공사중
		노성도로 선형개량공사	논산	노성	1식	798	’21.01∼’21.12.	10	공사중
		국지도68호 황산대교 내진성능보강	논산	강경	1식	100	’20.10.∼’21.08.	100	준공
		제설장비 적치장 설치공사	공주지소		1식	65	’21.10∼’21.12.	-	발주중
		안개상습구간 시설물 개선사업	공주지소		3개소	78	’21.10∼’22.06.	-	설계중
		횡단보도 및 노견 물고임 정비사업	논산	광석	1식	30	’21.10∼’21.12.	-	설계중
		지방도799호 십자사거리 회전교차로 설치공사	부여	석성	1식	800	’21.10∼’21.12.	10	공사중
	소계	위 임 국 도	3건			9,026
	위임국도	도로안전 및 환경개선	전노선		1식	5,085	’21.01∼’21.12.	30	공사중
		국도유지운영	전노선		1식	113	’21.01∼’21.12.	40	공사중
		도로유지보수	전노선		1식	3,828	’21.01∼’21.12.	50	공사중

□ 홍성지소

(단위: 백만원, 2021. 9. 30. 현재)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
총 계			119건			40,718
계(계속사업)			20건			2,277
계속사업	소계	자 체 사 업	4건			781
	자체사업	신창교 재가설공사	서산	해미	1개소	478	’20.08∼’21.10	90	공사중
		용현교 재가설공사	서산	운산	1개소	136	’20.08∼’21.09	100	준공
		삼송교 재가설공사	서산	해미	1개소	164	’19.11∼’21.03	100	준공
		2021년 홍성, 아산지역 실시설계용역	홍성, 아산		1식	3	’20.12∼’21.02	100	준공
	소계	재배정 사업	12건			1,180
	재배정사업	지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.9km	19	’20.12∼’21.04	100	준공
		국지도 96호 용신도로 선형개량공사 실시설계용역	태안	근흥	L=0.3km	7	’20.08∼’21.05	100	준공
		지방도610호 영보리 선형개량공사	보령	오천	L=0.5km	353	’20.09∼’21.08	100	준공
		서원교 재가설공사	아산	염치	1개소	86	’20.04∼’21.06	100	준공
		삼송교 재가설공사	서산	해미	1개소	96	’19.11∼’21.03	100	준공
		지방도 교량유지관리(선인교)	아산	선장	1개소	31	’20.06∼’21.05	100	준공
		지방도616,645호 재해복구 공사(2공구)	아산	도고	1개소	201	’20.12∼’21.06	100	준공
		지방도606호 수부고개 자동염수분사장치 설치공사	보령	웅천	1개소	200	’21.01∼’21.03	100	준공
		지방도602호 계정리 재해복구 (사면보강) 사업	예산	응봉	1개소	86	’21.01∼’21.06	100	준공
		국지도70호 칠성암삼거리 회전교차로 설치공사	예산	신양	1개소	36	’20.07∼’21.10	95	공사중
		지609호 운월도로 선형개량공사 실시설계용역	홍성	홍동	1식	52	’20.08∼’21.02	100	준공
		2021년 홍성지소 인도설치공사 실시설계용역	보령, 당진, 태안		3식	13	’20.12∼’21.02	100	준공
	소계	위 임 국 도	4건			316
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	50	’20.01∼’21.12	70	공사중
		도로유지보수	전노선		1식	120	’20.01∼’21.03	100	준공
		도로병목지점개선	전노선		1식	10	’20.01∼’21.12	70	공사중
		위험도로개선	전노선		1식	136	’20.01∼’21.12	70	공사중
계(신규사업)			99건			38,441
신규사업	소계	자 체 사 업	54건			9,847
	자체사업	2021년 예산지역 지방도 유지보수공사 실시설계용역	예산		1식	20	’21.01∼’21.02	100	준공
		지방도616호 장복도로 포장도 보수공사	예산	대술	L=1.2km	155	’21.01∼’21.05	100	준공
		지방도618호 신원도로 포장도 보수공사	예산	오가	L=0.5km	100	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도645호 화산도로 포장도 보수공사	예산	대술	L=2.0km	250	’21.01∼’21.06	100	준공

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
신규사 업	자체사업	지방도616호 서초정도로 외 1개소 배수로 정비공사	예산	광시	2개소	70	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도616호 녹문도로 외 1개소 배수로 정비공사	예산	신양	2개소	100	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도618호 오촌도로 외 1개소 배수로 정비공사	예산	오가	2개소	55	’21.01∼’21.06	100	준공
		2021년 아산지역 지방도 유지보수공사 실시설계용역	아산		1식	20	’21.01∼’21.02	100	준공
		2021년도 아산지역 지방도 유지보수공사 단가계약	아산		1식	50	’21.01∼’21.12	90	공사중
		지방도616호 동화리 배수로 정비 공사	아산	송악	1개소	100	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도616호 강장도로 그루빙 설치공사	아산	송악	1식	20	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도 616,645호 농은 ~ 강장도로 포장도 보수공사	아산	송악	L=4.5km	430	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도623호 수철리 배수로 정비공사	아산	배방	1개소	100	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도645호 신유리 배수로 정비공사	아산	도고	1개소	30	’21.01∼’21.06	100	준공
		국지도 70호 서원지구 법면보호공사	아산	염치	1식	300	’21.09∼’21.12	15	공사중
		2021년도 홍성지역 지방도 유지보수공사 단가계약	홍성		1식	20	’21.01∼’21.02	100	준공
		국지도96호 가송~도산도로 포장도 보수공사	홍성	장곡	L=4.0km	250	’21.01∼’21.06	100	준공
		국지도96호 도산~상송도로 포장도 보수공사	홍성	장곡	L=2.0km	240	’21.01∼’21.06	100	준공
		국지도96호 상송~산성도로 포장도 보수공사	홍성	장곡	L=2.0km	240	’21.01∼’21.06	100	준공
		2021년 태안지역 지방도 유지보수공사 실시설계용역	태안		1식	20	’21.01∼’21.02	100	준공
		국지도96호 당암도로 교통안전시설 정비공사	태안	근흥	1식	20	’21.01∼’21.04	100	준공
		국지도96호 정죽도로 포장도 보수공사	태안	근흥	L=0.5km	70	’21.01∼’21.05	100	준공
		지방도603호 관리도로 배수시설 정비공사	태안	이원	2개소	45	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도603호 청산도로 포장도 보수공사	태안	원북	L=3.0km	415	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도634호 반계도로 포장도 보수공사	태안	원북	L=1.4km	180	’21.01∼’21.05	100	준공
		2021년 서산지역 지방도 유지보수공사 실시설계용역	서산		1식	20	’21.01∼’21.02	100	준공
		국지도70호 탑곡교차로 포장도 보수공사	서산	음암	L=0.3km	20	’21.01∼’21.03	100	준공
		국지도70호 배수시설 정비공사	서산	음암	4개소	30	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도609호 원평도로 포장도 보수공사	서산	운산	L=1.0km	150	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도634호 배수시설 정비공사	서산	성연	4개소	50	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도647호 용현도로 포장도 보수공사	서산	운산	L=2.1km	290	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도647호 삼송도로 포장도 보수공사	서산	해미	L=1.5km	190	’21.01∼’21.05	100	준공
		2021년 당진지역 지방도 유지보수공사 실시설계용역	당진		1식	20	’21.01∼’21.02	100	준공
		국지도70호 면천도로 외 1개소 포장도 보수공사	당진	면천 합덕	L=2.5km	350	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도615호 광천도로 배수시설 개선공사	당진	순성	1개소	140	’21.01∼’21.06	100	준공

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
신규사 업	자체사업	지방도619호 가교리 회전교차로 도로안전시설 정비공사	당진	송악	1식	30	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도647호 신시도로 외 2개소 포장도 보수공사	당진	정미 송악	L=1.1km	210	’21.01∼’21.06	100	준공
		2021년 보령지역 지방도 유지보수공사 실시설계용역	보령		1식	20	’21.01∼’21.02	100	준공
		지방도606호 수부도로 포장도 보수공사	보령	웅천	L=2.5km	230	’21.01∼’21.05	100	준공
		지방도610호 장현도로 포장도 보수공사	보령	청라	L=1.5km	150	’21.01∼’21.05	100	준공
		지방도610호 성연도로 포장도 보수공사	보령	청소	L=2.0km	200	’21.01∼’21.05	100	준공
		지방도610호 황룡도로 포장도 보수공사	보령	청라	L=1.5km	150	’21.01∼’21.05	100	준공
		서원교 재가설공사	아산	염치	1개소	274	’21.01∼’21.06	100	준공
		위험교량 보수보강	자라실교 등		1식	500	’21.01∼’21.12	70	공사중
		위험교량 유지보수(특교세)	중대교 외 4개교		1식	626	’21.01∼’21.06	100	준공
		안전시설 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	850	’21.01∼’21.12	70	공사중
		긴급도로보수공사	전노선		1식	150	’21.01∼’21.12	-	공사중
		지방도 제설 및 제초용역	전노선		1식	500	’21.01∼’21.12	70	공사중
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	350	’21.01∼’21.12	70	추진중
		도로유지보수 폐기물처리	전노선		1식	50	’21.01∼’21.12	70	추진중
		재해대책추진	전노선		1식	527	’21.01∼’21.12	70	추진중
		터널 및 교량관리(전기요금)	전노선		1식	200	’21.01∼’21.12	70	추진중
		터널 및 교량관리	전노선		1식	150	’21.01∼’21.12	70	공사중
		비점오염저감시설 운영 유지관리	55개소		1식	120	’21.01∼’21.12	70	용역중
	소계	재배정 사업	40건			18,078
	재배정사업	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	’21.01∼’21.05	100	준공
		지방도 표지판 정비공사	전노선		1식	100	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도 도로표지(LED) 정비사업	전노선		1식	50	’21.01∼’21.10	70	공사중
		로드킬 방지 시설	홍성, 예산		1식	100	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도 안전시설(방호울타리) 정비	서산, 당진, 홍성		1식	1,000	’21.01∼’21.12	70	공사중
		운행방향 유도레인 설치	아산, 당진, 예산		1식	30	’21.01∼’21.04	100	준공
		횡단보도 바닥 매립형 유도등 설치	당진, 태안		7개소	50	’21.01∼’21.12	70	공사중
		지방도619호 신대도로 배수시설 정비공사	예산	광시	1식	35	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도616,619호 횡배수관 준설공사	예산		3개소	25	’21.01∼’21.07	100	준공
		지방도619호 마교도로 배수시설 정비공사	예산	봉산	1식	10	’21.01∼’21.10	90	공사중
		지방도624호 염치교차로 포장도 보수공사	아산	염치	L=0.7km	85	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도645호 신유도로 포장도 보수공사	아산	도고	L=2.0km	215	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도609호 운월도로 선형개량공사	홍성	홍동	L=0.4km	646	’21.01∼’21.12	30	공사중
		국지도96호 대평도로 인도설치공사	홍성	광천	L=0.2km	93	’21.01∼’21.06	100	준공

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
신규사 업	재배정사업	국지도 96호 용신도로 선형개량공사	태안	근흥	L=0.3km	420	’21.01∼’21.11	50	공사중
		지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.8km	1,503	’21.01∼’21.12	30	공사중
		지방도603호 포지도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.8km	1,546	’21.01∼’21.12	15	공사중
		지방도603호 내리도로 인도설치공사	태안	이원	L=0.2km	76	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도634호 황촌도로 인도설치공사	태안	원북	L=0.4km	270	’21.01∼’21.12	15	공사중
		당진지역 포장도 보수공사	당진		L=7.6km	1,000	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도647호 장고항도로 인도설치공사	당진	석문	L=0.2km	114	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도615호 성북도로 인도설치공사	당진	순성	L=0.1km	59	’21.01∼’21.06	100	준공
		당진지역 송산리,교로리 인도설치공사	당진	석문 정미	L=0.6km	457	’21.01∼’21.12	-	설계중
		지방도607호 황교도로 선형개량공사	보령	웅천	L=0.3km	484	’21.01∼’21.12	15	공사중
		지방도610호 영보리 도로 선형개량공사	보령	오천	L=0.5km	63	’21.01∼’21.08	100	준공
		지방도610호 교성리 인도설치공사	보령	오천	L=0.2km	133	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도606호 수부리 인도설치공사	보령	웅천	L=0.4km	211	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도649호 투명방음벽 조류충돌 방지필름 부착사업	서산 예산	인지 봉산	L=0.8km	100	’21.01∼’21.08	100	준공
		국지도70호 문양도로 포장도 보수공사	서산	음암	L=0.8km	500	’21.01∼’21.09	100	준공
		지방도618호 고풍2지구 급경사지 정비	서산	운산	1식	613	’21.01∼’21.09	100	준공
		지방도(인수인계) 유지보수사업	아산, 홍성		1식	1,033	’21.01∼’21.12	-	설계중
		지방도 교량안전진단	전노선		16개소	670	’21.01∼’21.12	70	추진중
		도화담리 개선공사 실시설계용역	보령	미산	1개소	87	’21.01∼’22.03	-	설계중
		서원교 재가설공사	아산	염치	1개소	670	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도 교량유지관리	삼월1교 등 15개교		15개소	1,397	’21.01∼’21.12	70	공사중
		도화담교 재가설공사	보령	미산	1개소	2,450	’21.01∼’21.12	-	설계중
		지방도616,645호 재해복구 공사(1공구)	예산	대술	L=0.1km	503	’21.01∼’21.06	100	준공
		지방도616,645호 재해복구 공사(2공구)	아산	도고	1개소	315	’21.01∼’21.06	100	준공
		도로 수해 응급복구공사	당진,서산,홍성,예산		1식	70	’21.09∼’21.10	70	공사중
		상습안개구간 시설물 개선사업	전노선		1식	875	’21.09∼’21.12	-	설계중
	소계	위 임 국 도	5건			10,516
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	4,543	’21.01∼’21.12	70	공사중
		도로유지보수	전노선		1식	3,847	’21.01∼’21.12	70	공사중
		도로병목지점개선	전노선		1식	507	’21.01∼’21.12	70	공사중
		위험도로개선	전노선		1식	1,508	’21.01∼’21.12	70	공사중
		국도유지운영(전기료 등)	전노선		1식	111	’21.01∼’21.12	70	공사중