		제349회 도의회 임시회 2024. 1. 23. ~ 2. 2.

- 2024년 -

주요업무 계획 보고

	건설본부

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2024년도 업무여건과 운영방향 Ⅲ. 2024년 주요업무 추진계획 Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황 □ 2023년도 행정사무감사 처리상황 Ⅴ. 참고사항 □ 각종 위원회 현황 □ 주요 사업별 예산확보 현황 □ 간부명단

Ⅰ. 기본 현황

□ 기구 및 기능

① 기 구 : 5과, 2사무소, 24팀

						건 설 본 부
	행정관리과		도로건설과		공공건축1과			공공건축2과		하천개발과			동부사무소		서부사무소
	행정경리		도로1		대형건축			시설유지관리		지역개발			서무		서무
	계약		도로2		건축사업			품질관리		하천1			보수1		보수1
			도로보상		건축지원					하천2			보수2		보수2
										하천보상			구조물관리		구조물관리
													단속		단속

<정․현원 현황>

( 2024. 1. 1. 字 )

구 분		계	일반직 (정원/현원)						비고
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계		115/113	1/1	7/7	26/28	43/38	28/30	10/9
본부		68/66	1/1	5/5	15/17	25/22	14/17	8/4
	행정관리과	13/13	1/1	1/1	2/2	5/8	3/1	1/0
	도로건설과	15/15	-	1/1	3/3	7/4	3/6	1/1
	공공건축1과	17/17	-	1/1	4/5	7/7	3/3	2/1
	공공건축2과	8/7	-	1/1	2/3	1/0	1/2	3/1
	하천개발과	15/14	-	1/1	4/4	5/3	4/5	1/1
동부사무소		24/24	-	1/1	5/5	9/7	7/7	2/4
서부사무소		23/23	-	1/1	6/6	9/9	7/6	0/1

※ 정·현원 제외: 파견자 1명(시설6급), 공무직 71명(행정실무 3, 시험□검사실무 1, 도로보수원 51, 과적단속요원 16)

② 주요기능

	- 행정관리과
	❍ 조직 · 예산 · 청사관리 및 직원 후생 · 복지 ❍ 각종 건설공사 입찰 및 계약, 관급자재 구매
	- 도로건설과
	❍ 지방도 사업 집행계획 수립 및 조정 ❍ 국가지원지방도, 지방도 확포장공사 및 보상업무
	- 공공건축1과
	❍ 공공건축물 건립을 위한 설계·시공 관리·감독 ❍ 사업 의뢰부서의 공공건축물 건립 기획단계 업무 지원
	- 공공건축2과
	❍ 공공건축물 유지관리 및 공공 건축사업 시행 ❍ 건설공사 자재 품질시험 및 건설현장 품질 · 안전점검
	- 하천개발과
	❍ 지방하천 집행계획 수립 및 정비사업 시행 ❍ 지역개발 기반시설 사업 시행
	- 동부□서부사무소
	❍ 지방도 및 위임국도 유지관리 · 보수사업 ❍ 자연 재해대책 수립 · 시행 및 운행제한 위반차량 단속

□ 예산현황

세입 세출
		∙ [세 입 예 산] 8,280백만원 - 수수료 100, 지난년도수입 40, 과태료 140, 교부세 1,000, 지방채 7,000 ∙ [세 출 예 산] 30,021백만원 - 사업예산 17,061, 행정운영경비 12,561, 이자상환 399

❍ 재배정 예산 및 자체 사업 :			456,138백만원			(단위 : 백만원)
도로건설과	공공건축1과	공공건축2과		하천개발과	동□서부사무소
154,904	90,407	31,285		79,131	100,411

Ⅱ. 2024년도 업무여건과 운영방향

	업 무 여 건
◈ 지역건설경기 활성화 및 안전하고 편리한 도로망 확충 요구 - 지역업체 수주 확대를 통한 경제 활력 회복 추진 - 지역 경쟁력을 강화시키는 촘촘한 지역교통 인프라 구축 ◈ 품질 높은 공공건축물 조성 및 친환경적인 하천정비 기대 - 문화 ․ 전시시설 등 품질 높은 공공건축물 조성 - 친환경적인 하천정비 및 경관개선으로 아름다운 하천 조성

	운 영 방 향
◈ 지역업체 및 지역자재 우선 계약을 통한 지역경제 활성화 ◈ 지역간 촘촘한 교통인프라를 구축하여 도민에 교통편의 제공 ◈ 삶의 가치를 높이는 고품질 공공건축물 건립 및 시설유지관리 ◈ 자연재해에 대비한 견실하고 안전한 하천정비사업 추진

지역경제 반영한 미래지향적 건설행정 구현, 도민이 만족하는 안전하고 신뢰하는 건설인프라 구축으로 ‘힘쎈 건설’ 기반 마련

Ⅲ. 2024년 주요업무 추진계획

□ 지역업체 수주 확대를 통한 경제 활력 회복 추진

신속 예산 집행을 통한 지역 경제 활성화

대가 적시 지급을 통한 민생 안정 추진

하자 보수 통합 관리 통한 공공 건축 ‧ 토목공사물 안전 확보

【1】신속한 예산 집행 및 지역업체 우선 수주를 통해 지역경제 활성화 기여

❍ 대금 청구일로부터 3일 이내 신속한 대가 지급(법적 기준 : 5일 이내)

❍ 최대 80% 선금 지급으로 지역업체의 경영활동 지원

❍ 100억 미만* 종합공사 지역제한입찰로 지역 중소업체 보호

* (100억 이상) 지역의무 공동도급 의무화(최대 49%)로 대형업체 기술이전을 통한 지역 기업 경쟁력 확보

❍ 관급자재 지역업체 생산품 우선 구매 및 경쟁구매 시 지역 가점 최대치 부여(도내 7.5점, 도외 1.5점)로 지역업체 수주기회 제공

【2】대금 및 임금 체불 방지로 상생협력 체계 구축

❍ 발주시 3자 합의*(발주처, 도급인, 하도급인) 통해 하도급 대금 직접 지급

* 직접지급 미합의 사업은 ʻ하도급대금 지급보증서ʼ 확인 통해 체불 방지

❍ 노무비 구분관리제* 시행으로 건설근로자 임금체불 방지

* 계약금액에서 노무비는 노무비 이외의 대가와 구분관리하고 발주자가 노무자에게 직접 지급

【3】하자 보수 통합 관리를 통한 도민 안전 확보

❍ 하자 보수 계획* 수립 후 관리 대장 통합 관리 실시

* 계약별 하자 관리토록 되어 있어 본부‧사무소별 계획 수립 관리

- (계약팀) 하자 보수 관리 대장 관리 / (사업부서) 하자 검사 관리

□ 지역 경쟁력을 강화시키는 촘촘한 지역교통 인프라 구축

지역간 촘촘한 교통인프라를 구축하여 도민에 교통편의 제공

적극적인 도로건설사업을 추진하여 지역 경쟁력 강화 도모

□ 2024년 도로건설사업 : 42지구 / 154,904백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	42	154,904	2	244	36	151,660	4	3,000
국지도	9	32,710	1	-	8	32,710	-	-
지방도	29	110,000	-	-	25	107,000	4	3,000
위임국도	2	11,950	-	-	2	11,950	-	-
기 타	2	244	1	244	1	-	-	-

※ 계속지구 : 총 36개지구(공사 10, 신규착공 10, 보상 1* 설계 14, 사후 1**)

*보상지구 : 성환~입장(국지도70호, 천안), **사후환경 : 이호~양곡(국지도96호, 홍성)

【1】지역간 촘촘한 교통인프라 구축으로 도민 교통편의 제공

❍ 사업 지구별 특성에 맞는 추진계획 수립하여 도로건설사업 조속 추진

- (설계지구) 인허가·각종영향평가·심의에 적극대응하여 기간단축 노력

- (보상지구) 보상협의 대민 행정서비스 강화(찾아가는 보상협의 등)

- (공사지구) 현장별 시공계획 사전점검, 효율적인 예산배정을 통해

공사기간 단축 등 도민 교통편의 제공 노력

【2】속도감 있는 도로건설사업 추진으로 지역경쟁력 강화 선도

❍ 2024년 도로건설사업 예산 집중투자로 지역경쟁력 강화 기반마련

- 연내 2개 지구* 차질없이 개통 및 10개 지구** 신규착공

* 준공지구(2개지구) : ❶청양~신양IC(청양, 예산), ❷웅천산업단지진입도로(보령)

** 신규착공(10개지구) : 국지도 3개지구, 지방도 6개지구, 위임국도 1개지구

【3】쾌적하고 안전한 이용자 중심의 도로건설

❍ 지역특성을 반영한 경관디자인 및 교통약자를 배려한 도로건설

❍ 여유부지, 잔여지를 활용한 휴게쉼터 조성 및 제설 전진기지(제설창고) 건설

❍ 사고예방 차원의 맞춤형 도로건설로 사람 중심의 도로건설

□ 지역주민 소통강화 및 안전하고 전문적인 건설행정 추진

사업 추진시 발생민원에 대하여 지역주민과 소통하여 적극 대응

공사관계자 소통강화 및 안전관리체계 강화 통한 사고 제로화 노력

공정하고 투명한 건설공사 추진을 통한 전문성 강화

【1】지역주민과 적극적으로 소통하여 주민불편사항 최소화 노력

❍ 건설공사 추진 시 각종 불편민원이 발생중이며 적극적인 대응이 필요

- 도면 중심의 주민설명회 시 민원발생 적으나, 공사 착공 후 현황변화에 따른 민원발생이 다수 발생하여 현장중심 대응 필요

- 법정 주민설명회 외에 간담회, 수시 현장대응 등 소통을 확대하고 주민의견을 적극수렴하여 이용자 중심의 도로건설공사 추진

【2】도로건설공사 현장관계자 소통강화 및 안전관리체계 강화

❍ 공사관계자(건설본부, 감리, 시공사) 간담회 개최(분기별 / 총 4회)

- 분기별 각 현장의 추진상황(시공계획, 예산집행) 점검과 애로사항 청취 및 해결방안 도출을 통해 소통을 활성화하고 상호 협력체계 강화

❍ 기상상황(폭우, 폭염, 강설 등) 대비 상시대응체계 구축 및 현장안전관리 강화

- 현장 상주인력(감리, 현장소장)을 중심으로 각종 기상상황 발생 시 비상근무반을 운영하고 SNS를 활용한 상시 보고체계 구축

- 계절별 취약시기(해빙기, 장마철), 휴가철·명절기간 등 공사현장 안전, 품질, 시공관리, 근로자 안전 관련 합동점검*을 실시하여 사고제로화 노력

* 중앙부처(국토부, 고용부 등), 道(건설본부, 본청), 책임건설사업관리기술인, 현장대리인 등

【3】공정하고 투명한 건설공사 추진 및 건설행정 전문성 강화

❍ 건설본부기술자문위원회를 운영하여 투명한 기술·공법 적용

- 건설공사(설계, 공사) 추진 시 고효율·고품질 기술 적용을 위해 기술자문위원회*의 기술적 자문을 받아 건설행정 전문성 강화 노력

* 도로, 교통, 토질, 구조 등 건설공사 관련분야 전문가(조교수급이상, 기술사)로 구성

- 설계타당성, 자재공법(신기술·특허) 선정 등 공정하고 투명한 건설기술적용

□ 현장소통과 신속한 용지확보, 적극적인 보상행정 추진

소통하는 보상행정을 통한 도민편의 제공 및 투명하고 공정한 보상 실현

효율적인 보상절차 이행으로 신속한 용지확보 및 원활한 보상추진

□ 2024년 도로·하천 보상 추진계획

❍ 총 37개 지구 (직접시행 30 / 위탁사업 7 ) / 258,285백만원

(단위 : 백만원)

구 분		합 계		계속지구		신규지구
		지구	보상비	지구	보상비	지구	보상비
합 계		37	258,285	18	91,061	19	167,224
도로	자체	17	103,827	11	3,801	6	100,026
		7	125,998	3	86,478	4	39,520
	위탁
하천		13	28,460	4	782	9	27,678

【1】3-ONE 찾아가는 보상서비스를 통한 대민서비스 강화

❍ 보상착수 전 ｢보상설명회｣ 개최 및‘찾아가는 보상 상담창구’운영 등 보상민원 현장 대응으로 도민 불편 최소화 * 23년 240회 현장방문

* 3-one : 한번의 만남으로(one-time), 소유자의 서랍에서 인감만 꺼내면(one-action),

보상완료(one-spot)된다는 의미

【2】토지소유자 참여로 권리보호 및 보상액 공정성 확보

❍ 토지소유자 □ 감정평가사 □ 사업시행자 등으로 구성(8명~16명)된

‘보상협의회’를 운영

❍‘토지소유자 감정평가법인 추천제’적극 홍보 등 보상 협의 시

토지소유자 의견 반영

【3】보상업무 전문성 확보 및 적극적인 보상행정 실현

❍ 드론 정사영상 촬영 및 지적 중첩도 활용으로 보상업무 효율성 증대

❍ 선지정 측량에 따른 편입용지(면적 등) 조기 확정으로 보상 기간 단축

※  선지정 측량 선행 시 보상기간 최대 1.5 ~ 2개월 소요 / 기존 3개월 이상 소요

□ 충남을 대표하는 품격 높은 공공건축물 건립

충남미술관, 충남국제전시컨벤션센터 등 道 대표 문화 ․ 전시공간 조성

효율적 건설사업관리 운영을 통한 공공건축물 품질향상

□ 2024년 공공건축사업 : 29건 / 90,407백만원

(단위 : 백만원)

총 괄		준공사업		계속사업		신규(예정)사업
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
29	90,407	6	14,890	11	67,092	12	8,425
(준 공) 충남스포츠센터, 충남육아종합지원센터, 당진소방서 증축, 충남소방복합시설 건립공사 등 (계속사업) 충남미술관 및 공영주차장, 충남국제전시컨벤션센터, 충남기후환경교육원 조성사업 등 (신규사업) 충남예술의전당, 충남여성가족플라자, 섬 비엔날레주제관 신축공사 등

충남미술관 및 공영주차장	충남국제전시컨벤션센터	충남기후환경교육원	충남예술의전당

【1】도 대표 문화 ․ 전시 공간 조성을 통한 지역 문화 ․ 경제 활성화

❍ “충남도립미술관”, “예술의전당” 건립을 통한 도민 문화 향유  충족과 차별화된 디자인으로 지역 경관의 구심적 역할 수행

- 수준 높은 전시 및 공연예술 유치를 위한 문화기반시설 마련

❍ 대규모 전시, 회의, 공연이 가능한 “컨벤션센터” 건립을 통해 지역  경제 및 문화 성장의 견인차 역할 수행

【2】공공건축물 기획 내실화 및 탄소중립 건축물 건립

❍ 건축 의뢰부서의 기획업무* 지원으로 업무효율 향상

* 사업비 및 사업량 산정, 행정절차 이행사항 사전이행 등

❍ 건축물 건립 단계부터 탄소중립 건축물* 건립 단계적 추진

* 디지털 기술 적용(공장제작, 건설자동화 등), 신재생 에너지 사용 등 Zero 에너지 구현

□ 2027 하계세계대학 경기대회 지원 및 안전․품질관리 강화

2027 하계세계대학 경기대회 성공적 개최를 위한 충남국제테니스장 건립

추진 및 기존 건축물의 기능성·안전성 확보를 위한 시설유지관리 추진

부실시공 및 중대재해 예방을 위한 현장 중심의 선제적 관리

【1】2027 하계세계대학경기대회 충남국제테니스장 건립 추진

❍ 대회일정(’27. 8. 1.~ 8. 12.) 감안 적기에 시설물 준공토록 공정관리 철저

- (상반기) 건설사업관리용역 및 설계․시공일괄입찰 추진 (하반기) 공사착수

* ‘충남국제테니스장 조성 사업’ 총예산 : 134,837백만원(국비 40,451, 도비 94,386)

[2024년 예산 : 31,107백만원(설계·시공 10,454/감리 2,468/부지매입 9,100/예비비 등 9,085)]

└ 2024년 공공건축2과 예산 : 31,285백만원(테니스장 건립 31,107, 서부사무소 창고수리 178)

**  건립규모 : 면적 22,492㎡, 센터코트, 쇼코트, 실내코트 등 국제공인 코트 20면

【2】道공공건축물 유지관리를 통한 쾌적한 사무환경 조성

❍ 유지관리 대상 공공건축물 실태조사·점검으로 노후시설물 모니터링

- 보수가 필요한 시설물에 대해 적기 예산확보 노력 및 사업추진

*  유지관리 대상 공공건축물 실태조사 및 해빙기(3월), 우기(7월) 안전점검 실시

** 점검결과를 반영하여 보수·보강이 필요한 시설물 예산확보 및 공사 추진

【3】건설현장 촘촘한 품질·안전관리로 부실시공 및 안전사고 제로화

❍ 정확하고 철저한 품질검사로 건설공사 품질향상 및 안전시공 지원

* 성토용 흙, 아스콘, 콘크리트 등(21분야 107종목) 건설자재 품질시험 등 추진

❍ 건설현장 품질 ․ 안전점검(분기별) 및 중대재해 의무이행 점검(반기별) 등 현장 중심 안전관리를 통한 중대재해 예방

*  해빙기, 우기, 폭염기, 동절기 취약시기 대비 현장점검 품질·안전관리단 운영

** 현장근로자 등 공사관계자 대상 안전교육 실시(반기별)로 안전의식 제고

□ 안전하고 친환경적인 하천정비 추진

자연재해에 대비한 견실하고 안전한 하천정비사업 추진

친환경적인 하천정비 및 경관개선으로 아름다운 하천 조성

□ 2024년 하천사업 : 33지구 / 72,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
지방하천	33	72,000	3	5,531	27	64,969	3	1,500

❍ 친환경 지방하천 정비사업 추진

- 총 33지구 : 준공*3, 계속(공사 8, 설계·보상 19), 신규**3

*준공(명천천, 중산천, 장승천) / **신규(유구천, 갈두천, 읍내천)

【1】신속한 사업 추진으로 예산 조기 집행 및 재정집행률 향상

❍ (공사지구) 신속한 공사 추진으로 예산 조기 집행 재정집행률 향상

❍ (설계지구) 진행중인 설계지구는 신속한 마무리 후 보상·공사발주 신규 설계지구는 조기 발주 추진

【2】자연재해 및 친환경적인 하천사업 추진

❍ 경관과 조화되는 친환경 자재사용 및 하천정비로 생태공간 조성

❍ 기후변화에 따른 자연재해 대비 견실하고 안전한 하천정비 추진

【3】신뢰받는 하천정비사업 구현으로 안전사고 예방

❍ 하천사업 설계단계부터 주민참여 확대로 도민 신뢰도 향상

❍ 민원 공사관계자와 현안사항 공유(간담회 등) 소통으로 신속한 사업 추진

❍ 안전사고 예방을 위한 점검 및 교육 강화로 사고 발생률 ZERO화

□ 도민의 삶의 질 향상을 위한 지역개발사업 추진

산업단지 지역 교통 여건 개선으로 도로 이용자 편의 도모

주민 편의시설 확충 및 지역경제 활성화를 위한 기반시설 조성

□ 2024년 지역개발 사업 : 4지구 / 7,131백만원

(단위: 백만원)

구 분	사업량 (km)	사 업 비				비고
		합 계	기시행	2024년	장 차
계	40.55	47,187	2,093	7,131	37,963
음봉 일반산업단지 진입도로 개설공사	1.9 (8차로)	30,000	506	3,431	26,063	설계
내포~삽교호 자전거도로 정비사업	36.4	3,087	87	3,000	0	공사
행정저수지 생태탐방로 연장사업	1.25	2,100	700	700	700	공사
안면도 관광지 제방도로 확포장공사	1.0 (4차로)	12,000	800	0	11,200	설계

※ 안면도 관광지 이월예산(800백만원)으로 사업(설계) 추진

【1】음봉 일반산업단지 진입도로 개설

❍ 산업단지 개발 등 교통 유발 요인에 대비한 확□포장사업 추진

⇨ ‘24년도 실시설계용역 완료 및 보상 추진

【2】내포~삽교호 자전거도로 정비

❍ 친환경 교통수단 확산을 위한 자전거 이용 환경(시설) 조성

⇨ 실시설계 기시행(’23년도) 완료, 24년도 공사 추진

【3】행정저수지 생태탐방로 연장

❍ 대둔산도립공원 탐방객들에게 보다 쾌적한 탐방환경 제공

⇨ 실시설계 기시행(’23년도) 완료, 24년~25년도 공사 추진

【4】안면도 관광지 제방도로 확포장

❍ 관광지 연계기능 강화로 서해안 지역발전 및 관광 활성화에 기여

⇨ ‘24년 실시설계용역 추진

□ 안전중심의 쾌적한 도로유지관리사업 추진

도로의 기능 보전과 이용자 편의를 위한 적기 유지보수 추진

자연재해에 대한 철저한 대비․대응으로 안전한 도로환경 조성

□ 2024년 도로 유지보수 사업 : 227지구 / 100,411백만원

(단위: 백만원)

구 분	합 계		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	227	100,411	52	17,378	175	83,033
자체사업	97	14,547	8	837	89	13,710
재배정사업	122	69,503	40	10,403	82	59,100
위임국도	8	16,361	4	6,138	4	10,223

【1】선제적 도로 유지보수를 통한 안전 위험 요소 사전 제거

❍ 교량□터널 등(총 644, 동부 344 서부 300) 주요 시설물에 대한 안전점검 및 유지관리 추진

- 주기적으로 각종 안전점검·진단 실시 및 보수․보강공사 추진

❍ 도로 유지보수 사업의 전년도 사전설계로 조기 발주와 시공 ․ 품질관리 철저

- 위험도로 구조개선(13개소 65억원), 인도 설치(15개소 67억원), 교차로 개선(14개소, 75억원), 배수로 등 도로보수(623억원) 등

❍ 체계적인 포장 관리 및 도로 순찰 강화로 도로 환경 개선

- 스마트 도로유지관리시스템 우선순위에 따른 포장도 보수 추진(14개 시·군, 209.5억원)

- 해빙기, 장마철에 대비한 수시 도로순찰 및 포트홀 등 소파보수

【2】자연재해에 대비한 철저한 사전 준비 및 신속 대응

❍ 겨울철 : 신속하고 선제적인 제설작업 추진으로 교통불편 최소화

- 충분한 제설자재․장비 확보 및 단계별 비상근무 철저

- 환경오염 예방 및 시설물 부식 방지를 위해 친환경 제설재 사용 확대

- 자동염수분사장치* 확충을 통한 첨단 제설시스템 구축

* ’23년까지 28개소(동부 13, 서부 15), ‘24년계획 6개소(동부 3, 서부 3)

❍ 여름철 : 재해 취약구간에 대한 사전정비 및 응급복구 태세 확립

- 급경사지 등 위험구간 계측관리 및 순찰강화 상습 퇴적지역 배수로 준설

- 응급복구 장비‧인력‧자재의 사전확보 및 유관기관 협조체계 구축 운행제한 위반차량 강력 단속

도로 파손방지 및 원활한 도로 유지관리를 위한 단속강화

대형공사장 등 과적근원지 과적예방을 위한 사전계도 실시

운행제한 위반차량 과태료 체납에 대한 징수활동 강화

□ 운행제한 차량 단속현황                          (단위: 대수)

구분	검 차 대 수			적 발 대 수
	2021년	2022년	2023년	2021년	2022년	2023년
합계	10,120	7,224	10,930	417	265	253
동부	6,265	5,349	5,351	143	133	112
서부	3,855	1,875	5,579	274	132	141

【1】도로파손방지 및 원활한 도로 유지·관리를 위한 단속강화

❍ 주요 과적 근원지(대형공사장 등) 및 위험 교량 노선 이동단속

❍ 휴일 □ 조간 □ 야간 이동단속 : 민원 발생 및 필요시

【2】과적행위 근절을 위한 유관기관 합동단속 추진

❍ 국토관리사무소, 시·군, 경찰서 등 유관기관 합동단속 실시

※ ’23년 합동단속 실적 : 32회 / 검차 576대 / 적발 24대

【3】근무환경 개선을 위한 이동검문소 설치공사 추진

❍ 충분한 진입차로 확보 및 운행제한 차량 연속 측정으로 업무능률 향상

❍ 계측대와 차도 구분을 위한 가드레일 설치로 단속지점 근무환경 개선

- ’23년 준공(논산 2, 부여 1), 공사중(보령 2) / ’24년 4개소 설치 예정(금산 1, 천안 1, 예산 2)

【4】운행제한 위반차량 과태료 체납에 대한 징수활동 강화

❍ 체납고지서 수시 발송 및 전화·문자 등을 통한 징수 활동 강화

❍ 체납자 재산조회(예금·차량·부동산)를 통한 압류실시

< 최근 3년간 징수 현황>

(단위: 백만원)

연 도	동부사무소			서부사무소
	압류건수	수납건수	징수액	압류건수	수납건수	징수액
2021	54	14	8	122	22	19
2022	20	25	16	13	31	26
2023	50	24	23	77	29	29

Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황

□ 2023년도 행정사무감사 처리상황

< 총  괄 >

(단위 : 건)

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
-	26	3	23	-	-
시정요구	-	-	-	-	-
처리요구	8	1	7	-	-
제안사항	18	2	16	-	-

< 완료사항 >

❶ 지방도 649호 도로 요철 보수공사 실시(건설교통국→건설본부 이관, 처리요구)

❍ 현재 서산~부석 도로포장상태 조사 및 분석용역(’23.12., 도로건설과)을 착수하여 도로포장 불량 원인 분석 및 대안공법 과업 수행 중

❍ 또한, 요철이 심한 구간(부석면 대두리 217-1번지 포함)에 대하여 도로 포장도 보수공사 실시 완료(’23.11., 서부사무소)

⇨ (도로건설과) 용역수행을 통해 원인분석 및 대안마련(’23.12.~’24.03.)
(서부사무소) 지속적인 모니터링 및 유지보수 실시 예정

❷ 실질적, 효과적 과적 차량 단속 필요(제안사항)

❍ 운행제한 위반차량 단속 강화에 대한 적극적인 조치로

- 운행제한 위반차량에 대하여 후속조치(회차, 운행중지, 분리운송) 적극 시행

- 국토관리사무소, 시·군 및 경찰서 등 유관기관 월 1회 이상 합동단속 실시

- 신규 이동검문소 설치공사 추진으로 단속지점 확보를 통한 단속강화

⇨ 운행제한 위반차량 근절 및 경각심 고취를 위한 야간 및 주말에  단속실시 및 불시이동단속 추진하고 관계기관 협업을 통해   합동단속과 계도 활동으로 효과적인 단속추진

❸ 적발과 계도를 병행한 과적차량 단속 필요(제안사항)

❍ 토취장·대형공사장·골재채취장 등 해당업체 방문 과적예방 홍보

❍ 운행제한 차량 단속 시 검차와 계도(전단지 배포) 활동을 병행하여 실시

❍ 과태료 부과 후 체납시 재산압류 등 강력 조치

⇨ 주기적인(월2회 이상) 예방홍보 및 유관기관 합동단속시 계도활동 추진과 적발 차량에 대하여는 강력한 행정명령 조치

< 추진중인 사항 >

❶ 행정사무감사 자료 작성 철저(처리요구)

□ 행정사무감사 작성 관련 간부 회의(’23.11.14.) 및 제349회 정례회 대응 업무보고 개선 방안 논의(’23.12.19.) 등 의회 보고자료 작성 개선방안에 대하여 지속적인 논의 추진

⇨ 과장 및 팀장 책임하에 도의회 제출 및 보고자료 철저히 검토 확인과 동부□서부 사무소 사업내용 일치화 등 향후 제출자료 대응 철저

❷ 건설본부 인력보강 및 본부장 직급 상향 필요(처리요구)

□ 인사부서에 인력보강 문제를 애로 및 건의사항으로 지속 요청하고 있으나, 기준인건비, 정원동결 등 제도적 문제로 수용되지 않음

□ 본부장 직급 상향은 현재 ｢지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정｣에 따라 행정안전부와 사전 협의 필요

⇨ 조직·인사부서에 애로사항 건의 등 지속 협의를 통한 해결방안 강구

❸ 포트홀 대응체계 구축 필요(처리요구)

□ 포트홀은 중차량 통행 및 포장 노후화 등으로 인해 발생되고 있으며, 지속적인 노선점검 등을 실시하여 포트홀 발생, 발견시 도로보수원을 통해 즉시 보수하고,

❍ 포트홀 다수 발생구간은 절삭 후 덧씌우기 포장으로 전면 보수 시행 추진

⇨ 철저한 품질시공관리 및 도로유지관리시스템을 활용하여 체계적인 포장 유지관리 추진으로 교통사고 예방 도모

❹ 도로보수원 즉시 보고 체계 확립(처리요구)

❍ 도로보수원 노선 순찰을 통해 위험구간 발견시 유선으로 즉시 보고

❍ 현장 상황이 담긴 사진이나 현장여건을 파악하여 부서장에게 보고

⇨ 긴급 사항은 선 조치후 보고 및 중요사항(예산수반 등)은 보고서 형식의 보고 후 조치

❺ 하자보수관리대장 작성□보관 필요(처리요구)

□ 현재 발주부서에서 하자보수 관련 사항을 개별 관리 중이나 계약  부서에서 계획 수립 후 하자보수관리 대장 통합 관리 실시

⇨ (계약팀) 하자 보수 관리 대장 관리 / (사업부서) 하자 검사 관리

❻ 천안 성거읍 국지도 즉시 인도 정비(처리요구)

□ ｢국지도23호 인도구간 보행개선 공사｣를 추진하여 상태가 불량한 L=2.5km 구간에 대하여 우선 사업 시행 예정

⇨ 인도 전구간(10km) 보수는 대규모 예산이 소요되어 연차별 사업추진

❼ 지방도 정비사업 공정률 제고 필요(건설교통국→건설본부 이관, 처리요구)

❍ 사업의 조속한 추진을 위해 분기별 공사관계자 회의 등 지속적인 추진상황 점검 및 애로사항 해소를 위해 노력하고 있으나,

❍ 보상협의 지연 및 공사구간 내 지장물(한전주, 가스관로, 통신주 등) 이설 지연 등으로 인해 공사추진이 지연되는 경우 발생하고 있음

⇨ 보상협의 지연시 토지수용절차 조기이행과 지장물 관련 해당기관*과 간담회 등을 개최하여 업무 협조 요청(’24.上) 및 지속적인 현장관리로  속도감 있는 사업추진 및 공정률 제고

* 한국전력공사, 한국가스안전공사, KT 등 통신사

❽ 건설 폐기물 임시 야적 관리 철저(제안사항)

□ 도로유지 보수 후 발생된 폐기물을 양사무소 창고 및 야적장에

보관 후 폐기물처리용역을 통해 처리중으로,

□ 우천 시에는 폐기물로 인해 토양오염이 되지 않도록 덮개를 활용하여 관리중에 있음

⇨ 관리도로 노선 연장 및 공사량이 증가되어 폐기물이 매년 증가  하는 실정으로, 2024년 보관 창고를 설치 추진

❾ 도로 맨홀뚜껑 수평유지 필요(제안사항)

□ 작업구(상하수도, 전기, 통신 등 설치 관리를 위한 출입구) 관리자는  각 시군 상하수도 부서, 한국전력공사 등이며,

□ 도로관리청은 작업구 주변 도로 포장의 유지관리를 담당

⇨ 양사무소 도로보수원 수시 순찰 및 전수조사 실시하여 해당 관리책임기관에 보수 요청 및 소규모공사인 경우 자체 보수 예정

건설본부 조직 위상 강화 필요(제안사항)

□ 인력 배치 및 부서 인센티브 강화 등 애로 및 건의사항 지속 요청

□ 2024년 격무부서로 4개팀*이 선정되어 가점(최대 2.4점) 근무평정 시 반영

⇨ 향후 실질적인 인사적 인센티브를 받을 수 있도록 건설본부    행정환경, 사무량 분석에 따른 애로 및 건의사항 요청 등 실무  차원에서 꾸준한 소통 및 대응 추진

* 도청 전체 10개팀 중 건설본부 4개팀 선정(행정관리과 계약팀, 도로건설과 도로1팀, 동부사무소 보수1팀, 서부사무소 보수1팀)

휘도 및 차선 시인성 개선 대책 마련(제안사항)

□ 준공검사 시 보유중인 휘도 측정기를 통하여 검사 후 준공 처리하고, 교통량 등을 고려하여 도로 환경에 맞는 시공방식 선정 운영 중이며

□ 유리알 등 차선도색에 사용되는 자재에 대한 검증을 위해 관급자재 적극 사용

⇨ 국토교통부 지침에 따라 휘도 검사 등 품질 관리에 철저를 기하며,  주기적인 순찰 등을 통해 시인성이 떨어지는 노선에 대해서는   도색공사를 즉시 추진

도로의 차선 시인성 개선(건설교통국→건설본부 이관, 제안사항)

□ 준공검사 시 보유중인 휘도 측정기를 통하여 검사 후 준공 처리하고, 교통량 등을 고려하여 도로 환경에 맞는 시공방식 선정 운영 중이며

□ 유리알 등 차선도색에 사용되는 자재에 대한 검증을 위해 관급자재 적극 사용

⇨ 국토교통부 지침에 따라 휘도 검사 등 품질 관리에 철저를 기하며,  주기적인 순찰 등을 통해 시인성이 떨어지는 노선에 대해서는   도색공사를 즉시 추진

발광형 표지판 설치 확대(제안사항)

□ 발광형 표지판은 야간 운전시 시인성을 높여 교통사고 예방에 도움이

되므로 대상지 조사를 통해 적극 설치 예정(매년 3억원 투자)

⇨ 대규모 사업비가 소요되므로 필요 구간을 파악하여 우선순위를 결정하여 연차별 추진

공주지역 하천관리 관심 필요(제안사항)

❍ ‘중산천 지방하천 정비사업’ 2023년말 완료 예정이었으나,

❍ 민원사항 반영, 호우피해 복구 공사 추진, 현장여건 등의 사유로       사업이 부득이 지체되어 24년 1월 현재, 공사 진행중에 있음.

⇨ 신속히 잔여 공사를 마무리하여 3월중 준공 추진

민원 대응 방안 마련(제안사항)

□ 건설본부에 제기되는 지속적인 민원 증가를 적극 해소하기 위해 주민설명회*, 이장단협의회 설명회** 등 각종 설명회 개최

* 주민설명회: 공사 시행 전, 지역주민□용역사□관계공무원 등 의견 및 애로사항 청취

** 이장단협의회 설명회: 추진중 및 추진예정인 지역현안사업에 대해 지역이장단□공무원 설명

⇨ 공사 시행 이후에도 보상설명회 등 지속적인 주민간담회를 개최하여 각종 민원 최소화 및 적극 대응

건설장비 내용연수 관리 철저(제안사항)

□ 도로보수용 장비 관리 운영계획 수립(’24년 2월)하고, 매월 도로보수용 장비 월간 정비·점검을 통해 최적의 상태 유지하고 있으며,(총 249대 : 차량 31대, 건설기계 18대, 제설장비 154대, 기타 46대)

□ 한정된 예산의 효율적 사용을 위해 사용빈도가 높고, 내용연수가초과된 순으로 장비 교체 추진

⇨ 보유장비는 고가의 장비로 내용연수 초과하더라도 자원낭비 최소화를 위해 지속적인 점검·정비 및 안전검사를 통해 활용 하고,

노후로 운영 불가한 장비 및 수리한계 금액 도달한 장비에 대한 교체계획을 수립하여 예산반영을 통해 순차적 교체추진

잔여지 매수기준 개정 필요(제안사항)

□ 잔여지 매수가능 면적(330㎡) 기준 외 주변토지와 활용성, 농기계 진입,

건축 여부 등 현장 상황을 적극 검토하여 잔여지 매수민원 해결 추진

※ (소규모 토지*) 잔여지 비율 50%이하 매수 가능, (일단의 토지) 잔여지 비율 25%이하 1.5배 완화** : 2022. 4. 14. 개정

* 편입전 일단의 토지면적이 택지 90~1,000㎡, 농지, 산지, 그 밖의 토지 330㎡이상

** 농지의 경우 495㎡까지 완화 적용 가능

□ 잔여지 매수 불가 시 중토위 잔여지 수용청구 절차를 통하여 소유자  의견이 적극 반영되도록 추진

당진지역 도로건설 사업에 지속적 관심 필요(제안사항)

□ 당진지역 도로 승격(시도 1호 → 지방도609호)으로 원활한 도로유지 관리를 위해 해당도로 인수·인계 진행중

□ 인수·인계 전까지 당진시에서 유지관리 중이며, 24년도 타당성 조사 평가용역 추진 예정

⇨ 도로철도항공과와 협의하여 조기에 공사추진될수 있도록 노력

친환경 제설재 구매 확대 필요(제안사항)

□ 제설용 자재는 소금, 염화칼슘, 친환경 제설재가 쓰이고 있으며,

□ 친환경 제설제는 제설효과가 타 제설제에 비하여 효과가 미흡하고 구입비용*이 높은 단점이 있어, 신속한 제설작업을 요구하는 민원 증가로 소금 및 염화칼슘 위주로 제설작업 중이며

* 친환경 제설재(440천원/톤)의 경우 비용이 소금(161천원)의 3배, 염화칼슘(370천원)의 1.5배

⇨ 신속한 제설을 위해 효과성이 좋은 염화칼슘, 소금 등을 우선 사용하고 있으나, 친환경적 측면을 고려하여 사전 살포용으로 사용하는 등 점진적으로 구매 확대* 추진

* ‘21~’22년 709톤, ‘22~’23년 919톤, ‘23~’24년 399+α(추가구입예정)

물품 등 선정기준 일원화를 위한 내부 방침 필요(제안사항)

□ (관급자재 대상) 판로지원법에 따른 직접지급대상, 지방계약법에

따라 효과적인 물품(ex 강관파일) 등

□ (구매절차) 나라장터 종합쇼핑몰 등록물품의 경우 조달계약을 통해

구매하고, 미등록 물품은 입찰공고를 통한 일반경쟁으로 구매

⇨ ①종합쇼핑몰 3자단가, ②종합쇼핑몰 2단계 경쟁, ③일반입찰 등

여러 방안 검토 추진

직원들 외부교육 기회제공 필요(제안사항)

□ 건설 분야 공무원 역량 강화 교육, 직무 관련 동아리 활동 등 내부적으로 다양한 교육 및 워크숍 등이 운영되고 있으나, 현안업무 등으로 참여가 어려운 실정임

⇨ 직무 관련 외부교육 수시 공지를 통한 적극 참여 독려 및 관련

부서에서 운영하는 직무분야 워크숍 참석

건설현장 지역상황 고려 필요(제안사항)

□ 건설현장 품질·안전 점검 실시: 연4회(해빙기·우기·폭염·동절기)

□ 현장소장·안전관리자·감독관 등 건설관계자 안전교육 실시

⇨ 기존 점검표 수정·보완을 통해 건설본부 여건에 맞는 점검 추진, 공사 착공전 주민설명회 추진 및 현수막 설치로 사고 미연 방지

공주 우성~이인 도로건설공사 착공식 홍보 필요(건설교통국→건설본부 이관, 제안사항)

□ 공사 착공(’23. 5.) 이후 현장사무실 제작, 가설교량 공장제작 등 현장에서의 공사 추진이 없어 착공식 등 별도 행사 미실시

※ 공사 시·종점부 플래카드 부착하여 사업 홍보중(’23.11.~)

⇨ 무재해 및 안전시공을 기원하고자 안전기원제 추진(’24.상/현장내) 예정이며 주민 홍보를 위하여 준공식 등은 사업추진 여건을 고려하여 시행

Ⅴ. 참 고 사 항

□ 각종 위원회 현황

□ 충청남도건설본부 기술자문위원회

❍ 목  적 : 충청남도 건설본부에서 추진하는 건설공사에 대한 설계 및 시공 검토, 공사 방법 등 기술적 제언 및 자문

❍ 구   성 : 총 73명(당연직 8명, 외부위원 65명)

- (당 연 직) 건설본부장(위원장), 행정관리과장, 도로건설과장,
공공건축1과장, 공공건축2과장, 하천개발과장,
동부사무소장, 서부사무소장

- (외부위원) 건설분야 6급 이상 공무원, 대학의 조교수급 이상 및 기술사 자격을 취득한 자

(’24. 1. 기준)

구분	합계	도로	교통	토질	구조	하천	건축	조경	기계	전기	소방	환경
계	65	7	1	10	10	10	15	2	2	3	3	2

□ 주요 사업별 예산확보 현황

① 총괄

(2024. 1.)

부서별		지구수	사업량(km)	사업비(백만원)
총 계		340	403.37	456,138
도로건설과	계	42	211.82	154,904
	국 지 도	9	78.49	32,710
	지 방 도	29	129.45	110,000
	국 도	2	2.13	11,950
	기 타	2	1.75	244
공공건축1과		29	-	90,407
공공건축2과		5	-	31,285
하천개발과	지방하천	33	151	72,000
	지역개발	4	40.55	7,131
동□서부사무소		227	-	100,411

② 2024년 부서별 사업추진 세부현황

【1】도로건설과 사업 현황

(단위 : 백만원, ’24년 1월 기준)

총 괄		’24년 준공지구		계 속 지 구		’24년 신규지구
◀ 42지구 / 154,904 ▶		◀ 2지구 / 244 ▶		◀ 36지구 / 151,660 ▶		◀ 4지구 / 3,000 ▶
국지도 9 / 32,710		국지도 1 / -		국지도 8 / 32,710		국지도 - / -
지방도 29 / 110,000		지방도 - / -		지방도 25/ 107,000		지방도 4 / 3,000
위임국도 2 / 11,950		국 도 - / -		국 도 2 / 11,950		국 도 - / -
기 타 2 / 244		기 타 1 / 244		기 타 1 / -		기 타 - / -

사 업 명		위치		사업량	사 업 비(백만원)				사업기간 (공사기간)	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		전 체	기시행	2024년	장 차
총 계				42지구 (211.82㎞)	1,948,740	451,790	154,904	1,342,046
국 지 도				9지구 (78.49km)	583,586	195,747	32,710	355,129
준공	청양~신양IC (국지70호)	청양 예산	청양 신양	16.2km	60,537	60,537	-	-	’17.05. ~’24.03.	90	공사
계속	당진~서산 (국지70호)	당진 서산	합덕 운산	19.1km	186,476	109,546	22,100	54,830	’19.04. ~’28.03.	20	공사
	우성~이인 (국지96호)	공주	우성 이인	0.89km	29,521	2,234	5,114	22,173	’23.05. ~’28.04.	5
	성환~입장(국지70호)	천안	성환	10.3km	111,800	3,763	286	107,751	’18.01. ~’28.12.	-	보상
	장척~목현 (국지96호)	홍성	은하	3.67km	34,578	5,230	742	28,606	’21.01. ~’27.12.	-	신규 착공
	임천~강경 (국지68호)	부여 논산	임천 강경	9.88km	49,615	6,021	347	43,247	’19.01. ~’27.12.	-
	진산~금산 (국지68호)	금산	진산 금산	10.0km	60,816	8,130	3,835	48,851	’20.01. ~’28.12.	-
	충북도계~탑원 (국지57호)	천안	병천	3.60km	50,100	143	286	49,671	’23.01. ~’28.12.	-	설계
	이호~양곡 (국지96호)	홍성	서부	4.85km	143	143	-	-	’24.01. ~’26.12.	-	사후 환경
지 방 도				29지구 (129.45km)	1,309,360	235,089	110,000	964,271
계속	어천~공주(4차) (지625호)	공주	우성	3.95km	48,900	30,383	7,000	11,517	’20.12. ~’26.12.	35	공사
	오천우회 (지610호)	보령	오천	3.98km	22,449	17,959	3,490	1,000	’20.10. ~’27.04.	74
	무창포IC~웅천 (지606호)	보령	웅천	1.40km	15,626	10,215	1,661	3,750	’20.06 ~’25.05.	34
	구룡~용두 (지610호)	청양	남양	1.30km	10,795	3,275	4,500	3,020	’23.03. ~‘26.03.	1
	화성~장곡 (지609호)	청양	화성	2.40km	13,306	3,400	6,500	3,406	’23.03. ~’26.06.	3
	삭선~원북 (지603호)	태안	태안 원북	6.08km	46,514	28,000	6,000	12,514	’23.03. ~’‘28.03.	7
	고암~역재 (지609호)	홍성	홍성	1.24km	11,000	3,862	1,000	6,138	’23.03. ~’25.03.	1
	원북~방갈1 (지634호)	태안	원북	1.25km	12,698	1,663	3,000	8,035	’21.01. ~’25.12.	-	신규 착공
	기지시~한진 (지619호)	당진	송악	9.36km	143,171	91,098	22,400	29,673	’17.01. ~’30.12.	-
	밀두~대음 (지623호)	아산	인주	3.58km	49,170	1,360	17,000	30,810	’18.01. ~’27.12.	-
	두마~노성 (지643호)	논산 계룡	상월 엄사	9.25km	116,590	31,087	8,000	77,503	’18.01. ~’30.12.	-
	산동~상덕 (지624호)	아산 천안	음봉 직산	5.61km	128,659	3,791	10,000	114,868	’18.01. ~’30.12.	-
	서면~비인 (지624호)	서천	서면 비인	5.09km	29,130	1,436	4,500	23,194	’20.01. ~’27.12.	-
	복수~진산 (지635호)	금산	복수 진산	4.28km	107,100	1,646	4,000	101,454	’20.01. ~’30.12.	-	설계
	광시~운곡 (지604호)	예산 청양	광시 운곡	6.74km	46,490	1,565	800	44,125	’20.01. ~’29.12.	-
	노화~평촌 (지619호)	예산	응봉	3.38km	34,723	889	800	33,034	’20.01. ~’29.12.	-
	동해~부곡 (지629호)	공주	유구 사곡	7.23km	44,021	1,220	800	42,001	’20.01. ~’29.12.	-
계속	왕암도로 (지643호)	논산	가야곡	1.00km	15,440	260	2,000	13,180	’20.01. ~’25.12.	-	설계
	무창포IC~웅천2 (지606호)	보령	웅천	1.30km	8,400	205	749	7,446	’23.01. ~’29.12.	-
	대봉~흥산 (지606호)	청양	남양	4.60km	19,420	305	800	18,315	’23.01. ~’29.12.	-
	홍동우회 (지609호)	홍성	홍동	1.20km	8,500	305	800	7,395	’23.01. ~’27.12.	-
	신계~관정 (지6691호)	천안	목천	3.40km	22,090	305	400	21,385	’23.01. ~’28.12.	-
	장선~복룡 (지643호)	공주	이인	4.00km	20,990	305	400	20,285	’23.01. ~’28.12.	-
	당정~남전 (지617호)	서천	종천	5.50km	16,500	305	400	15,795	’23.01. ~’28.12.	-
	인주~염치 (지617호)	아산	인주	11.67km	179,078	250	-	178,828	’23.01. ~’28.12.	-	타당성 조사
신규	원북~방갈2 (지634호)	태안	원북	10.25km	53,600	-	1,000	52,600	’24.01. ~’29.12.	-	신규설계
	신가~구만 (지619호)	예산	삽교 고덕	6.00km	7,000	-	400	6,600	’24.01. ~’29.12.	-
	장암~석성 (지611호)	부여	장암 석성	1.10km	30,000	-	1,000	29,000	’24.01. ~’29.12.	-
	연산~조동1 (지691호)	논산	연산 벌곡	3.31km	48,000	-	600	47,400	’24.01. ~’29.12.	-
위임국도				2지구 (2.13km)	36,905	10,593	11,950	14,362
계속	합곡지구 (국도29호)	부여	장암	1.24km	18,000	638	3,000	14,362	’21.01. ~’25.12.	-	신규 착공
	원청사거리 (국도77호)	태안	남	0.89km	18,905	9,955	8,950	-	’20.07. ~’24.11.	35	공사
기타				2지구 (1.75km)	18,889	10,361	244	8,284
계속	효제리~위라리 (국도96호)	청양	운곡	0.75km	8,250	1,300	-	6,950	’21.01. ~’24.12.	-	설계
준공	웅천산단진입도로 (지606호)	보령	웅천	1.0km	10,639	9,061	244	1,334	’20.06. ~’24.07.	52	공사

【2】공공건축1과 사업 현황

(단위 : 백만원, ’24년 1월 기준)

총 괄		‘24년도 준공사업		계속사업		‘24년도 신규사업
◀ 29건 / 90,407 ▶		◀ 6건 / 14,890 ▶		◀ 11건 / 67,092 ▶		◀ 12건 / 8,425 ▶

사 업 명 (준공)			사업위치		사업량	사 업 비(백만원)				사업기간 (연□월)	공정률 (%)	비고
			시군	읍면		전 체	기시행	2024년	장 차
총 계					29건	843,332	237,999	90,407	514,926
구분	연번	소 계			6건	159,947	145,057	14,890	0
준공 (6)	1	건설본부경관녹화조성사업	예산군	예산읍	경관개선 1,710㎡	478	478	-	-	’23.06.～ ’24.01.	95	공사중
	2	충남 스포츠센터건립공사	예산군	삽교읍	지하1층 지상2층 13,344㎡	53,117	48,617	4,500	-	’18.08.～ ’24.10.	70	공사중
	3	충남 육아종합 지원센터 건립공사	예산군	삽교읍	지하2층 지상3층 3,459㎡	15,127	15,127	-	-	’20.10.～ ’24.06.	35	공사중
	4	당진 소방서 증축공사	당진시	채운동	지하1층 지상4층 2,300㎡	9,864	9,864	-	-	’21.07.～ ’24.09.	10	공사중
	5	충남연구원 태양광 발전시설 설치사업	공주시	금흥동	태양광발전설비 136kW	339	11	328	-	’23.03.～ ’24.09.	0	공사 발주 단계
	6	충남소방 복합시설 건립공사	청양군	비봉면	지하1층 지상4층 17,042㎡	81,022	70,960	10,062	-	’17.09.～ ’24.05.	65	공사중
계속 (11)	연번	소 계			11건	437,916	85,282	67,092	285,542
	7	충남국제 전시 컨벤션센터 건립공사	천안시	불당동	지하1층 지상4층 52,223㎡	192,697	6,069	-	186,628	’21.10.～ ’27.12.	-	실시 설계, 공사 발주 단계
	8	축산기술전문교육관신축사업	청양군	정산면	지상1층440㎡	1,961	-	1,961	-	’23.11.～ ’25.06.	-	설계 발주 단계
	9	충청권통일플러스센터신축사업	홍성군	홍북읍	지하1층 지상3층 1,625㎡	10,000	4,000	4,853	1,147	’22.12.~ ’25.12.	60	설계중

사 업 명 (계속)			사업위치		사업량	사 업 비(백만원)				사업기간, (의뢰예정일)	공정률 (%)	비고
			시군	읍면		전 체	기시행	2024년	장 차
	10	충남 장애인 가족 힐링센터	태안군	안면읍	지하1층 지상4층 6,550㎡	26,765	6,873	19,892	-	’21.07.～ ’26.03.	80	설계중
	11	동물위생 시험소 당진지소 신축사업	당진시	용연동	지상2층 1,200㎡	6,954	428	1,121	5,405	’23.03.～ ’25.06.	65	설계중
	12	안면도 지방정원 가든센터 건립공사	태안군	안면읍	지상2층 1,982㎡	17,289	12,699	4,590	-	’21.06.～ ’25.03.	-	공사 착공 단계
	13	동학사 119안전 센터이전신축사업	공주시	반포면	지상3층 1,100㎡	6,552	1,961	2,200	2,391	’22.09.～ ’25.01.	-	공사 착공 단계
	14	충남 미술관 및 공영주차장 건립공사	홍성군	홍북읍	지하2층 지상4층 28,279㎡	116,900	9,800	22,829	84,271	’21.04.～ ’26.11.	-	공사 발주 단계
	15	충남 사회적 경제 혁신타운 건립공사	청양군	청양읍	지하1층 지상4층 7,333㎡	28,780	24,310	4,470	-	’21.05.～ ’25.01.	30	공사중
	16	금산 소방서 증축공사	금산군	금산읍	지하1층 지상4층 2,085㎡	10,218	5,242	2,976	2,000	’22.06.～ ’25.03.	-	공사 발주 단계
	17	충남 기후환경교욱원 조성공사	청양군	대치면	신축 1,844㎡ 리모델링 301㎡	19,800	13,900	2,200	3,700	’21.12.～ ’25.03.	-	공사 착공 단계
	연번	소 계			12건	245,469	7,660	8,425	229,384
	18	충남 여성가족플라자 건립공사	예산군	삽교읍	지하1층 지상4층 8,400㎡	49,440	4,790	700	43,950	’24. 01.	-	신규
	19	충남소통협력공간 조성공사	아산시	온천동	지상2층 3,800㎡	5,384	-	2,240	3,144	’24. 01.	-	신규
	20	천안소방서서부119안전센터	천안시	성정동	지상2층 1,100㎡	6,700	-	290	6,410	’24. 01.	-	신규

사 업 명 (신규)			사업위치		사업량	사 업 비(백만원)				의뢰예정일	공정률 (%)	비고
			시군	읍면		전 체	기시행	2024년	장 차
신규 (12)	21	광역먹거리통합지원센터 신축공사	부여군	남면	지상2층 3,120㎡	8,000	2,000	1,000	5,000	’24. 01.	-	신규
	22	지휘역량 강화센터	청양군	비봉면	지상2층 995㎡	5,262	-	277	4,985	’24. 03.	-	신규
	23	충청남도 동물위생 부여지소 신축사업	부여군	부여읍	지상2층 1,500㎡	7,873		434	7,439	’24. 06.	-	신규
	24	충청남도 동물위생 태안지소 신축사업	태안군	태안읍	지상2층 1,500㎡	7,473		434	7,039	’24. 06.	-	신규
	25	섬비엔날레주제관신축공사	보령시	오천면	지상2층 4,000㎡	27,900		1,500	26,400	’24. 06.	-	신규
	26	시니어친화형국민체육센터	청양군	남양면	지하1층 지상3층 2,500㎡	10,000		1,000	9,000	’24. 07.	-	신규
	27	광역 해양자원 순환센터 건립공사	태안군	근흥면	지상2층 5,433㎡	15,000	870	250	13,880	’24. 07.	-	신규
	28	서천소방서판교119안전센터	서천군	판교면	지상3층 1,100㎡	6,700		300	6,400	’24. 08.	-	신규
	29	충남예술의전당 건립사업	홍성군	홍북읍	지하2층 지상4층 14,080㎡	95,737		-	95,737	’24. 09.	-	신규

【3】공공건축2과 사업 현황

(단위 : 백만원, ’24년 1월 기준)

총 괄		‘24년도 준공사업		계속사업		‘24년도 신규사업
◀ 5건 / 31,285 ▶		◀ 3건 / 0 ▶		◀ 0건 / 0 ▶		◀ 2건 / 31,285 ▶

사 업 명			사업위치		사업량	사 업 비(백만원)				사업기간 (연□월)	공정률 (%)	비고
			시군	읍면		전 체	기시행	2024년	장 차
총 계					5건	136,052	2,037	31,285	102,730
구분	연번	소 계			3건	1,037	1,037	-	-
준공 (3)	1	건설본부 청사 개보수공사	예산군	예산읍	본관동 및 시험동 환경개선 1식	873	873	-	-	’23.12.～ ’24.03.	15	공사중
	2	충남 적정기술 공유센터 BF인증	예산군	신암면	BF본인증 보완공사 1식	94	94	-	-	’24.01.～ ’24.03.	-	공 사 발주중
	3	충남 노인회관 기능보강 공사	홍성군	홍북읍	주차장 환경개선 및 시설물 보수공사 1식	70	70	-	-	’23.12.～ ’24.01.	65	공사중
구분	연번	소 계			2건	135,015	1,000	31,285	102,730
신규 (2)	1	충남국제 테니스장 조성사업	홍성군	홍북읍	지하1층 지상3층 (코트20면) 22,492㎡	134,837	1,000	31,107	102,730	’24. 03. 의뢰예정 (道체육진흥과)	-	-
	2	서부사무소 염수저장 창고 보수공사	홍성군	홍성읍	판넬교체, 오버헤드도어설치등 시설보수	178	-	178	-	(설계)’24. 1. ~‘24. 3. (공사)’24. 4. ~‘24. 6.	-	설계 발주중

【4】하천개발과 사업 현황(지방하천)

(단위 : 백만원, ’24년 1월 기준)

총 괄		’24년 준공사업		계 속 사 업		‘24년 신규사업
◀ 33건 / 72,000 ▶		◀ 3건 / 5,531		◀ 27건 / 64,969▶		◀ 3 건 / 1,500 ▶

<총  괄>

(단위 : 백만원, ’24년 1월 기준)

구 분	지구 수	사업량 (km)	사 업 비				비고
			계	기시행	2024년	장차
합 계	33지구	151	726,825	153,452	72,000	501,373
지방하천 정비사업	33지구	151	726,825	153,452	72,000	501,373	준공 3 계속 27 신규 3

<지방하천 정비사업 세부 내역>

(단위 : 백만원, ’24년 1월 기준)

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2024년	장차
계	33지구			151	726,825	153,452	72,000	501,373
준공사업	소계 (3지구)			7.2	42,855	37,324	5,531	0
	중산천	공주	금흥	1.4	20,496	20,496	0	0	’20. 10. ~’24. 3.	92	준공
	명천천	서산	성연	1.1	3,643	3,643	0	0	’21. 3. ~’24. 3.	94	준공
	장승천	청양	청양	4.7	18,716	13,185	5,531	0	’20. 12. ~’24. 8.	62	준공
계속사업	소계 (27지구)			131.36	607,503	116,128	64,969	426,406
	천안천 (장재천)	천안	백석 불당	1.5	23,170	13,009	8,598	1,563	’21. 8. ~’25. 2	55	공사
	병천천	천안	병천	7.3	35,940	25,894	8,498	1,548	’20. 7. ~’25. 1.	50	공사
	광기천	천안	병천	6.8	29,007	20,960	8,000	47	’20. 7. ~’25. 1.	65	공사
	간치천	보령	주산 웅천	8.3	33,649	5,039	9,000	19,610	’23. 8. ~’26. 7.	2	공사
	석림천	서산	석림	0.5	710	390	-	320	’20. 12. ~’25. 12.	2	정지
	도마천	서천	문산 시초	9.4	23,851	1,500	4,384	17,967	’19.~’25.	2	공사
	주교천	부여	세도	6.7	26,308	14,191	7,500	4,617	’20. 12. ~’25. 2.	48	공사
	신양천	논산	연무	8.6	27,084	10,448	8,500	8,136	’21. 8. ~’25. 2.	23	공사
	용요천	태안	근흥	6.5	45,278	1,942	1,000	42,336	’19.~’28.	-	설계 (보상)
	칠산천	부여	임천	5.6	25,373	2,352	500	22,521	’20.~’25.	-	설계 (보상)
	진산천	금산	진산	4.9	7,420	1,695	500	5,225	’20.~’27.	-	설계 (보상)
	유등천	금산	복수	3.6	17,308	1,296	-	16,012	‘18. ~’26.	-	설계 (보상)
	와룡천	홍성	갈산 결성	4.46	35,070	1,250	2,334	31,486	’19.~’28.	-	설계 (보상)
	오봉천	당진	송악 신평	6.0	23,699	1,091	2,000	20,608	’20.~’25.	-	설계 (보상)
	청지천	서산	장홍 석림	5.9	47,651	4,678	3,053	39,920	’20.~’27.	-	설계 (보상)
	판교천	서천	종천 서천	4.4	14,376	754	-	13,622	’20.~’25.	-	설계
	왕암천	논산	가야곡	8.9	23,370	1,230	-	22,140	’20.~’25.	-	설계
	왕대천	계룡	두마	3.4	6,497	568	600	5,329	’19.~’26.	-	설계
	초대천	당신	신평	6.3	37,394	1,411	-	35,983	’21.~’26.	-	설계
	양촌천	논산	양촌	3.4	15,832	803	-	15,029	’21.~’26.	-	설계
	판정천	천안	입장	3.4	8,598	603	-	7,995	’21.~’26.	-	설계
	솔리천	서천	장항	1.3	4,997	901	-	4,096	’22.~’27.	-	설계
	도곡천	계룡	엄사	2.5	15,086	835	-	14,251	’22. ~’27.	-	설계
	성연천	서산	성연	2.2	14,039	1,036	-	13,003	’22.~’27.	-	설계
	구룡천	천안	신방	1.9	18,655	781	-	17,874	’22.~’27.	-	설계
	삽교천	홍성	홍동	5.5	34,445	1,022	-	33,423	’22.~’27.	-	설계
	남성천	부여	임천	2.1	12,696	449	502	11,745	’23.~’28.	-	설계
신규사업	소계 (3지구)			12.44	76,467	0	1,500	74,967
	유구천	공주	유구	3.07	28,517	-	500	28,017	’24.~’29.	-	설계
	갈두천	태안	원북	6.87	27,845	-	500	27,345	’24.~’29.	-	설계
	읍내천	청양	정산	2.5	20,105	-	500	19,605	’24.~’29.	-	설계

【5】하천개발과 사업 현황(지역개발)

(단위 : 백만원, ’24년 1월 기준)

총 괄		’24년도 준공사업		계 속 사 업		’24년도 신규사업
◀ 4건 / 7,131▶		◀ 1건 / 3,000▶		◀ 3건 / 4,131▶		◀ - / - ▶

연번	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2024년	장차
합 계		4지구		40.55	47,187	2,093	7,131	37,963
준공사업	내포~ 삽교호 자전거도로 정비사업	예산 아산 당진	삽교 ~ 신평	36.4	3,087	87	3,000	-	’23. 4. ~’24. 12.	-	공사
계속사업	음봉일반산업단지 진입도로 개설공사	아산	음봉	1.9 (4→8차로)	30,000	506	3,431	26,063	’22. 12. ~’25. 12.	-	설계
	행정저수지 생태탐방로 연장사업	금산	행정	1.25	2,100	700	700	700	’23. 7. ~’25. 12.	-	공사
	안면도 관광지 제방도로 확포장공사	태안	안면	1.0	12,000	800	-	11,200	’23. 12. ~’26. 12.	-	설계

【6】동□서부사무소 사업 현황

<동·서부사무소>

(단위 : 백만원, ’24년 1월 기준)

사업 구분	총계		계속지구						신규지구
			합계		동부		서부		합계		동부		서부
계	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	227	100,411	52	17,378	25	9,283	27	8,095	175	83,033	95	39,387	80	43,646
자체사업	97	14,547	8	837	6	241	2	596	89	13,710	48	6,610	41	7,100
재배정사업	122	69,503	40	10,403	17	6,352	23	4,051	82	59,100	45	27,500	37	31,600
위임국도	8	16,361	4	6,138	2	2,690	2	3,448	4	10,223	2	5,277	2	4,946

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음.

<동부사무소 / 계속지구>

(단위 : 백만원, ’24년 1월 기준)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
계(계속지구)			25개 지구			9,283
계속지구	소계	자체사업	6개 지구			241
	자체사업	공주‧부여 지방도 유지 실시설계용역	공주, 부여		1식	29	23.11.~24.02.	80	용역중
		원수도로 황단보도 도색공사	서천	장항	1식	5	23.12.~24.03.	-	중지중
		대치도로 구조개선사업	청양	대치	1식	132	23.10.~24.03.	70	공사중
		매당교차로 실시설계용역	천안	광덕	1식	43	23.02.~24.04.	70	용역중
		국공유지 무상귀속 협의용역	전노선		1식	20	23.04.~24.03.	70	용역중
		지방도 696호 차선도색공사	천안	병천	1식	12	23.12.~24.02.	80	공사중
	소계	재배정사업	17개 지구			6,352
	재배정사업	지방도 691호 용원교차로 개선공사	천안	성남	1식	953	23.05.~24.12	-	용역중
		지방도 623호 매당교차로 개선공사	천안	광덕	1식	42	23.05~24.12	-	용역중
		지방도635호 석막도로 선형개량공사	금산	진산	1식	1,200	21.05.~25.03.	60	공사중
		지방도723호 황골교차로 개선사업	부여	양화	1식	17	23.05.~24.12.	-	용역중
		지방도723호 송암교차로 개선사업	부여	남면	1식	17	23.05.~24.12.	-	용역중
		지방도625호 석동교차로 개선사업	부여	장암	1식	17	23.05.~24.12.	-	용역중
		지방도799호 응평교차로 개선사업	부여	초촌	1식	17	23.05.~24.12.		용역중
		국지도96호 안양도로 위험도로 개량공사	공주	우성	L=1.00km	450	23.05~25.12.	-	용역중
		지방도610호 대봉도로 인도설치공사	청양	대봉	L=1.10km	326	23.01.~24.12.	30	공사중
		지방도606호 봉우티고개 오르막차로 설치공사	청양	남양	L=1.1km	912	23.01.~25.12.	30	공사중
		지방도604호 유구도로 위험도로 개량공사	공주	유구	L=1.2km	387	23.05~25.12	-	용역중
		지방도697호 모촌도로 위험도로 개량공사	논산	양촌	L=0.70km	23	23.01.~25.12.	-	용역중
		지방도691호 덕평도로 위험도로 개량공사	논산	부적	L=0.27km	8	23.12.~24.12.	10	공사중
		지방도625호 북고도로 위험도로 개량공사	부여	장암	L=1.23km	43	23.05.~25.12.	-	용역중
		지방도723호 팔충도로 위험도로 개량공사	부여	충화	L=0.2km	42	23.05.~24.12.	-	용역중
		[서천[상일교 재가설공사(계속지구)	판교	상좌	1식	405	23.08.~24.08.	30	공사중
		2023년 호우피해 복구사업	공주,부여,금산, 서천,청양		12지구	1,493	24.01.~24.12.	-	용역 완료
	소계	위 임 국 도	2개 지구			2,690
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	1,962	24.01.~24.12.		발주 준비중
		도로유지보수	전노선		1식	728	24.01.~24.12.		발주 준비중

<동부사무소 / 신규지구>

(단위 : 백만원, ’24년 1월 기준)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
계(신규지구)			95개 지구			39,387
신규지구신규지구신규지구신규지구	소계	자 체 사 업	48개 지구			6,610
	자체사업자체사업	천안지역 지방도 유지보수 단가계약	천안		1식	40	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		국지도23호 망향도로 배수로 정비공사	천안	성거	L=0.72km	75	24.01.~24.06.	-	용역완료
		국지도23호 인도보행개선 공사	천안	성거	L=2.5km	100	24.01.~24.06.	-	용역완료
		국지도23호 오목리 외 1개소 배수로정비공사	천안	성거	L=0.2km	66	24.01.~24.06.		용역완료
		국지도57호 운용리 외 2개소 배수로정비공사	천안	입장	L=0.15km	44	24.01.~24.06.		용역완료
		지방도623호 매당도로 배수로 정비공사	천안	광덕	L=0.1km	50	24.01.~24.06.	-	용역중
		국지도57호 사담도로 외1개소 배수로 정비공사	천안	북면	L=0.1kn	35	24.01.~24.06.	-	용역중
		지방도691호 용원도로 배수로 정비공사	천안	성남	L=0.1km	65	24.01.~24.06.	-	용역중
		공주지역 지방도 유지보수 단가계약	공주		1식	40	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		지방도691호 마암지구 사면정비 및 배수로정비공사	공주	계룡	L=0.55km	55	24.01.~24.06.	-	용역중
		지방도697호 이인지구 배수로정비공사	공주	이인	L=0.3km	70	24.01.~24.06.	-	용역중
		지방도691호 구왕지구 배수로정비공사	공주	의당	L=0.1km	30	24.01.~24.06.	-	용역중
		지방도604호 운암지구 외 1개소 배수로정비공사	공주	사곡 의당	L=0.1km	55	24.01.~24.06.	-	용역중
		논산지역 지방도 유지보수 단가계약	논산		1식	40	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		국지도68호 배수로 정비공사	논산	벌곡	L=0.5km	50	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도691호 배수로 정비공사	논산	연무	L=0.5km	50	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도643호 배수로 정비공사	논산	가야곡	L=0.5km	50	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도697호 배수로 정비공사	논산	가야곡	L=0.5km	50	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		금산지역 지방도 유지보수 단가계약	금산		1식	40	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		국지도68호 신대지구 배수로정비공사	금산	금산	L=0.5km	70	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		국지도68호 상가지구 배수로정비공사	금산	금성	L=0.7km	50	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도635호 수영지구 배수로정비공사	금산	복수	L=0.3km	50	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도601호 동편지구 배수로 정비공사	금산	군북	L=0.4km	60	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도635호 역평지구 차선도색공사	금산	역명	L=1.5km	150	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		국지도68호 복수지구 차선도색공사	금산	복수	L=1.5km	125	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		부여지역 지방도 유지보수 단가계약	논산		1식	40	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		지방도799호 초촌지구 배수로정비공사	부여	초촌	L=0.9km	80	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도606호 외산지구 배수로정비공사	부여	외산	L=0.5km	90	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도723호 수목지구 배수로정비공사	부여	구룡	L=0.3km	100	24.01.~24.06.	-	용역완료
		지방도606호 외산지구 준설 및 배수정비공사	부여	외산	L=0.3km	50	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		서천지역 지방도 유지보수 단가계약	서천		1식	40	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		지방도607호 주항~성북 차선도색공사	서천	서	L=3.5km	50	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도617호 옥산~장구 차선도색공사	서천	마서	L=5km	50	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도 613호 마산지구 배수로 정비공사	서천	마산	L=0.5km	200	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		국지도68호 원수삼거리 배수로 정비공사	서천	장항	L=0.7km	200	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		청양지역 지방도 유지보수 단가계약	청양		1식	40	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		지방도645호 락지도로 배수로정비공사	청양	장평	L=2km	150	24.01.~24.06.	-	용역중
		지방도610호 화성도로 배수로정비공사	청양	화성	L=0.3km	100	24.01.~24.06.	-	용역중
		지방도625호 청남도로 배수로정비공사	청양	청남	L=0.2km	100	24.01.~24.06.	-	용역중
		지방도 풀깎기	전노선		1식	700	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		도로유지보수에 따른 폐기물 처리	전노선		1식	30	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		도로시설물 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	500	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		설해 및 수해대책 장비 임차료	전노선		1식	800	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		설해 및 수해대비 자재구입	전노선		1식	700	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		터널 및 교량 정비사업	전노선		1식	200	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		비점오염저감시설 유지관리	전노선		1식	80	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		응급복구	전노선		1식	500	24.01.~24.12.	-	발주준비중
	소계	재배정사업	45개 지구			27,500
	재배정사업재배정사업	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		운행방향 유도레인 설치	전노선		1식	30	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선		1식	1,300	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		동물찻길사고 방지시설 설치	전노선		1식	200	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		도로 표지판 정비사업	전노선		1식	100	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		도로 표지판(LED) 개선사업	전노선		1식	150	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		급경사지 개축시설 1식	전노선		1식	1,000	24.01.~24.12.		발주준비중
		지방도 포장도 보수공사	전노선		1식	7,750	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		지방도645호 진고개교차로 개선공사	공주	탄천	1식	500	24.04.~24.08.	-	발주준비중
		지방도643호 장선교차로 개선공사	공주	탄천	1식	500	24.04.~24.08.	-	발주준비중
		지방도604호 운암도로 인도설치공사	공주	사곡	L=0.30km	300	24.01.~24.06.	-	용역중
		지방도604호 정안도로 인도설치공사	공주	정안	L=0.40km	400	24.01.~24.06.	-	용역중
		지방도651호 덕학도로 인도설치공사	공주	의당	L=0.30km	300	24.01.~24.06.	-	용역중
		지방도604호 광정도로 인도설치공사	공주	정안	L=0.20km	400	24.01.~24.06.	-	용역중
		지방도643호 장마도로 인도(갓길) 설치공사	논산	광석	L=4.0km	500	24.01.~25.12.	-	발주준비중
		지방도691호 상도도로 인도(갓길) 설치공사	논산	상월	L=2.0km	500	24.01.~25.12.	-	발주준비중
		지방도635호 곡남도로 인도설치공사	금산	진산	L=2.0km	500	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		지방도601호 신평지구 인도설치공사	금산	추부	L=0.6km	600	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도799호 현내지구 인도설치공사	부여	석성	L=0.87km	500	24.01.~24.012.	-	용역중
		지방도610호 대봉도로 인도설치공사	청양	대봉	L=1.10km	400	23.01.~24.12.	30	공사중
		지방도601호 신평지구 마을주민 보호구간정비	금산	추부	L=0.8km	500	24.01.~24.08.	-	발주준비중
		지방도799호 석성도로 마을주민 보호구역정비	부여	석성	L=0.3km	300	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		지방도635호 석막교차로 개선사업	금산	진산	1식	1,000	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		지방도723호 황골교차로 개선사업	부여	양화	1식	500	24.03.~24.12.	-	발주준비중
		지방도723호 송암교차로 개선사업	부여	남면	1식	500	24.03.~24.12.	-	발주준비중
		지방도625호 석동교차로 개선사업	부여	장암	1식	500	24.03.~24.12.	-	발주준비중
		지방도799호 응평교차로 개선사업	부여	초촌	1식	400	24.03.~24.12.		발주준비중
		지방도799호 응평도로 위험도로 개량공사	부여	초촌	L=0.70km	100	24.01.~24.10.	-	발주준비중
		지방도799호 교원도로 위험도로 개량공사	부여	교원	L=1.3km	150	24.01.~24.10.	-	발주준비중
		지방도723호 죽절도로 위험도로 개량공사	부여	구룡	L=0.1km	100	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		지방도697호 모촌도로 위험도로 개량공사	논산	양촌	L=0.70km	1,000	24.05.~25.12.	-	용역중
		지방도691호 덕평도로 위험도로 개량공사	논산	부적	L=0.27km	600	24.03.~24.12.	10	공사중
		지방도625호 북고도로 위험도로 개량공사	부여	장암	L=1.23km	1,000	24.05.~25.12.	-	발주준비중
		지방도723호 팔충도로 위험도로 개량공사	부여	충화	L=0.2km	500	23.05.~24.12.	-	발주준비중
		지방도604호 유구도로 위험도로 개량공사	공주	유구	L=1.2km	1,000	23.05~25.12	-	용역중
		국지도96호 안양도로 위험도로 개량공사	공주	우성	L=1.00km	1,000	23.05~25.12.	-	용역중
		지방도 691호 용원교차로 개선공사	천안	성남	1식	1,000	23.05.~24.12	-	용역중
		[천안]풍서천교 보수보강공사	천안	풍세	1식	250	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		[천안]신흥교 보수보강공사	천안	광덕	1식	250	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		[논산]신흥교 보수보강공사	논산	양촌	1식	150	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		[논산]고양교 보수보강공사	논산	연산	1식	300	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		[청양]작천교 보수보강공사	청양	대치	1식	200	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		[청양]주정교 보수보강공사	청양	대치	1식	100	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		[청양]탄정교 보수보강공사	청양	대치	1식	100	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		[청양]인양교 철거공사	청양	청남	1식	50	24.01.~24.12.	-	발주준비중
	소계	위 임 국 도	2개 지구			5,277
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	2,721	24.01.~24.12.		발주준비중
		도로유지보수	전노선		1식	2,556	24.01.~24.12.		발주준비중

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음

<서부사무소 / 계속지구>

(단위 : 백만원, ’24년 1월 기준)

사업명			위 치		사업량	사업비 (이월액)	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
계(계속지구)			27개 지구			8,095
계속지구	소계	자체 사업	2개 지구			596
	자체사업	재해대책	전노선		1식	583	23.11.~24.03.		용역중
		위험도로 개선공사 편입토지 보상액	당진	합덕	1식	13	23.01.~24.03.		보상진행중
	소계	재배정 사업	23개 지구			4,051
	재배정사업	지방도610호 영보~소성도로 포장도 보수공사	보령	오천	L=2.5km	312	23.12.~24.03.	-	일시정지
		지방도616호 녹문도로 인도설치공사	예산	신양	L=0.2km	203	23.01.~24.03.	80	공사중
		지방도606,617호 이동과적검문소 개량공사	보령	웅천 미산	1식	242	23.01.~24.03.	-	일시정지
		국,공유지 무상귀속 협의용역	전노선		1식	19	23.04.~24.03.	70	용역중
		2024년 인도설치공사(아산, 서산, 태안) 실시설계용역	아산, 서산, 태안		1식	14	23.11.~24.01.	50	용역중
		지방도634호 고남도로 위험도로 개량공사 실시설계용역	서산	성연	1식	60	23.06.~24.02.	70	용역중
		지방도634호 고남도로 위험도로 개량공사 소규모환경영향평가용역	서산	성연	1식	20	23.11.~24.03.	10	용역중
		지방도634호 고남도로 위험도로 개량공사 소규모재해영향평가용역	서산	성연	1식	20	23.11.~24.03.	10	용역중
		지방도603호 포지도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.8km	1,403	22.07.~24.01.	70	공사중
		지방도603호 내리도로 선형개량공사 실시설계용역	태안	원북	1식	32	23.06.~24.01.	70	용역중
		지방도603호 내리도로 선형개량공사 소규모환경양향평가용역	태안	원북	1식	20	23.12.~24.04.	10	용역중
		지방도603호 내리도로 선형개량공사 소규모재해양향평가용역	태안	원북	1식	20	23.12.~24.04.	10	용역중
		국지도70호 쌍용교 보수보강공사	아산	음봉	1식	120	23.12.~24.03.	-	공사중
		지방도649호 부석교 및 둔당교(옹벽) 정밀안전진단 용역	서산	부석 인지	1식	46	23.12.~24.12.	-	용역중
		[당진]지방도647호 조금도로 선형개량공사	당진	대호지면	L=0.2km	81	23.06.~24.06.	70	공사중
		2024년 당진지역 인도설치공사 실시설계용역	당진	송악	1식	16	23.12.~24.02.	10	용역중
		운곡교차로 병목지점 무인교통감시장치 설치공사 관급자재 구입	당진	합덕	1식	28	23.12.~24.02.	-	공사중
		[당진]지방도619호 반촌도로 인도설치공사	당진	송악	L=0.6m	28	23.06.~24.01.	90	공사중
		2023년 호우피해 복구사업	보령	청소	1식	85	23.12.~24.05.	-	용역중
		지방도647호 승산도로 회전교차로 설치공사	당진	정미	1식	500	23.12.~24.12.	-	용역중
		지방도615호 광천도로 회전교차로 설치공사	당진	순성	1식	600	23.12.~24.12.	-	용역중
		지방도618호 고풍지구 염수분사장치	서산	운산	1식	7	23.12.~24.12.	-	공사중
		2023년 대설대책비	전노선		1식	175	23.12.~24.03.	-	용역중
	소계	위 임 국 도	2개 지구			3,448
	계속지구	도로안전및환경개선	전노선		1식	2,714	24.01.~24.12.	20	공사중
		도로유지보수	전노선		1식	774	24.01.~24.12.	50	공사중

<서부사무소 / 신규지구>

(단위 : 백만원, ’24년 1월 기준)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
계(신규지구)			80개 지구			43,646
신규지구신규지구신규지구신규지구	소계	자 체 사 업	41개 지구			7,100
	자체사업자체사업	홍성지역 지방도 유지보수 단가계약	홍성		1식	90	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		지방도616,619호 봉서도로 외 2개소 배수시설 정비공사	홍성	금마 장곡	L=0.72km	145	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		보령지역 지방도 유지보수 단가계약	보령		1식	90	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		지방도610호 주교도로 배수시설 정비공사	보령	주교	L=0.4km	100	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도610호 성연도로 배수시설 정비공사	보령	청소	L=0.4km	100	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		예산지역 지방도 유지보수 단가계약	예산		1식	90	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		지방도616호 화천도로 외 2개소 배수시설 정비공사	예산	대술 광시 신양	L=0.2km	60	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도602호 송석도로 배수시설 정비공사	예산	응봉	L=0.2km	50	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도609, 618호 봉운도로 외 2개소 배수시설 정비공사	예산	봉산 고덕	L=0.1km	50	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도602호 충남대로 배수시설 정비공사	홍성	홍북	L=0.4km	300	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		아산지역 지방도 유지보수 단가계약	아산		1식	90	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		지방도624호 해암도로 배수시설 정비공사	아산	인주	L=0.3km	70	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도624호 중방도로 갓길정비공사	아산	염치	L=0.2km	300	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도628호 덕지도로 시설물유지보수공사	아산	음봉	L=0.3km	100	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도624호 갈산도로 시설물유지보수공사	아산	탕정	L=0.1km	30	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도616호 역촌도로 배수시설 정비공사	아산	송악	L=0.2km	50	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도645호 화천도로 배수시설 정비공사	아산	도고	L=0.3km	60	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		서산지역 지방도 유지보수 단가계약	서산		1식	90	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		지방도649호 애정도로 외 2개소 배수시설 정비공사	서산	인지	L=0.3km	90	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도647호 삼송도로 배수시설 정비공사	서산	해미	L=0.07km	30	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도634호 양길도로 배수시설 정비공사	서산	팔봉	L=0.2km	40	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도634호 고남도로 배수시설 정비공사	서산	성연	L=0.1km	30	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		국지도70호 명천도로 외 2개소 배수시설 정비공사	서산	음암	L=0.1km	30	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		태안지역 지방도 유지보수 단가계약	태안		1식	90	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		국지도96호 도황도로 배수시설 정비공사	태안	근흥	L=0.3km	100	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		당진지역 지방도 유지보수 단가계약	당진		1식	90	24.01.~24.11.	-	발주준비중
		지방도615호 장항도로 외 2개소 배수시설 정비공사	당진	고대	L=0.3km	70	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도615호 봉소도로 외 1개소 배수시설 정비공사	당진	순성	L=0.1km	30	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도619호 중흥도로 외 1개소 배수시설 정비공사	당진	송악	L=0.1km	30	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도619호 상거도로 외 1개소 배수시설 정비공사	당진	송산	L=0.1km	25	24.01.~24.06.	-	발주준비중
		지방도 풀깎기	전노선		1식	880	.24.04.~24.10.	.	발주준비중
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		도로유지보수에 따른 폐기물 처리	전노선		1식	30	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		도로시설물 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	500	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		설해 및 수해대책 장비 임차료	전노선		1식	800	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		설해 및 수해대비 자재구입	전노선		1식	700	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		무인자동염수분사	보령, 당진, 태안		1식	450	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		터널 및 교량 정비사업	전노선		1식	200	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		비점오염저감시설 유지관리	전노선		1식	120	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		응급복구	전노선		1식	100	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		제설창고 구축	보령 (예정)		1식	500	24.01.~24.12.	-	발주준비중
	소계	재배정사업	37개 지구			31,600
	재배정사업재배정사업	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		운행방향 유도레인 설치	전노선		1식	30	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선		1식	1,300	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		동물찻길사고 방지시설 설치	전노선		1식	200	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		도로 표지판 정비사업	전노선		1식	100	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		도로 표지판(LED) 개선사업	전노선		1식	150	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		지방도 포장도 보수공사	전노선		1식	13,200	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		급경사지 계측시설 설치	전노선		1식	1,000	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		지방도607호 죽청도로 교차로 개선공사	보령	웅천	1식	500	24.01.~24.12.	-	용역중
		지방도628호 신현도로 교차로 개선공사	아산	영인	1식	450	24.01.~24.12.	-	용역중
		지방도634호 일람도로 교차로 개선공사	서산	성연	1식	150	24.01.~24.12.	-	용역중
		지방도647호 오학도로 교차로 개선공사	서산	해미	1식	800	24.01.~24.12.	-	용역중
		지방도633호 유곡2교차로 개선공사	당진	송산	1식	500	24.01.~24.12.	-	용역중
		국지도96호 산성삼거리 교차로 개선공사	홍성	장곡	1식	700	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		지방도618호 대천교차로 개선공사	예산	고덕	1식	500	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		지방도610호 성연도로 인도설치	보령	청소	L=0.6km	600	24.01.~24.12.	-	발주준비중
		지방도645호 도고중~신유리 인도설치	아산	도고	L=1.0km	1,000	24.01.~24.12.	-	용역중
		지방도647호 신창도로 인도설치	아산	신창	L=0.2km	300	24.01.~24.12.	-	용역중
		지방도619호 반촌도로 인도설치	당진	송악	L=0.5km	500	24.01.~24.12.	-	용역중
		지방도634호 황촌도로 인도설치	태안	원북	L=0.1km	100	24.01.~24.12.	-	용역중
		지방도628호 냉정도로 마을주민보호구역 정비	아산	인주	1식	100	24.01.~24.12.	-	용역중
		지방도647호 삼봉도로 마을주민보호구역 정비	당진	석문	1식	100	24.01.~24.12.	-	용역중
		지방도634호 금학도로 위험도로 개량공사	서산	팔봉	L=0.1km	200	24.01.~24.12	-	용역중
		지방도603호 고남도로 위험도로 개량공사	서산	성연	L=0.8km	500	24.01.~24.12	-	용역중
		지방도619호 백석도로 위험도로 개량공사	당진	순성	L=1.2km	900	24.01.~24.12	-	용역중
		지방도619호 원동도로 위험도로 개량공사	당진	면천	L=0.3km	500	24.01.~24.12	-	용역중
		지방도619호 관음도로 위험도로 개량공사	예산	광시	L=0.2km	500	24.01.~24.12	-	용역중
		지방도618호 신원도로 위험도로 개량공사	예산	오가	L=0.2km	300	24.01.~24.12	-	용역중
		지방도603호 와우재고개 위험도로 개량공사	태안	당산	L=1.0km	200	24.01.~24.12	-	용역중
		지방도615호 노후방음벽 교체공사	당진	고대	L=0.4km	300	24.01.~24.12	-	용역중
		지방도606호 배수로 정비공사	보령	웅천	L=0.4km	500	24.01.~24.12	-	용역중
		지방도645호 신언도로 보수공사	아산	도고	L=0.8km	100	24.01.~24.12	-	용역중
		지방도603호 내리도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.6km	1,000	24.01.~24.12	-	용역중
		교량 및 터널 안전진단 및 점검	전노선		1식	2,000	24.01.~24.12	-	발주준비중
		지방도617호 도화담교 재가설공사(2차)	보령	미산	1개소	700	24.01.~24.12	80	공사중
		지방도 교량보수보강	11개 지구		1식	1,100	24.01.~24.12	-	발주준비중
		터널내 방재시설(CCTV)설치	홍성 예산	홍북 봉산	2개소	500	24.01.~24.12	-	발주준비중
	소계	위 임 국 도	2개 지구			4,946
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	2,248	24.01.~24.12.		발주준비중
		도로유지보수	전노선		1식	2,698	24.01.~24.12.	-	발주준비중

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음

□ 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
건설본부	본부장	지방기술서기관	김병용	2023.07.01.
	행정관리과장	지방행정사무관	이학규	2023.01.16.
	도로건설과장	지방시설사무관	박중호	2023.01.16.
	공공건축1과장	지방시설사무관	나윤주	2023.01.16.
	공공건축2과장	지방시설사무관	안동수	2023.01.16.
	하천개발과장	지방시설사무관	정성진	2022.01.12.
건설본부 동부사무소	동부사무소장	지방시설사무관	최양진	2023.07.21.
건설본부 서부사무소	서부사무소장	지방시설사무관	이재흥	2023.01.16.