《건설본부》

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 □ 기구 및 기능 □ 예산현황 Ⅱ. 주요업무 추진상황 □ 총 평 □ 분야별 추진실적 및 계획 Ⅲ. 도의회 관련 처리상황 □ 2022년도 행정사무감사 처분요구 처리상황 Ⅳ. 참고사항 □ 주요 사업별 예산 확보 현황 □ 간부명단

Ⅰ. 기본 현황

□ 기구 및 기능

① 기 구 : 5과, 2사무소, 24팀

					건 설 본 부
행정 관리과			도로 건설과						공공 건축과				시설유지 관리과			하천 개발과				동부 사무소				서부 사무소
행정경리			도로1						대형건축				시설유지 관리			지역개발				서무				서무
계약			도로2						건축사업				품질관리			하천1				보수1				보수1
			도로보상						건축지원							하천2				보수2				보수2
																하천보상				구조물 관리				구조물 관리
																				단속				단속

<정․현원 현황>

( 2023. 6. 30. 字 )

구 분		계	일 반 직(정원/현원)						비고
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계		115/112	1/1	7/7	26/26	43/41	28/27	10/10
본부		68/67	1/1	5/5	15/15	25/23	14/14	8/8
	행정관리과	13/13	1/1	1/1	2/2	5/5	3/3	1/1
	도로건설과	15/15	-	1/1	3/3	7/7	3/3	1/1
	공공건축과	17/16	-	1/1	4/4	7/5	3/4	2/2
	시설유지관리과	8/8		1/1	2/2	1/1	1/1	3/3
	하천개발과	15/14	-	1/1	4/4	5/5	4/3	1/1
동부사무소		24/23	-	1/1	5/5	9/8	7/7	2/2
서부사무소		23/23	-	1/1	6/6	9/10	7/6	0/0

※ 공무직(76명) : 행정실무 3, 시험□검사실무 1, 도로보수원 56, 과적단속요원 16

② 주요기능

	- 행정관리과
	❍ 조직 · 예산 · 청사관리 및 직원 후생 · 복지 ❍ 각종 건설공사 입찰 및 계약, 관급자재 구매
	- 도로건설과
	❍ 지방도 사업 집행계획 수립 및 조정 ❍ 국가지원지방도, 지방도 확 · 포장사업 시행 및 보상업무
	- 공공건축과
	❍ 공공 건축사업 시행 및 기술지원 ❍ 건축현장 관리 · 감독업무
	- 시설유지관리과
	❍ 道 공공건축물 유지관리 및 보수 · 보강사업 ❍ 건설공사 자재 품질검사 및 현장 품질 · 안전점검
	- 하천개발과
	❍ 지방하천 정비 및 재해복구 · 보상업무 ❍ 지역개발 기반시설 사업
	- 동부□ 서부사무소
	❍ 지방도 및 위임국도 유지관리 · 보수사업 ❍ 자연 재해대책 수립 · 시행 및 운행제한 위반차량 단속

□ 예산현황

세입 □ 세출
		∙ [세 입 예 산] : 1,615백만원 - 품질시험수수료 150 / 과태료 180 / 그외수입 45 / 교부세 1,200 지난년도수입 40 ∙ [세 출 예 산] : 38,961백만원 - 사업예산 25,942 / 행정운영경비 12,620 / 이자상환 399

❍ ’23 년 재배정 예산 : 367,989백만원					(단위 : 백만원)
도로 확･포장	공공건축	시설 유지관리	하천정비	재해복구		지역개발	도로 유지관리
156,489	82,145	103	71,319	0		800	57,133

※ 재해복구 및 지역개발사업(2건)은 이월 예산으로 사업 추진 (이월액 : 37,018백만원)

Ⅱ. 주요업무 추진상황

□ 총   평

대규모 건설예산 투입에 따른 신속·안전한 건설사업 추진

충남 지역업체 우대 및 지역자재 우선 구매를 통한 지역경제 활성화

고품질 건설사업을 위한 체계적인 공정관리 및 관리감독 철저

□ 주요성과로는

사업분야

상반기 주요업무 추진성과

□ 도 로 건 설

삭선~원북 지방도 확포장공사 착공 등 10건, 205억원 집행

도로 보상 1,652건 / 715억 보상

□ 공 공 건 축

충남사회적경제혁신타운 착공 등 7건, 152억원 집행

□ 시설 유지관리

공공건축물 통합 유지관리 체계 마련 및

보수·보강공사 신규 착수(3건)

해빙기 · 우기 대비 안전점검실시(32개소)

성토용 흙 · 아스콘 등 품질시험 62건 / 382종목 실시

□ 하천 · 지역개발

태안기업도시 연결도로 준공 등 20건, 330억원 집행

하천 보상 1,337건 / 80억 보상

□ 도로 유지 · 보수

지방도 유지 · 보수사업 등 236건 발주, 603억원 집행

이동 · 합동단속 등 6,045건 검차, 130건 적발

□ 아쉬웠던 점은

❍ 건설 원자재 값 폭등으로 자재수급(철근 등) 난항, 정부 전기요금 인상에 따른 건설자재 제조원가 상승 및 건설노조 파업(연대 집단운송거부 등) 등 건설 경기 불안정 지속

□ 앞으로

❍ 안정적인 자재 수급을 위한 유관기관 협조 요청 및 사급자재 전환 등 탄력적 운영

❍ 현장별 체계적인 공정관리로 안전하고 속도감 있는 건설사업 추진

□ 분야별 추진실적 및 계획

【1】지역상생·공정 계약행정으로 지역경제 활성화

충남도 건설경기 성장을 위한 지역업체 중심 우선계약

신속한 대가 지급으로 지역경제 활력을 공급하는 회계업무 추진

임금체불 방지 및 하도급 질서 확립을 통한 공정한 건설환경 조성

□ 지역업체를 성장시키는 계약업무 수행

❍ 지역제한입찰·지역의무공동도급계약을 통해 지역업체 보호

❍ 직무성과 계약과제와 연계한 상반기 지역업체 계약율 87.5% 달성

< 2023년 상반기 지역업체 계약 현황 >

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수			금 액
	총 건수	지역업체	비율	총 금액	지역업체	비율
총 계	1,961	1,716	87.5%	163,000	1,578	96.8%
공 사	195	193	98.9%	890,000	889	99.8%
용 역	229	215	93.8%	174,000	169	97.1%
물 품	1,537	1,308	85.1%	566,000	520	91.8%

□ 신속한 대가지급 등 예산 적극집행으로 지역경제 활성화

❍ 상반기 도로·하천·건축사업 용역 등 선금 37건, 205억원 지급

❍ 대금 청구 시 3일 이내 100% 지급(345건, 625억원)

□ 하도급 질서 확립으로 공정하고 투명한 건설환경 구축

❍ 표준 계약서 사용·하도급 대금 직불제 및 지급보증제 실시

❍ 노무비 구분관리제 및 지급관리제 시행으로 건설근로자 임금체불 방지

앞으로
			□ 지역업체와의 상생을 최우선으로 하는 건설공사 계약업무 추진

【2】도민에게 신뢰받는 안전한 교통인프라 구축

지역 간 촘촘한 교통 네트워크 구축으로 지역 발전기반 마련

적극적인 소통·체계적인 건설행정으로 고품질 도로건설 실현

□ 2023년 도로건설사업 : 44지구 / 156,489백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	44	156,489	6	23,354	30	129,849	8	3,286
국지도	11	22,465	2	14,897	8	7,282	1	286
지방도	29	130,562	2	8,457	20	119,105	7	3,000
국 도	4	3,462	2	-	2	3,462	-	-

□ 대규모 예산 집중투자에 따른 도로건설사업 차질없이 추진

❍ ’23년 사업비 1,564억원 중 920억원 집행(집행률 59%)

- 공사 현장별 집행계획 점검(1, 2분기) 및 보상지구 예산 집중 투자

- 상반기 개통 2건1), 공사 착공 5건2), 용역 착수 3건3)

1) 개통 : 정산지구, 장평지구

2) 착공 : 우성~이인, 삭선~원북, 화성~장곡, 구룡~용두, 고암~역재

3) 용역 : 홍동우회, 무창포IC~웅천(2차), 대봉~흥산

□ 적극적인 소통·전문성 강화로 주민에게 신뢰받는 건설행정 추진

❍ 주민설명회(간담회) 개최, 민원사항 현장대응 등 적극적인 소통 노력

- 상반기 주민설명회(간담회) 총 4회 개최(지역주민 156명 참석)

❍ 정기적인 공사관계자(발주청, 감리단, 시공사) 간담회 등 소통활성화*로 상호 협력체계 강화 및 상시 안전체계 구축

* 분기별 추진상황 점검 및 애로사항 청취 공사관계자 간담회 개최(상반기 / 2회)

❍ 기술자문위원회 구성ㆍ운영(5회)으로 고품질ㆍ고효율 건설기술 적용

- 분야별 외부전문가 자문, 공법선정 등 건설사업 전문성 강화

앞으로
			□ ’23년 하반기 4개지구 개통 · 3개지구 신규설계 착수 □ 체계적인 사업관리로 안전하고 속도감있는 도로건설사업 추진

【3】찾아가는 보상협의로 신속한 보상행정 추진

찾아가는 보상 협의로 민원 최소화 및 도민 중심 보상행정 실현

도로·하천사업에 편입되는 사유재산에 대한 객관적이고 공정한 보상

□ 2023년 도로·하천 상반기 보상실적

❍ 총 39개 지구 (직접시행 32 / 위탁사업 7 ) / 79,525백만원 집행

(단위 : 백만원)

구 분		’23년 보상계획		’23년 상반기 실적			’23년 하반기 계획
		건 수	금 액	건 수	금 액	보상 진행률	건 수	금 액
합 계		5,478	106,408	2,989	79,525	75%	2,489	9,965
도로 (24)	자체 (17)	2,351	37,977	1,133	10,992	29%	1,218	5,385
	위탁 (7)	1,118	47,894	519	60,570	126%	599	2,190
하천(15)		2,009	20,537	1,337	7,963	39%	672	2,390

□ 찾아가는 보상 협의를 통해 대민서비스 강화 및 민원 최소화

❍ 사업지구별 평균 4회 이상‘찾아가는 보상 상담창구’운영 등 도민 행정편의 극대화를 위해 ’23년 상반기 120회 현장 방문

※ ’23년 신규 사업지구(고암~역재) 현장 협의 보상률 53%

□ 토지소유자의 참여로 공정하고 신뢰받는 보상행정 추진

❍ 토지소유자 □ 감정평가사 □ 사업시행자 등 8명 이상 16명 이하로 구성되는‘보상협의회’를 운영하고‘토지소유자 감정평가법인 추천제’적극 홍보 등 보상 협의 시 토지소유자 의견 반영

□ 보상인력 전문성 확보 및 적극적인 보상 행정 실현

❍ 보상 매뉴얼 정비 및 전문교육(드론 등) 참여로 공익사업 토지 신속 확보

- 보상 매뉴얼 내 수록자료 보완 (절차, 기준, 실무 처리요령 등)

- 선지정 측량에 따른 편입용지(면적 등) 조기 확정으로 보상 기간 단축

※ 선지정 측량 선행 시 보상기간 최대 1.5 ~ 2개월 소요 / 기존 3개월 이상 소요

앞으로
			□ 도민과 소통하는 신속·정확한 보상행정 실현

【4】공공건축물 품질향상을 통한 탄소중립 실천

2045 충남도 녹색성장 정책에 부응하는 탄소중립 공공건축물 건립

동아리 활동 및 자체 교육 등을 통한 공공건축물의 품질향상

□ 2023년 공공건축사업 : 27건 / 82,145백만원

(단위 : 백만원)

총 괄		준공사업		계속사업		신규사업
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
27	82,145	7	2,790	13	78,628	7	727

❍ ’23년 사업비 821억원 중 152억원 집행(집행률 19%)

- 상반기 준공 1건1), 설계 착수 2건2), 공사 착공 4건3)

1) 준공 : 당진 합덕119안전센터 증축공사

2) 설계 : 공주소방서 동학사119안전센터, 충청권 통일플러스센터 신축사업

3) 착공 : 공주소방서 비상대기숙소 증축공사, 충남 사회적 경제혁신타운 건립공사, 아산지역 제설 전진기지 신축공사, 청양소방서 119구조구급센터 증축공사

□ 2045 녹색성장 정책에 부응하는 탄소중립 건축사업 추진

❍‘충남 광역형 탄소중립 연수원 조성사업’등 창호계획·단열 강화로 제로에너지 건축물 구현 노력

□ 공공건축물 품질 향상을 위한 자체 교육 강화

❍ 담당자 업무능력 향상을 위한 지식동아리 운영 (월 1회 / 상반기 5회)

※ ① 2023 코리아빌드위크 견학, ② 2023 건축분야 공무원 워크숍, ③ 건설사업관리의 이해, ④ 도면검토 방법, ⑤ 내진설계 및 내진보강 이해

❍ 품질 향상을 위한 설계·시공 사례집 작성

- 건축물 하자 및 우수사례를 조사·작성하고 관련 자료를 설계시공 단계에 적극 활용하여 공공건축물 품질향상에 기여

앞으로
			□ 녹색성장 정책에 부응하는 탄소중립 건축물 건립 □ 하자 최소화 및 품질향상을 위한 자체 교육 강화

【5】공공건축물 통합 유지관리 및 건설현장 품질관리 강화

道 공공건축물 유지관리 체계 일원화로 적기에 보수·보강 추진, 건축물 내구성 향상 및 안전관리 강화 기틀 마련

건설 현장별 품질·안전점검 실시하여 안전한 건설 현장 조성

□ 道 공공건축물 통합 유지관리 체계 구축 및 보수·보강공사 추진

❍ 「충청남도 공공건축물 유지관리 업무추진 규정」 제정(4월) 및 「충청남도 공공건축물 유지관리 매뉴얼」 작성(5월)

- 유지관리 대상* 공공건축물 및 업무범위, 업무수행 세부사항 확정

* ’23년 유지관리 대상 공공건축물 : 10개소 94동 (단계별 확대 추진)

❍ ’23년 유지관리 대상 공공건축물 실태조사 실시(4~5월)

- ‘보건환경연구원 옥상방수’등 3개 공사 설계·발주 추진 중, 실태조사 결과 등을 반영하여 중단기 보수·보강 계획 수립(6~7월)

□ 건설공사 현장 안전확보 및 품질향상을 위한 안전점검 추진

❍ 해빙기·우기 대비 건설공사 현장 안전점검 추진(32개소 / 2회)

- 현장관리 및 서류구비 미흡 등 8개소 17건 지적사항 조치 완료

- 건설본부 내 직접감독공사 현장 기성·준공 검사 실시(3개소)

❍ 건설공사 품질향상 위한 품질시험 추진 (62건 / 382종목)

- 시험기기(20종 52기) 교정검사 실시로 품질시험 신뢰도 확보

- 품질시험 종목 확대 추진(가드레일 지지력, 벽돌 등 3개 분야 10종목)

앞으로
			□ 건축물 보수·보강계획 수립 및 유지관리사업 확대 □ 현장 안전점검 및 철저한 품질시험으로 건설공사 안전확보

【6】자연재해 대비·대응하는 안전한 하천정비 추진

자연환경과 조화를 이루는 지방하천 정비사업 추진

집중호우로 인한 제방 유실·범람 등 피해지역 재해복구사업 추진

□ 2023년 하천정비사업 : 38개지구 / 71,319백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	38	71,319	7	16,638	27	52,681	4	2,000
지방하천	35	71,319	4	16,638	27	52,681	4	2,000
재해복구	3	-	3	-	-	-	-	-

※ 재해복구사업 이월예산으로 사업 추진

□ 재해로부터 안전한 지방하천정비사업 신속 추진

❍ ’23년 사업비 713억원 중 410억원 집행(집행률 57.5%)

- 상반기 발주 2건1), 설계 완료 8건2), 공사 추진 10건3)

1) 발주 : 간치천, 남성천

2) 설계 : 와룡천, 용요천, 칠산천, 도마천, 진산천, 유등천, 청지천, 왕대천

3) 공사 : 병천천, 광기천, 주교천, 장재천, 신양천, 석림천, 중산천, 화산천,
명천천, 장승천

□ 신속한 재해복구 및 친환경 하천정비 추진

❍ 온양천(95%)·금곡천(85%)·약봉천(60%)  재해복구사업 정상 추진 중

※ (7월 준공) 금곡천, 온양천 / (11월 준공) 약봉천

❍ 식생매트, 자연석 등 친환경 호안공법을 적용한 하천정비 추진

앞으로
			□ 견실 시공 및 장마철 집중호우 대비, 안전관리 철저 □ 연내 계획 공정률 달성 및 설계 완료지구는 신속 보상 추진

【7】균형있는 발전을 위한 지역개발사업 추진

서해안 균형발전 및 지역 간 연계기능 확보로 지역 경제 활성화

산업지역 교통 여건 개선으로 도로 이용자 편의 도모

□ 2023년 지역개발사업 : 4지구 / 800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	사업량 (km)	사 업 비				비고
		합 계	기시행	2023년	장 차
계	40.16	71,746	37,152	800	33,794
태안기업도시 연결도로 개설공사	0.61	36,646	36,646	-	-	준공(’23. 5.)
음봉 일반산업단지 진입도로 개설공사	1.90	30,000	506	-	29,494	설계 중
내포~삽교호 자전거도로 개설공사	36.4	3,000		100	2,900	설계 중
행정저수지 생태탐방로 연장사업	1.25	2,100		700	1,400	설계 발주 중

※ 태안기업도시·음봉일반산단 이월예산으로 사업 추진

□ 태안 기업도시 연결도로 개설공사 준공

❍ 서산웰빙특구와 태안 기업도시 연결도로를 개설하여 서해안 관광산업 활성화 및 지역 균형발전 기여

□ 음봉 일반산업단지 진입도로 개설공사 설계 착수

❍ 산업단지 개발 등 교통량 증대 요인에 대응하기 위한 도로 확·포장사업으로써 도로 간선 기능 확보 및 지역경제 활성화 도모

□ 내포~삽교호 자전거도로 개설공사 설계 착수

❍ 삽교천 제방도로를 활용한 자전거도로 설치로 친환경 교통 수단 확산 및 충남도 탄소중립에 기여

□ 행정저수지 생태탐방로 연장사업 추진

❍ 대둔산 도립공원 활성화 및 지역주민 삶의 질 향상을 위한 둘레길 조성

\

앞으로
			□ 원활한 사업 추진을 위해 관련부서와 신속히 협의 □ 철저한 공정계획 수립 및 주기적인 점검으로 공사 추진

【8】도민이 안심하고 이용할 수 있는 도로 유지관리 추진

선제적인 도로 유지·보수 추진으로 이용자 편의 제공

철저한 자연재해 대비·대응으로 도민의 재산과 생명 보호

□ 2023년 도로 유지·보수 사업 : 236지구 / 116,741백만원

(단위: 백만원)

구 분	합 계		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	236	116,741	63	33,469	173	83,272
자체사업	121	22,475	16	944	105	21,531
재배정사업	102	57,133	40	29,717	62	27,416
위임국도	13	37,133	7	2,808	6	34,325

❍ ’23년 사업비 1,167억원 중 603억원 집행(집행률 52%)

- 준   공 : 광금도로 선형개량공사 등 100건 13,861백만원

- 추진 중 : 관리도로 선형개량공사 등 136건 46,439백만원

□ 철저하고 선제적인 재해대책 추진

❍ 완벽한 겨울철(’22. 11. 15. ~ ’23. 3. 15.) 재해대책 추진

- 인력 168명·제설장비 185대(임차포함)·소금 등 자재 11,191톤 투입,강설·결빙으로 인한 대형 교통사고 등 피해없이 제설대책 마무리

❍ 철저한 여름철(’23. 5. 15. ~ ’23. 10. 15.) 재해대책 추진

- 급경사지·산사태 우려지역 등 재해 취약시설 상시점검 추진

- 유관기관 협조체계 구축 및 응급복구 장비·인력·자재 사전확보

앞으로
			□ 연내 계획된 도로 유지 · 보수사업 완벽히 마무리 □ 상시·비상근무체계 유지 및 재해 발생 시 신속히 대응

【9】도로 파손 방지를 위한 운행제한 위반차량 강력단속

쾌적한 도로 관리를 위한 과적 및 안전기준 위반차량 단속 강화

체납 과태료 집중 관리 및 징수활동 강화

□ 원활한 도로 유지·관리를 위한 단속 강화

❍ 도내 지방도·국지도·위임국도 62개 노선 수시 이동단속

- 주요 과적 근원지(대형공사장 등) 및 위험교량 주변 노선 단속 철저

< 최근 3년간 단속현황>

(단위 : 대)

구 분	검 차 대 수			적 발 대 수
	2021년	2022년	2023년 6월	2021년	2022년	2023년 6월
합 계	10,120	7,224	6,045	417	265	130
동부사무소	6,265	5,349	3,175	143	133	61
서부사무소	3,855	1,875	2,870	274	132	69

□ 불법행위 근절을 위한 유관기관 합동단속 실시

❍ 국토관리사무소, 시·군 및 경찰서 등 유관기관 합동단속 실시

- 2023년 상반기 합동단속 : 총 16회 (검차 310대 / 적발 14대)

□ 근무환경 개선을 위한 이동검문소 개량사업 추진

❍ 단속 시 진입차로 확보·계측대와 차도 분리 가드레일 설치 등 단속원의 업무 능률 향상 및 안전 확보

- 이동검문소 설치 현황 : 총 12개소 (5개소 설치 중 / 논산2, 보령2, 부여1)

□ 체납 과태료 집중 관리 및 징수활동 강화

❍ 체납고지서 수시 발송 및 전화·문자 등을 통한 징수 활동 강화

❍ 체납자 재산조회(예금·차량 등)를 통한 압류 적극 추진

※ (’21년 대비 ’22년)건수 기준 159%, 수납액 기준 168%로 체납 징수율 향상

앞으로
			□ 대형공사장 · 위험교량 등 집중단속을 통한 과적 예방 □ 체납 과태료 징수강화 및 징수 불가 체납액 결손처분

Ⅲ. 도의회 관련 처리상황

□ 2022년도 행정사무감사 처분요구 처리상황

< 총  괄 >

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
	7	7	-	-	-
시정요구	-	-	-	-	-
처리요구	2	2	-	-	-
제안사항	5	5	-	-	-

< 완료사항 >

① 운행제한 위반차량 단속 철저 및 과태료 미수납액 징수 대책 마련 (처리요구)

❍ 운행제한 위반차량 단속 강화에 대한 적극적인 조치로

- 과적 발생 근원지, 위험 교량 지역 등 취약지역 수시 이동단속 실시

- 국토관리사무소, 경찰서 등 유관기관 간 월 1회 이상 합동단속 실시

- 연중 대형공사장, 골재채취장 등 해당업체 방문 과적예방 홍보

- 노후 장비(차량, 측정기) 교체로 단속 실적 저해요인 제거 및
이동검문소 개량사업 추진으로 위반(과적)차량 단속 강화

❍ 체납액 징수 강화에 대한 적극적인 조치로

- 차량 압류(재산권 제한)에도 재산처분 이전까지 체납자의 고의 과태료 미납 문제점 보완을 위해 전자예금압류시스템을 적극 활용

- 전자예금압류시스템 사용자 교육 2회 실시(’22. 1. 7. / 5. 20.)

< 체납액 징수강화 실적 >

구분	2021년(A)		2022년(B)		증가율(B/A, %)
	건수	수납액 (천원)	건수	수납액 (천원)	건수 기준	금액 기준
합계	36	26,521	56	41,386	159%	168%
동부사무소	14	7,890	25	15,839	179%	201%
서부사무소	22	18,631	31	25,547	141%	137%

② 장기간 내용연수 초과된 도로보수장비 관리 철저(처리요구)

- 2023년 도로보수용 장비 관리 운영계획 수립(’23년 1월)

- 매월 도로보수용 장비 점검 실시(차량·건설기계)

- 수시로 내용연수 초과 대상 물품 관리전환 조회 후 불용처리 진행

- 한정된 예산의 효율적 사용을 위해 사용빈도가 높고, 내용연수가
초과된 순으로 장비 교체 추진 中

□ 향후 사용 가치가 손실된 물품은 즉시 불용 처리 하고, 교체가 필요한 물품의 경우 차기 예산에 반영될 수 있도록 적극 대응하겠음.

③ 폭설 등 매뉴얼 재정비 및 동절기 공사정지 관리 강화(제안사항)

- 자체적 겨울철 도로 제설대책을 수립하여 단계별 비상근무 및 제설작업을 시행하고 있으며, 대규모 피해발생이 우려되는 경우, ｢풍수해 현장조치 행동매뉴얼｣에 따라 재난에 적극 대응 中

□ 폭설 등 기상 악화에 도민의 생명과 재산을 지킬 수 있도록 폭설대책 매뉴얼을 재정비하고, 동절기 기온 강하로 인한 건설공사 품질 저하 및 부실시공 방지를 위해 공사정지 관리 철저히 하겠음.

④ 친환경 제설재 사용 및 상습결빙지역 안전 대책 마련(제안사항)

- 환경오염예방과 도로시설물 등 부식방지를 위해 매년 친환경제설재 사용을 확대 시행 中 (’20년 199톤, ’21년 709톤, ’22년 1,203톤)

□ 향후 예산 범위 내에서 사용량을 늘리도록 노력하겠음.

- 현재 도내 20개 구간의 자동염수분사장치를 설치․운용하고 있으며, 1개소를 추가적으로 설치할 계획

□ 앞으로도 상습 결빙지역에 동시설을 확충해 나갈 수 있도록
예산확보 등 최선의 노력을 다 하겠음.

⑤ 안전한 도로교통환경을 위한 포토홀 저감 대책 마련(제안사항)

- 스마트 도로유지관리시스템 우선순위에 따라 체계적인
포장·유지관리를 시행하고, 아스콘 포장 시에는 철저한 시공·품질 관리를 통해 포트홀이 발생되지 않도록 노력

□ 중차량 통행량이 많아 포트홀 발생이 잦은 구간은 순찰을 강화하고 신속히 보수하여 도로 이용자의 불편이 최소화되도록 노력하겠음.

⑥ 적극적인 민원해결 및 소통하는 조직문화 구축 필요(제안사항)

- 적극적인 민원 해결을 위해 협의 기간 중 주 1회 이상 사업지구를 방문하여 현장 협의를 실시하는 등 도민 의견 적극 수렴

- 소통하는 조직문화 구축을 위해 본부 내 브레인스토밍 형식의 자유로운 지식동아리 운영 및 업무 연찬회 등 개최

□ 앞으로 도민 □ 도의원 □ 이해관계인과의 사전 협의를 통해 민원 사항을 능동적으로 해결하고 세대 간 직급 간 소통장벽을
해소해 화합하는 조직문화를 구축해 나아가겠음.

⑦ 수의계약 대상 금액 상향 및 지역업체 활성화 방안 마련(제안사항)

- ʼ22년 충청남도 종합청렴도는 하락(2→3등급)했으나, 공사·용역분야의 하락폭은 미미(공사 0.05점, 용역 0.1점)하고, 민·관 수요를 적극 반영하여 1인 수의계약 대상금액 상향(1,000→2,000만원) 추진 완료(’23.03.22.)

- 청렴도 상향 방안으로 1인 수의계약 건수 총량제 도입(’23.01.01.~)

< ‘19~22년 공공기관 종합 청렴도 평가 결과  >

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	증감
종합	2등급	3등급	2등급	3등급	△1등급
용역	9.54	9.53	9.59	9.49	△0.1
공사	5.74	4.75	9.32	9.27	△0.05

□ 앞으로 지역경제 활성화를 위해 지역제한이 가능한 범위 내
최대한 지역제한 계약을 체결하겠음.

Ⅳ. 참고사항

□ 주요 사업별 예산 확보 현황

【1】 분야별 사업추진 내역 (총괄표)

(단위 : 백만원, ’23년 6월 기준)

분야별		지구수	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
총 계		352	441.54	428,668	-
도 로	계	44	213.92	156,489	도로건설과
	국 지 도	11	90.58	22,465
	지 방 도	29	118.66	130,562
	기타도로 (국도포함)	4	4.68	3,462
공공건축		27	-	82,145	공공건축과
시설유지관리		3	-	1,174	시설유지관리과
지방하천정비		35	172.27	71,319	하천개발과
재해복구		3	15.2	-
지역개발		4	40.15	800
도로유지관리		236	-	116,741	동부사무소 서부사무소

【2】도로 확·포장사업 현황

(단위 : 백만원, ’23년 6월 기준)

총 괄		’23년 준공지구		계 속 지 구		’23년 신규지구
◀ 44지구 / 156,489 ▶		◀ 6지구 / 23,354▶		◀ 30지구 / 129,849 ▶		◀ 8지구 / 3,286 ▶
국지도 11 / 22,465		국지도 2 / 14,897		국지도 8 / 7,282		국지도 1 / 286
지방도 29 / 130,562		지방도 2 / 8,457		지방도 20 / 119,105		지방도 7 / 3,000
국 도 4 / 3,462		국 도 2 / -		국 도 2 / 3,462		국 도 - / -

사 업 명			사업량	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
				전 체	기시행	2023년	장 차
총 계			44지구 (213.92㎞)	1,813,855	400,704	156,489	1,256,703
국 지 도			11지구 (90.58km)	606,282	211,204	22,465	372,804
준공	공사	이호~양곡	연장=4.85km	27,377	23,465	3,902	-	’18.09. ~’23.08.	91	공사
		청양~신양IC	연장=16.2km	61,131	50,136	10,995	-	’17.05. ~’23.11.	80	공사
계속	사후	선장~염치	연장=11.34km	132	107.0	25	-	’20.10. ~’23.07.	100	사후환경
		성환~입장	연장=10.3km	99,100	3,334	714	95,052	’20.~’29.	-	설계
	설계
		효제리~위라리	연장=0.75km	3,000	1,300	1,000	700	’21.~’24.	-	설계
		진산~금산	연장=10.0km	60,816	7,845	286	52,685	’20~’28	1	보상
	보상
		우성~이인	연장=0.89km	33,957	1,519	714	31,724	’21.~’28.	1	공사
	공사
		임천~강경	연장=9.88km	49,615	6,166	714	42,735	’21~’29	1	공사
		장척~목현	연장=3.67km	34,578	1,278	3,114	30,386	’21.~’29.	1	공사
		당진~서산	연장=19.1km	186,476	116,054	715	69,708	’19.04. ~’28.03.	10	공사
신규
		충북도계~탑원	연장=3.6km	50,100	-	286	49,814	’23~’30	-	설계
	설계
지 방 도			29지구 (118.66km)	1,157,168	176,617	130,562	849,839
준공	공사	대술~정안	연장=4.8km	23,401	18,147	5,254	-	’19.07. ~’23.07.	80	공사
		규암~청남	연장=2.51km	30,025	26,822	3,203	-	’18.03. ~’23.09.	95	공사
계속	설계	서면~비인	연장=5.09km	29,100	1,140	4,750	22,960	’20.~’27.	-	설계
		보산원도로	연장=0.7km	3,000	795	750	1,455	’17.~’26.	-	설계
		노화~평촌	연장=3.38km	34,723	440	1,500	32,783	’20.~’29	-	설계
		동해~부곡	연장=7.23km	44,021	920	1,000	42,101	’20.~’29	-	설계
		광시~운곡	연장=6.74km	46,490	1,071	700	44,719	’20.~’29	-	설계
		왕암도로	연장=1.0km	15,440	50	3,000	12,390	’20.~’25.	-	설계
계속	보상	기지시~한진	연장=9.36km	143,171	37,698	30,000	75,473	’17.~’30.	1	보상
		밀두~대음	연장=3.58km	49,170	1,000	16,000	32,170	’18.~’27.	1	보상
		두마~노성	연장=9.25km	116,590	13,242	12,400	90,948	’18.~’30.	1	보상
		산동~상덕	연장=7.74km	128,659	3,438	3,000	122,221	’18.~’30.	1	보상
		복수~진산	연장=4.28km	107,100	1,746	1,000	104,354	’20.~’30.	1	보상
	공사	삭선~원북	연장=6.08km	46,514	14,560	14,600	17,354	’17.~’27.	1	공사
		화성~장곡	연장=2.4km	13,306	1,400	3,000	8,906	’18.~’25.	1	공사
		구룡~용두	연장=1.3km	10,795	1,285	3,000	6,510	’18.~’25.	1	공사
계속	공사	고암~역재	연장=1.24km	11,000	300	4,000	6,700	’21.~’25.	1	공사
		반계도로	연장=1.25km	9,783	663	-	9,120	’17.~’26.	1	공사
		어천~공주 (4차)	연장=3.95km	48,900	24,116	6,211	18,573	’20.12. ~’26.12.	20	공사
		무창포IC ~웅천	연장=1.4km	15,626	9,965	4,000	1,661	’20.06 ~’25.05.	28	공사
		웅천산단 진입도로	연장=1.0km	9,305	5,860	3,194	251	’20.06. ~’24.07.	31	공사
		오천우회	연장=3.98km	22,449	11,959	7,000	3,490	’20.10. ~ ’27.04.	56	공사
신규	설계	무창포IC ~웅천2	연장=1.3km	8,400	-	500	7,900	’23.~’29.	-	설계착수
		대봉~흥산	연장=4.6km	19,400	-	500	18,900	’23.~’29.	-	설계착수
		홍동우회	연장=1.2km	8,500	-	500	8,000	’23.~’27.	-	설계 착수
		신계~관정	연장=3.4km	22,100	-	500	21,600	’23.~’28.	-	발주예정
		당정~남전	연장=5.5km	16,500	-	500	16,000	’23.~’28.	-	발주예정
		장선~복룡	연장=4.0km	21,000	-	500	20,600	’23.~’28.	-	발주예정
		인주~염치	연장=10.4km	102,700	-	-	102,700	’23.~’28.	-	타당성 조사
국도			4지구 (4.68km)	50,405	12,883	3,462	34,060
준공	공사	장평지구	연장=1.4km	5,500	5,040	-	460	’19.12. ~’23.08.	100	준공
		정산지구	연장=1.0km	8,000	4,705	-	3,295	’20.08. ~’23.08.	100	준공
계속	설계	합곡지구	연장=1.39km	18,000	488	150	17,362	’21.~’25.	-	설계
	공사	원청사거리	연장=0.89km	18,905	2,650	3,312	12,943	’20.07. ~’24.11.	17	공사

【3】공공건축사업 현황

(단위 : 백만원, ’23년 6월 기준)

총 괄		‘23년도 준공사업		계속사업		‘23년도 신규사업
◀ 27건 / 82,145 ▶		◀ 7건 / 2,790 ▶		◀ 13건 / 78,628 ▶		◀ 7건 / 727 ▶

사 업 명				사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
					전체	기시행	2023년	장차
합계					721,960	163,824	82,145	475,991
구분	공정	연번	소계	7건	16,194	13,404	2,790	0
준공	공사	1	당진 합덕119 안전센터 증축공사	지상1층 62㎡ 내·외부 환경개선	865	865	-	-	’21.07.～ ’23.05.	100	준공
		2	아산지역 제설 전진 기지 신축공사	지상1층 400㎡	525	25	500	-	’22.05.～ ’23.09.	1	공사
		3	대천항 관공선 통합 사무실 건립공사	지상2층 1,370㎡	4,988	2,725	2,263	-	’20.08.～ ’23.08.	80	공사
		4	수산종자 연구센터 건립공사	지상3층 1,995㎡	7,214	7,214	-	-	’20.09.～ ’23.08.	56	공사
		5	공주 소방서 다목적 훈련탑 /소방 안전 체험교실 증축공사	지상4층 432㎡	939	939	-	-	’21.03.～ ’23.07.	80	공사
		6	공주 소방서 비상 대기소 증축공사	증축 191㎡	637	637	-	-	’22.04.～ ’23.11.	15	공사
		7	청양119 구조구급 센터 증축공사	증축 지상2층 275㎡	1,026	999	27	-	’22.02.～ ’23.12.	1	공사

사 업 명				사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
					전체	기시행	2023년	장차
구분	공정	연번	소계	13건	508,930	150,420	78,628	279,882
계속	공사	8	충남 스포츠 센터 건립공사	지하1층 지상2층 13,344㎡	52,500	31,861	16,756	3,883	’18.08.～ ’24.04.	61	공사
		9	소방 복합시설 건립공사	지하1층 지상4층 17,042㎡	76,649	60,522	8,065	8,062	’17.10.～ ’24.04.	32	공사
		10	충남 육아종합 지원센터 건립공사	지하2층 지상3층 3,459㎡	15,126	7,643	2,687	4,796	’20.10.～ ’24.04.	15	공사
		11	충남 사회적 경제 혁신타운 건립공사	지하1층 지상4층 7,333㎡	28,780	12,440	9,180	7,160	’21.05.～ ’25.01.	1	공사
	설계	12	충남국제 전시 컨벤션센터 건립공사	지하1층 지상4층 52,223㎡	160,300	5,869	1,505	152,926	’20.10.～26.12.	-	기술제안 작성기간
		13	금산 소방서 증축공사	지하1층 지상4층 2,300㎡	9,871	415	4,827	4,629	’21.01.～ ’24.12.	60	설계
		14	당진 소방서 증축공사	지하1층 지상4층 2,300㎡	9,864	4,432	5,432	-	’21.08.～ ’24.09.	100	설계
		15	충남 장애인 가족 힐링센터	지하1층 지상2층 6,550㎡	26,765	7,184	979	18,602	’21.07.～ ’25.03.	60	설계
		16	충남 미술관 건립공사	지하2층 지상4층 26,680㎡	79,993	9,800	7,784	62,409	’21.04.～ ’26.03.	95	설계
		17	안면도 지방정원 가든센터 건립공사	지상2층 1,982㎡	13,500	4,504	8,996	-	’21.06.～ ’25.03..	85	설계

사 업 명				사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
					전체	기시행	2023년	장차
계속	설계	18	충남 광역형 탄소중립 연수원 조성사업	신축 1,844㎡ 리모델링 301㎡	19,800	4,950	8,950	5,900	’22.01.～ ’24.12.	80	설계
		19	충청권통일플러스센터신축사업	신축 지하1층 지상3층 2,300㎡	10,000	800	3,200	6,000	‘22.12.~ ’25.12.	1	설계
		20	동학사 119안전 센터 건립공사	신축 지상3층 1,100㎡	5,782	-	267	5,515	’22.09.～ ’25.01.	75	설계

<신규지구>

사 업 명				사업량	사업비				의뢰예정	공정률 (%)	비고
					전체	기시행	2023년	장차
구분	공정	연번	소계	6건	199,836	0	727	196,109
신규	-	21	광역 해양자원 순환센터 건립공사	지상2층 4,800㎡	15,000	-	-	15,000	‘23. 12.	-	검토
		22	여성가족 플라자 건립공사	지상5층 13,735㎡	49,440	-	-	49,440	‘23. 07.	-	검토
		23	충남 예술의전당 건립공사	지하2층 지상4층 16,398㎡	124,489	-	-	124,489	‘23. 07.	-	검토
		24	동물위생 시험소 당진지소 신축사업	지상3층 1,200㎡	5,200	-	-	5,200	’23. 03.	-	설계
		25	축산기술 전문교육관 건립공사	지상2층 650㎡	1,980	-	-	1,980	‘23. 07.	-	검토
		26	충남연구원 태양광 발전시설 설치사업	태양광발전설비 136kW	249	-	249	0	‘23. 03.	-	검토
		27	건설본부경관녹화조성사업	조경녹화 8,600㎡	478	-	478	0	‘23. 06.	5	설계

【4】공공건축물 보수·보강 현황(시설유지관리과)

(단위 : 백만원, ’23년 6월 기준)

총 괄		준공사업		계속사업		‘23년도 신규사업
◀ 3건 / 1,174 ▶		◀ 0건 / 0 ▶		◀ 0건 / 0 ▶		◀ 3건 / 1,174 ▶

사 업 명				사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
					전체	기시행	2023년	장차
합계				3건	1,174.5	-	1,174.5	-
신규사업	소계			2건	1,072	-	1,072	-
	자체	1	청사 개·보수 공사	본관동 및 시험동 (사무실 환경 개선)	873	-	873	-	’23. 6. ~‘23. 10.	-	설계 발주 준비
		2	충남 보건환경연구원 옥상 방수공사	본관동 옥상 (A=2,300㎡)	199	-	199	-	’23. 7. ~‘23. 11.	-	공사 발주 준비
	소계			1건	102.5	-	102.5	-
	재배정	1	충남 적정기술 공유센터 BF 본인증	BF 본인증 획득	102.5	-	102.5	-	’23. 7. ~‘23. 11.	-	설계 발주 준비

【5】지방하천 정비사업 현황

(단위 : 백만원, ’23년 6월 기준)

총 괄		’23년 준공사업		계 속 사 업		‘23년 신규사업
◀ 38건 / 71,319 ▶		◀ 7건 / 16,638 ▶		◀ 27건 / 52,681 ▶		◀ 4건 / 2,000 ▶
지방하천 35 / 71,319		지방하천 4 / 16,638		지방하천 27 / 52,681		지방하천 4 / 2,000
재해복구 3 / -		재해복구 3 /		재해복구 / -		재해복구 / -

<총  괄>

(단위 : 백만원, ’23년 6월 기준)

구 분	지구 수	사업량 (km)	사 업 비				비고
			계	기시행	2023년	장차
합 계	38지구	187.47	839,751	195,302	71,319	573,130
지방하천 정비사업	35지구	172.27	766,382	121,933	71,319	573,130	준공 4, 계속 27, 신규 4
지방하천 재해복구	3지구	15.2	73,369	73,369	-	-	준공 3

<지방하천 정비사업 세부 내역>

(단위 : 백만원, ’23년 6월 기준)

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2023년	장차
계	35지구			171.97	766,382	121,933	71,319	573,130
준공사업	소계 (4지구)			11.5	76,335	56,729	16,638	2,968
	중산천	공주	금흥	1.4	20,239	13,098	4,173	2,968	’20. 10. ~’23. 8.	62	준공
	화산천	서천	기산 화양	4.3	38,748	32,585	6,163	-	’18. 3. ~’23. 12.	88	준공
	명천천	서산	성연	1.1	3,047	2,070	977	-	’21. 3. ~’23. 9.	40	준공
	장승천	청양	청양	4.7	14,301	8,976	5,325	-	’20. 12. ~’23. 10.	38	준공
계속사업	소계 (27지구)			145.9	600,884	65,204	52,681	482,999
	병천천	천안	병천	7.3	35,149	16,474	9,000	9,675	’20. 7. ~’24. 1.	30	공사
	광기천	천안	병천	6.8	29,007	10,960	9,000	9,047	’20. 7. ~’24. 5.	42	공사
	주교천	부여	세도	6.7	23,972	5,540	6,000	12,432	’20. 12. ~’24. 11.	17	공사
	천안천 (장재천)	천안	백석 불당	2.5	23,170	4,944	9,000	9,226	’21. 8. ~’24. 7.	35	공사
	신양천	논산	연무	8.6	27,084	4,080	8,000	15,004	’21. 8. ~’24. 11.	17	공사
	석림천	서산	석림	0.5	710	471	-	239	’20. 12. ~’23. 12.	-	정지
	간치천	보령	주산 웅천	8.3	33,649	2,404	5,000	26,245	’19.~’26.	-	공사
	와룡천	홍성	갈산 결성	7.7	25,247	1,050	-	24,197	’19.~’24.	-	설계
	용요천	태안	근흥	6.5	45,278	1,349	4,132	39,797	’19.~’24.	-	설계
	칠산천	부여	임천	11.0	25,373	1,602	-	23,771	’20.~’25.	-	설계
	도마천	서천	문산 시초	9.4	23,851	1,200	2,000	20,651	’19.~’24.	-	설계
	진산천	금산	진산	4.9	7,420	945	-	6,475	’20.~’25.	-	설계
	유등천	금산	복수	6.1	14,323	1,296	-	13,027	‘18. ~’23.	-	설계
	청지천	서산	장홍 석림	5.9	29,431	1,118	549	27,764	’20.~’25.	-	설계
	왕대천	계룡	두마	3.4	6,497	568	-	5,929	’19.~’24.	-	설계
	판교천	서천	종천 서천	4.4	14,376	754	-	13,622	’20.~’25.	-	설계
	왕암천	논산	가야곡	8.9	23,370	1,124	-	22,246	’20.~’25.	-	설계
	오봉천	당진	송악 신평	6.0	23,699	1,091	-	22,608	’20.~’25.	-	설계
	둔포천	아산	둔포	4.5	40,222	843	-	39,379	’21.~’26.	-	설계
	솔리천	서천	장항	1.3	4,997	901	-	4,096	’22.~’27.	-	설계
	초대천	당신	신평	6.3	37,394	1,410	-	35,984	’21.~’26.	-	설계
	양촌천	논산	양촌	3.4	15,832	803	-	15,029	’21.~’26.	-	설계
	판정천	천안	입장	3.4	8,598	603	-	7,995	’21.~’26.	-	설계
	도곡천	계룡	엄사	2.5	15,086	835	-	14,251	’22. ~’27.	-	설계
	성연천	서산	성연	2.2	14,039	1,036	-	13,003	’22.~’27.	-	설계
	구룡천	천안	신방	1.9	18,665	781	-	17,884	’22.~’27.	-	설계
	삽교천	홍성	홍동	5.5	34,445	1,022	-	33,423	’22.~’27.	-	설계
신규사업	소계 (4지구)			14.57	89,163	-	2,000	87,163
	남성천	부여	임천	2.1	12,696	-	300	12,396	’23.~’28.	-	설계
	유구천	공주	유구	3.1	28,517	-	700	27,817	’23.~’28.	-	발주전
	갈두천	태안	원북	6.87	27,845	-	600	27,245	’23.~’28.	-	발주전
	읍내천	청양	정산	2.5	20,105	-	400	19,705	’23.~’28.	-	발주전

<지방하천 재해복구사업>

(단위 : 백만원, ’23년 6월 기준)

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2023년	장차
계	3지구			15.2	73,369	73,369	-	-
준공사업	금곡천	아산	배방	2.7	11,895	11,895	-	-	’21.08. ~’23.7.	85	준공
	약봉천	아산	송악	5.7	24,711	24,711	-	-	’21.07. ~’23.7.	60	준공
	온양천	아산	송악	6.8	36,763	36,763	-	-	’21.07. ~’23.7.	95	준공

【6】지역개발사업 현황

(단위 : 백만원, ’23년 6월 기준)

총 괄		’23년도 준공사업		계 속 사 업		’23년도 신규사업
◀ 4건 / 800 ▶		◀ 1건 / - ▶		◀ 1건 / - ▶		◀ 2 / 800 ▶

연번	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2023년	장차
합 계		2지구		2.5	71,746	37,152	800	33,794
준공사업	태안 기업 도시 연결도로 개설공사	태안 서산	태안 부석	L=0.6	36,646	36,646	-	-	’20.2. ~’23.5.	100	준공
계속사업	음봉 일반산업단지 진입도로 개설공사	아산	음봉	L=1.9 (4→8차로)	30,000	506	-	29,494	’22.~’24.	-	설계
신규사업	내포~ 삽교호 자전거도로 정비사업	예산	당진,아산	L= 36.4km	3,000	-	100	2,900	’23.4. ~’23.10.	-	설계
	행정 저수지 생태 탐방로 연장사업	금산	행정	L= 1.25km	2,100	-	700	1,400	23.~25.	-	설계

【7】도로 유지관리사업 현황

<동부․서부사무소>

(단위 : 백만원, ’23년 6월 기준)

사업 구분	총계		계속지구						신규지구
			합계		동부		서부		합계		동부		서부
계	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	236	116,741	63	33,469	49	26,720	14	6,749	173	83,272	91	41,478	82	41,794
자체사업	121	22,475	16	944	15	704	1	240	105	21,531	58	10,690	47	10,841
재배정사업	102	57,133	40	29,717	30	23,901	10	5,816	62	27,416	29	13,232	33	14,184
위임국도	13	37,133	7	2,808	4	2,115	3	693	6	34,325	4	17,556	2	16,769

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음.

<동부사무소 / 계속지구>

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
계(계속지구)			49개 지구			26,720
계속지구계속지구	소계	자 체 사 업	15개 지구			704
	자체사업	지방도635호 백암리 급경사지 정비사업	금산	복수	A=11,500㎡	53	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 공주지구 지방도 유지관리사업 실시설계용역	공주 전노선		1식	6	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 논산지구 지방도 유지관리사업 실시설계용역	논산 전노선		1식	29	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 천안지구 지방도 유지관리사업 실시설계 용역	천안 전노선		1식	7	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 금산지구 지방도 유지관리사업 실시설계용역	금산 전노선		1식	5	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 서천지구 지방도 유지관리사업 실시설계용역	서천 전노선		1식	5	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 청양지구 지방도 유지관리사업 실시설계용역	청양 전노선		1식	6	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 부여지구 지방도 유지관리사업 실시설계용역	부여 전노선		1식	6	22.12.~23.05.	100	완료
		[서천]국지도68호 원수도로 유턴차로 및 배수로 설치공사	서천	장항	1식	219	22.11.~23.12.	20	공사
		2022년 비점오염저감시설 유지관리용역	전노선		1식	16	22.11.~23.08.	80	추진중
		[금산]흑암교 보수공사	금산	남이	L=0.08km	35	22.12.~23.03.	100	완료
		지방도629호선 풍세터널 조명시설 교체공사 실시설계용역	천안	풍세	1식	9	22.11.~23.01.	100	완료
		황산대교 등 6개교 보수보강공사 실시설계용역	전노선		1식	14	22.12.~23.06.	100	완료
		덕목터널 외 11개소 청소용역	전노선		1식	26	22.12.~23.03.	100	완료
		설해 및 수해대비 자재구입	전노선		1식	268	22.12.~23.12.	40	추진중
	소계	재배정사업	30개 지구			23,901
	재배정사업재배정사업	지방도617호 남전도로 인도설치공사	서천	마서	L=1.80km	1,206	22.04.~24.12.	90	용역
		천안 오목도로 외 1개소 인도설치공사	천안	성거	L=0.40km	131	22.07.~23.03.	100	완료
		금산 복수도로 인도설치공사	금산	복수	L=0.30km	95	22.05.~23.05.	100	완료
		충청남도 도 경계표지판 정비공사	전노선		1식	37	22.12.~23.01.	100	완료
		[금산]지방도601호, 국지도68호선 마을주민 보호구역 정비사업	금산	제원	1식	218	22.11.~23.05.	100	완료
		[금산]지방도601호 평촌도로 마을주민 보호구역 정비사업	금산	부리	1식	182	22.12.~23.08.	50	용역
		지방도635호 건천1지구 등 2개소 급경사지 정비사업 실시설계 용역	금산	남이	1식	31	22.12.~23.04.	100	완료
		지방도606호 용마도로 갓길정비공사	청양	용마	L=0.95km	201	22.09.~23.08.	80	공사
		지방도645호 청양 탄정도로 회전교차로	청양	대치	1식	409	22.05.~23.11.	30	공사
		국지도96호 청양 중묵도로 교차로개선	청양	비봉	1식	264	22.09.~23.12.	60	용역
		지방도697호 KTX공주역 진입도로 선형개량	공주	이인	1식	2,858	19.01.~23.12.	80	공사
		지방도799호 덕지도로 선형개량	공주	탄천	L=0.40km	336	22.08.~23.06.	100	완료
		지방도645호 청양 광금도로 선형개량	청양	대치	L=0.58km	795	22.12.~23.05.	100	완료
		지방도697호 모촌도로 위험도로 개량공사	논산	양촌	L=0.70km	570	21.10.~24.12.	50	용역
		지방도799호 부여 현내도로 선형개량	부여	석성	L=0.70km	1,798	21.11.~23.12.	50	공사
		지방도606호 청양 봉우티고개 오르막차로	청양	남양	L=1.77km	2,474	21.04∼24.12.	10	공사
		지방도606호 대봉도로 외 5개소 재해복구공사	청양		1식	85	22.12∼23.05.	100	완료
		지방도610호 대봉도로 수로준설 재해복구공사	청양	남양	1식	41	22.12∼23.04.	100	완료
		지방도723호선 부여지구 재해복구사업	부여	은산	L=0.30km	248	21.03∼23.06.	100	완료
		[금산]지방도601호 개선복구사업	금산	제원	1식	853	22.11∼23.12.	80	공사
		지방도799호 우곤도로 위험도로 선형개량공사	논산	성동	L=1.85km	882	17.09∼23.09.	80	공사
		석막도로 선형개량공사	금산	진산	L=1.05km	1,862	20.12∼24.10.	60	공사
		천을도로 선형개량공사	금산	군북	L=1.16km	932	20.12∼24.10.	20	공사
		노성도로 선형개량공사	논산	노성	L=0.71km	3,170	21.07∼24.05.	40	공사
		지방도697호 주내사거리 회전교차로 설치공사	논산	상월	1식	508	21.01∼24.07.	70	용역
		광암교 재가설공사	청양	운곡	1개소	1,380	22.07.~23.12.	60	공사
		상일교 재가설공사	서천	판교	L=0.03km	1,321	22.12.~24.12.	10	공사
		일양교 등 2개교 보수보강공사	금산, 서천		1식	339	22.11.~23.06.	100	완료
		정안교 내진성능보강공사	공주	정안	1식	428	22.11.~23.03.	100	완료
		도로안전시설확충 등	전노선		1식	247	22.11.~23.12.	50	추진중
	소계	위 임 국 도	4개 지구			2,115
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	1,628	22.12.~23.12.	70	공사
		도로유지보수	전노선		1식	401	22.12.~23.12.	100	완료
		도로병목지점개선	전노선		1식	56	22.12.~23.12.	70	공사
		위험도로개선	전노선		1식	30	22.12.~23.12.	100	완료

<동부사무소 / 신규지구>

(단위 : 백만원, ’23년 6월 기준)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
계(신규지구)			91개 지구			41,478
신규지구신규지구	소계	자 체 사 업	58개 지구			10,690
	자체사업	천안지역 포장도 보수공사	천안		L=2.35km	660	23.04.~23.06.	100	완료
		국지도23호 망향도로 배수로 정비공사	천안	성거	1식	23	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도693호 동남구 차선도색 공사	천안	성환	L=8.4km	71	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도623, 691호 동남구 차선도색 공사	천안	광덕	L=16.3km	108	23.01.~23.06.	100	완료
		[천안]지방도623호 매당교차로 개선공사	천안	광덕	1식	50	23.02.~23.08.	60	용역
		천안지역 도로 유지보수 단가계약	천안		1식	40	23.03.~23.11.	100	완료
		지방도691,697호 계룡지구 배수로정비공사	공주	계룡	L=0.10km	68	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도604,629호 사곡지구 배수로정비공사	공주	사곡	L=0.15km	107	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도604호 덕학지구 배수로정비공사	공주	의당	L=0.10km	53	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도629호 동해지구 배수로정비공사	공주	유구	L=0.10km	24	23.01.~23.06.	100	완료
		2023년 공주지구 차선도색공사	공주		L=17.97km	153	23.06.~23.06.	100	완료
		논산지역 포장도 보수공사	논산		L=5.92km	700	23.05.~23.08.	60	공사
		지방도643호 도로정비공사	논산	가야곡	1식	24	23.04.~23.05.	100	완료
		지방도799호 병촌지구 외 1개소 정비공사	논산	병촌	1식	45	23.03.~23.05.	100	완료
		지방도697호 대우지구 외 1개소 정비공사	논산	상월	L=0.15km	45	23.03.~23.05.	100	완료
		지방도697호 반곡지구 외 3개소 정비공사	논산	연산	1식	35	23.03.~23.05.	100	완료
		국지도68호 신화4교 하부 콘크리트 포장공사	논산	연무	L=0.06km	17	23.04.~23.05.	100	완료
		논산지역 도로 유지보수 단가계약	논산		1식	40	23.03.~23.11.	60	공사
		금산지역 포장도 보수공사	금산		1식	400	23.05.~23.08.	60	공사
		수영도로 배수로 정비공사	금산	복수	L=0.49km	65	23.04.~23.06.	100	완료
		구억도로 배수로 정비공사	금산	제원	L=0.47km	73	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도635호 석막도로 사면정비공사	금산	진산	1식	61	23.01.~23.06.	100	완료
		2023년 금산지구 무인단속카메라 설치	금산	복수	1식	42	23.04.~23.05.	100	완료
		금산지역 도로 유지보수 단가계약	금산		1식	40	23.03.~23.11.	60	공사
		부여지역 포장도 보수공사	부여		1식	500	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도723호 팔충지구 배수로정비공사	부여	충화	L=0.37km	69	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도799호선 석성지구 배수로정비공사	부여	석성	1식	95	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도606호 전장지구 배수로정비공사	부여	외산	L=0.20km	30	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도625호선 정동지구 배수로정비공사	부여	부여	L=0.10km	20	23.05.~23.06.	100	완료
		지방도799호선 초촌지구 외 1개소 차선도색공사	부여	초촌	L=2.40km	27	23.05.~23.06.	100	완료
		지방도723호선 경둔지구 재해복구사업	부여	부여	1식	34	23.05.~23.06.	100	완료
		부여지역 도로 유지보수 단가계약	부여		1식	40	23.03.~23.11.	60	공사
		지방도611호 군사도로 및 지방도617호 화천도로 차선도색공사	서천	서천	1식	33	23.04.~23.05.	100	완료
		국지도68호 창선도로 인도정비공사	서천	장항	L=0.15km	31	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도611호 은곡도로 배수로 정비공사	서천	문산	1식	140	23.05.~23.08.	60	공사
		국지도68호 장암도로 배수로 정비공사	서천	장항	L=0.12km	69	23.05.~23.07.	70	공사
		서천지역 도로 유지보수 단가계약	서천		1식	40	23.03.~23.11.	60	공사
		국지도96호 용천도로 사면정비공사	청양	비봉	1식	159	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도723호 관현도로 사면정비공사	청양	장평	1식	19	23.04.~23.05.	100	완료
		지방도645호 중추도로 배수로 정비 및 도로포장공사	청양	장평	1식	26	23.05.~23.06.	100	완료
		지방도645호 작천도로 배수로정비공사	청양	대치	L=0.10km	34	.23.04.~23.05.	100	완료
		국지도70호 백천도로 배수로정비공사	청양	청양	L=0.14km	29	.23.04.~23.05.	100	완료
		지방도625호 신흥도로 배수로정비공사	청양	목	1식	20	.23.04.~23.05.	100	완료
		청양지역 도로 유지보수 단가계약	청양		1식	40	23.03.~23.11.	60	공사
		2023년 천안지구 포장도 보수공사(국지도 70호)	천안	성환	L=2.43km	350	23.05.~23.07.	50	공사
		[청양]지방도645호 먹거리종합타운 진입로 개선공사	청양	대치	1식	500	23.05.~23.12.	30	설계
		하반기 터널 및 교량 정비사업	전노선		1식	350	23.05.~23.12.	50	공사
		국유림 토지 보상	공주	정안	1식	150	23.05.~23.12.	-	협의중
									설계
								20
							23.05.~23.12.
						650
					1식
			논산
		하반기 논산 지방도 포장도 보수공사
		응급복구	전노선		1식	501	23.01.~23.12.	-	추진중
		지방도 풀깎기	전노선		1식	1,100	23.01.~23.12.	50	공사
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	23.01.~23.12.	50	추진중
		도로유지보수에 따른 폐기물 처리	전노선		1식	30	23.01.~23.12.	90	용역
		도로시설물 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	600	23.01.~23.12.	70	공사
		설해 및 수해대책 장비 임차료	전노선		1식	800	23.01.~23.12.	40	추진중
		설해 및 수해대비 자재구입	전노선		1식	700	23.01.~23.12.	40	추진중
		터널 및 교량 정비사업	전노선		1식	200	23.01.~23.12.	90	공사
		‘23년 비점오염저감시설 유지관리	전노선		1식	60	23.01.~23.12.	30	용역
	소계	재배정사업	29개 지구			13,232
	재배정사업재배정사업	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	23.01.~23.12.	50	용역
		운행방향 유도레인 설치	전노선		1식	30	23.01.~23.12.	10	설계
		지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선		1식	1,300	23.01.~23.12.	80	공사
		동물찻길사고 방지시설 설치	전노선		1식	200	23.01.~23.12.	80	공사
		도로 표지판 정비사업	전노선		1식	100	23.01.~23.05.	100	완료
		도로 표지판(LED) 개선사업	전노선		1식	150	23.01.~23.05.	100	완료
		2023년 서천지구 포장도 보수공사(1공구)	서천		1식	400	23.01.~23.06.	100	완료
		2023년 청양지구 포장도 보수공사	청양		L=2.38km	400	23.01.~23.06.	100	완료
		2023년 공주지구 포장도 보수공사	공주		L=6.88km	950	23.06.~23.08.	60	공사
		마을주민보호구역 정비	부여	구룡	1식	200	23.01.~23.12.	60	공사
		국지도68호 천내도로 인도설치공사	금산	제원	L=0.40km	600	23.01.~23.12.	10	공사
		지방도799호 증산도로 인도설치공사	부여	석성	L=0.40km	500	23.01.~23.12.	10	공사
		지방도613호 지현도로 인도설치공사	서천	한산	L=0.30km	75	23.01.~23.12.	90	용역
		지방도607호 신합도로 인도설치공사	서천	서	L=0.25km	750	23.01.~23.12.	90	용역
		지방도610호 대봉도로 인도설치공사	청양	남양	L=1.10km	600	23.06.~23.10.	30	공사
		지방도699호 탑동교차로 교차로 개선	부여	석성	1식	370	23.01.~24.12.	30	공사
		지방도723호 황골교차로 외1지구 교차로 개선	부여	양화	1식	100	23.01.~24.12.	30	용역
		지방도625호 석동교차로 개선	부여	장암	1식	50	23.01.~24.12.	30	용역
		지방도799호 응평교차로 개선	부여	초촌	1식	50	23.01.~24.12.	30	용역
		지방도691호 덕평도로 위험도로 개량공사	논산	부적	L=0.27km	100	23.01.~24.12.	50	용역
		지방도625호 북고도로 선형개량공사 실시설계용역	부여	장암	L=1.23km	100	23.01.~23.12.	40	용역
		지방도604호 유구도로 선형개량공사 실시설계용역	공주	유구	L=1.20km	600	23.01.~23.12.	40	용역
		국지도96호 안양도로 위험도로 개량공사 실시설계용역	공주	우성	L=1.00km	600	23.01.~23.12.	40	용역
		지방도723호 팔충도로 선형개량공사	공주	충화	L=0.20km	800	23.01∼23.12.	30	용역
		교량 및 터널 안전진단 및 점검	전노선		1식	1,491	23.01.~23.12.	50	용역
		황산대교 등 8개교 보수보강공사	전노선		1식	1,525	23.06.~23.12.	20	공사
		원수삼거리 개선사업	서천	장항	1식	71	23.01.~23.12.	80	용역
		지방도723호 팔충교차로 개선사업	부여	충화	식	500	23.01.~23.12.	30	공사
		지방도635호 건천1지구 등 2개소 급경사지 정비사업	금산	남이	L=0.80km	600	23.01.~23.12.	20	공사
	소계	위 임 국 도	4개 지구			17,556
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	11,709	23.01.~23.12.	40	공사
		도로유지보수	전노선		1식	5,264	23.01.~23.12.	40	공사
		도로병목지점개선	전노선		1식	360	23.01.~23.12.	30	공사
		위험도로개선	전노선		1식	223	23.01.~23.12.	20	공사

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음.

<서부사무소 / 계속․신규지구 >

(단위 : 백만원, ’23년 6월 기준)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
총 계			96개 지구			48,543
계(계속지구)			14개 지구			6,749
	소계	자체 사업	1개 지구			240
계속지구	자체사업	재해대책	전노선		1식	240	22.12.~23.03.	100	완료
	소계	재배정 사업	10개 지구			5,816
	재배정사업	지방도619호 백석도로 선형개량 공사 용역	당진	순성	1식	80	22.05.~23.07.	85	용역
		23년 도로유지보수공사 실시설계용역	전노선		1식	68	22.12.~23.03.	100	완료
		22년 지방도 인도설치공사(서산양길)	서산	팔봉	L=1.1km	181	22.04.~23.05.	15	공사
		22년 지방도 인도설치공사(당진고대)	당진	고대	L=0.4km	151	22.04.~23.12.	10	공사
		지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.87km	2,109	20.12.~23.04.	69	공사
		지방도603호 포지도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.84km	1,843	21.05~23.06.	50	공사
		지방도617호 도화담교 재가설공사	보령	미산	1식	311	22.10.~23.03.	100	완료
		교량 보수보강	전노선		1식	263	21.12.~23.03.	100	완료
		보령 월전도로 교차로 개선공사	보령	남포	1식	16	21.12.~23.03.	100	완료
		자동염수분사장치	전노선		1식	794	21.12.~23.03.	100	완료
	소계	위임 국도	3개 지구			693
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	187	22.01.~23.05.	100	완료
		도로유지보수	전노선		1식	339	22.01.~23.05.	100	완료
		위험도로개선	전노선		1식	167	22.01.~23.06.	100	완료
계(신규지구)			82개 지구			41,794
신규지구신규지구신규지구	소계	자 체 사 업	47개 지구			10,841
	자체사업	지방도610호 진죽도로 포장도 보수공사	보령	청소	1식	250	23.03.~23.05.	100	완료
		지방도610호 오포도로 포장도 보수공사	보령	오천	1식	330	23.03.~23.05.	100	완료
		지방도606호 수부도로 배수시설 정비공사	보령	웅천	L=0.15km	70	23.03.~23.06.	100	완료
		지방도606호 구룡도로 배수시설 정비공사	보령	웅천	L=0.02km	10	23.03.~23.05.	100	완료
		보령지역 도로 유지보수 단가계약	보령		1식	40	23.01.~23.11.	50	공사
		지방도628호 동암도로 포장도 보수공사	아산	음봉	1식	470	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도628호 냉정도로 외 2개소 배수시설 정비공사	아산	인주	L=0.40km	40	23.01.~23.06.	100	완료
		국지도70호 신동도로 배수시설 정비공사	아산	선장	L=0.30km	70	23.01.~23.06.	35	공사
		지방도624호 도흥도로 진출입로 배수시설 정비공사	아산	인주	L=0.15km	70	23.01.~23.07.	35	공사
		아산지역 도로 유지보수 단가계약	아산		1식	50	23.01.~23.12.	50	공사
		지방도634호 금학도로 포장도 보수공사	서산	팔봉	1식	300	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도634호 양길도로 외 2개소 배수시설 정비공사	서산	팔봉	L=0.20km	60	23.01.~23.06.	100	완료
		국지도96호 창리도로 포장도 보수공사	서산	운산	L=0.10km	300	23.01.~23.06.	100	완료
		서산지역 도로 유지보수 단가계약	서산		1식	40	23.01.~23.12.	50	공사
		지방도649호 천의도로 포장도 보수공사	당진	정미	1식	150	23.05.~23.06.	100	완료
		지방도622호 전대도로 포장도 보수공사	당진	송악	1식	340	23.05.~23.06.	80	공사
		지방도615호 광천도로 외 1개소 배수시설 정비공사	당진	순성	L=0.02km	30	23.01.~23.06.	30	공사
		지방도615호 성북도로 배수시설 정비공사	당진	순성	L=0.25km	40	23.05.~23.06.	100	완료
		지방도615호 진관도로 배수시설 정비공사	당진	고대	L=0.23km	50	23.05.~23.06.	100	완료
		지방도649호 도산도로 배수시설 정비공사	당진	정미	L=0.20km	40	23.05.~23.06.	100	완료
		당진지역 도로 유지보수 단가계약	당진		1식	50	23.01.~23.12.	50	공사
		지방도609호 신경도로 포장도보수공사	홍성	홍북	L=1.50km	220	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도609호 화신도로 포장도보수공사	홍성	홍동	L=1.10km	160	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도619호 천태도로 포장도보수공사	홍성	장곡	L=1.30km	180	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도609호 운월도로 배수시설 정비공사	홍성	홍동	L=0.40km	80	23.01.~23.06.	100	완료
		국지도96호 상송도로 배수시설 정비공사	홍성	장곡	L=0.20km	20	23.01.~23.06.	100	완료
		홍성지역 도로 유지보수 단가계약	홍성		1식	40	23.01.~23.12.	50	공사
		지방도619호 마교도로 외 3개소 배수시설 정비공사	예산	봉산	1식	200	23.03.~23.06.	90	공사
		지방도618호 발연도로 외 3개소 배수 및 616호 포장	예산	예산	1식	290	23.03.~23.06.	100	완료
		국지도70호 대덕도로 외 1개소 배수시설 정비공사	예산	신양	1식	170	23.03.~23.06.	100	완료
		예산지역 도로 유지보수 단가계약	예산		1식	40	23.01.~23.12.	50	공사
		국지도96호 당암도로 포장도 보수공사	태안	남	1식	400	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도634호 어은도로 포장도 보수공사	태안	태안	1식	200	23.01.~23.06.	100	완료
		국지도96호 도황도로 배수시설 정비공사	태안	근흥	1식	20	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도603호 내리도로 배수시설 정비공사	태안	이원	1식	40	23.01.~23.06.	100	완료
		태안지역 도로 유지보수 단가계약	태안		1식	40	23.01.~23.12.	50	공사
		지방도 풀깎기	전노선		1식	700	23.01.~23.12.	50	용역
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	23.01.~23.12.	50	추진중
		도로유지보수에 따른 폐기물 처리	전노선		1식	30	23.01.~23.12.	70	추진중
		도로시설물 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	600	23.01.~23.12.	80	공사
		응급복구	전노선		1식	100	23.01.~23.12.	50	공사
		(서산)국지도70호 문양~탑곡도로 포장도 보수공사	서산		1식	2,000	23.06.~23.12.	20	공사
		아산지역 전진기지(제설창고) 구축사업	아산		1식	491	23.01.~23.12.	20	공사
		설해 및 수해대책 장비 임차료	전노선		1식	900	23.01.~23.12.	40	추진중
		설해 및 수해대비 자재구입	전노선		1식	600	23.01.~23.12.	40	추진중
		터널 및 교량 정비사업	전노선		1식	100	23.01.~23.12.	40	추진중
		비점오염저감시설 유지관리	전노선		1식	120	23.01.~23.12.	50	추진중
	소계	재배정사업	33개 지구			14,184
	재배정사업	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	23.01.~23.12.	50	용역
		운행방향 유도레인 설치	전노선		1식	30	23.01.~23.06.	100	준공
		지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선		1식	1,300	23.01.~23.12.	50	공사
		동물찻길사고 방지시설 설치	전노선		1식	200	23.01.~23.12.	50	공사
		도로 표지판 정비사업	전노선		1식	100	23.04.~23.05.	100	완료
		도로 표지판(LED) 개선사업	전노선		1식	150	23.04.~23.05.	100	완료
		지방도 포장도 보수공사	전노선		1식	1,750	23.01.~23.12.	20	공사
		지방도645호 화천리,농은리 마을주민보호구간 정비공사	아산	도고	1식	50	23.01.~23.08.	20	발주준비중
		지방도615호 교로리 마을주민보호구간 정비공사	당진	석문	1식	50	23.01.~23.08.	20	발주준비중
		지방도619호 홍원리 마을주민보호구역 정비공사	홍성	홍동	1식	50	23.01.~23.12.	20	발주준비중
		지방도610호 정전리 마을주민보호구간 정비공사	보령	청소	1식	50	23.01.~23.12.	20	발주준비중
		지방도610호 관창도로 인도설치공사	보령	주교	L=0.36km	500	23.06.~23.09.	5	공사
		지방도623호 수철도로 인도설치공사	아산	배방	L=0.60km	160	23.01.~23.12.	20	공사
		지방도634호 양길도로 인도설치공사	서산	팔봉	1식	65	23.01.~23.12.	5	공사
		지방도619호 반촌도로 인도설치공사	당진	송악	L=0.58km	600	23.06.~23.9.	20	공사
		지방도616호 봉서도로 인도설치공사	홍성	금마	L=0.13km	300	23.01.~23.12.	20	공사
		지방도616호 녹문도로 인도설치공사	예산	신양	L=0.20km	500	23.01.~23.12.	20	공사
		지방도616호 화천도로 인도설치공사	예산	대술	L=0.20km	400	23.01.~23.12.	20	공사
		지방도603호 관리도로 인도설치공사	태안	이원	L=0.40km	300	23.01.~23.12.	30	공사
		지방도619호 백석도로 위험도로 개량공사	당진	순성	1식	700	23.07.~24.08.	20	용역
		지방도647호 조금도로 위험도로 개량공사	당진	대호지	1식	400	23.06.~23.09.	20	발주준비중
		지방도634호 고남도로 위험도로 개량공사	서산	성연	1식	200	23.01.~23.12.	20	발주준비중
		지방도603호 관리도로 위험도로 개량공사	태안	이원	1식	700	23.01.~23.12.	70	공사
		지방도634호 안산삼거리 교차로 개선공사	태안	원북	1식	200	23.01.~23.12.	50	용역
		지방도615호 순성사거리 교차로 개선공사	당진	순성	1식	200	23.01.~23.12.	20	용역
		국지도96호 산성삼거리 교차로 개선공사	홍성	장곡	1식	200	23.01.~23.12.	50	용역
		지방도647호 오학도로 교차로 개선공사	서산	해미	1식	300	23.01.~23.12.	70	용역
		지방도618호 대천사거리 교차로 개선공사	예산	고덕	1식	200	23.01.~23.12.	50	용역
		지방도603호 내리도로 선형개량공사	태안	이원	1식	600	23.06.~25.12.	5	용역
		교량 및 터널 안전진단 및 점검	전노선		1식	1,039	23.01.~23.12.	40	추진중
		지방도 교량보수보강	아산,예산		1식	370	23.01.~23.12.	30	발주준비중
		지방도617호 도화담교 재가설공사(2차분)	보령	미산	1개소	2,000	21.12.~24.01.	68	공사
		당진 정미 승산사거리 교차로 개선공사	당진	정미	1개소	500	23.01.~23.12.	20	용역
	소계	위 임 국 도	2개 지구			16,769
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	7,593	23.01.~23.12.	50	공사
		도로유지보수	전노선		1식	9,176	23.01.~23.12.	50	공사

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음.

□ 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
건설본부	본부장	지방기술서기관	김병용	2023.07.01.
	행정관리과장	지방행정사무관	이학규	2023.01.16.
	도로건설과장	지방시설사무관	박중호	2023.01.16.
	공공건축과장	지방시설사무관	나윤주	2023.01.16.
	시설유지 관리과장	지방시설사무관	안동수	2023.01.16.
	하천개발과장	지방시설사무관	정성진	2022.01.12.
	동부사무소장	지방시설사무관	김정흠	2021.07.01.
	서부사무소장	지방시설사무관	이재흥	2023.01.16.