		2022회계연도 결산

일반 및 특별회계

주요사업 추진현황

	충 청 남 도

목 차		페이지
일 반 회 계
《기획조정실》
1. 공공기관 경영효율화 추진방안 연구용역		7
《자치안전실》- 자치행정과
1. 충청권 통일플러스센터 건립		8
《자치안전실》- 공동체정책과
2. 소통협력공간 조성		9
《자치안전실》- 자연재난과
3. 재해위험지역정비(시군)		10
4. 공공시설물 내진보강(도)		11
5. 우수저류시설 설치		12
《산업경제실》- 미래산업과
1. 충남지식산업센터 건립		13
2. 충남국제전시컨벤션센터 건립		14
《산업경제실》- 경제정책과
3. 사회적경제 혁신타운 조성사업		15
《균형발전국》- 균형발전정책과
1. 지역발전투자협약 시범사업 지원		16
《복지보건국》- 복지보육정책과
1. 내포 자연놀이뜰 건립		17
2. 충남육아종합지원센터 건립		18
《복지보건국》- 장애인복지과
3. 충남 장애인가족 힐링센터 건립사업		19

목 차		페이지
《문화체육관광국》- 체육진흥과
1. 충남스포츠센터 건립		20
《문화체육관광국》- 관광진흥과
2. 기업도시 진입도로 지원		21
《농림축산국》- 농업정책과
1. 배수개선사업(민간보조)		22
2. 농업기반정비(수리시설개보수)		23
《농림축산국》- 농촌활력과
3. 정주환경 개선		24
《기후환경국》- 탄소중립정책과
1. 충남 기후환경교육원 조성		25
《기후환경국》- 대기환경과
2. 석탄화력발전소 주변 어린이건강영향조사		26
《기후환경국》- 물관리정책과
3. 금강 물환경 모니터링 3단계 사업		27
4. 충청남도 중점관리저수지 수질개선대책 수립 연구용역		28
《기후환경국》- 하천과
5. 하천기본계획 수립		29
6. 지방하천 정비사업(도)(전환사업)		30
7. 지방하천 정비사업(시군)(전환사업)		31
8. 지방하천 유지관리 사업		32
9. 지방하천 재해예방 사업		33
10. 국가하천 유지보수(금강권역)		34
11. 2021 지방하천 호우피해 복구		35

목 차		페이지
《건설교통국》- 교통정책과
1. 충청남도 노선버스운행정보시스템 구축		36
《건설교통국》- 도로철도항공과
2. 청양~신양IC(국지도 70호) 건설		37
3. 이호~양곡(국지도 96호) 건설		38
4. 당진~서산(국지도 70호) 건설		39
5. 성환~입장(국지도 70호) 건설		40
6. 우성~이인(국지도 96호) 건설		41
7. 장척~목현(국지도 96호) 건설		42
8. 임천~강경(국지도 68호) 건설		43
9. 지방도 유지 관리		44
10. 위험교량 등 구조물 개량		45
11. 지방도 정비사업		46
《건설교통국》- 토지관리과
12. 일본식 지명 등 조사·정비		47
《해양수산국》- 해양정책과
1. 도서지역 해양쓰레기 정화운반선 건조		48
2. 광역 해양자원 순환센터 건립		49
《해양수산국》- 해운항만과
3. 항만개발		50
《해양수산국》- 수산자원과
4. 지자체관리(지방)어항건설(시설비)		51
《산림자원연구소》
1. 지방정원 조성(태안)		52
2. 원산도자연휴양림 조성사업		53
《수산자원연구소》
1. 종자연구센터 건립		54

목 차		페이지
균형발전 특별회계
《산업경제실》- 미래산업과
1. 인공지능 지역상생 연구원 조성		57
《균형발전국》- 균형발전정책과
2. 논산 강경읍 활력채움터 조성지원		58
안면도관광지개발 특별회계
《균형발전국》- 개발전략과
1. 안면도관광지 연결도로 개설공사(공사비)		63
2. 안면도관광지 연결도로 개설공사(보상비)		64
특정자원 지역자원시설세 특별회계
《기후환경국》- 탄소중립정책과
1. 화력발전소 주변지역 기후환경영향 연구		67
《보건환경연구원》
2. 화력발전소 송전선로 환경역학조사 연구용역		68
소방 특별회계
《소방본부》- 회계장비과
1. 소방복합시설 조성사업		71
2. 당진소방서 청사 증축		72
3. 금산소방서 청사 증축		73

	일반회계

공공기관 경영효율화 추진방안 연구용역

[예산담당관실 소관, 일반회계(공공기관 관리)]

○ 공공기관들의 유사‧중복 기능 수행 등으로 인한 비효율성      제거 및 도민에게 양질의 공공서비스 제공

□ 용역개요

○ 대    상 : 충청남도 산하 지방공공기관 30개

○ 용역기간 : ’22. 8. 31. ~ ’23. 1. 31. (5개월)

○ 총용역비 : 807백만원(도비 807백만원)

○ 주요내용 : 기관 설립‧목적에 따른 기능 효율적 수행 여부, 조직 및 인력의 확대‧축소 필요성, 유사‧중복기능 조정 및 통폐합 여부 등 종합 진단

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	807	565	242	-	□연구원 인건비 □자문료, 인쇄비, 교통통신비, 회의비 □일반관리비, 이윤 등
국비	-	-	-	-
도비	807	565	242	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 유사·중복 기관 통·폐합 실시로 예산 절감 및 사회적 가치창출

○ 인사, 복리후생제도 등 기존의 비효율적 제도 개선을 통해 경영효율화 달성

예산담당관 과장 도중선(☎2120), 팀장 임지열(☎3160), 담당자 장준민(☎3173)

「충청권 통일+센터」 건립

[자치행정과 소관, 일반회계(충청권 통일플러스센터 건립사업)]

○ 평화통일 인프라의 수도권·접경지 집중에 따른 불균형 해소

○ 충청권 560만이 참여·소통하는 남북협력·통일교육 종합 플랫폼 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 홍성군 홍북읍 신경리 937번지

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

○ 사 업 량 : 연면적 2,100㎡(부지면적 3,000㎡)

○ 총사업비 : 10,000백만원(국비 4,000백만원, 도비 6,000백만원)

○ 주요내용 : 전시·체험실, 교육실, 테마도서관, 다목적홀 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	800	-	800	-	□ 건립 사전행정절차 장기화로 ’22년 사업비 전액 명시이월 처리
국비	400	-	400	-
도비	400	-	400	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 매력적인 콘텐츠를 통해 미래세대를 중심으로 확산하는 평화·통일에 대한 무관심을 극복하고 통일 공감대 확산에 기여

○ 내포신도시를 중심으로 충청권 대상 통일행정서비스 제공 가능

자치행정과 과장 이동유(☎ 2330), 팀장 박영란(☎ 3584), 담당자 정재희(☎ 3602)

소통협력공간 조성

[공동체정책과 소관, 일반회계(소통협력공간 조성)]

○ 지역 내 유휴공간을 활용한 사회혁신 활동 지원으로 사회적

가치 실현 및 지역사회 문제해결력 제고

□ 사업개요

○ 위    치 : 중부농축산물류센터(천안시 서북구 성거읍 송남2길 22)

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년

○ 사 업 량

- 소통협력 거점공간 조성(건축물 리모델링, 장비 구입 등)

- 혁신활동 지원(사회문제해결실험 리빙랩, 홍보, 네트워킹, 컨퍼런스 등)

○ 총사업비 : 13,000백만원(국비 6,000백만원, 도비 7,000백만원)

○ 주요내용 : 소통협력공간 조성 및 사회혁신활동 지원

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	2,000	2,000	-	-	□충남사회혁신센터 민간위탁금
국비	2,000	2,000	-	-
도비	-	-	-	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 소통협력의 장 마련을 통한 혁신실험 촉진 등 사회적가치 창출

○ 다양한 주체의 참여를 통한 지역사회 문제해결력 제고

새마을공동체과장 전상욱(☎ 2310), 팀장 김용모(☎ 3421), 담당자 신동훈(☎ 3473)

재해위험지역정비(시군자본)

[자연재난과 소관, 일반회계(재해위험지역 정비(시군자본))]

❍ 기상이변으로 인한 집중호우 및 태풍 등 자연재난에 능동적 대응

❍ 재해취약지역 지속적 점검･정비로 재해의 사전 예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 15개 시군

❍ 사업기간 : 1987년 ~ 계속

❍ 사 업 량

- 자연재해위험개선지구 정비사업 : 170지구(2022년 32지구)

- 풍수해생활권 종합정비사업 : 5지구(2022년 5지구)

- 급경사지 붕괴위험지역 정비 : 121지구(2022년 6지구)

- 재해위험저수지 정비 : 38지구(2022년 8지구)

- 재해위험지역 조기경보시스템 구축사업 : 38개소(2022년 16개소)

❍ 총사업비 : 2,254,174백만원(국비 50%, 지방비 50%)

❍ 주요내용 : 제방축제, 교량, 하천정비, 급경사지, 저수지 정비 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	77,739	77,739	-	-	□재해위험지구 정비 : 11개 시군, 32지구 □풍수해생활권 정비 : 4개 시군, 5지구 □급경사지 붕괴위험지역 정비 사업 - 6개 시군, 6지구 □재해위험저수지 정비 5개 시군, 8지구 □조기경보시스템 구축 9개 시군, 16지구
국비	51,826	51,826	-	-
도비	25,913	25,913	-	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

❍ 지형적인 여건 등으로 인하여 재해가 발생할 우려가 있는 지역을 체계적으로 정비･관리하여 자연재해를 사전 예방하고 재해를 경감

자연재난과 과장 이영민(☎2185), 팀장 김철수(☎3242), 담당자 소예산(☎3252)

공공시설물 내진보강(도)

[자연재난과 소관, 일반회계(공공시설물내진보강)]

❍ 내진보강으로 지진 발생시 주민의 생명과 재산 보호

❍ 충남의 지진재난 환경을 고려한 맞춤형 지진방재대책 수립

□ 사업개요

❍ 위    치 : 15개 시·군 및 사업소

❍ 사업기간 : 2011년 ~ 계속

❍ 사 업 량 : 716개소(2022년 2개소)

❍ 총사업비 : 38,719백만원(도비 100%)

❍ 주요내용 : 내진보강, 내진성능평가, 내진설계

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	955	365	590	-	□내진보강(2개소) □도급사 채권 가압류에 따른 공탁 등 행정절차 처리 기한 필요로 도비 이월 □연말 교부로 연내 사업이 불가능하여 특교세 이월
국비	-	-	-	-
도비	455	365	90	-
기타 (특교세)	500	-	500	-

□ 사업효과

❍ 공공시설물의 내진보강 증대 및 충청남도 맞춤형 지진방재 대책 수립으로 지진 재난에 대비

자연재난과 과장 이영민(☎2185), 팀장 김철수(☎3242), 담당자 주형진(☎3254)

우수저류시설 설치

[자연재난과 소관, 일반회계(우수저류시설 설치)]

○ 기후변화와 각종 도시개발로 인한 지표수 증가에 따른 도심지와 하천 주변지역 침수피해 예방을 위한 재해예방사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 공주시 신관동

○ 사업기간 : 2019~2023년

○ 사 업 량 : 저류시설 15,000㎥, 유입관거 등

○ 총사업비 : 15,800백만원(국비 50%, 지방비 50%)

○ 주요내용 : 침수우려지역 우수저류시설 설치

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	1,988	1,988	-	-	□계속 1지구 공사비, 감리용역비 등
국비	1,325	1,325	-	-
도비	663	663	-	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 강우 시 우수의 직접유출을 감소시켜 저지대 침수피해 예방

자연재난과 과장 이영민(☎2185), 팀장 최천규(☎3243), 담당자 추연수(☎3257)

충남지식산업센터 건립

[미래산업과 소관, 일반회계(충남지식산업센터 건립)]

○ 대통령 지역공약인 「천안아산 KTX역세권 R&D집적지구」조성 사업의 일환으로 전략산업 육성을 위한 혁신거점 조성 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 천안시 서북구 불당동 650-3번지 일원

○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.

○ 사 업 량 : 부지 4,510㎡, 연면적 12,486㎡(지하1층~지상6층)

○ 총사업비 : 32,238백만원(국비 12,666백만원, 도비 19,572백만원)

○ 주요내용 : 충남지식산업센터 건립

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	18,554	12,240	6,314	-	□지식산업센터 건립공사(11,138백만원) □지식산업센터 감리비(1,102백만원)
국비	4,887	4,829	58	-
도비	13,667	7,411	6,256	-
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(18,554백만원) = 이월액(국 3,887백만원, 도3,106백만원) + ‘22본예산(국1,000백만원, 도10,561백만원)

□ 사업효과

○ 중소･벤처기업의 안정적 기업활동 공간 제공

○ 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

미래산업과 과장 이영조(☎ 2230), 팀장 이근규(☎ 3942), 담당자 이관용(☎ 3955)

충남국제전시컨벤션센터 건립

[미래산업과 소관, 일반회계(충남국제전시컨벤션센터 건립)]

○ 전시+산업+투자를 연계하는 B2B전문 전시컨벤션 장소 제공,

○ R&D집적지구 조성사업의 랜드마크, MICE산업 인프라 확충

□ 사업개요

○ 위    치 : 천안시 서북구 불당동 562-5번지 일원

○ 사업기간 : 2020. ~ 2026.

○ 사 업 량 : 연면적 51,900㎡, 지하1층~지상4층

○ 총사업비 : 222,496백만원(도비 160,300백만원, 시·군비 62,196백만원)

○ 주요내용 : 전시장 9,000㎡, 회의장 4,700㎡ 조성 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	1,337	409	928	-	□건설사업관리 용역비(394백만원) □조달청 맞춤형서비스 약정해지 수수료(11백만원) □입찰안내서 심사위원 수당(3백만원) □지방건설심의 수수료(1백만원)
국비	-	-	-	-
도비	1,337	409	928	-
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(1,337백만원) = ‘21이월액 도 175백만원+‘22본예산 도 1,162백만원

□ 사업효과

○ 충남의 새로운 성장동력 창출 기지로서 도내 기업의 국내·외

판로개척 및 교류의 장 제공

○ 국제회의·행사 개최를 통해 기업이 「더 행복한 충남」,

「글로벌 충남」으로 성장기반 마련

미래산업과 과장 이영조(☎ 2230), 팀장 이근규(☎ 3942), 담당자 장용진(☎ 2232)

사회적경제 혁신타운 조성사업

[경제정책과 소관, 일반회계(사회적경제 혁신타운 조성)]

○ 사회적경제 기업․지원조직을 물리적으로 집적화함으로써, 사회적경제기업에 대한 통합지원체계 구축 및 사회적가치 확산 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 청양군 청양읍 소재(구 청양여자정보고 / 부지 13,341㎡)

○ 사업기간 : 2020. 7. ~ 2024. 6.

○ 사 업 량 : 1동(지하1층, 지상4층), 연면적 약 7,333m2

○ 총사업비 : 28,000백만원(국비 14,000 도비 8,400 군비 5,600)

※ 재원(국 50%, 도 30%, 군 20%)

○ 주요내용 : 사회적경제기업·지원조직의 협업 네트워크 거점구축

※ 기업·지원조직 입주공간, 메이커스스페이스, 판매·전시공간, 협업공간 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	11,455	2,283	9,172	-
					□구 청양여자정보고 해체공사 : 851 □건설폐기물 처리용역 : 430 □석면해제공사 : 349 □설계용역 : 381 □해체공사 감리용역 : 120 □실시설계용역 등 : 152
국비	5,256	1,218	4,038	-
도비	3,728	457	3,271	-
기타	2,471	608	1,863	-

※ 기타 : 자치단체간부담금(청양군)

□ 사업효과

○ 인적·물적 통합지원을 통해 사회적경제기업의 질적 성장 도모

경제정책과 과장 김종수(☎2210), 팀장 박동순(☎3306), 담당자 최지혜(☎3311)

지역발전투자협약 시범사업 지원

[균형발전정책과 소관, 일반회계(유기농업 홍성형 프로젝트(자본보조,경상보조))]

○ 농가소득 안정적 기반 마련 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 홍성군 관내 일원 (홍동면, 장곡면, 은하면)

○ 사업기간 : 2019. ~ 2023.

○ 사 업 량 : 친환경먹거리 플랫폼 조성 등 1식

○ 총사업비 : 18,200백만원(국비 9,100, 도비 2,730, 시·군비 6,370)

○ 주요내용

- 자연생태마을 인프라 보강

- 마을교육공동체 및 사회적 농업 복합 플랫폼 구축

- 친환경 학교․공공급식지원센터 및 비즈니스 지원센터 조성

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	510	510	-	-
					□자치단체경상보조 510.9백만원 (국393, 도117.9)교부
국비	393	393	-	-
도비	117	117	-	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 농가 소득 향상 및 포용적 경제성장 기여

○ 청년후계농 발굴 및 양성을 통한 농업 인력 육성

균형발전정책과 과장 윤종한(☎2910), 팀장 임형균(☎4702), 담당자 윤창호(☎2912)

내포 자연놀이뜰 건립

[복지보육정책과 소관, 일반회계(내포 자연놀이뜰 건축사업비)]

○ 충남형 인성교육을 위한 자연놀이뜰 건립

□ 사업개요

○ 위    치 : 예산군 삽교읍 목리 741-1(RB5구역 내 일부)

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사 업 량 : 연면적 2,622㎡(지상 2층), 6개동

○ 총사업비 : 25,000백만원(균특2,200, 특교1,000, 기금1,400, 도비20,400)

○ 주요내용 : 충남형 인성교육 및 생태 체험형 프로그램을  운영할 수 있는 자연놀이뜰 건립

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	3,481	2,465	-	1,016	□공사 준공금 지급 ※ 계속비 사업(’18.~’22.)
국비	-	-	-	-
도비	3,481	2,465	-	1,016
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 자연놀이뜰(놀이+체험+가꿈)을 테마로 어린이 인성학습

및 생태체험의 메카로 육성

복지보육정책과 과장 허창덕☎2610, 팀장 박은실 ☎4539, 담당자 이상구 ☎4259

충남육아종합지원센터 건립

[복지보육정책과 소관, 일반회계(충남육아종합지원센터 건립)]

○ 건전한 양육과 교육기반시설 집적화 마련 및 자연놀이뜰과

연계한 원스톱 보육서비스 제공을 위한 센터 건립

□ 사업개요

○ 위    치 : 예산군 삽교읍 목리 741-1

○ 사업기간 : 2020~2024(4년)

○ 사 업 량 : 연면적 3,203㎡(지하 2층, 지상 3층)

○ 총사업비 : 14,425백만원(국비 1,000, 특교 1,000, 도비 12,425)

○ 주요내용 : 영유아놀이터, 그림책도서관, 장난감·도서대여점

프로그램실, 상담실, 대강당 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	8,252	350	7,902	-	□설계용역 준공금 지급 등 ※ 계속비 사업(’20.~’24.)
국비	609	350	259	-
도비	6,643	-	6,643	-
기타	1,000	-	1,000	-

※ 예산현액(8,252백만원) = 이월액(국 609백만원) + ‘22본예산(도 6,643백만원, 특별교부세 1,000백만원)

□ 사업효과

○ 자연놀이뜰과 연계하여 놀이+육아+자연을 하나로 품는

다양하고 창의적인 종합 보육서비스 제공

복지보육정책과장 허창덕(☎2610), 팀장 박은실(☎4235), 담당자 신은주(☎4251)

충남 장애인가족 힐링센터 건립사업

[장애인복지과 소관, 일반회계(장애인가족힐링센터 건립)]

○ 장애인과 부모(가족)이 함께 이용할 수 있는 휴양시설을 건립하여 정서적 안정을 지원하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 태안군 안면읍 승언리 산 18-1(도유지 30,000㎡)

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2025년

○ 사 업 량 : 연면적 6,550㎡(지하1층, 지상4층)

○ 총사업비 : 26,929백만원(국비 12,737, 도비 11,612, 태안군 부담금 2,580)

○ 주요내용 : 장애인과 그 가족이 돌봄 부담에서 벗어나 휴식할 수 있는 장애인복합 힐링센터 건립

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	5,054	6	5,048	-	□설계용역, 계획설계 적정성 검토 등
국비	4,894	6	4,888	-
도비	160	-	160	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 발달․중증장애인 가족의 휴식과 회복을 지원할 장애인 편의시설 및 프로그램을 갖춘 휴양시설을 마련하여 이용대상자들의 정서적 안정 지원

장애인복지과 과장 곽행근(☎2630), 팀장 김규태(☎4264), 담당자 최다임(☎2634)

충남스포츠센터 건립

[체육진흥과 소관, 일반회계(충남스포츠센터 건립)]

○ 체육 및 편의시설 확충을 통한 지방체육 진흥 및 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 충남 예산군 삽교읍 목리 1967외 1필지

○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 4.(다년도 계속사업)

○ 사 업 량 : 부지 20,614.7㎡(6,236평), 연면적 13,344.07㎡(4,043평)

○ 총사업비 : 49,500백만원(국비 8,700백만원, 도비 40,800백만원)

○ 주요내용 : 수영장 및 통합운영센터, 다목적 체육관

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	19,033	7,207	11,826	-	□설계비, 감리비 지출 □건축공사외 공사 선급금 등 지출 □관급자재 지출 □공사에 수반되는 시설비 지출
국비	3,438	-	3,438	-
도비	15,595	7,207	8,388	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 도청신도시 및 혁신도시 소재지의 체육 인프라를 구축하여 30만 도시의 생활체육 활성화

체육진흥과 과장 남상길 (☎2430), 팀장 이용석(☎ 3853), 담당자 방상수(☎ 2433)

기업도시 진입도로 지원

[관광진흥과 소관, 일반회계(기업도시 진입도로 지원)]

○ 서해안고속도로 해미IC~태안군을 직접 연결하여 수도권 접근성 향상 및 태안기업도시와 서산 웰빙특구 연결을 통한 관광객 유치 시너지 효과 거양

□ 사업개요

○ 위    치 : 태안군 태안읍 송암리 ~ 서산시 부석면 갈마리 일원

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2023년

○ 사 업 량 : 부남교 건설 L=610m

○ 총사업비 : 36,646백만원(국비 18,000 도비 5,594, 시·군비 13,052)

○ 주요내용 : 부남교 건설 L=610m

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	7,781	3,529	4,252	-	□태안 기업도시 연결도로 개설(6,266.5)
국비	5,836	2,906	2,930	-
도비	1,945	623	1,322	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 태안기업도시와 서산 웰빙특구를 연결하는 부남교 설치로 고용창출 효과 및 지역경제 활성화에 기여

○ 고속도로와의 접근성도 크게 향상되어 서해안권 발전 도모

관광진흥과 과장 강병락(☎2440), 팀장 서정범(☎3874), 담당자 김정은(☎3889)

배수개선사업(민간보조)

[농업정책과 소관, 일반회계(배수개선(지자체))]

○ 농업진흥지역 내 상습 침수 농경지가 50ha이상인 지역에 배수시설을 확충하여 침수피해를 예방함으로써 안전영농 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 9개 시군(공주, 보령, 논산, 당진, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안)

○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2024. 12.

○ 사 업 량 : 28지구(농촌공 24지구, 시군 4지구)

- 천안1, 공주2, 서산1, 논산6, 당진4, 금산1, 부여2, 서천3, 청양1, 홍성1, 예산4, 태안2

○ 총사업비 : 263,179백만원(국비 263,179백만원)

○ 주요내용 : 농경지 배수간선 설치 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	45,697	36,186	9,511	-	□배수개선사업 28지구 - 배수장 및 배수갑문 설치 - 배수로 정비 등
국비	45,697	36,186	9,511	-
도비	-	-	-	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 농경지 침수피해 예방으로 안전영농 도모

○ 농지 이용률 제고로 농업경쟁력 향상

농업정책과 과장 남상훈(☎2510), 팀장 이창로(☎4006), 담당자 강현수(☎4021)

농업기반정비(수리시설개보수)

[농업정책과 소관, 일반회계(농업기반정비(수리시설개보수)(전환사업))]

○ 기능이 저하된 시군관리 수리시설(저수지, 양수장 등)을 보수·보강하여 재해를 예방하고 안정적인 농업용수 공급 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 천안, 공주, 보령, 서산, 부여, 서천, 청양, 홍성, 예산, 태안

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

○ 사 업 량 : 14지구

- 천안1, 공주1, 보령2, 서산2, 부여1, 서천1, 청양1, 홍성2, 예산1, 태안2

○ 총사업비 : 4,488백만원(도비 3,590백만원, 시군비 898백만원)

○ 주요내용 : 기능 저하된 수리시설(저수지, 양수장 등) 개보수

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	4,488	4,488	-	-	□10개시군 14지구 - 저수지 제방 그라우팅 및 사·복통 개보수 - 취수시설 및 송수관로 개보수 등
국비	-	-	-	-
도비	3,590	3,590	-	-
기타	898	898	-	-

□ 사업효과

○ 기능저하 및 노후 수리시설의 효율적인 유지관리로 기능회복

○ 시설물 현대화로 재해예방과 농업용수의 안정적인 공급

농업정책과 과장 남상훈(☎2510), 팀장 이창로(☎4006), 담당자 민대홍(☎2513)

정주환경 개선

[농촌활력과, 일반회계(정주환경개선)]

○ 지역주민의 생활불편 해소를 위하여 주거환경개선 및 주민 편익 증진 도모

○ 농어촌마을에 필요한 지역현안사업 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 14개 시군

○ 사업기간 : 2022. 1. ∼ 2022. 12.

○ 사 업 량 : 14개 시군 591개 지구

○ 총사업비 : 39,289백만원(도비 19,330 시군비 19,959)

○ 주요내용 : 마을안길포장, 마을쉼터 조성, 소규모 교량설치 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	19,330	19,330	-	-	14개 시군 591지구
국비	-	-	-	-
도비	19,330	19,330	-	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 농어촌마을 지역주민 생활불편 해소 및 편의시설 증가

○ 정주환경 개선 및 가로경관 정비로 인한 주민 삶의 질 향상

농촌활력과 과장 최천재(☎ 2530), 팀장 이상호(☎ 4064), 담당자 서한솔(☎2532)

충남 기후환경교육원 조성

[탄소중립정책과 소관, 일반회계(충남 광역형 탄소중립연수원 조성)]

○ 2045년 탄소중립을 달성하고, 생애주기별 다양한 환경교육      프로그램 제공을 위한 ‘환경교육시설’ 조성 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 칠갑산 휴양랜드(청양군 대치면 까치내로 815 일원)

○ 사업기간 : ’21년~’24년

○ 사 업 량 : 충남 기후환경교육원 조성

○ 총사업비 : 19,800백만원(국비 9,900백만원, 도비 9,900백만원)

○ 주요내용 : 전시체험관, 교육관, 생활관, 탄소저감시설(에너지) 등 조성

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	4,935	3,043	1,892	-	□현황측량용역(17백만원) □건축설계용역(500백만원) □전시설계 및 전시물 제작·설치용역(2,520백만원)
국비	3,935	3,043	892	-
도비	1,000	-	1,000	-
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(4,935백만원) = 전년도 이월액(2,435백만원) + 2022예산액(2,500백만원)

□ 사업효과

○ 환경교육도시 지정 이행과제 목표 달성 및 체계적 환경교육 기반시설 구축

○ 도민 누구에게나 생애주기별 다양한 환경교육프로그램 제공

탄소중립정책과 과장 김성식(☎2710), 팀장 오종석(☎4402), 담당자 황미라(☎2717)

석탄화력발전소 주변 어린이건강영향조사

[대기환경과 소관, 일반회계(환경오염 피해지역 주변 건강영향조사)]

○ 발전소 주변 환경오염과 어린이 건강영향 관련성을 평가하고

어린이의 환경성 질환 등 건강피해 예방·관리대책 수립

□ 사업개요

○ 위    치 : 발전소 지역(보령, 당진, 서천, 태안) 및 비교지역(서산, 부여)

○ 사업기간 : 2018. 08. 14 ~ 2022. 12. 31

○ 사 업 량 : 발전소 주변(5km 이내) 및 비교지역 초등학생 4.5학년 140명

○ 총사업비 : 1,200백만원(발전3사 지정기탁금 100%)

○ 주요내용

- 환경오염 노출조사(대기․토양․지하수 실측 및 기존 자료 분석), 건강조사

(일반 및 특수검진, 설문조사, 중금속 등 생체모니터링 등), 위해도 소통 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	300	300	-	-	<4차년도 집행 내역> □건강조사분야 : 120백만원 지급(단국대학교) □환경오염조사(대기) 분야 보조금 120백만원 지급(순천향대학교) □환경오염조사(토양,지하수) 및 위해소통 분야 보조금 60백만원 지급(충남연구원)
국비	-	-	-	-
도비	-	-	-	-
기타	300	300	-	-

□ 사업효과

○ 발전소 주변 어린이 환경유해요인 노출실태 파악을 통해 환경과 건강영향 관련성 규명

○ 발전소 주변 어린이 노출저감 및 건강보호 정책의 근거 마련

및 예방․관리대책 수립

대기환경과 과장 빈준수(☎2740), 팀장 이상준(☎4408), 담당자 최재호(☎4436)

금강 물환경 모니터링 3단계 사업

[물관리정책과 소관, 일반회계(수질관리 정책개발 육성)]

○ 금강 정비사업 이후 수질, 수생태계 변화 등 모니터링

○ 1단계(‘11∼‘15), 2단계(‘16∼‘20)사업과 연계하여 지속 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 금강 수계(대청조정지댐~금강하굿둑)

○ 사업기간 : 2021. 1. ∼ 2025. 12.

○ 사 업 량 : 3단계 연구용역 1식

○ 사 업 비 : 1,457백만원(도비 1,232, 세종시 225)

※ 당해연도(3단계 2차년도) 사업비 : 287백만원(도비 242, 세종시 45)

○ 주요내용 : 금강정비사업 전후 수질, 수생태, 지형·지질 등 모니터링

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	287	287	-	-	□수질, 수생태 분야별 모니터링
국비	-	-	-	-
도비	242	242	-	-
기타	45	45	-	-

□ 사업효과

○ 1~2단계 모니터링 결과와 연계한 연속적인 모니터링 사업

추진을 통한 체계적이고 과학적인 최적의 금강관리방안 마련

물관리정책과장 이종현(☎2730), 팀장 김종수(☎4461), 담당자 이후영(☎4471)

충청남도 중점관리저수지 수질개선대책 수립 연구용역

[물관리정책과 소관, 일반회계(충청남도 중점관리저수지 수질개선대책 수립)]

○ 저수지 지정 목적에 맞는 목표수질 달성을 위한 수질개선 방안 마련 및 국비 확보

□ 사업개요

○ 용역범위 : 3개소(아산 마산지, 서산 잠홍지, 예산 예당지)

○ 사업기간 : 2021. 9. 6. ~ 2022. 7. 2.

○ 사 업 비 : 350백만원(도비 100%)

○ 주요내용 : 유역현황 분석, 중점저수지 수질오염 원인분석 및 진단, 수질개선방안 마련, 투자계획

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	157	150	-	7	□2021회계연도 예산액 193백만원 집행 □용역 준공금 지급(22. 7. 7.)
국비	-	-	-	-
도비	157	150	-	7
기타	-	-	-	-

※ 사업비 350백만원 = 2021회계연도 193백만원 + 2022회계연도 예산액 157백만원

□ 사업효과

○ 저수지 사용목적의 기능(수변휴양기능 등)을 갖추도록 수질·수생태계를 관리하기 위한 개선대책 수립

○ 개선대책(환경부 승인 ’22.9.) 및 물환경 개선사업 국비확보 기초자료로 활용

물관리정책과 과장 이종현(☎2730), 팀장 공상현(☎4465), 담당자 조남황(☎4473)

하천기본계획 수립

[하천과 소관, 일반회계(하천기본계획수립)]

○ 하천사용의 이익을 증진하고 자연친화적으로 정비・보전

○ 예측가능한 홍수 방어 계획 및 주민이 이용가능한 기본계획 수립

□ 사업개요

○ 위    치 : 충청남도 관할 지방하천(전체 491개소)

○ 사업기간 : 1986 ~ 2030년

○ 사 업 량 : 491개 지방하천 / ‘22년 봉당천 등 13개 하천

○ 총사업비 : 129,003백만원(도비 100%)

○ 주요내용 : 하천유역 특성조사, 홍수량 산정, 홍수방어계획,

하천시설계획, 하천구역 및 홍수관리구역 결정 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	1,356	877	431	48	□하천기본계획 수립 13개소 - 봉당천 등 6개하천(계속사업) / 완료 - 산수천 등 7개하천(신규사업) / 추진중
국비	-	-	-	-
도비	1,356	877	431	48
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(1,356백만원) = 이월액(도 353백만원) + ’22본예산(도 1,003백만원)

□ 사업효과

○ 계획홍수량 산정을 통한 치수안정성 확보로 농경지 및 주거지 보호

○ 하천계획에 따른 개수공사시 환경조건을 고려한 하천정비 시행

하천과 과장 이성남(☎2745), 팀장 여형구(☎4522), 담당자 오근영(☎ 4534)

지방하천 정비사업(도)(전환사업)

[하천과 소관, 일반회계(지방하천 정비사업(도)(전환사업))]

○ 기후변화에 대한 선제적인 대응과 사전 예방중심의 하천정비 실현

○ 홍수피해 및 재해예방을 위한 안전한 하천환경조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 충청남도 15개 시군

○ 사업기간 : 2016년 ~ (다년도 계속사업)

○ 사 업 량 : 천안시 병천천 등 33개 하천

○ 총사업비 : 907,247백만원(도비 100%)

○ 주요내용 : 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위한 제방, 호안, 수제 등 물길의 안전을 위한 시설설치 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	64,505	55,608	8,897	-	□병천천 등 지방하천정비사업 33개지구 사업추진 - 석남천, 연산천 준공
국비	-	-	-	-
도비	64,505	55,608	8,897	-
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(64,505백만원) = 이월액(도11,835백만원) +‘22본예산(도52,670백만원)

□ 사업효과

○ 홍수에 안전한 구간의 확대로 홍수피해와 복구비 절감

○ 생태·문화하천 조성으로 건강하고 활력있는 하천공간 제공

하천과 과장 이성남(☎2745), 팀장 여형구(☎4522), 담당자 남정민(☎4532)

지방하천 정비사업(시군)(전환사업)

[하천과 소관, 일반회계(지방하천 정비사업(금강권역)(시군))]

○ 기후변화에 대한 선제적인 대응과 사전 예방중심의 하천정비 실현

○ 홍수피해 및 재해예방을 위한 안전한 하천환경조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 충청남도 15개 시군

○ 사업기간 : 2016년 ~ (다년도 계속사업)

○ 사 업 량 : 천안시 풍서천 등 15개 하천

○ 총사업비 : 470,423백만원(국비 83,195, 도비 227,572, 시군비 159,656)

○ 주요내용 : 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를              줄이기 위한 제방, 호안, 수제 등 물길의 안전을 위한              시설설치 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	31,631	31,631	-	-	□풍서천 등 지방하천정비사업 15개지구 사업추진 - 풍서천, 조정천 준공
국비	-	-	-	-
도비	31,631	31,631	-	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 홍수에 안전한 구간의 확대로 홍수피해와 복구비 절감

○ 생태·문화하천 조성으로 건강하고 활력있는 하천공간 제공

하천과 과장 이성남(☎2745), 팀장 여형구(☎4522), 담당자 남정민(☎4532)

지방하천 유지관리 사업

[하천과 소관, 일반회계(지방하천유지관리)]

○ 하천의 안전성을 확보하고 하천기능 정상화와 하천제방 및

하천시설물의 효율적인 유지관리로 사전 재해예방

□ 사업개요

○ 위    치 : 충청남도 15개 시·군

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2025년

○ 사 업 량 : 지방하천 491개소(L=2,460km)

○ 총사업비 : 89,309백만원(도비 25%, 소방교부세 15%, 시군비 60%)

○ 주요내용 : 제초, 하상정리(퇴적토 제거), 제방 및 수문 유지 보수 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	3,050	3,050	-	-	□ 예초 및 잡목제거, 퇴적토 제거, 제방유지보수, 통문 및 통관 보수, 기타(수변정비, 보 보수 등)
국비	-	-	-	-
도비	1,950	1,950	-	-
기타	1,100	1,100	-	-

□ 사업효과

○ 지방하천의 지속적인 유지관리로 하천의 고유기능 유지

○ 하천시설물의 유지ㆍ보수를 통한 재해위험 요소 제거

하천과 과장 이성남(☎2745), 팀장 박상용(☎4523), 담당자 박기남(☎4536)

지방하천 재해예방 사업

[하천과 소관, 일반회계(지방하천재해예방)]

○ 하천의 안전성을 확보하고 하천기능 정상화와 하천제방 및

하천시설물의 효율적인 유지관리로 사전 재해예방

□ 사업개요

○ 위    치 : 충청남도 15개 시·군

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2025년

○ 사 업 량 : 지방하천 491개소(L=2,460km)

○ 총사업비 : 67,665백만원(도비 50%, 시군비 50%)

○ 주요내용 : 예초‧잡목 및 퇴적토 제거, 제방보수, 통문 보수 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	3,180	3,180	-	-	□ 지방하천 수문(통문)자동화 및 중앙제어 시스템 구축, 퇴적토정비 등
국비	-	-	-	-
도비	3,180	3,180	-	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 재난으로부터 안전한 하천유지관리로 재해 사전예방 도모

하천과 과장 이성남(☎2745), 팀장 박상용(☎4523), 담당자 박기남(☎4536)

국가하천 유지보수(금강권역)

[하천과 소관, 일반회계(국가하천유지보수(금강권역))]

○ 하천의 안전성을 확보하고 하천기능 정상 유지를 통한 재해예방

○ 친환경적인 휴식 공간 제공으로 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 도내 국가하천

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2025년

○ 사 업 량 : 금강 등 8개 하천(L=248km)

○ 총사업비 : 106,000백만원(국비 100%)

○ 주요내용 : 예초작업, 수목관리, 시설물 보수, 자전거도로

및 친수시설 유지관리 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	5,250	5,250	-	-	□예초 및 잡목제거, 친수시설 유지관리, 자전거도로 유지관리, 오토캠핑장 유지 관리, 제방 등 하천시설물 유지보수, 기타(보수원 인건비 등)
국비	5,250	5,250	-	-
도비	-	-	-	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 국가하천의 지속적인 유지관리로 하천의 고유기능 유지

○ 재난으로부터 안전한 하천유지관리로 재해 사전예방 도모

하천과 과장 이성남(☎2745), 팀장 박상용(☎4523), 담당자 나상욱(☎2748)

2021 지방하천 호우피해 복구

[하천과 소관, 일반회계(2021지방하천호우피해복구)]

○ 집중호우로 인한 재해발생 지방하천을 항구복구하여 하천기능 복원 및 개선 복구

□ 사업개요

○ 위    치 : 천안시 등 12 시‧군

○ 사업기간 : 2020. 9. 1. ~ 2023. 12. 31.

○ 사 업 량 : 지방하천 기능복원사업 213지구, 개선복구 7지구

○ 총사업비 : 146,824백만원(국비 30,155, 도비 42,572, 기타 68,061)

○ 주요내용 : 2020~2021년 호우피해로 인한 하천기능복원 및 개선복구

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	108,657	53,217	55,440	-	□ 2020. 7.28 ~ 8.11 재해복구사업 ※ 기타: 1) 부담금(환경부) 43,436 2) 부담금(아산시) 5,036 □ 2021. 8.31 ~ 9.1 재해복구사업 ※ 기타: 부담금(지역개발기금) 937
국비	29,020	3,562	25,458	-
도비	30,091	246	29,845	-
기타	49,546	49,409	137	-

※ 예산현액(108,657백만원) = 이월예산(102,621백만원) + ’22.예산(6,036백만원)

□ 사업효과

❍ 재난으로부터 안전한 하천유지관리로 재해 사전예방 도모

하천과 과장 이성남(☎2745), 팀장 박상용(☎4523), 담당자 박기남(☎4536)

충청남도 노선버스운행정보시스템 구축

(충남 노선버스 회계 및 운행정보의 융합과 활용방안 연구용역-2)

[교통정책과 소관, 일반회계(노선버스 운행정보 구축)]

○ 노선버스 경영수지 분석시스템 및 운행관리 플랫폼 구현을 통해 운송업체의 투명한 회계, 경영, 노선관리와 이용자 편의 증진을 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 15개 시‧군, 18개 시내‧농어촌 운수업체

○ 사업기간 : 2022. ~ 2023.

○ 총사업비 : 800백만원(도비 240백만원, 부담금 560백만원)

○ 주요내용 : 노선버스 경영수지분석 및 운행관리 시스템 설계 및 플랫폼 구현 확대, 충남형 버스앱 구현 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	800	493	282	25	□연구용역 선금지급(493백만원) □준공기간 미도래로 예산 이월(282백만원)
국비	-	-	-	-
도비	240	148	85	7
기타	560	345	197	18

□ 사업효과

○ 데이터 기반으로 도 및 시‧군 버스업체 재정지원의 누수방지 및 회계 기반의 노선버스 운행관리 선진 행정 도모

○ 지도 기반 노선버스 및 운행정보 표출과 빅데이터 관리‧활용으로 과학적 버스 정책 수립 기반 마련

교통정책과 과장 최기호(☎2840), 팀장 박지훈(☎4562), 담당자 이재용(☎4576)

청양~신양IC(국지도 70호) 건설

[도로철도항공과 소관, 일반회계(국가지원지방도건설(청양~신양IC))]

○ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 따른 국가발전

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 청양군 청양읍 교월리 ~ 예산군 신양면 만사리

○ 사업기간 : 2017. 5. ~ 2023. 6.

○ 사 업 량 : 도로 시설개량(2차로), L=16.2km

○ 총사업비 : 57,274백만원(국비 31,926백만원, 도비 25,348백만원)

○ 주요내용 : 도로 시설개량(2차로)

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	7,149	3,483	3,666	-	□시설비 3,332백만원 □감리비 150백만원 □부대비 1백만원
국비	2,043	2,040	3	-
도비	5,106	1,443	3,663	-
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(7,149백만원) = 이월액(국4백만원, 도 4,232백만원) + ‘22본예산(국2,039백만원, 도874백만원)

□ 사업효과

○ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 다른 국가발전

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

도로철도항공과 과장 윤여권 ☎2830, 팀장 박상용 ☎4671, 담당자 이응용☎2831

이호~양곡(국지도 96호) 건설

[도로철도항공과 소관, 일반회계(국가지원지방도건설(이호~양곡))]

○ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 따른 국가발전

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 홍성군 서부면 이호리 ~ 양곡리

○ 사업기간 : 2018. 9. ~ 2023. 8.

○ 사 업 량 : 도로 신설(2차로), L=4.85km

○ 총사업비 : 26,787백만원(국비 18,751백만원, 도비 8,036백만원)

○ 주요내용 : 도로 시설개량(2차로)

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	4,720	2,648	2,072	-	□시설비 2,551백만원 □감리비 95백만원 □부대비 2백만원
국비	947	782	165	-
도비	3,773	1,866	1,907	-
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(4,720백만원) = 이월액(국688백만원, 도 3,662백만원) + ‘22본예산(국259백만원, 도111백만원)

□ 사업효과

○ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 다른 국가발전

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

도로철도항공과 과장 윤여권 ☎2830, 팀장 박상용 ☎4671, 담당자 이응용☎2831

당진~서산(국지도 70호) 건설

[도로철도항공과 소관, 일반회계(국가지원지방도건설(당진~서산))]

○ 석문국가산업단지 물동량에 대한 중부권으로의 원활한 수송 도모

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 서산시 운산면 갈산리 ~ 당진시 합덕읍 운산리

○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 2028. 3.

○ 사 업 량 : 도로 확장(4차로), L=19.1km

○ 총사업비 : 176,017백만원(국비 78,363백만원, 도비 97,654백만원)

○ 주요내용 : 도로 확장(4차로)

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	19,025	4,913	14,112	-	□시설비 4,593백만원 □감리비 318백만원 □부대비 2백만원
국비	11,367	4,895	6,472	-
도비	7,658	18	7,640	-
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(19,025백만원) = 이월액(국10,131백만원, 도 7,129백만원) + ‘22본예산(국1,236백만원, 도529백만원)

□ 사업효과

○ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 다른 국가발전

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

도로철도항공과 과장 윤여권 ☎2830, 팀장 박상용 ☎4671, 담당자 이응용☎2831

성환~입장(국지도 70호) 건설

[도로철도항공과 소관, 일반회계(국가지원지방도건설(성환~입장))]

○ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 따른 국가발전

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 천안시 성환읍 매주리 ~ 입장면 연곡리

○ 사업기간 : 2019. ~ 2029.

○ 사 업 량 : 도로 확장(4차로), L=10.1km

○ 총사업비 : 99,100백만원(국비 45,380백만원, 도비 53,720백만원)

○ 주요내용 : 도로 확장(4차로)

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	2,834	-	2,548	286	□대전지방국토관리청 설계 지구
국비	1,984	-	1,784	200
도비	850	-	764	86
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(2,834백만원) = 이월액(국1,700백만원, 도 728백만원) + ‘22본예산(국284백만원, 도122백만원)

□ 사업효과

○ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 다른 국가발전

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

도로철도항공과 과장 윤여권 ☎2830, 팀장 박상용 ☎4671, 담당자 이응용☎2831

우성~이인(국지도 96호) 건설

[도로철도항공과 소관, 일반회계(국가지원지방도건설(우성~이인))]

○ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 따른 국가발전

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 공주시 우성면 어천리 ~ 이인면 운암리

○ 사업기간 : 2021. ~ 2026.

○ 사 업 량 : 도로 신설(2차로), L=0.89km

○ 총사업비 : 33,957백만원(국비 23,832백만원, 도비 10,125백만원)

○ 주요내용 : 도로 신설(2차로)

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	691	57	634	-	□시설비 57백만원 □감리비 -백만원 □부대비 -백만원
국비	484	57	427	-
도비	207	-	207	-
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(691백만원) = 이월액(국200백만원, 도 85백만원) + ‘22본예산(국284백만원, 도122백만원)

□ 사업효과

○ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 다른 국가발전

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

도로철도항공과 과장 윤여권 ☎2830, 팀장 박상용 ☎4671, 담당자 이응용☎2831

장척~목현(국지도 96호) 건설

[도로철도항공과 소관, 일반회계(국가지원지방도건설(장척~목현))]

○ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 따른 국가발전

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 홍성군 은하면 목현리 ~ 장척리

○ 사업기간 : 2021. ~ 2027.

○ 사 업 량 : 도로 확장(4차로), L=3.67km

○ 총사업비 : 34,578백만원(국비 22,191백만원, 도비 12,387만원)

○ 주요내용 : 도로 확장(4차로)

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	691	181	510	-	□시설비 181백만원 □감리비 -백만원 □부대비 -백만원
국비	484	181	303	-
도비	207	-	207	-
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(691백만원) = 이월액(국200백만원, 도 85백만원) + ‘22본예산(국284백만원, 도122백만원)

□ 사업효과

○ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 다른 국가발전

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

도로철도항공과 과장 윤여권 ☎2830, 팀장 박상용 ☎4671, 담당자 이응용☎2831

임천~강경(국지도 68호) 건설

[도로철도항공과 소관, 일반회계(국가지원지방도건설(임천~강경))]

○ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 따른 국가발전

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 부여군 임천면 비정리 ~ 세도면 가화리

○ 사업기간 : 2021. ~ 2027.

○ 사 업 량 : 도로 시설개량(2차로), L=9.88km

○ 총사업비 : 49,615백만원(국비 31,760백만원, 도비 17,855백만원)

○ 주요내용 : 도로 시설개량(2차로)

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	692	436	256	-	□시설비 433백만원 □감리비 -백만원 □부대비 3백만원
국비	484	372	112	-
도비	208	64	144	-
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(692백만원) = 이월액(국284백만원, 도122백만원) + ‘22본예산(국200백만원, 도 86백만원)

□ 사업효과

○ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 다른 국가발전

○ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

도로철도항공과 과장 윤여권 ☎2830, 팀장 박상용 ☎4671, 담당자 이응용☎2831

지방도 유지 관리

[도로철도항공과 소관, 일반회계(지방도 유지관리)]

❍ 지방도 효율적인 유지·보수체계 확립으로 이용자 불편 최소화

❍ 기능 위주의 관리에서 수요자 중심의 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 도내 지방도

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

❍ 사 업 량 : 지방도 유지관리 1식

❍ 사 업 비 : 34,819백만원(당해예산 30,123 이월예산4,696)

❍ 주요내용 : 보도 설치, 방호울타리 설치 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	34,819	28,558	6,252	9	□(시설비) 26,256백만원 □(부대비) 32백만원 □(시군보조) 2,060백만원 □(위탁사업) 210백만원
국비	5,265	4,465	800	-
도비	29,554	24,093	5,452	9
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(34,819만원) = 이월액(도 4,696백만원) + 22본예산(국1,200백만원, 도 28,923백만원)

□ 사업효과

❍ 지방도 효율적인 유지관리 추진으로 도로이용자에게 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

도로철도항공과 과장 윤여권 ☎2830, 팀장 최양진 ☎4681, 담당자 윤대성 ☎4683

위험교량 등 구조물 개량

[도로철도항공과 소관, 일반회계(지방도 유지관리)]

❍ 정밀안전진단 판정결과에 따라 도로이용자 및 주민들의 안전사고를 예방하고 도로의 기능 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 도내 지방도

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

❍ 사 업 량 : 구조물 안전관리 1식

❍ 사 업 비 : 12,535백만원(당해예산 7,246, 이월예산 5,289)

❍ 주요내용 : 구조물 점검·보수보강 및 교량 재가설 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	12,535	11,009	1,521	5	□구조물 점검·보수보강 및 교량 재가설 사업 집행
국비	2,745	1,860	880	5
도비	9,790	9,149	641	-
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(12,535백만원) = 이월액(도 5,289) + ‘22본예산(국396백만원, 도6,850백만원)

□ 사업효과

❍ 구조물 사고 등 재해로부터 도민의 생명과 재산 보호

도로철도항공과 과장 윤여권 ☎2830, 팀장 최양진 ☎4681, 담당자 김용관 ☎2833

지방도 정비사업

[도로철도항공과 소관, 일반회계(지방도 정비사업)]

❍ 고속도로, 국도 등 국가기간 교통망과의 연계도로망 구축

❍ 체계적인 도로망 구축, 기반시설 확충으로 지역균형발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 도내 지방도

❍ 사업기간 : 2017~2030(다년도 계속사업)

❍ 사 업 량 : 지방도 확·포장 20지구

❍ 총사업비 : 1,035,551백만원(도비)

❍ 2022년 사업비 : 66,998백만원(도비)

- ‘22년 당해 62,500백만원, ‘21년 계속비이월 4,498백만원

❍ 주요내용 : 단절구간 연결, 시설기준 미달구간 개량 등
지방도 정비사업 추진

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	66,998	60,628	6,370	0	□규암~청남(지625호) 지방도 확·포장 등 20지구 사업추진
국비	-	-	-	0
도비	66,998	60,628	6,370	0
기타	-	-	-	0

※ 예산현액(66,998백만원) = 이월액(도 4,498백만원) + ‘22본예산(도62,500백만원)

□ 사업효과

❍ 간선도로의 원활한 흐름 확보로 물류비 절감에 따른 국가발전

❍ 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모

도로철도항공과 과장 윤여권 ☎2830, 팀장 박상용 ☎4671, 담당자 김준운☎4673

일본식 지명 등 조사·정비

[토지관리과 소관, 일반회계(일본식 지명 등 조사정비)]

○ 일제강점기 때 바뀌거나 왜곡된 지명, 미고시 지명 등 조사‧      정비로 일제 잔재청산과 우리 정통성‧역사성 정립

⇨ 지명 조사 후 「지역주민 의견수렴하여 정리 추진」

□ 사업개요

○ 위    치 : 6개 시군(천안·공주·서산·당진시, 예산·태안군)

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 사 업 량 : 자연‧인공지명 13,522건

○ 총사업비 : 491백만원(도비 491백만원)

○ 주요내용 : 일제강점기 때 왜곡된 지명, 미고시 지명 등 조사

- 고문헌‧고지도 등 분석, 주민 인터뷰 등 현지조사 실시

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	491	491	-	-	□일본식 지명 등 조사 연구용역 - 일본식 지명 등 조사 인건비, 보고서 인쇄비, 자문회의 수당 등 □평가수당, 원가용역비 등
국비	-	-	-	-
도비	491	491	-	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 우리의 고유 지명으로 복원함으로서 정통성‧역사성 정립

○ 지명의 유래 등을 보존함으로서 행정 및 연구자료 등에 활용

토지관리과 과장 고재성(☎2860), 팀장 박정원(☎4783), 담당자 고아라(☎2863)

도서지역 해양쓰레기 정화운반선 건조

[해양정책과 소관, 일반회계(해양폐기물 정화사업)]

○ 접근성이 취약한 도서지역 해양쓰레기의 운반을 위한 전용

운반선 건조로 해양쓰레기의 신속한 수거‧처리 기반 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 도내 연안 및 도서지역

○ 사업기간 : 2021. ~ 2022.

○ 사 업 량 : 전용운반선 1척 건조

○ 총사업비 : 7,500백만원(기금 3,750 도비 3,750)

- ’22년 사업비(예산현액) : 4,646백만원(기금 2,323, 도비 2,323)

○ 주요내용 : 도서지역 해양쓰레기 전용운반선 건조 완료

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	4,646	3,750	-	896	□’22.12.12. 선박건조 완료 □3,750 백만원(’22.12.30) 건조비, 감리비, 조달수수료 집행
국비	2,323	1,875	-	448
도비	2,323	1,875	-	448
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 해양쓰레기 수거 전용 운반선 도입으로 체계적 관리기반 구축

○ 도서지역 해양쓰레기 수거 강화를 통한 섬 정주여건 향상 도모

해양정책과 과장 임민식(☎2760), 팀장 이효구(☎4756), 담당자 설은희(☎4778)

광역 해양자원 순환센터 건립

[해양정책과 소관, 일반회계(광역 해양자원 순환센터 건립)]

○ 해양쓰레기의 체계적인 처리 및 환경친화적 재활용 기반마련을

위한 광역 前처리 시설 건립으로 지속가능 해양환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 태안군 근흥면 도황리 1391-2 외 1

○ 사업기간 : 2021. ~ 2024.

○ 사 업 량 : 광역 前처리 시설 건립 1식

○ 총사업비 : 15,000백만원(국비 7,500 도비 7,500)

- ’22년 사업비(예산현액) : 830백만원(국비 415 도비 415)

○ 주요내용 : 해양쓰레기 분리·선별로 해양자원 재활용화 추진

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	830	-	830	-	□기획설계 용역 착수 및 완료 - 용역기간 ‘21.7.29.~’21.10.26. - 용 역 비 40백만원 □예산액 계속비 이월 - 실시설계 및 환경영향평가 등
국비	415	-	415	-
도비	415	-	415	-
기타	-	-	-	-

※ 일부 지역주민 공감대 부족으로 인해 사업 지연, 주민설명회 개최 등 주민 공감대 형성 지속 노력

□ 사업효과

○ 해양쓰레기의 前처리시설로 자원순환형 관리체계 구축을 통한 지속가능 해양환경 조성 기여

해양정책과 과장 임민식(☎2760), 팀장 이경석(☎4754), 담당자 사재호(☎4769)

항만개발

[해운항만과 소관, 일반회계(항만개발)]

○ 화물의 안정적 수송과 미래 충남권 항만 물동량 증가에 대비한 신항만건설 예정지 개발 및 시설 확충

○ 노후 손상된 항만시설의 적기 유지보수로 항만기능 유지 및 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 위    치 : 지방관리항만 4개소(대천항, 마량진항, 보령항, 태안항)

○ 사업기간 : 2021. ~ 2025.

○ 총 사업량 : 대천항 돌제물양장 설치공사, 보령신항 준설토투기장 및 관리부두 설치공사, 항만시설 유지보수 및 보수보강 공사

○ 총사업비 : 166,539백만원

- ’22년 사업비(예산현액) : 35,178백만원(도비)

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	35,178	31,131	4,047	-	□대천항 돌제물양장 사업추진(계속사업) □보령신항 관리부두,투기장조성사업 추진 (계속사업) □정밀안전점검 및 유지보수 추진
국비	-	-	-	-
도비	35,178	31,131	4,047	-
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(35,178백만원) = 이월액(도5,114백만원) + ‘22본예산(도30,064백만원)

□ 사업효과

○ 준설토 투기장 및 관리부두 개발을 통한 항만의 체계적인 개발 및 관리, 물양장시설 확보로 어선의 원활한 항만 이용 도모

해운항만과장 김병용(☎2790), 팀장 박경덕(☎4812), 담당자 이양구(☎4823)

지자체관리(지방) 어항건설

[수산자원과 소관, 일반회계(지자체관리(지방)어항건설)]

○ 어선 안전수용으로 어업인의 생명과 재산을 보호하고, 원활한 어획물의 유통을 통한 어업인 소득증대 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 도내 연안 6개 시군

○ 사업기간 : 1973. ~ 계속

○ 사 업 량 : 지방어항 28개항

○ 총사업비 : 101,414백만원

- ’22년 사업비(예산현액) : 14,574백만원(도비)

○ 주요내용 : 지방어항 정비

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	14,574	14,389	185	-	□공사지구 - 백사장, 드르니, 만대, 학암포, 방포, 통개, 삽시도 □준공 후 사후환경 조사지구 - 다사
국비	-	-	-	-
도비	14,574	14,389	185	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 태풍 및 강풍으로부터 어선보호

○ 수산업의 경쟁력을 강화하고 어촌주민의 삶의 질 향상

수산자원과 과장 장민규(☎2770), 팀장 조용백(☎4125), 담당자 임정재(☎4140)

지방정원 조성(태안)

[산림자원연구소 소관, 일반회계(지방정원 조성(태안))(전환사업)]

○ 안면도 지방정원 조성(2단계) 및 가든센터 신축을 통하여 정원 문화 확산 및 정원 산업 활성화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 태안군 안면읍 중장리 산14-207 일원

○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.(계속비 사업)

○ 사 업 량 : 21ha(시설지구 6, 숲치유지구 15)

○ 총사업비 : 13,700백만원(도비 13,700백만원)

○ 주요내용 : 1단계 보완(85,300㎡), 2단계 신규조성(48,413㎡), 가든센터 신축(연면적 1,982㎡, 지상2층)

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	4,699	1,120	3,579	-	□사유토지 매입(4,466㎡, 596백만원) □재해영향평가용역(81백만원) □설계용역 선급금(405백만원) □지반조사, 조성계획 수립용역 등(31백만원) □건축물에너지 효율등급 예비인증, 에너지절약계획서 검토 수수료 등(5백만원)
국비	-	-	-	-
도비	4,699	1,120	3,579	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 정원 조성 및 가든센터 건축을 통해 계절을 막론한 정원 교육 여건 확충 및 정원 문화 확산 도모

태안사무소 소장 송재길(☎7250), 팀장 박정아(☎7263), 담당자 김지현(☎7264)

원산도자연휴양림 조성사업

[산림자원연구소 소관, 일반회계(지자체 자연휴양림조성(보령))]

○ 산림·해양 복합형의 특색 있는 자연휴양림 신규 조성을 통해      쾌적하고 다채로운 산림휴양서비스 제공

○ 원산안면대교 및 보령해저터널 개통과 연계하여 태안·보령

일대의 관광문화 붐조성을 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 충남 보령시 오천면 원산도리 산60번지 일원

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.(계속비사업)

○ 사 업 량 : 28.4ha

○ 총사업비 : 10,000백만원(국비 5,000백만원, 도비 5,000백만원)

○ 주요내용 : 휴양림 신규조성(방문자안내센터, 산책로, 광장,

주차장, 관리·진입도로 등)

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	9,090	1,088	8,002	-	□원산도 자연휴양림 조성 공사(1,044백만원) □분묘개장 용역(2차)(14백만원) □전기 인입 시설부담금 납부(13백만원)
국비	4,545	544	4,001	-
도비	4,545	544	4,001	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 바다가 보이는 휴양림 신규 조성을 통하여 이용객에게 쾌적하고 특색 있는 산림 휴양서비스 제공

보령사무소 소장 이돈선(☎7430), 팀장 한창민(☎7443), 담당자 박상문(☎7444)

수산종자연구센터 건립

[수산자원연구소 소관, 일반회계(양식기술기반구축)]

○ 우량 수산종자 개량‧육종 및 지역 자생종 보존 등 종자연구센터건립을 통한 종자연구․개발 기반 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 충남 보령시 웅천읍 갓골큰길 162

○ 사업기간 : 2020. ~ 2023.

○ 사 업 량 : 연면적 1,995.83㎡(지상 3층)

○ 총사업비 : 7,220백만원(국비 3,150 도비 4,070)

※ 국비 : 보조금 2,650, 특별교부세 500

- ’22년 사업비(예산현액) : 6,442백만원(국비 2,534 도비 3,908)

○ 주요내용 : 수산종자 개량‧육종, 종 보전 등 전문연구센터 건립

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	6,442	1,183	5,259	-	□ 종자연구센터 1개소 건립(지상3층) * 건립중(~23.6.) - 건축공사등 공사 선급금 등 지출 - 감리비, 관급자재 등 지출
국비	2,534	934	1,600	-
도비	3,908	249	3,659	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 서해 권역 수산종자 연구의 컨트롤 타워 역할 수행으로 도민과 상생하는『연구서비스』구현 및 수산의『미래성장동력』확충

연구개발과 과장 임동규 (☎7762), 팀장 전상기(☎ 7775), 담당자 남기웅(☎ 7773)

	균형발전
	특별회계

인공지능 지역상생 연구원 조성

[미래산업과 소관, 균형발전특별회계(인공지능 지역상생 연구원 조성)]

○ 과기정통부 주관 연구사업인 ‘인공지능 융합 선도프로젝트’ 연계, 태안군, 서울대학교와 협력한 지역 인공지능 산업 진흥 거점 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 충남 태안군 남면 달산리 880-2번지 (구)서남중학교

○ 사업기간 : 2021. ~ 2025.

○ 사 업 량 : 인공지능 연구원 기반조성 및 디지털라이프헬스             케어 실증 등 세부 추진과제 시행

○ 총사업비 : 2,320백만원(도 1,000백만원, 군 1,320백만원 등)

○ 주요내용 : 인공지능융합산업진흥원 기반조성 및 디지털라이프헬스케어 실증, 노인건강관리서비스 시범운영, 지역상생프로그램구축 등 추진

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	200	195	-	5	□인공지능융합산업진흥원 기반조성 (보강 · 연구환경 조성, 100백만 원) □디지털라이프 헬스케어 주거실증 단지 조성, 노인건강관리 서비스 시범운영, 지역상생프로그램 구축 · 드론 실증화 등 추진(95백만 원)
국비	-	-	-	-
도비	200	195	-	5
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 의료 · 건강 분야 인공지능 솔루션을 개발 및 적용한 통합관리시스템 구축 및 향후 타 산업(관광·해양·농업 등) 내 성과 확산 등 지역 내 신성장동력 확보

미래산업과 과장 이영조(☎ 2230), 팀장 강재홍(☎  3946), 담당자 신윤철(☎ 2236)

논산 강경읍 활력채움터 조성지원

[균형발전정책과 소관, 특별회계(강경읍 활력채움터 조성)]

○ 공영주차장, 실내체육관 등 복합시설 조성으로 주민 삶의 질 향상

○ 강경역 인근 주차공간 확보하여 역 및 전통시장 인근 주차난 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 논산시 강경읍 대흥리 19-19 일원

○ 사업기간 : 2021. ~ 2024.

○ 사 업 량 : 체육 및 문화시설 등 2,030㎡

○ 총사업비 : 7,400백만원(도비 1,900, 시비 5,500)

○ 주요내용 : 체육 및 문화시설 등 복합공간 조성

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	200	200	-	-	□설계용역비 200백만원
국비	-	-	-	-
도비	200	200	-	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 주차공간 확보로 강경역 인근 유동인구의 체류시간 증가 등 시장 및 상권 활성화

○ 복합화시설을 거점으로 생활문화 프로그램 운영 등 지역주민 삶의 질 향상

균형발전정책과 과장 윤종한(☎2910), 팀장 임형균(☎4702), 담당자 고은별(☎4715)

	안면도관광지개발
	특별회계

안면도관광지 연결도로 개설공사(공사비)

[개발전략과 소관, 안면도관광지개발 특별회계(관광지 개발)]

❍ 안면도관광지 진입도로(북측·중앙·남측도로) 간 접근성 향상을 통하여 관광지 개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 태안군 안면읍 승언~중장~신야리 일원

❍ 사업기간 : 2015 ~ 2022년

❍ 사 업 량 : 연장(L)=2.9km, 폭(B)=27m

❍ 총사업비 : 21,200백만원(국비 8,350, 도비 12,850)

❍ 주요내용 : 안면도관광지 연결도로 개설공사(L=2.9km, B=27m)

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	2,842	2,457	-	385	□안면도관광지연결도로 개설공사(2,457) - 염수분사시설 설치 - 무단횡단 안전휀스 설치 - 충격흡수시설 처리 - 보행자 안전 볼라드 설치 등
국비	515	515	-	-
도비	2,327	1,942	-	385
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

❍ 안면도관광지 진입도로(북측·중앙·남측도로) 간 접근성 향상을

통하여 관광지 개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

개발전략과장 이강섭(☎2920), 팀장 서윤석(☎4723), 담당자 강태민(☎2923)

안면도관광지 연결도로 개설공사(보상비)

[개발전략과 소관, 안면도관광지개발 특별회계(안면도관광지 연결도로 자체)]

❍ 안면도관광지 진입도로(북측·중앙·남측도로) 간 접근성 향상을 통하여 관광지 개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 태안군 안면읍 승언~중장~신야리 일원

❍ 사업기간 : 2015 ~ 2022년

❍ 사 업 량 : 연장(L)=2.9km, 폭(B)=27m

❍ 총사업비 : 21,000백만원(도비)

❍ 주요내용 : 토지 및 지장물 보상(잔여지분 감정평가 등)

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	426	426	-	-	□안면도관광지연결도로 개설공사보상비 등(426)
국비	-	-	-	-
도비	426	426	-	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

❍ 안면도관광지 진입도로(북측·중앙·남측도로) 간 접근성 향상을 통하여 관광지 개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

❍ 토지수용 재결을 통하여 공사부지 확보(장비 진입로 등)

개발전략과장 이강섭(☎2920), 팀장 서윤석(☎4723), 담당자 강태민(☎2923)

	특정자원 지역자원시설세
		특별회계

화력발전소 주변지역 기후환경영향 연구

[탄소중립정책과 소관, 특별회계(화력발전소 주변지역 기후환경영향 연구)]

○ 화력발전소 주변지역 기후변화와 주민피해, 생태계 영향 등에 대한 객관적 실증자료 축적으로 환경피해 정량화 및 개선 정책 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 4개 시군(보령, 당진, 서천, 태안)

○ 사업기간 : 2016. 5. ~ 2023. 6.

○ 사 업 량 : 연구용역 1식

○ 총사업비 : 4,750백만원(도비 2,375백만원, 부담금 2,375백만원)

○ 주요내용 : 화력발전소 주변지역 기후환경영향 연구

- 대기환경 정보구축, 대기질 측정분석, 사회적 피해 비용평가, 생태환경 모니터링 연구, 대기환경 법제도 분석 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	1,000	667	333	-	□연구용역비 선금 지급
국비	-	-	-	-
도비	500	333.5	166.5	-
기타	500	333.5	166.5	-

※ 예산현액(1,000백만원) = 전년도 이월액(1,000백만원)

□ 사업효과

○ 화력발전소 운영에 따른 기후·대기질 변화, 주민 피해 등 연구조사를 통해 정책개발 및 개선대책 마련을 위한 기초자료 활용

탄소중립정책과 과장 김성식(☎2710), 팀장 도중원(☎4404), 담당자 김미영(☎4421)

화력발전소 송전선로 환경역학조사 연구용역

[보건환경연구원 소관, 특별회계(화력발전소 송전선로 환경역학조사 연구용역)]

○ 고압전자파 건강 위해성 및 송전선로에 의한 환경영향 문헌 연구

○ 송전선로 주변지역 환경영향, 지역주민 건강 피해조사 및 대응방향 제시

□ 사업개요

○ 위    치 : 화력발전소 소재 4개 시군(보령, 당진, 서천, 태안)

○ 사업기간 : 2021. 7. 1. ~ 2025. 6. 30.

○ 사 업 량 : 화력발전소 송전선로 환경역학조사 연구용역 1식

○ 총사업비 : 2,000백만원(도비 2,000백만원)

○  주요내용  :  송전선로 선하지 및 주변 지역주민의 고압전자파 노출상태 및 건강영향 상태 조사

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	500	148	346	6	□인건비 및 사업 수행 경비 등 148백만원 □명시이월(‘23) : 346백만원 - 1차년도 결과에 대한 전문가 자문의견 반영
국비
도비	500	148	346	6
기타

□ 사업효과

○ 전자파 장기간 노출에 대한 인과관계 도출로 지역 주민 피해 구제

○ 피해 사례 조사를 통한 환경보건관리 중장기 계획수립 근거 마련

식약품연구부 부장 김종대(☎6805), 팀장 김현정(☎6840), 담당자 이강범(☎6841)

	소방
	특별회계

소방복합시설 조성사업

[회계장비과 소관, 특별회계(소방복합시설 조성사업)]

○ 소방기관의 분산, 임차 등에 따른 불안전성ㆍ비효율성 해소

○ 복합시설 내 관련시설 집적을 통한 거점기능 및 연계 강화

□ 사업개요

○ 위    치 : 청양군 비봉면 록평리 12-1 번지 외 62필지

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 3월(5년 3월)

○ 사 업 량 : 10개동 3개 시설물(건축 연면적 17,042㎡, 부지 388,789㎡)

○ 총사업비 : 79,023백만원(도비 57,513, 소방안전교부세 21,510)

○ 주요내용 : 소방학교, 119항공대, 장비정비센터 이전 등

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	49,053	6,793	42,260	-	□정보통신 공사 : 680 □건축공사 : 4,776 □건설사업관리 용역 : 564 □시설부대비 등 : 773
국비	-	-	-	-
도비	42,803	3,564	39,239	-
기타	6,250	3,229	3,021	-

※ 예산현액(49,053백만원) = 이월액(도30,441백만원, 소교세1,310백만원) + ‘22편성액(도12,362백만원, 소교세4,940백만원)

□ 사업효과

○ 3개 기관 집중화를 통한 투자비 절감과 시너지 효과 창출

○ 충남 중심부 위치로 대형재난에 신속·효과적 광역 대응

회계장비과 과장 이상권 ☎5570, 팀장 임재청 ☎5633, 담당자 배석제 ☎5606

당진소방서 청사 증축

[회계장비과 소관, 특별회계(당진소방서 청사 증축)]

○ 지역 안전 컨트롤타워로서의 기능과 역할 재정립

○ 도민 위기대처 능력 향상 및 질 높은 소방안전서비스 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 당진시 채운동 118-5번지

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 6월(3년 6월)

○ 사 업 량 : 1개동(건축 연면적 2,391㎡, 부지 9,056㎡)

○ 총사업비 : 9,864백만원(도비)

○ 주요내용 : 청사 증축을 통한 사무공간 및 안전체험시설 확충

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	4,413	201	4,212	-	□설계공모 : 24 □설계용역 : 177
국비	-	-	-	-
도비	4,413	201	4,212	-
기타	-	-	-	-

※ 예산현액(4,413백만원) = 이월액 375백만원 + ‘22본예산 4,038백만원

□ 사업효과

○ 신속한 출동체계 확립과 재난 현장 대응능력 향상

○ 소방안전체험시설 제공을 통한 도민 안전의식 고취

회계장비과 과장 이상권 ☎5570, 팀장 임재청 ☎5633, 담당자 배석제 ☎5606

금산소방서 청사 증축

[회계장비과 소관, 특별회계(금산소방서 청사 증축)]

○ 지역 안전 컨트롤타워로서의 기능과 역할 재정립

○ 도민 위기대처 능력 향상 및 질 높은 소방안전서비스 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 금산군 상옥리 385번지

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 1월(3년 1월)

○ 사 업 량 : 1개동(건축 연면적 2,204㎡, 부지 6,852㎡)

○ 총사업비 : 7,886백만원(도비)

○ 주요내용 : 청사 증축을 통한 사무공간 및 안전체험시설 확충

□ 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

2022회계연도 집행내역					주요 세부 집행내역
재원별	예산현액	지출액	이월액	잔 액
계	415	268	147	-	□건축기획 : 19 □설계용역 : 249
국비	-	-	-	-
도비	415	268	147	-
기타	-	-	-	-

□ 사업효과

○ 신속한 출동체계 확립과 재난 현장 대응능력 향상

○ 소방안전체험시설 제공을 통한 도민 안전의식 고취

회계장비과 과장 이상권 ☎5570, 팀장 임재청 ☎5633, 담당자 배석제 ☎5606