	제330회 도의회 임시회 (’21. 7. 21.(수) 10:30 / 행정문화위원회 회의실)

- 2021계룡세계軍문화엑스포 -

주요업무추진 상황보고

	(재)계룡세계군문화엑스포 조 직 위 원 회

순   서

		Ⅰ. 기본 현황 1 [1] 기 구 1 [2] 예산현황 1 Ⅱ. 엑스포 개요 2 [1] 추진배경 2 [2] 행사개요 2 Ⅲ. 그동안 추진상황 3 [1] 총 평 3 [2] 추진상황 4 Ⅳ. 앞으로 추진계획 8 Ⅴ. 도의회 관련사항 처리상황 13 【참고자료】 16

Ⅰ. 기본 현황

1	기 구

【1사무총장 2본부 6부 / 정원 39명】

【정․현원 현황】

구 분	합계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	임기직
	39/21	1/0	2/2	6/4	10/6	13/4	3/2	4/3

※ 정원 39명 / 현원 21명(결원 △18명), 충남도 18명 / 8명(△10명), 계룡시 17명 / 10명(△7명), 민간 4명 / 3명(△1명)

→  엑스포 1년 재연기에 따라 ’21.하반기「1총장 2본부 4부」로 감축 운영, ‘22.1월 행사 정상준비 위해 결원보충 예정

2	예산 현황

❍ (예산총액) : 17,798백만원(국비 2,800, 도비 6,769, 시비 4,929, 자체수익 3,300)

❍ (출연금 현황)                                     (단위 : 백만원)

구 분	합 계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
합 계	17,798	2,500	1,500	2,840	5,871	5,087
소 계	14,498	2,500	1,500	2,840	5,400	2,258
국 비	2,800	500	500	1,800	-	-
도 비	6,769	1,000	500	540	3,600	1,129
시 군 비	4,929	1,000	500	500	1,800	1,129
자체수익	3,300	-	-	-	471	2,829

Ⅱ. 엑스포 개요

1	추진 배경

❖ 3軍 본부가 위치한 “국방수도” 계룡시의 특성을 살려

- 세계軍문화의 다양한 가치 공유 및 평화수호자로서 軍의 위상 향상

- 세계 유일의 분단국인 한반도에서 평화와 화합의 메시지 전달

- 6.25 전쟁을 딛고 일어선 대한민국 위상 제고와 지원국에 대한 보은

❖ 세계 軍문화 교류를 통한 軍문화의 긍정적 가치 공유･확산,

한반도 평화･번영 기원 및 세계 평화와 화합의 장 실현

2	행사 개요

❍ 행 사 명 : 2022계룡세계軍문화엑스포

(2022 Gyeryong World Military Culture EXPO)

❍ 기    간 : 2022. 10. 7.(금) ~ 10. 23.(일) / 17일간

❍ 장    소 : 충남 계룡시 일원 (계룡대 활주로 일원 / 330천㎡)

❍ 주    제 : “K-Military, 평화의 하모니”

❍ 관람목표 : 총 131만명(내국인 124만, 외국인 7만)

❍ 사 업 비 : 177.9억원(국비 28억, 도비 67.7억, 시비 49.2억, 자체재원 33억)

❍ 행사내용 : 공식행사 (개장식, 개･폐막식 등), 전시행사(세계평화관, 한반도희망관,

대한민국국방관, 세계군문화생활관, 4차산업융합관, 지역산업관) 등

❍ 후    원 : 국가기관, 군 및 일반법인 등

- 국가기관(10) : 국방부, 국가보훈처, 교육부, 중소벤처기업부, 산업통상

자원부, 방위사업청, 대한민국 육‧해‧공군본부 및 해병대

- 일반법인( 2) : 한국관광공사, 대한민국재향군인회

※ 기부후원(5) : NH농협은행, ㈜태유, 중소기업중앙회, JB(주), KB국민은행

Ⅲ. 그동안 추진상황

1	총 평

□ 그 동안

○ 코로나-19 대응 관련 종합적인 대책 마련

- 코로나-19 방역지침을 반영한 ‘코로나-19 대응 단계별 운영방안’ 마련

○ 참여국가, 정치, 행정, 유관기관 등 지속적인 지원체계 구축

- 해외 군악대(9개국 의사 표명), 국방부, 외교부, 문체부, 3군 및 해병대, 타 지방자치단체, 유관기관, 기업, 자원봉사자 등

○ 그동안 추진한 국내･외 협조 및 협력관계 유지･보완 발전

- 국방부·육군 지원단 협력, UN PKO, 각국 6·25 참전용사, 방산업체 초청 등

○ 코로나-19 감염병 확산 지속에 따라 엑스포 행사 1년 재연기 결정

- 관계기관 합동회의 (4.19.) ·이사회 의결 (4. 22.), 공표(언론브리핑, 4. 26.)

□ 앞으로

○ Program, 시설, 이벤트·회장 운영 등 전면적인 점검 및 보완･보강

- 컨텐츠 수정·보완을 통해 다양하고 업그레이드된 행사 준비

- 6 · 25 참전용사 및 해외군악대 초청국 확대 등

○ 국방부지원단 등과 긴밀한 협조체계 지속(내년도 개최까지 존치 결정)

○ 다양한 매체를 활용한 다각적 홍보로 국내･외 관람객 유치 전력

○ 감염병 예방은 물론 안전사고 없는 엑스포가 될 수 있도록 준비 만전

⇨ 세계 최초 군문화엑스포인 만큼, 평화･화합･번영의 희망과 감동이 있는 세계적인 엑스포가 되도록 최선

2	추진상황

□ 그 동안 추진경과

2016. 7.	• ｢2020계룡세계軍문화엑스포｣ 국제행사심사위원회 개최 - 심사결과(98억원 / 10일), “정부 승인”(기획재정부)
2017. 9.	• 조직위원회 사무처 발족
2018. 12.	• 국방부 업무협약(MOU) 체결 (도지사 + 장관) - 엑스포 조직위 및 국방부 간 협력·지원사항 합의
2019. 3.	• 사업계획 변경 - 행사기간 : 10일간 → 17일간, 사업비 : 98억원 → 155억원 - 중앙투자심사위 개최(’19. 3.) ⇒ 결과 : 승인(행정안전부)
2019. 7.	• 대행사 선정(일괄계약 턴키방식 발주 / 조달청 계약) - ㈜유니원커뮤니케이션즈(계약체결 / ’19. 12.)
2020. 1.	• 국방부 엑스포지원단 발족 - 단장(육군 준장), 1단계(9명) → 2단계(24명)
2020. 6.	• 코로나-19 확산으로 행사 연기 및 시기․명칭 변경 - (연기 결정) : ’20.5.26.(화) 이사회 의결, ’20.5.28.(목) 대외공포 - (시기․명칭) : ｢2021.10.1. ~ 10.17.(17일간)｣,｢2021계룡세계군문화엑스포｣ ’20.6.25(목) 이사회 의결
2020. 8.	• 엑스포 주차장 조성공사 완료(’20. 8.)
2021. 3.	• ｢2021계룡세계軍문화엑스포｣ 코로나-19 대응 단계별 운영방안 마련(3.29.)
2021. 4.	• 코로나-19 확산에 따른 행사 1년 재연기 결정 - ’21.4.22.(목) 이사회 의결, ’21.4.26.(월) 대외 공포
2021. 5.	• 엑스포 연기에 따른 후속조치 계획 마련
2021. 6.	• ‘22년도 엑스포 개최시기 및 명칭 결정 추진

□ 엑스포 행사 1년 재연기 결정

◇ 지난해에 이어 ‘코로나 - 19’ 감염병 지속 확산에 따라 국민건강, 안전 및 감염병 예방 등을 위하여 군문화엑스포 1년 재연기 결정

<관계기관 등 논의 경과>

❍ 조직위 위원총회 개최 (3. 30.) ⇒  민간위원장 보고(4.12.) 및 국방부  지원단 설명·공유(4.14.) ⇒ 계룡시장 보고(4.14.) ⇒ 충남도 실국장  회의 개최(4.15./계룡시 부시장 등 참석) ⇒ 충남도지사 보고(4.15.)

【관계기관 합동회의 개최】

❍ 때 ․ 곳 : ’21. 4. 19.(월) 15:00~16:00 / 충남도청 중회의실(510호)

❍ 참    석 : 15명(주재 : 문화체육부지사)  * 충남도･계룡시 실국장, 육군지원단, 감염병전문가 등

❍ 주요내용

▹ 코로나-19 상황이 예측 곤란한 상황에서 행사 특성상 전국적, 세계적   영향을 감안할 때, 개최는 현실적으로 큰 부담이며, 연기가 불가피

▹ 엑스포 조직·인력, 예산, 공사용역 문제 등 후속 조치에 대해 낭비가   없도록 관계기관과 협의하여 준비 철저 필요

▹ 국방부 및 육군에서는 연기하더라도 적극 지원 의사 표명

⇨ 회의결과 : 現 코로나 상황에서 엑스포 특성상 연기는 불가피

【조직위 이사회 의결 (결정)】

❍ 때 ․ 곳 : ’21. 4. 22.(목) 15:00 / 충남도청 중회의실(510호)

❍ 참    석 : 5명 (이사장 : 문화체육부지사)

· 道 (문화체육부지사, 문화체육관광국장), 市 (부시장, 기획감사실장, 군문화엑스포지원단장)

❍ 의    결 : 1년 재연기, 개최시기는 코로나 상황 감안, 관계기관 협의 후 이사회 결정

* 공표 : ’21. 4. 26 [월] 09 : 50 / 道 브리핑실 / 도지사

□ 자체재원 확보 : 목표 33억원 (관람료  23, 후원 ·협찬  5, 광고  2, 임대 2, 휘장  1)

❍ 관람료 확정 (목표 23억원 / 100만매)

대 상 (국내․외인 동일)		관 람 료 (원)			할 인 내 용
		권 종	요 금	지역상품권 반환
일 반 인		현 장	6,000	3,000 (50%)	※ 현장권 1천원 할인 - 만65~74세 - 기초생활수급자 등 ※ 무료 관람 - 국가유공자, 75세 이상 - 장애정도 1~3급 - 현역 사병 등
		예 매	5,000	2,500 (50%)
학생	중･고 생	현장/예매	3,000	1,000 (단일권)
	초 등 생	현장/예매	2,000

- 관람권 판매대행 계약(’20.1. / 티켓링크<제작 및 온라인>, ’20.4. / NH농협, KB국민은행<오프라인>)        -  지역상품권 정산대행 협약 체결 (’19.12. / NH농협계룡시지부·논산계룡농협)

❍ 후원･협찬 : 5억 확보 (4.5억 세입 완료 / KB국민은행 0.5억 예정)

❍ 휘장업체 선정 : SR기획 (’20. 1. 계약), 계약금 (21백만원), 런닝로열티 (매출액의 5%)

- 엑스포 개최기간 재확정 시 기간연장 추진(현재 2021. 10. 17까지)

□ 관람객 유치･홍보

❍ 계기성 홍보 (50여회)

- 관광박람회, 관광안내소, 고속도로 휴게소, 교육기관(충남･대전･세종 초 중 고

교육청, 교장단 회의, 지역 군사학과 관련 대학), 공공기관 등 방문 참여 홍보

❍ 해외관람객 유치 홍보

- 한국관광공사 충남지사, 주한외국공관(네덜란드 등), 다국어 포털

(코리아넷) 등 홍보영상 및 e-mail, 우편, 방문 홍보

❍ 기타 홍보 추진

- 한･미연합사령관, 주한미대사를 방문, 엑스포 홍보 및 협의 (’20. 1.)

- 아마추어 무선 홍보(무선사 15명) : 68개국, 2,500여건(’21. 3.)

- 홈페이지 개편･운영, 홍보동영상 제작 (유튜브 Posting, 계룡시 야외전광판(2곳) 송출)

□ 교통대책 : 도로 개설 및 확･포장

사 업 명	사 업 량	추 진 상 황	비 고
신도안 ~ 세동 광역도로 개설	□ L = 1.96km (계룡 1.24km, 대전 0.72km ) □ B = 20m(4차선)	□ 사 업 비 : 249.7억원(대전구간 포함) (국 75, 도 37.3, 계룡 46.4, 대전91) □ 사업기간 : ’19. 9. ~ ’21. 8.	공정율 90%
공군기상단 삼거리 ~ 괴목정 도로 확장	□ L = 2.09km □ B = 10m → 20m ( 2 → 4차선 )	□ 사 업 비 : 88억원(국 8, 도 25, 시 55) □ 사업기간 : ’19. 8. ~ ’21. 4.	사업 완료
행사장 진입도로 및 보도정비 사업	□ 계룡IC ~ 행사장 (L=5.8km)	□ 사 업 비 : 17억원 (도 8.5, 시 8.5) □ 사업기간 : ’20. 3. ~ ’21. 3.	사업 완료

□ 해외군악대 초청 : 9개국 참가 표명

❍ 영국, 러시아, 바레인, 미국(미8군), 스웨덴, 말레이시아, 네팔, 태국, 베트남

□ 후원명칭 사용 동의 : 17개 기관 (’21. 6.현재)

❍ 국방부, 국가보훈처, 교육부, 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 방위사업청,  대한민국 육군･해군･공군･해병대, 한국관광공사, 대한민국재향군인회, NH농협은행, 중소기업중앙회, ㈜태유, KB국민은행, JB(주)

□ 회장관리

❍ EXPO 행사장 시설물(전시관, 게이트, 주･보조무대, 휴게존 등) 배치(안) 마련

❍ 토목･전기･통신 및 행사장 조성 설계용역 완료(’19. 12. ~ ’20. 3.)

□ 엑스포 주차장 조성 공사 : 완 료

❍ 조성내용 : 총 9,790면 (기존 6,050, 신설 2,554, 예비 1,186)

관람객 유치 등을 위한 MOU 체결
❍ 충남도교육청(’19.9.), 충청권(대전․세종․충남․충북) 시․도 교육청(’19.12.)

※ 전국 교육지원청(60여개소) 방문 홍보 및 각 급 학교 게시판(공문) 협조 시달(’20.2.)

❍ 충남도 대학 및 지역인재육성지원협의회(’19.12.), 충청권 4개 시·도지사(’20.1.)

❍ 중소기업중앙회 대전세종충남지역본부(’20.2.), 대전도시공사(’20.5.)

Ⅳ. 앞으로 추진계획

□  연기에 따른 인력 및 조직 운영 후속조치

❍ 정  원(39명) : 1총장 2본부 6부 (도 18, 시 17, 민간 4)

								공동위원장 (충남도지사, 계룡시장, 민간위원장)
													사무총장(3급)
	총괄지원본부장																		행사운영본부장																총감독
행정관리부					대외협력부							홍보마케팅부					행사지원부							전시시설부						국제협력부

❍ 현  원(21명) : 1총장 2본부 4부 (도 8, 시 10, 민간 3)  △18

					공동위원장 (충남도지사, 계룡시장, 민간위원장)
							사무총장(공석)
	총괄지원본부장											행사운영본부장											총감독
행정관리부						홍보협력부					행사지원부						전시시설부

※ 총 괄 : 정원(39명) 대비 53.8% 근무(21명) ※ 감축율 46.2%

□ 충남도 : 정원(18명) 대비 44.4% 근무(8명) ※ 감축율 55.6%,  □ 계룡시 : 정원(17명) 대비 58.8% 근무(10명) ※ 감축율 41.2%

	< 향후 추진계획 >
◈ 행정안전부 정원승인 협의 결과 * 근거 : 행안부 통보 공문(‘21.5.28.) < 당초 > 2명(3급 1, 4급 1) ⇒ < 변경 > 2명(4급 2) ☞ 행안부 직무파견 3급(1명) 정원 미승인에 따라 사무총장은 민간으로 임용 예정 ※ 2022년 1월 엑스포 정상 개최 준비시 정원･인력 결원 보충 운영 계획

□ 행사 개최시기 및 명칭 결정(안)

◇ ‘코로나 - 19‘ 감염병 지속 확산으로 1년 재연기된 2021계룡세계 軍문화엑스포의 ‘2022년도 행사 개최시기 및 명칭‘ 결정 추진

❍ 추진계획 수립(’21. 6. 4.)

❍ 관계기관 등 의견수렴 절차 진행

- 위원총회 위원(17명) 및 충남도 · 계룡시 직원 대상 설문조사(’21. 6. 7.~6.10.)

- 관계기관 사전회의 개최(’21. 6. 23.까지/조직위 · 軍 · 계룡시지원단 등 3회)

□ 개최시기 및 명칭 “가안”에 대해 논의 및 확정

- 의견수렴 결과 보고(’21. 6. 28.까지/공동조직위원장, 이사장 등)

❍ 이사회 심의･의결 확정 및 대외공포(’21. 7.)

□ 대행사 관리

❍ 업  체  명 : ㈜유니원커뮤니케이션즈 (’19. 12. 31. /계약 체결)

❍ 지금까지 추진상황

- 장기계속 1차 계약 (25억원)                      : ’19. 12. 31.

- 장기계속 2차 계약 (31.95억원)                    : ’20.  5. 11.

- 엑스포 연기에 따른 대행용역 사업 용역 중지     : ’20.  7.  1.

- 1, 2차 계약 납기 연장 계약완료(’21.12.31까지)         : ’20.  7. 20.

- 하도급계약 기간연장 승인(’21.12.31까지)            : ’20. 12. 30.

❍ 앞으로 추진계획

- 과업 내용, 기간 등 변경 협의                      : ’21.  7.~

- 대행사업 변경계약 및 재착수(조달청)            : ’21. 10.限

□『국방부』협조체계 지속 유지

❍ (지원기구) 계룡세계군문화엑스포 국방부지원단(’20.1.2. 발족)

❍ (인력구성) 24명(1단장 1참모장 4팀 [기획운영, 시설, 콘텐츠, 홍보])

【그동안 추진 사항】

► (업무 협업체계 구축) : 조직위 + 국방부･육 ･해･공군 및 해병대

► (소요인력 및 예산 분석) : 軍 인원 및 장비지원 등 소요예산 판단

► (체험행사 준비 및 실행) : 기동시범, 무기･장비전시, 병영체험 등

► (전시관 전시연출 구상) : 대한민국 국방관, 국방체험관 등

► (軍프로그램 개발 · 구상) : K-Military경연대회, 드론전투체계 시연 등

► (각 軍 지원분야 협력) : 각 軍 지원 가용 인력 및 자산 파악 및 협조

⇨ 홍보, 전시관 및 프로그램 구성까지 전반적인 사항에 대해 협력 中

❍ (축소운영) 인력감축 후 존치 결정 : 총 4명(단장 외 3명)

- 연기 후 후속조치, 사업내용 일관성·연속성 유지 및 보완

- 군 장비 및 인력동원 계획 재협의 등

□  조직위 자구방안 마련

◇ 행사 1년 재연기 결정에 따라 하반기 인력 감축, 조직위 수당 등 예산 절감을 통한 자구 노력 마련

❍ 사무처 예산 절감 : △ 294백만원

(단위:백만원)

구 분	당초예산 (Ⓐ)	조정예산 (Ⓑ)	절감액 (Ⓐ-Ⓑ)	비고
합 계	1,180	886	△294
업무추진비	156	38	△118
파견보조비	283	223	△60
특정업무경비	100	69	△31
일반운영비, 여비 등	641	556	△85

※ 민간 사무총장 인건비는 미포함.

□ 자체재원 확충 : 33억원 (관람료 23, 후원 ·협찬 5, 광고 2, 임대 2, 휘장 1)

◇ 관람권 사전 예매 및 자체재원 확보를 위한 관람객 유치 총력 추진

◇ 자체재원 확충을 위해 기관, 기업, 향토업체의 기부(후원) 추진

❍ 관람권 판매(100만매 / 23억원 목표)

- 예매권 : 60만매(관람객의 46%), 현장권 : 40만매(관람객의 30%)

- 예매권 판매 개시 : ’22년 상반기 ~ ’22년 9월 (행사 일주일전까지)

□ 온라인 : 티켓링크 / 오프라인 : NH농협은행, 국민은행

- 道, 시군(노조포함), 출자출연기관, MOU기관 등 자율판매 참여 홍보 추진

- 교육기관, 공공기관, 사회단체, 기업체 등 리스트 현행화 및 기관방문은 물론 온라인 ･오프라인 활용 적극 추진

❍ 후원·협찬 유치

- 전국 10대 방산기업 및 기 기부희망 단체 대상 엑스포 붐업과 추가 유치 추진

- 15개 시․군 대표기업(향토기업 등)의 엑스포 동참 재 안내 및 유치 전개

❍ 광고･임대 유치

- 軍콘텐츠의 국제행사 강조 주요 방산기업 브랜드 노출 광고 집중 유치 전개

- 시군의 명소 홍보영상 및 도 대표 기관, 단체의 브랜드 홍보 광고 유치

□ 주무대 LED전광판 활용 기업의 홍보영상 노출로 브랜드 광고 제안

- 행사장 내 메인음식관, 편의점, 까페테리아 등 임대시설 유치 공개모집

❍ 휘장사업

- 휘장업자의 사업기간 연장 및 개발품 심사승인과 판촉도모 활동 지원

□ 회장 조성

❍ 휴게존 조성 공사 (100백만원)

- 위치 : 행사장 내 잔디광장 / 내용 : 맹암거 설치, 잔디보식 등

- 기간 : ’20. 4. 14. ~ 6. 10. / 공사 완료 : ’20. 6. 10.

⇨  연기에 따라 그늘막, 벤치 의자 등 휴게시설 설치(’22. 3. ~)

❍ 행사장 조성 공사 (토목 200백만원, 전기 646백만원)

- 토목 : 경계펜스, 상하수관로 설치 등 / 전기 : 수배전설비 증설 등

- 착공 : (토목) ’20. 6. 1. (전기) ’20. 6. 4. ⇨ 공사 중지 : ’20. 6. 8.

⇨  연기에 따른 軍 협의 및 물가변동 등 검토 (’21. 7. ~ 12.), 공사중지 해제 및 재착공 (’22. 4.~8.)

□ 행사기간 및 명칭 변경에 따른 효과적인 EXPO 홍보

❍ 옥외광고 매체를 활용한 홍보 (전광판, 시설물 등)            : ’21. 7. ~

❍ 엠블렘 및 마스코트 등 변경 제작 관리 추진                : ’21. 7. ~

❍ 홍보물(팜플렛･리플릿 등 인쇄물, 물품) 변경 인쇄･제작       : ’21. 7. ~

❍ 계기성 홍보(박람회･축제), 기관 홍보(공공·교육기관·사회단체 등)     : ’21. 8. ~

❍ 중앙･지방지･언론매체 활용 홍보 (보도자료, 인터뷰 등)       : ’21. 7. ~

❍ SNS 홍보 (페이스북, 유튜브 영상 제작, 경품 이벤트 등)          : ’21. 8. ~

□ 해외군악대 초청

❍ 기 참가 표명국 및 신규 초청국 선정, 엑스포 참가 재협의  : ’21. 7. ~

❍ 해외군악대 초청자 숙·식업체 선정 사전 협의       : ’21. 8. ~

4차산업융합관 운영

❍ 행사 성격에 부합하는 전시관 운영을 위한 기업유치(안) 재조정  : ’21. 7. ~

❍ 독립부스 참여기업(기관) 유치활동 추진              : ’21. 9. ~

❍ 전시관 참가업체 모집공고                        : ’22. 1. ~

Ⅴ. 도의회 관련사항 처리상황

□ 2020년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황

《 총    괄 》

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
계	4	3		1
시정요구
처리요구	1	1
제안사항	3	2		1

《 완료사항 》

【1】특정업무수행활동비 지급 투명화 [제안사항]

예산 집행내역 중 특정업무수행활동비 지급내역에 대한 명확화, 임금에 포함 또는 수당 명목으로 지급 등 합법적으로 지급할 수 있도록 조치

❍ 道□市 파견공무원에게 “특정업무수행활동비” 항목으로 파견보조비를       지급하는 것은 예산 항목에 맞지 않아, 2021년도 본예산에 “보수          (101-01)” 항목에 명확히 편성하여 직급별 파견보조비를 지급하고 있음.

- (3급이상) 월1,000천원, (4급) 월800천원, (5급이하) 월600천원

【2】엑스포 기반시설 구축 등 조속한 사업시행 및 업무추진비 등 집행철저 [처리요구]

최근 3년간 예산 집행율 10%대, 국제행사가 연기됐음에도 국내여비, 업무추진비 예산이 계속 증액된 부분은 문제가 있어 보이는 바, 예산의 적절한 집행이 필요함

❍ 국내여비는 엑스포 홍보, 벤치마킹, 대외협력 등 출장 발생을 고려하여       편성하였으나, 1년 재연기에 따라 최소한으로 지출하고 있으며,

’21년도 업무추진비는 전년대비 △17,240천원 삭감하여 예산편성       하였으며, 낭비없이 효율적으로 집행토록 하겠음.

【3】코로나19가 지속되는 경우 비대면 등 행사개최 방식 대체방안 강구 [제안사항]

내년에도 불확실한 상황이 올 것임을 감안하여 사업계획에 대해 재점검 추진이 필요하며, 비대면 행사로라도 반드시 내년중에 사업완료 할 수 있도록 철저한 대비 필요

❍ 2021계룡세계군문화엑스포 코로나19 대응 단계별 운영방안 마련(’21.3.29.)

- (1단계) 방역강화, 일부축소, (1.5단계) 일부축소, 온라인 병행, (2단계) 언택트 전환, 일부 폐지

* 세입 : (1단계) 6억원 감소, (1.5단계) 11억원 감소, (2단계) 27.8억원 감소

* 세출 : (1단계) 운영관, 군악대 초청 축소, (1.5단계) 전시관, 프로그램 축소, 온라인 병행,

(2단계) 운영관 축소, 프로그램 통폐합 및 온라인 전환 등

❍ 대응방안 마련에도 불구하고, 코로나-19 지속 확산(1일평균 700명 육박)에 따라       관계기관 등 다양한 의견수렴을 거쳐 이사회에서 최종 1년 재연기 결정(’21.4.22.)

- 개최시기 : 2022. 10. 7. ~ 10. 23.(17일간) / 행사명칭 : 2022계룡세계군문화엑스포

☞ 조직·인력 감축 및 예산 절감, 대행사 계약 변경, 자체 사업 등 보완을 통한         후속조치 추진으로 2022년 새로운 엑스포 준비 철저

《 추진불가사항 》

【1】직급상향이 과도, 적절한 직급 조정 필요 [제안사항]

기존 업무량 대비 직급 비율이 너무 상향 편중되어 있는 것으로 보이며, 적절한 직급 비율로 조정될 필요가 있음

❍ 엑스포조직위 상위직급을 하향조정시 중앙부처, 軍, 軍관련 연구기관,       기업체 등과 관계 유지 및 소통 시 협상력 부족,  타 기관과 조율할       수 있는 현 직급 필요, 직급 하향 조정시 엑스포 행사 추진 곤란

❍ 국제적 행사인 엑스포의 규모와 격에 맞는 협상력과 의전 등을 고려해       볼 때 현행 유지 반드시 필요하며,

2021엑스포 1년 재연기에 따라 행안부 직무파견 결원보충을 요청하였으나,    3급 정원 미승인에 따라 민간 사무총장 임용 예정임.

* 행안부 자치분권제도과-1900(2021.5.28.) : 4급 2명 승인(‘21.7.~’22.12.)

【 참 고 자 료 】

(1) 프로그램

분 야 (8)

프로그램(41)

사전행사

· D - 100일, 30일 행사 등 추진

공식행사

· 개장식 : 행사 첫째날 / 개장세레모니

· 개막식 : 행사 첫째날 / 평화 메시지 전달

· 폐막식 : 행사 마지막날 / 하이라이트 영상

메인공연

· 계룡밀리터리군악의장콘서트

· 주제공연 “계룡의 꿈”

· 로드퍼포먼스 “평화의 발걸음”

공

특별행사

· 육군의 날, 해군의 날, 공군의 날, 해병대의 날

· 미8군의 날,  충청남도 시･군의 날, 우정의 무대

· 박혜미 뮤지컬 갈라쇼, 군악콘서트 ‘울림’

경연행사

· K-Military 경연대회, 글로벌 K-POP 경연대회

· 전국평생교육 동아리 경연대회

· 밀리터리 코스프레 경연대회

부대행사

· 계룡산 안보등반, 계룡대 영내투어

· 장비기동시범, 전통무예·태권도·특공무술 시범공연,

· 위문열차, 프린지 공연 “고성방가”

체험행사

· 군 무기장비 전시·탑승 체험, 병영훈련 체험

· 가상현실 사격 체험, 전투장비 분해･결합 체험

· 육군･해군･공군･해병대 체험 프로그램 등

학술 및

국제회의

· 계룡세계평화포럼

※ 최고의 Quality 있는 프로그램 운영과 완벽한 연출·공연을 위해 최선의 노력 경주(2) 전시관 조성･운영(안)

			① 세계평화관		『세계평화, 우리 모두 Peacemaker가 되어야 이룰 수 있습니다』
					콘텐츠 : 세계전쟁의 역사와 평화를 위한 노력 존구성 : [일상의 평화] [깨어진 평화] [전쟁의 상처] [평화를 꿈꾸는 Peacemaker]
			② 한반도희망관		『Peacemaker를 꿈꾸는 평화와 희망의 한반도』
					콘텐츠 : 대한민국의 전쟁과 평화의 역사 존구성 : [상처입은 한반도] [희망을 꿈꾸는 한반도] [미래로 향하는 한반도] [Global Peacemaker, 한반도]
주 제 Zone
			③ 대한민국국방관		『평화실현을 위해 나아가는 대한민국 국군의 강한 힘과 미래』
					콘텐츠 : 대한민국 국방과 우리 軍 존구성 : [국방정책 존] [육･해･공･해병대 등 국군 존]
			④ 세계군문화생활관		『세계군의 역사속에서 형성된 군문화의 과거와 현재』
국 방 체 험 Zone					콘텐츠 : 대한민국 국군과 세계 軍의 衣·食 군문화 존구성 : [세계 군의 ‘식’ 문화] [세계 군의 ‘의’ 문화] [우리가 궁금했던 군문화]] [전쟁과 함께 발전한 과학]
			⑤ 4차산업융합관		『軍과 新기술의 만남』
					콘텐츠 : 국방산업 대기업 및 4차산업을 비롯한 첨단기술 기업 제품 전시 존구성 : [세계방위산업트랜드 존] [첨단기술 발전 존] [4차 산업 존]
산 업 Zone
			⑥ 지역산업관		『충남 지역산업의 우수성을 만나다』
					홍보 Zone : [충남을 알리는 홍보전시관] 판매 Zone : [우수 농･수･산업 제품의 판매장]

※ 다양하고 풍부한 자료 확보 및 콘텐츠 사전 검증으로 국민이 공감하는 전시관 운영

※ 전시관 구성시 영유아, 노약자, 장애인 등 동선 고려 등 세심한 배치

※ 엑스포 개최 후, 활용가능한 전시콘텐츠는 계룡시･軍 등에 이관 및 영구 활용

(3) 행사장 조감도 및 상징마크

【 행사장 조감도 】

【 상징마크 및 캐릭터 】

상징마크 (엑스포 행사를 통해 평화와 화합의 장이 대한민국 계룡에서 새로이 시작됨을 표현)		캐릭터 (비룡이) (비상하는 계룡의 줄임말로, 계룡시의 상징인 용을 귀엽고 친밀하게 표현)

(4) 조직위 임원 현황 및 간부 명단

□ 조직위 임원 현황

구 분	소 속	직 위	성 명	비 고
조직위원장 (3)	충청남도	도지사	양 승 조
	계 룡 시	시 장	최 홍 묵
	재향군인회	회 장	김 진 호
당연직 이 사 (6)	충청남도	문화체육부지사	이 우 성	이사장
	충청남도	기획조정실장	이 창 규
	충청남도	문화체육관광국장	이 건 호
	계 룡 시	부시장	황 상 연
	계 룡 시	기획감사실장	김 세 겸
	계 룡 시	군문화엑스포지원단장	윤 광 근

□ 간부 명단

구 분	직 위	직 급	성 명	비 고
조직위원회 사 무 처	사무총장	계약직	공 석
	총괄지원본부장	지방서기관	허 선 무
	행사운영본부장	지방서기관	최 천 재
	총감독	계약직	전 인 근
	행정관리부장	지방행정사무관	조 영 철
	홍보협력부장	지방행정사무관	김 기 영
	행사지원부장	지방행정사무관	최 성 운
	전시시설부장	지방시설사무관	강 병 권