		제328회 도의회 임시회 2021. 3. 30. ~ 4. 13.

- 2021년 -

주요 업무 계획 보고

	종합건설사업소

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2021 업무여건과 운영방향 Ⅲ. 2021 주요업무 추진계획 Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황 □ 2020년도 행정사무감사결과 처리상황 □ 제11대 도정질문, 5분발언 등 추진상황 Ⅴ. 참고사항 □ 각종 위원회 및 기관․단체 현황 □ 주요 사업별 예산확보 현황 □ 간 부 명 단

Ⅰ. 기  본  현  황

□ 기구 및 기능

【1】기 구 : 4과 2지소 23팀

								소 장
행정관리과				도로건설과				공공건축과						하천개발과					공주지소				홍성지소
서무팀				도로1팀				대형건축팀						지역개발팀					서무팀				서무팀
계약팀				도로2팀				건축사업팀						하천1팀					보수1팀				보수1팀
보상1팀								건축지원팀						하천2팀					보수2팀				보수2팀
보상2팀								시험팀											구조물 관리팀				구조물 관리팀
																			단속팀				단속팀

【2】정․현원 현황

부서․지소별		계	일 반 직(정원/현원)
			4급	5급	6급	7급	8급	9급	운영직
합 계		114/108	1/1	6/6	23/27	42/28	32/15	4/25	6/6
본소		61/59	1/1	4/4	13/16	25/18	15/6	3/14	-
	행정관리과	18/18	1/1	1/1	4/4	8/7	4/0	0/5	-
	도로건설과	12/11	-	1/1	2/2	4/3	3/3	2/2	-
	공공건축과	21/18	-	1/1	4/6	10/7	5/0	1/4	-
	하천개발과	10/12	-	1/1	3/4	3/1	3/3	0/3	-
공주지소		27/25	-	1/1	5/6	9/5	9/5	0/6	3/2
홍성지소		26/24	-	1/1	5/5	8/5	8/4	1/5	3/4

※ 공무직(67명) : 도로보수원 49, 사무보조 4, 과적단속요원 14

【3】주요 기능

	- 행정관리과
	❍ 조직, 예산, 청사관리 및 직원후생복지 ❍ 각종 건설공사 입찰 및 계약, 관급자재 구매, 보상업무
	- 도로건설과
	❍ 지방도 사업 집행계획 수립 및 조정 ❍ 국가지원지방도 및 지방도 확‧포장사업 시행
	- 공공건축과
	❍ 공공 건축물의 신축 및 보수사업 ❍ 건설공사 자재 및 현장 품질검사 시험
	- 하천개발과
	❍ 지방하천 정비사업 시행 및 집행계획 수립 ❍ 지역개발 기반시설사업 시행 ❍ 지방하천 재해복구사업 추진
	- 공주∙홍성지소
	❍ 지방도∙위임국도 유지관리 및 보수사업 시행 ❍ 재해대책(풍∙수해) 수립 시행, 과적차량 단속

【4】 2021년도 예산규모

세입 세출
		∙ [세 입 예 산] 1,920백만원 - 수수료 100, 과태료 210, 지난년도 수입 210, 소방안전교부세 1,400 ∙ [세 출 예 산] 30,805백만원 - 사업예산 18,914, 행정운영경비 11,891

❍ 재배정 예산 사업 : 311,855백만원

(단위 : 백만원)

도로 확･포장	공공건축	하천정비	지역개발	재해복구사업	도로유지 관리
97,051	36,182	47,214	13,991	32,631	84,786

Ⅱ. 2021년도 업무여건과 운영방향

	업 무 여 건
◈ 코로나19로 침체된 지역경제 활성화 및 도민 중심 행정 요구 - 도내 건설업체 계약 및 자재구매를 통한 지역경제 자생력 강화 - 지역 균형발전 및 도민 편의를 위한 미래지향적 도로망 확충 ◈ 더 안전하고 친환경적인 건설행정 수행 - 자연 재난 대비 도민의 안전 확보 및 재산 보호 - 환경친화적 고품격 도로·하천·공공건축물 조성 기대

운 영 방 향

사람중심, 도민과 호흡하는 투명한 건설공사로 살기좋은 충남 구현

◈ 지역경제 특성을 반영·연계한 미래지향적 건설행정

-「지역경제 우선」지역업체 우선 계약 및 손실 보상 편의 제고

- 도내 균형발전에 기여하는 광역도로교통망 구축

◈ 도민이 만족하는 안전하고 신뢰받는 건설인프라 구축

- 건의·애로사항 → 도민의 편익을 보호하는 해결방안 강구

- 맞춤형 민원보상서비스 제공으로 민원서비스의 질 향상

- 안전하고 체계적인 도로·하천정비사업을 통한 신뢰도 제고

- 도민 중심의 편리하고 안전한 랜드마크 공공건축물 건립

Ⅲ. 2021년 주요업무 추진계획

1		지역 경제를 우선하는 건설부분 계약 추진

지역 건설 및 자재생산 업체 참여율 향상으로 충남도민을 보호하고 지역경제 활성화에 기여

【1】 지역업체에 도움이 되는 계약업무 수행

❍ 건설공사 지역의무공동도급(49%)으로 지역건설업체 참여율 제고

❍ 입찰공고 시 지역업체 하도급 체결(60%이상) 권장 문구 명시

❍ 지역업체 생산자재 우선 구매 추진

- 도내업체 가점 부여 등 자체 물품선정 평가 기준 적용

- 지역업체 생산제품 및 여성·장애인기업 생산제품 우선 구매 확대

【2】 투명하고 공정한 하도급 문화 정착 유도

❍ 하도급대금 직접 지불 적극 권고 및 지급보증제 실시

❍ 하도급지킴이·건설공사정보시스템을 이용한 주기적 모니터링으로 하도급 계약체결 및 대금지급 등 전 과정을 투명하게 관리

❍ 건전한 하도급 문화 조성을 위한 시공사 및 감리 대상 간담회 실시

❍ 현장 실태조사 점검(연 2회)으로 건전한 하도급 문화 정착 유도

【3】 신속한 대금지급으로 침체된 지역경제 활성화

❍ 전자입찰 및 전자계약을 통해 기업체의 경비 절약 실현

❍ 전자 대금 청구(G2B) 독려로 신속한 대금지급 처리

❍ 적극적인 임금체불 방지대책 마련

- 전월 노무비 지급실적 확인 후 당월 노무비 지급

❍ 회계업무 처리기한 단축(코로나19 대응)에 따른 적극 행정(‘21. 6한)

2		공정하고 신뢰받는 보상행정 추진

보상업무의 전문성 및 효율성 강화 등 선진보상 행정 도모

원활한 보상업무 추진을 위한 지속적인 업무개선 추진

□ 2021년 보상 집행계획 :  51지구 / 29,538백만원

(단위 : 백만원)

지 구 수	보상 대상(A)		기보상 실적(B)		비율 (%)	2021년도 보상계획(A-B)		보상 목표 시기
	건수	금액	건수	금액		건수	금액
51지구	14,503	126,348	12,680	96,810	77	1,823	29,538	21.12.31.

【1】 원활한 보상업무 추진을 위한 지속적인 업무개선 추진

❍ 보상기간 단축을 위한 보상조직 개편 및 인력확충 개선방안 마련

❍ 손실보상 의뢰 전 사업 추진사항 협의 의무화 추진(사업팀⇔보상팀)

❍ 사업계획 수립 시 총사업기간을 실보상기간 고려하여 산정

❍ 보상예산 우선확보, 사업인정고시 선행, 현황측량 후 보상의뢰 절차 준수

【2】 보상업무의 전문성 및 효율성 강화 등 선진보상 행정 도모

❍ 보상기간 단축을 위한 업무개선 아이디어 발굴 활성화(연중, 수시)

❍ 손실보상관련 제도개선 사항 중앙부처에 적극적 의견 개진(연중, 수시)

❍ 찾아가는 보상협의 및 주민보상설명회 개최로 도민 행정 편의 극대화

【3】 누수 없는 행정절차 이행으로 토지수용 신청기간 단축

❍ 협의 불성립 또는 불능 토지 등은 재결에 의한 공탁 및 수용

❍ 신속한 수용재결 신청으로 공사 간접비 소송 예방 및 공기 단축

3		고품질 책임시공으로 명품 도로건설사업 추진

안전한 도로 환경 구축 및 이용자 중심 도로 건설

청렴하고 전문적인 건설행정서비스 구현으로 명품 도로 건설 실현

□ 2021년 도로사업 추진계획 : 35지구 / 97,051백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	35	97,051	2	3,800	24	88,570	9	4,681
국지도	7	42,662	-	-	4	41,504	3	1,158
지방도	21	43,600	-	-	17	41,600	4	2,000
기 타	7	10,789	2	3,800	3	5,466	2	1,523

【1】 지역 건설사 참여확대 방안 모색 등 지역경제 성장동력 제고

❍ 지역 건설사 하도급 참여 확대를 위한 도급사 합동 간담회 추진

❍ 추정가격 100억원 미만 주계약자 관리방식 사업 적극 추진

【2】 체계적인 사업관리를 통한 효율적인 예산 집행

❍ 현장별 공정계획 사전 점검을 통한 선택과 집중형 예산 투자

❍ 보상 및 준공지구 예산 우선 투입 및 부진지구 지속 점검·관리

【3】 쾌적하고 안전한 도로건설 환경 구축 및 이용자 중심 도로 건설

❍ 지역특성을 반영한 경관디자인 및 교통약자를 배려한 도로 건설

❍ 가로수 식재, 휴게쉼터 조성 등 이용자 중심의 도로 건설

❍ 미세먼지 발생 저감을 위한 건설현장 관리 철저(세륜세차시설, 분진마스크 착용 등)

❍ 원활한 교통환경 제공 및 사고예방 차원의 맞춤형 사업 추진

【4】 지역 주민의견 적극수렴을 위한 주민설명회 추진

❍ 적극적인 주민참여를 통해 지역주민과 소통하는 건설사업 추진

- 작은 민원도 경청하여 신뢰받는 행정서비스 제공

4		무사고 건설현장 실현을 위한 안전관리 강화

지속적인 안전점검으로 도로 건설현장 안전관리 강화

교육 및 단계별 안전관리 체계 구축으로 무사고 현장 실현

【1】 계절 특성 고려 취약시기 연 2회 특별 안전점검 실시

❍ 해빙기(3~4월), 우기 전(6~7월) 전체현장 안전점검 실시

❍ 도로건설과 2개팀, 분야별 기술지원기술자, 책임기술자 합동점검

【2】 현장 상주인력을 활용한 상시 안전점검 체계 구축

❍ 현장 상주인력(감리, 현장소장) 1일 1회 담당사업장 내 안전순찰 실시

❍ 현장 감독관 월1회 현장 안전 점검 실시 및 결과 보고

【3】 직책별 안전교육 필수이행 여부 점검

❍ 관리감독자 연간 16시간 이상, 일용직 근로자 4시간 교육 수강

【4】 현장 실무자를 위한 건설안전 교육자료 및 책자 배포

❍ 도로작업자 안전매뉴얼 등 연평균 3회 교육자료 및 책자 배포

【5】 건설공사 근로자 산업재해 예방을 위한 단계별 안전보건대장 작성

❍ 대    상 : 총공사비 50억원 이상 신규사업 지구(2021년 7개 지구)

❍ 계획·설계·공사 단계별 안전보건대장 작성 및 이행여부 확인

· 계획단계 : 유해·위험요인 감소대책에 대한 설계조건 반영한 기본   안전보건대장 작성(작성 후 설계자 인계)

· 설계단계 : 기본 및 실시설계 시 기본안전보건대장의 구체적 사항을 반영한 설계안전보건대장 작성(작성 후 시공사 인계)

· 공사단계 : 설계안전보건대장 및 공사안전보건대장에 따라 산업재해 예방조치 이행 여부 분기별 1회 확인

5		견실한 도로 사업 추진 위한 공사 관련자 역량 강화

청렴하고 전문적인 건설행정 서비스 구현 목표

지속적 교육을 통한 내부직원 관리 및 감독 역량 강화 추진

【1】 고품질 · 고효율 공법 선정 및 시공을 위한 전문가 자문 실시

❍ 분야별 외부전문가 자문을 통한 현지 여건에 부합하는 설계 및 시공 완성도 향상 (’20년 기술자문위원회 7회, 외부전문가 40명 참석)

※ 충청남도 종합건설사업소 4기 기술자문위원 : 총 56명

- 당연직 7, 도로 9, 교통 5, 토질 9, 구조 9, 하천 6, 건축 4, 기타 7

【2】 의견 교류 활성화 및 공정관리 강화 위한 공사관계자 회의 개최

❍ 분기별 공사관계자(발주처, 시공사, 감리단) 상호교류를 위한 현장 내 애로사항 청취 및 상호 협력체계 구축

❍ 청렴협약식 개최로 청렴의식 고취 및 투명한 건설행정 실현

❍ 코로나-19 대응수칙 모범이행을 위한 온나라 영상회의시스템 적극 활용, 비대면 공사관계자 회의 개최 예정

【3】 토목시공기술연구회 운영을 통한 관리감독관의 전문성 향상

❍ 기술정보 교류와 상호 소통·협력을 바탕으로 일관성 있는 업무 추진

❍ 신기술·신공법 적용 현장 견학 등 연 2~3회 학술동아리 추진

【4】 공사관계자 직무 역량강화 교육 실시 및 워크숍 개최(연2회)

❍ 기술력, 안전관리 지식 제고 목적의 직무관련 교육 실시 및 워크숍 개최로 공사관계자 역량 강화 및 지식 공유의 장 마련

6		충남을 대표하는 품격 있는 공공건축물 건립

품격 있는 디자인을 적용하여 공공건축물 가치 향상 도모

□ 2021년 공공건축사업 추진계획 : 12개소 / 36,182백만원

(단위 : 백만원)

총 괄		계속사업		준공사업
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
12	36,182	7	28,033	5	8,149

【1】 건물 자체가 랜드마크가 되는 공공건축물 건립

❍ 혁신도시 지정에 걸맞는 충남만의 독창적 건축디자인 설계로 충남을 대표하는 품격 높은 지역 랜드마크 조성

【2】 공공건축물 대형화에 따른 전문성 강화

❍ 충남국제전시컨벤션센터, 충남스포츠센터 등 대형공사가 증가함에 따라 건축 설계·시공 실무 경험 사례 연구를 통하여 실무 경험을 공유하고 안전사고 예방 및 건축물 품질 향상 이바지

❍ 지식동아리 운영을 통해 설계·시공·행정 경험 공유 및 업무능력 향상

【3】 공정하고 투명한 설계공모 심사 추진

❍ 심사위원의 3배수로 예비심사위원 추천하고, 추첨을 통한 설계공모 심사위원 선정(예비심사위원 포함)하며, 심사 全 과정 SNS 생중계

【4】 체계화된 공공건축 공정관리 시스템 마련

❍ 설계 ‧ 시공 등 공사 全 과정의 공사비 · 건축물 용도 · 규모별 매뉴얼 마련을 통한 효율적인 공공건축사업 체계화 추진

※ ’21년 충남연구원 연구과제로 병행 추진 예정

【5】 이용자 만족도 제고를 위한 공공건축물 기획 내실화

❍ 공공건축물 건립 시 다양한 주체가 참여하여 협력적이고 수요자 중심적인 공공건축물 건립

- 사업의뢰 前 기획단계(사업계획 사전검토, 공공건축심의 등)부터 적극 참여 및 설계·시공단계 사업의뢰 부서와 소통강화

7		철저한 품질관리로 안전한 건설공사 추진

「건설기술 진흥법」에 의한 품질관리계획 및 시험계획 수립 현장의       품질시험 대행을 통한 도내 건설현장 품질 향상 기여

【1】 건설공사 품질 향상을 위한 주도적 품질시험 실시

❍ 시험대상 : 3개 분야

1) 총 공사비 5억원 이상 토목공사

2) 2억원이상 전문공사

3) 연면적 660㎡이상 건축공사

※ 근거 : 건설기술진흥법 제55조 및 동법시행령 제89조

❍ 시험종목 : 성토용 흙, 아스콘, 콘크리트 등 총20분야 104종목

- 충청남도 건설공사 품질시험 종목 및 수수료 공고(2.10.)

❍ 추진목표 : 400건 / 1,700종목(누적) (‘20년도 실적 : 383건 / 1,614종목)

- 설계서에 명시된 품질과 규격에 맞도록 단계별 품질시험을 추진하여 합리적·경제적·내구적 구조물 완성

⇨ 철저한 품질시험으로 건설공사 원가절감 및 신뢰성 확보

【2】 건설공사 현장 품질·안전점검을 통한 인명사고 제로화

❍ 품질·안전관리단 구성 및 상시운영으로 고품질 건설공사 추진

- 종합건설사업소장을 단장으로 2개반 운영(건축, 토목)

❍ 품질·안전관리단 운영을 위한 점검계획 수립 및 시행(1.26.)

❍ 정기점검(연4회) 실시 (해빙기, 우기, 동절기 등 계절적 요인에 따라 실시)

- 총공사비 10억 이상, 공정률 10% 이상의 건설현장 점검

❍ 준공사업장 하자 발생 여부 및 위험성 조사를 위한 수시점검

⇨ 신속히 관련 부서에 통보하여 안전 확보 및 부실시공 예방

8		자연친화적인 지방하천 정비사업 추진

자연경관과 조화를 이루는 환경친화적 하천정비

수해상습지 개선으로 도민의 안정적 생활기반 조성

【1】 견실한 지방하천 정비 및 신속한 예산 집행

□ 2021년 지방하천정비사업 추진계획 : 34지구 / 47,214백만원

(단위 : 백만원)

총 괄		준공사업		계속사업		신규사업
지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
34	47,214	6	12,516	23	30,403	5	4,295

❍ 공사지구는 신속한 공사 추진으로 재정 집행률을 향상시키고 진행중인  설계지구는 신속한 마무리 및 공사 조기 발주

❍ 환경친화적 하천 정비

- 기후변화에 따른 자연재해 대비 견실하고 안전한 하천정비 추진

- 경관과 조화되는 친환경 자재 사용 및 하천 정비로 생태공간 조성

【2】 지방하천 재해복구사업 추진

□ 2021년 재해복구사업 추진계획 : 3지구 / 32,631백만원

(단위 : 백만원)

지구명			사업량 (km)	사 업 비				비고
	시군	읍면		합 계	기시행	2021년	장 차
계			8.25	68,277	3,023	32,631	32,623
금곡천	아산	배방	1.8	9,045	1,000	4,439	3,606
약봉천		송악	2.94	21,853	1,023	12,146	8,684
온양천		송악	3.51	37,379	1,000	16,046	20,333

❍ 상반기 사업착공을 위한 조속한 행정절차 이행 및 재정집행률 향상

- 1분기 중 행정안전부 사전심의 완료

- 우기철 전 수해복구를 위한 적극 보상협의 추진하여 공정률 향상

- 건설기술심의 등 각종 행정절차 신속히 진행하여 복구공사 추진

9		지역발전을 선도하는 도로개설 추진

내포 도시첨단산업단지 및 신도시 활성화를 위한 인프라 구축

태안기업도시와 서산웰빙특구 연계기능 강화로 지역경제 활성화

□ 2021년 지역개발사업 추진계획 : 2지구 / 13,991백만원

(단위 : 백만원)

구 분	사업량 (km)	사 업 비				비고
		합 계	기시행	2021년	장 차
계	4.51	89,812	57,152	13,991	18,669
내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설공사	3.90	53,166	42,824	5,491	4,851
태안기업도시 연결도로 개설공사	0.61	36,646	14,328	8,500	13,818

【1】 내포 신도시 활성화를 위한 기반시설 확충

❍ 도시첨단산업단지 진입도로 개설로 교통체증 해소 및 교통량 분산

❍ 내포 도시첨단산업단지 및 내포 신도시 활성화 기틀 마련

* 공사착공(’18. 3. 공정률 73%) → 준공(’21. 12. 예정)

⇨ ‘21년 하반기 조기 준공을 위해 역점 추진

【2】 태안 기업도시 연계기능 강화로 지역경제 활성화

❍ 서산웰빙특구 및 태안기업도시 연결도로 개설로 서해안 거점지역 육성

❍ 서해안 관광산업 및 지역경제 활성화로 지역 균형발전 기여

* 공사발주(’19. 11.), 공사 착공(’20. 2. ) → 준공(’23. 2. 예정)

【3】 신뢰받는 건설 행정 구현 및 안전사고 예방 노력

❍ 설계단계부터 주민참여 확대로 도민 신뢰도 향상

❍ 기술자문위원회를 통한 투명하고 효율적인 자재 및 공법 선정

❍ 안전사고 예방을 위한 점검 및 교육 강화로 사고 발생률 ZERO화

10		안전중심, 책임공정으로 쾌적한 도로환경 조성

지속적인 도로순찰 강화 및 훼손·파손 시설물에 대한 신속한 보수로 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

【1】 도로 유지·보수사업 추진

□ 2021년 도로 유지보수사업 추진계획 : 234지구 / 84,786백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	234	84,786	0	0	42	22,356	192	62,430
공주지소	132	48,108	-	-	21	19,559	111	28,549
홍성지소	102	36,678	-	-	21	2,797	81	33,881

❍ 금년도 계획된 유지․보수 사업의 조기 발주 및 철저한 시공관리

- 위험도로선형개량, 포장보수, 도로표지판 정비, 안전시설 등

❍ 교량, 터널 등 구조물의 철저한 안전관리로 교통사고 예방

【2】 신속한 포트홀 보수를 통한 안전한 도로환경 조성

❍ 연도별 포트홀 발생 현황

(단위 : 건)

구 분	계	2018	2019	2020	비고
공주·홍성지소	12,062	3,237	4,111	4,714

❍ 포트홀 발생 원인 및 대책

(문 제 점)

- 지방도 관리연장(총1,845km) 중 노후화 도로가 다수

* 30~40년 경과된 도로 1,576km(85%), 10~20년 경과된 도로 268km(15%)

- 담당자의 육안조사, 민원 등에 의존한 보수사업 대상지 선정, 관리인력 부족(평균 155km/인)으로 선제적 대응 방안 미비

(개선방안)

- 스마트 도로유지관리시스템 구축으로 포장도 파손 정도 전수조사

- 체계적인 도로유지보수의 우선순위 결정 및 포장도 보수로 포트홀 발생 최소화 추진

11		운행제한 위반차량 강력 단속

교량의 수명단축과 도로파손 주범인 운행제한(과적) 차량의

단속강화로 대형 교통사고 예방 및 쾌적한 도로환경 조성

【1】 도로 파손방지 및 원활한 도로 유지관리를 위한 단속강화

❍ 주요 과적발생 근원지(대형공사장 등), 위험교량 주변 노선 집중단속

- 도내 지방도, 국지도, 위임국도 62개 노선 수시 이동단속

※ 2020년 단속실적 : 검차 11,279대 / 적발 430대

❍ 휴일·조간·야간 불시 이동단속 실시

- 휴일·조간·야간 불시 이동단속을 통한 운행제한 위반차량 근절도모

【2】 유관기관 간 합동단속 강화

❍ 국토관리사무소, 시·군, 경찰서 등 유관기관 간 합동단속 실시

❍ 단속기관 간 단속업무 공유 및 공조단속

※ 2020년 합동단속 실적 : 검차 573대 / 적발 28대

【3】 대형공사장 등 과적 근원지 방문을 통한 과적예방 사전계도

❍ 대형공사장 등 과적 유발업체 방문 과적예방 협조

❍ 대형 화물차량 운전자 과적예방 홍보물 배포

【4】화물차량 운전자 과적예방 등 교통안전교육(충남교통연수원) 강화

❍ 화물차량 운전자 교통안전교육을 통한 과적행위 사전방지

- 2020년 교육실적 : 13,149명(이수율 112% / 교육계획 11,712명)

- 2021년 교육계획 : 12,791명

Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황

□ 2020년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황

< 총  괄 >

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
	7	-	-	-
시정요구	-	-	-	-
처리요구	2	1	1	-
제안사항	5	-	5	-

< 완료사항 >

① 보상절차 이행 시 철저한 확인 필요(처리요구사항)

❍ ‘연산천 지방하천 정비사업’추진 중 기 보상완료된 철갑상어 양어장 건에 대하여 철갑상어는 예민한 어종으로 알려져 있으나, 해당 양어장과 같이 노상의 환경이나 러시아와 같은 저온의 국가에서도 충분히 양육 가능한 것으로 확인됨

❍ 추후 보상절차 이행 시 감정평가 결과를 참고하되 담당공무원의 철저한 확인 및 검토로 업무가 원만히 진행될 수 있도록 적극 노력하겠음

< 추진중인 사항 >

① 미납 과태료에 대한 적극적 조치 필요(처리요구사항)

❍ 과태료 체납자 재산조회 및 압류조치

- 재산조회 : 차량, 예금, 토지 등 / 월1회

- 압류조치 : 차량 및 건설기계 / 수시

- 징수활동 강화 : 문자, 전화, 방문을 통한 납부독려 / 수시

※ 고액 체납자(체납금액 100만원 이상) 주소지 방문 징수추진

❍ 체납자 차량, 예금, 토지 등 재산압류를 통한 재산권 제약으로 체납 과태료 징수·과적인식 개선·과적심리 근절 도모

② 지역경제 활성화를 위한 지역업체 참여 활성화 방안 필요(제안사항)

- 대형공사 입찰 공고 시 지역업체와의 하도급 체결 및 지역 건설장비 사용 권장을 명시하고,

- 자체 발주하는 물품·용역·공사 계약 시 지역제한 등 관내 업체와 우선 계약을 적극 검토하겠음

③ 교통사고 사망자를 줄이기 위한 포트홀 관리 철저(제안사항)

- 지속적인 도로순찰을 하고 있으나 도로보수원 인원부족 등 사유로 즉각 조치가 어려운 실정으로 향후 도로보수원 인원을 충원(‘21. 3. 2. 채용 공고)하고

- 포트홀 발생 사전 방지를 위해 아스팔트 포장 시 철저한 품질관리로 포트홀 발생을 최소화하겠음

- 또한 스마트 도로유지관리시스템 구축으로 포장도 파손 정도를 전수조사하여 우선순위 결정 및 포장도 보수로 포트홀 발생 최소화 추진하겠음

④ 소관부처가 다른 하천사업 추진 시 중간 역할 필요(제안사항)

- 소관부처에 따른 사업목적이 달라 하천사업 추진 시 다양한 주민의견 반영하기 어려움

- 도 하천과와 협조하여 주민의견 적극 반영될 수 있도록 노력하겠음

⑤ 안전하고 아름다운 도로행정 추구(제안사항)

- 안면도 관광지 연결도로 건설사업, 어천~공주(4차) 지방도 확포장공사 등 서해안 및 금강의 자연경관을 연계하여 공사를 추진하겠음

- 설계중인 도로건설사업 13건에 대하여 주민설명회 개최 및 환경영향평가를 실시하여 주민요구사항 및 지역특성을 설계에 반영하겠음

⑥ 도로유지관리 철저(제안사항)

- 정기점검(2회/1년), 정밀점검(1회/2년), 안전진단·성능평가(1회/5년) 등철저한 안전점검으로 교량의 상태별 안전여부를 진단하고 대형 안전사고예방을 위해 연차별 보수보강 계획수립 및 예산을 확보하겠음

□ 제11대 도정질문, 5분발언 및 MOU체결 추진상황

【2-4】	MOU 체결 추진상황

< 총  괄 >

(2018.7월 ~ 2020.12.31.)
협약명	대상	협약일	협약내용	비고 (만료 등)
계	1건
운행제한차량 단속 상호협업	1건	2019. 5. 24.	운행제한차량 단속공조 등

< 추진상황 >

① 운행제한차량 단속 상호협업을 위한 업무협약

❍ 협약기관 : 공주지소 / 대전지방국토관리청 논산국토관리사무소

❍ 그동안 추진상황

- 협약체결 : 2019. 5. 24.(금)  ※ 논산국토관리사무소 대회의실

- 합동단속 : 12회(검차 573대, 적발 28대)

- 인적교류 : 3회(1분기당 단속원 2명 상호교류)

※ 코로나-19 감염병 확산에 따른 집합금지 명령으로 인적교류 보류(‘20. 10월 ~ 현재)

Ⅴ. 참 고 사 항

□  각종 위원회 및 기관‧단체 현황

【1】충청남도종합건설사업소 기술자문위원회

❍ 종합건설사업소에서 추진하는 건설공사에 대한 설계 및 시공 검토, 형식 ․ 공법 ․ 자재 선정 등에 대한 기술적 제언 및 자문을 구하기 위함.

- 도로, 교통, 토질, 구조 등 11개 분야 56명으로 구성(당연직 7, 외부 49)

□ 주요 사업별 예산확보 현황

【1】분야별 사업추진 내역

분야별		지구수	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
총 계		320	308.63	311,855
도 로	계	35	156.18	97,051	도로건설과
	국 지 도	7	64.63	42,662
	지 방 도	21	82.66	43,600
	기타도로	7	8.89	10,789
공공건축		12	-	36,182	공공건축과
지방하천정비		37	147.94	79,845	하천개발과
지역개발		2	4.51	13,991
도로유지관리		132	-	48,108	공주지소
		102	-	36,678	홍성지소

【2】도로 확·포장사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 3. 1. 기준)

총 괄		‘21년 준공지구		계 속 지 구		‘21년 신규지구
◀ 35건 / 97,051백만원 ▶		◀ 2건 / 3,800백만원 ▶		◀ 24건 / 88,570백만원 ▶		◀ 9건 / 4,681백만원 ▶
․국지도 7 / 42,662		․국지도 0 / -		․국지도 4 / 41,504		․국지도 3 / 1,158
․지방도 21 / 43,600		․지방도 0 / -		․지방도 17 / 41,600		․지방도 4 / 2,000
․기 타 7 / 10,789		․기 타 2 / 3,800		․기 타 3 / 5,466		․기 타 2 / 1,523

사 업 명		사업량		사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
				전 체	기시행	2021년	장 차
총 계		35지구 (156.18㎞)		1,470,489	265,207	97,051	1,108,231
국 지 도		7지구 (64.63km)		480,741	157,226	42,662	280,853
계속지구	소 계	4지구 (50.45km)		366,541	157,226	41,504	167,811
	청양～ 신양IC	연장=16.2km 폭=10.0m		52,714	43,012	4,213	5,489	2017.05.29. ∼ 2023.06.25.	58 (공사중)
	이호～양곡	연장=4.85km 폭=10.0m		24,227	20,337	2,834	1,056	2018.09.17. ～ 2023.08.21.	37 (공사중)
	당진～서산	연장=19.1km 폭=17.5m		175,500	93,091	31,814	50,595	2019.04.08. ～ 2027.04.05	1 (정지)	보상
	성환∼입장	연장=10.3km 폭=17.5m		114,100	786	2,643	110,671	2018～2028	대전청 설계중
신규지구	소 계	3지구 (14.18km)		114,200	0	1,158	113,042
	우성∼이인	연장=0.7km 폭=10.0m		35,000	0	386	34,614	2019～2029	대전청 설계중
	장척∼목현	연장=3.67km 폭=17.5m		29,500	0	386	29,114	2019～2029	대전청 설계중
	임천∼강경	연장=9.81km 폭=10.5m		49,700	0	386	49,314	2019～2029	대전청 설계중
지 방 도		21지구 (82.66km)		894,662	64,981	43,600	786,081
계속지구	소 계	17지구 (67.96km)		784,162	64,681	41,600	677,881
	규암～청남	연장=2.29km 폭= 10.0m		27,320	16,452	6,850	4,018	2018.03.19. ～ 2022.09.17.	46 (공사중)
	대술～정안	연장=4.8km 폭= 9.5～11.7m		21,752	10,780	4,000	6,972	2019.07.22. ～ 2023.07.20	24 (공사중)
	어천～공주 (4차)		연장=3.95km 폭= 10.0m	48,900	12,736	5,510	30,654	2020.12.23. ～ 2026.12.21	1 (공사중)
계속지구	오천우회		연장=3.98km 폭= 9.5m	22,449	6,395	4,010	12,044	2016.～2026.	1 (공사중)
	삭선～원북		연장=5.8km 폭= 20.0m	46,514	4,460	6,600	35,454	2017.～2027.	보상중
	기지시～한진		연장=9.3km 폭= 18.0m	143,171	3,595	1,000	138,576	2017.～2027.	보상중
	무창포IC～ 웅천		연장=1.46km 폭=21.75~23.0m	8,200	1,185	5,020	1,995	2018.～2024.	1 (정지)	보상
	두마～노성		연장=9.25km 폭=10.0m	103,453	2,000	1,000	100,453	2018.～2027.	설계중
	화성～장곡		연장=2.4km 폭=10.0m	13,306	395	3,005	9,906	2018.～2025.	보상중
	구룡～용두		연장=1.3km 폭=10.0m	10,785	375	1,605	8,805	2018.～2025.	보상중
	밀두～대음		연장=3.58km 폭=18.75m	49,170	835	500	47,835	2018.～2025.	설계중
	산동～상덕		연장=7.74km 폭=19.5m	128,659	3,130	200	125,329	2018.～2027.	설계중
	왕암도로		연장=1.0km 폭=10.0m	11,500	300	500	10,700	2019.～2022.	설계중
	반계도로		연장=1.25km 폭=10.0~19.2m	9,783	663	0	9,120	2017.～2023.	보상중
	보산원도로		연장=0.5km 폭=9.5m	3,000	100	500	2,400	2017.～2023.	설계중
	서면～비인		연장=4.9km 폭=19.5m	29,100	610	400	28,090	2019.～2027.	설계중
	복수～진산		연장=4.46km 폭=19.5m	107,100	670	900	105,530	2019.～2029	설계중
신규지구	소 계		4지구 (14.7km)	110,500	300	2,000	108,200
	광시～운곡		연장=5.0km 폭=10.0m	35,300	90	800	34,410	2020.～2030	타당성 조사중
	노화～평촌		연장=3.7km 폭=19.5m	30,000	90	200	29,710	2020.～2030	타당성 조사중
	동해～부곡		연장=5.0km 폭=10.0m	35,200	120	500	34,580	2020.～2030	타당성 조사중
	고암～역재		연장=1.0km 폭=20.0m	10,000	0	500	9,500	2020.～2030	타당성 조사중
기타도로사업			7지구 (8.89km)	95,086	43,000	10,789	41,297
준공지구	소 계		2지구 (4.3km)	46,700	40,047	3,800	2,853
	안면도 관광지 연결도로		연장=2.9km 폭=27.0m	41,200	38,900	2,300	0	2018.03.05. ～ 2021.03.23.	63 (공사중)
	장평지구		연장=1.4km 폭=16.5~17.4m	5,500	1,147	1,500	2,853	2019.12.20. ～ 2021.12.31.	3.6 (정지)
계속지구	소 계		3지구 (2.9km)	29,186	2,953	5,466	20,767
	원청사거리		연장=0.89km 폭=3.5～20m	14,075	600	2,700	10,775	2020.07. ～ 2023.07.	1 (정지)	보상
	웅천산단 진입도로		연장=1.01km 폭=19.7m	7,111	1,143	1,766	4,202	2020.06.04. ～ 2023.06.03.	1 (정지)	보상
	정산지구		연장=1.0km 폭=13.0~15.0m	8,000	1,210	1,000	5,790	2020.08.04. ～ 2023.08.03	10 (정지)
신규지구	소 계		2지구 (1.69km)	19,200	0	1,523	17,677
	합곡지구		연장=0.95km 폭=10.0m	18,000	0	323	17,677	2021.02. ～ 2025.12.	설계 예정
	효제교차로		연장=0.74km 폭=10.0m	1,200	0	1,200	0	2021～2023	설계 예정

【3】공공건축사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 3. 1.)

총 괄 12개소		‘21년도 계속사업 (7개소)		‘21년도 준공사업 (5개소)
36,182백만원		28,033백만원		8,149백만원

사 업 명			사업량	사업비						사업 기간	투자 공정 (진도)	비고 (지구)
				전체	기시행	소계	본예산	이월 예산	장차
합계			12개소	366,863	51,236	66,937	36,182	29,055	279,445
계속사업	연번	소계	7개소	337,436	29,958	47,898	28,033	18,165	279,445
	1	충남국제전시컨벤션센터 건립공사	지하1 지상4층 연면적 51,900㎡	160,300	2,607	4,264	1,700	2,564	155,993	2020.10 ~ 2025.06	-	설 계 준비중
	2	소방복합시설 조성사업	9개동 연면적 16,994㎡	76,649	8,046	6,510	6,510	0	62,093	2017.10 ~ 2023.12	-	설계중
	3	충남 스포츠센터 조성사업	지하1 지상2층 연면적 13,344㎡	47,500	7,760	13,534	7,500	6,034	32,240	2018.08 ~ 2023.03	-	착 공 준비중
	4	충남 지식산업센터 건립공사	지하1 지상6층 연면적 12,486㎡	29,346	9,497	18,161	10,638	7,523	9,211	2018.11 ~ 2022.08	-	공사중
	5	육아종합 지원센터	지하1층,지상3층,연면적 3,230㎡	13,034	984	984	0	984	12,050	2020.10. ~ 2023.01.	-	설계중
	6	수산종자 연구센터 건립공사	지상3층 연면적 2,024㎡	6,700	987	1,987	1,000	987	4,713	2020.09. ~ 2022.12.	-	설계중
	7	대천항관공선 통합사무실 건립공사	지상2층 연면적 1,370㎡	3,907	77	758	685	73	3,145	2020.08. ~ 2023.01.	-	설계중
준공사업	소계		5개소	29,427	21,278	19,039	8,149	10,890	0
	8	직산119 안전센터 신축공사	지상3층 연면적 993㎡	2,392	103	2,289	2,289	0	0	2019.11. ~ 2021.12.	5%	공사중
	9	재래흑염소 사육사 증축공사	지상1층 연면적 967㎡	998	998	844	0	844	0	2020.06. ~ 2021.06	5%	공사중
	10	홍성지소 증축및 리모델링	지상1층 연면적 153㎡	927	927	520	0	520	0	2020.01. ~ 2021.04.	52%	공사중
	11	충남공감마루 신축공사	지하1 지상3층 연면적 2,920㎡	9,450	9,450	4,463	0	4,463	0	2018.02. ~ 2021.05.	51%	공사중
	12	내포자연놀이뜰 조성공사	지하1 지상2층 연면적 3,370㎡	15,660	9,800	10,923	5,860	5,063	0	2018.11. ~ 2021.12	47%	공사중

<참고 - 신규예정사업>

사 업 명			사업량	위치	사업비				사업 기간	투자 공정 (진도)	비고
					전체	기시행	2021년	장차
신규사업	연번	소 계	13개소		178,575	0	12,677	165,898
	1	금산소방서 청사 증축공사	지하1층 지상4층 연면적2,300㎡	금산군 금산읍	7,269	0	210	7,059	2021.01. ~ 2024.12.	-	군관리계획용역중
	2	충청남도 공무원교육원 후생동 연결통로 지붕교체 공사	지붕교체 184㎡	공주시 금흥동	298	0	298	0	2021.01. ~ 2021.09.	-	설계중
	3	도립미술관 및 공영주차장	지하2층 지상2층	홍성군 홍북읍	80,000	0	3,000	95,700	2021.03. ~ 2024.12.	-	설계공모 준비중
	4	안면도지방 지방정원 가든센터 건립공사	지상2층	태안군 안면읍	6,000	0	1,000	5,000	미정	-	’21.5. 의뢰예정
	5	장애인힐링센터 건립공사	지하1층 지상2층	태안군 안면읍	28,000	0	600	27,400	미정	-	’21.7. 의뢰예정
	6	충남사회적경제 혁신타운	지하1층지상3층	청양군 청양읍	28,000	0	1,825	26,175	미정	-	’21.5. 의뢰예정
	7	충남 환경교육연수원	미 정	미정	19,000	0	3,000	16,000	미정	-	미정
	8	천안서북소방서 다목적 소방훈련탑 증축공사	지상4층	천안시 직산읍	350	0	350	0	2021.03. ~ 2021.12.	-	설계 준비중
	9	공주소방서 소방안전 체험교실 및 다목적 훈련탑 증축공사	지상4층	공주시 웅진동	500	0	500	0	2021.03. ~ 2021.12	-	설계 준비중
	10	계룡소방서 다목적 소방 훈련탑 증축공사	지상4층	계룡시 엄사면	300	0	300	0	2021.03. ~ 2021.12.		설계 준비중
	11	태안소방서 소방안전 체험교실 및 다목적 훈련탑 증축공사	지상4층	태안군 태안읍	500	0	500	0	2021.03. ~ 2021.12.	-	설계 준비중
	12	당진소방서 청사 증축공사	지하1층 지상4층	당진시 채운동	6,858	0	394	6,464	미정	-	’21.6. 의뢰예정
	13	청양구기자 연구소 증축공사	지상2층	청양군 운곡면	700	0	700	0	미정	-	’21.7. 의뢰예정

【4】지방하천 정비사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 3. 1. 기준)

총 괄		준공지구		계속지구		신규지구
◀ 37건 79,845백만원 ▶		◀ 6건 12,516백만원 ▶		◀ 26건 63,034백만원 ▶		◀ 5건 4,295백만원 ▶

<총  괄>

구 분	지구 수	사업량 (km)	사 업 비(백만원)				비고
			계	기시행	2021년	장차
합 계	37지구	147.942	802,520	198,239	79,845	526,471
지방하천 정비사업	34지구	139.692	734,243	195,216	47,214	491,813	준공 6, 계속 23, 신규 5
지방하천 재해복구	3지구	8.25	68,277	3,023	32,631	34,658	계속 3

<지방하천 정비사업 세부 내역>

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2021년	장차
계	34지구			139.692	734,243	195,916	47,214	491,813
준 공 지 구	소계 (6지구)			35.39	157,571	145,055	12,516	0
	성환천	천안	부대 성환	10.52	49,731	47,731	2,000	0	2016.05.10.∼ 2021.01.20.	95	공사중
	마곡천	공주	사곡	3.30	13,705	13,509	196	0	2017.12.12.∼ 2021.04.06.	98	공사중
	연산천	계룡 논산	엄사 연산	6.79	30,368	25,471	4,897	0	2018.03.29.∼ 2022.03.07.	69	공사중
	금 천	부여	옥산 장암	10.1	32,786	32,632	154	0	2016.05.10∼ 2021.01.18.	98	공사중
	도당천	서산	해미 운산	2.73	11,552	9,915	1,637	0	2018.07.02.∼ 2021.08.24.	81	공사중
	신암천	논산	연산	1.95	19,429	15,797	3,632	0	2018.05.18.∼ 2021.10.20.	35	공사중
계 속 지 구	소계 (23지구)			85.552	469,879	50,861	30,403	388,615
	화산천	서천	기산 화양	4.28	37,820	18,456	4,315	15,049	2018.03.29∼ 2023.05.01	56	공사중
	석남천	서산	예천 석남	2.66	21,216	14,480	4,412	2,324	2017.05.19.∼ 2022.08.29.	57	공사중
	병천천	천안	병천	8.3	22,010	1,710	3,911	16,389	2017.12.25.∼ 202312.31.	-	공사중
	광기천	천안	병천	3.4	25,823	2,030	3,000	20,793	2018.01.03.∼ 202312.31.	-	공사중
	주교천	부여	주교	3.0	24,020	1,055	2,000	20,965	2020.12.07.∼ 2024.03.20.	1.0	공사중
	명천천	서산	성연	1.055	3,047	634	500	1,913	2018.01.01.∼ 2022.12.31.	-	공사 발주
	석림천	서산	석림	0.387	711	169	311	231	2018.01.01.∼ 2022.12.31.	-	공사중
	중산천	공주	금흥	0.72	17,271	870	3,498	12,903	2020.10.06.∼ 2023.03.24.	3.0	공사중
	장승천	청양	청양	3.29	15,961	877	2,736	12,348	2020.12.07.∼ 2023.05.25.	1.0	공사중
	천안천 (장재천)	천안	백석 불당	1.5	23,170	521	1,300	21,349	2019.02.20. 2023.12.31.	-	발주 준비
	신양천	논산	연무	4.3	25,555	646	550	24,359	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	와룡천	홍성	갈산 결성	9.56	25,247	1,326	350	23,571	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	도마천	서천	문산	7.3	18,246	774	550	16,922	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	용요천	태안	근흥	3.3	40,669	847	520	39,302	2019.01.01.∼ 2025.02.28.	-	설계중
	왕대천	계룡	두마	2.7	6,497	295	200	6,002	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	간치천	보령	주산	4.7	23,124	878	550	21,696	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	판교천	서천	종천 서천	2.6	14,376	504	150	13,722	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계중
	청지천	서산	장홍 석림	3.4	29,431	905	100	28,426	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계중
	왕암천	논산	가야곡	5.4	24,870	725	200	23,945	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계중
	오봉천	당진	송악 신평	3.0	23,699	765	300	22,634	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계중
	칠산천	부여	임천	3.0	25,373	1,093	200	24,080	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	진산천	금산	진산	1.7	7,420	501	250	6,669	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	유등천	금산	복수	6.0	14,323	800	500	13,023	2018.01.∼ 2022.12.	-	설계중지 (하천과)
신규	소계 (5지구)			18.75	106,793	-	4,295	102,793
	둔포천	아산	둔포	4.47	40,222	-	945	39,422	20021.∼ 2025.		신규
	솔리천	서천	장항	1.3	4.997	-	800	4,197	20021.∼ 2025.		신규
	초대천	당신	신평	6.27	37,394	-	1105	36,594	20021.∼ 2025.		신규
	양촌천	논산	양천	3.38	15,832	-	860	15,032	20021.∼ 2025.		신규
	판정천	천안	입장	3.33	8,798	-	585	7,998	20021.∼ 2025.		신규

<지방하천 재해복구사업>

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2021년	장차
계	3지구			8.25	68,277	3,023	32,631	-
계속지구	금곡천	아산	배방	1.8	9,045	1,000	4,439	3,606	2020.11.24∼ 2022.12.31.	-	설계중
	약봉천	아산	송악	2.94	21,853	1,023	12,146	8,684	2020.11.24∼ 2022.12.31.	-	설계중
	온양천	아산	송악	3.51	37,379	1,000	16,046	20,333	2020.11.24∼ 2022.12.31.	-	설계중

【5】지역개발 사업 현황

(단위: 백만원, 2021. 3. 1. 현재)

총 괄		준공지구		계속지구		신규지구
◀ 2건 13,991백만원 ▶		◀ - ▶		◀ 2건 13,991백만원 ▶		◀ - ▶

연번	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				공사기간	진도 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2021년	장차
합 계		2지구		4.51	89,812	57,152	13,991	18,669
계속지구	도시첨단 산업단지 진입도로 개설공사	홍성 홍성	홍북 홍성	연장=3.90 (폭=20.0m)	53,166	42,824	5,491	4,851	2018.03.02.～ 2022.02.08.	73.0	공사중
	태안기업도시 연결도로 개설공사	태안 서산	태안 부석	연장=0.61 (폭=25.0m)	36,646	14,328	8,500	13,818	2020.02.28.∼2023.02.11.	20.0	공사중

【6】도로 유지관리사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 3. 1. 기준)

총 괄		계속지구		신규지구
◀ 234지구 84,786백만원 ▶		◀ 42지구 22,356백만원 ▶		◀ 192지구 62,430백만원 ▶
․자체사업 127 / 18,502		․자체사업 12 / 1,799		․자체사업 115 / 16,703
․재배정사업 94 / 47,318		․재배정사업 25 / 19,098		․재배정사업 69 / 28,220
․균특사업 0 / 0		․균특사업 0 / 0		․균특사업 0 / 0
․위임국도 13 / 18,966		․위임국도 5 / 1,459		․위임국도 8 / 17,507

<공주․홍성지소>                                        (단위 : 백만원, 2021. 3. 1. 현재)

사업 구분	총계		계속지구						신규지구
			합계		공주		홍성		합계		공주		홍성
계	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	234	84,786	42	22,356	21	19,559	21	2,797	192	62,430	111	28,549	81	33,881
자체사업	127	18,502	12	1,799	7	498	5	1,301	115	16,703	73	7,727	42	8,976
재배정사업	94	47,318	25	19,098	13	17,918	12	1,180	69	28,220	35	13,641	34	14,579
균특사업	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
위임국도	13	18,966	5	1,459	1	1,143	4	316	8	17,507	3	7,181	5	10,326

<공주지소>                                         (단위 : 백만원, 2021. 3. 1.현재)

사업명			위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
총 계			132개 지구			48,108
계(계속지구)			21개 지구			19,559
계속지구	소계	자 체 사 업	7개 지구			498
	자체사업	병암도로 안전시설정비공사	논산	가야곡	1식	20	20.12.~21.01.
		샛고개터널(상) 외 3개소 정밀안전 점검용역	금산	복수	1식	29	20.12.~21.02.
		지방도799호선 십자사거리 회전교차로 설치공사 실시설계용역	부여	석성	1식	8	20.12.~21.02.
		[서천]랑평리 외 2개소 도로정비공사	서천	종천	1식	17	20.12.~21.01.
		삼가교 재가설공사	금산	진산	1식	386	19.12.~21.02.
		공주지소 경관조형물 설치용역	공주지소		1식	18	20.12.~21.02.
		재해대책 추진	공주지소		1식	20	20.11.~21.03.
	소계	재배정 사업	13개 지구			17,918
	재배정사업	KTX공주역 진입지방도 선형개량사업	공주	이인	1식	2,150	19.01.~21.12.
		광금도로 선형개량공사	청양	대치	1식	1,566	19.12.~22.10.
		광덕도로 선형개량공사	천안	광덕	1식	1,009	21.01.~21.12.
		지방도 교량 내진성능보강	논산	양촌	1식	452	20.12.~21.12.
		국지도68호 황산대교 내진성능보강 (성립전)	논산	강경	1식	452	20.10.~21.12.
		지방도 7.28~8.11 수해복구 사업	공주지소		5개소	1,698	20.10.~21.06.
		우곤도로 선형개량공사	논산	성동	1식	1,838	17.06.~22.02.
		주항도로 선형개량공사	서천	서	1식	428	18.08.~21.06.
		양전도로 선형개량공사	금산	금성	1식	524	18.05.~21.09.
		석막도로 선형개량공사	금산	진산	1식	1,792	20.12.~23.11.
		천을도로 선형개량공사	부여	군북	1식	912	20.01.~23.12.
		저곡지구 급경사지 붕괴위험지역 정비	금산	제원	1식	5,049	19.01.~21.06.
		이동식 과속단속부스 설치공사	공주지소		1식	48	19.12.~21.03.
	소계	위 임 국 도	1개 지구			1,143
	위임국도	병목지점개선	전노선		1식	1,143	21.01~21.12
계(신규지구)			111개 지구			28,549
신규지구	소계	자 체 사 업	73개 지구			7,727
	자체사업	국지도70호 율금도로 배수로시설 정비공사	천안	성환	L=200m	10	‘21.01∼06
		국지도23호 성거도로 배수시설 정비공사	천안	성거	L=690m	34	‘21.01∼06
		국지도70호 성월도로 배수시설 정비공사	천안	성환	L=170m	26	‘21.01∼06
		지방도624호 양당도로 처선도색공사	천안	직산	L=831m	14	‘21.01∼06
		저리도로 포장도보수공사	천안	성거	1식	70	‘21.01∼06
		효계도로 포장도보수공사	천안	입장	1식	75	‘21.01∼06
		국지도57호 오곡2도로 배수로정비공사	천안	북	L=60m	22	‘21.01∼06
		지방도691호 천정도로 배수로정비공사	천안	목천	L=80m	19	‘21.01∼06
		지방도691호 대정도로 배수로정비공사	천안	성남	L=55m	40	‘21.01∼06
		지방도629호 매당도로 배수로정비공사	천안	광덕	L=100m	92	‘21.01∼06
		지방도691호 대정도로 재해복구정비공사	천안	성남	L=860m	30	‘21.01∼06
		지장도로 포장도보수공사	천안	광덕	L=860m	105	‘21.01∼06
		보성도로 포장도보수공사	천안	풍세	L=1,000m	106	‘21.01∼06
		명덕도로 포장도보수공사	천안	오곡	L=680m	71	‘21.01∼06
		신계도로 차선도색공사	천안	목천	L=1,560m	22	‘21.01∼06
		장산도로 차선도색공사	천안	수신	L=3,620m	64	‘21.01∼06
		지방도697호 반송도로 배수로정비공사	공주	이인	L=500m	40	‘21.01∼06
		지방도697호 경천도로 배수로 정비공사	공주	계룡	L=110m	25	‘21.01∼06
		지방도651호 대학도로 포장도 보수공사	공주	탄천	L=400m	62	‘21.01∼06
		지방도691호 계룡도로 방호울타리 정비사업	공주	계룡	L=88m	23	‘21.01∼06
		만수도로 포장도보수공사	공주	이인	1식	250	‘21.01∼06
		대산도로 포장도보수공사	공주	정안	1식	300	‘21.01∼06
		국지도68호 벌곡도로 배수로 정비	논산	벌곡	L=400m	40	‘21.01∼06
		지방도697호 연산도로 배수로 정비	논산	연산	L=400m	62	‘21.01∼06
		지방도691호 석종도로 배수로 정비	논산	상월	L=100m	26	‘21.01∼06
		지방도643호 삼전도로 배수로 정비	논산	가야곡	L=30m	20	‘21.01∼06
		국지도68호 벌곡도로 사면 정비	논산	벌곡	L=45m	14	‘21.01∼06
		지방도643호 가야곡도로 옹벽설치	논산	가야곡	L=55m	22	‘21.01∼06
		국지도68호 야촌도로 배수로 정비	논산	가야곡	L=110m	8	‘21.01∼06
		동산도로 외 1개소 포장도 보수공사	논산	연무	1식	65	‘21.01∼06
		양촌도로 포장도 보수공사	논산	양촌	1식	443	‘21.01∼06
		지방도601호 서대도로 외1개소 배수로 정비공사	금산	추부	L=400m	40	‘21.02∼04
		지방도635호 역평도로 배수로 정비공사	금산	남이	L=400m	90	‘21.02∼04
		지방도601호 예미도로 배수로 정비공사	금산	부리	L=100m	20	‘21.02∼04
		지방도635호 삼가도로 외1개소 배수로 정비공사	금산	진산	L=500m	30	‘21.03∼05
		대둔산로 포장도보수공사(상행)	금산	복수	1식	170	‘21.03∼05
		대둔산로 포장도보수공사(하행)	금산	복수	1식	280	‘21.03∼05
		군북로 포장도보수공사	금산	군북	1식	70	‘21.03∼05
		지방도723호 팔충도로 배수로 정비공사	부여	충화	L=500m	100	‘21.01∼06
		지방도606호 장항도로 배수로 정비공사	부여	외산	L=400m	100	‘21.01∼06
		지방도723호 내성도로 배수로 정비공사	부여	양화	L=300m	80	‘21.01∼06
		지방도611호 상황도로 배수로 정비공사	부여	장암	L=240m	70	‘21.01∼06
		정동도로 포장도보수공사	부여	부여	1식	100	‘21.01∼06
		응평도로 포장도보수공사	부여	석성	1식	75	‘21.01∼06
		상천도로 포장도보수공사	부여	홍산	1식	100	‘21.01∼06
		수원도로 포장도보수공사	부여	양화	1식	75	‘21.01∼06
		은곡도로 배수시설정비	서천	시초	L=150m	22	‘21.01∼06
		화천도로 배수시설정비	서천	장항	L=600m	95	‘21.01∼06
		원수도로 배수시설정비	서천	장항	L=300m	52	‘21.01∼06
		태월도로 길어깨 확장	서천	서천	L=300m	21	‘21.01∼06
		동산도로 옹벽설치	서천	한산	L=50m	30	‘21.01∼06
		동산도로 포장도 보수	서천	한산	L=500m	54	‘21.01∼06
		태월도로 포장도 보수	서천	한산	L=2,000m	305	‘21.01∼06
		지원도로 포장도 보수	서천	문산	L=500m	28	‘21.01∼06
		송림도로 포장도 보수	서천	장항	L=700m	93	‘21.01∼06
		화강도로 배수로 정비공사	청양	화성	L=200m	69	‘21.01∼06
		작천도로 배수로 정비공사	청양	대치	L=144m	37	‘21.01∼06
		구룡도로 배수로 정비공사	청양	남양	L=19m	27	‘21.01∼06
		왕진도로 정비공사	청양	청남	L=140m	43	‘21.01∼06
		용두도로 정비공사	청양	남양	L=215m	74	‘21.01∼06
		광암도로 정비공사	청양	운곡	L=2,800m	79	‘21.01∼06
		화산도로 포장도 보수공사	청양	장평	L=174m	39	‘21.01∼06
		농소도로 포장도보수공사	청양	대치	1식	77	‘21.01∼06
		중산도로 포장도보수공사	청양	청남	1식	80	‘21.01∼06
		인양도로 포장도보수공사	청양	청남	1식	80	‘21.01∼06
		용천도로 포장도보수공사	청양	비봉	1식	95	‘21.01∼06
		제초작업	전노선		1식	500	‘21.01∼12
		긴급 보수공사	전노선		1식	500	‘21.01∼12
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	‘21.01∼12
		안전시설물 정비사업	전노선		1식	700	‘21.01∼12
		교량 및 터널 정비사업	전노선		1식	200	‘21.01∼12
		재해대책 추진 장비임차료	전노선		1식	300	‘21.01∼12
		재해대책 추진 자재구입	전노선		1식	227	‘21.01∼12
	소계	재배정사업	35개 지구			13,641
	재배정사업	지방도 교량안전진단	공주지소		1식	1,127	‘21.01∼12
		도로대장 유지관리	공주지소		1식	20	‘21.01∼06.
		지방도변 마을주민 보호구역	공주지소		1식	240	‘21.01∼06.
		운행방향 유도레인 설치	공주지소		1식	30	‘21.01∼06.
		터널방재시설 설치(곡두터널)	천안	광덕	1식	200	‘21.01∼12
		지방도 안전시설(방호울타리)정비	공주지소		L=4,000m	1,000	‘21.01∼12
		로드킬 방지시설 설치공사	공주지소		L=1,850m	150	‘21.01∼06.
		606호 용마도로 갓길정비공사	청양	님양	L=2,300m	500	‘21.01∼22.12
		유구도로 안전시설 설치사업	공주	유구	1식	100	‘21.01∼06.
		지방도 인도설치공사	공주지소		5개소	1,413	‘21.01∼06.
		지방도 표지판 정비	공주지소		1식	100	‘21.01∼06.
		도로표지(LED) 개선사업	공주지소		1식	50	‘21.01∼12
		횡단보도 바닥 매립형 유도등 설치사업	공주지소		1식	50	‘21.01∼12
		611호 장항~서천 명품도로 개설사업	서천	장항,서천	1식	500	‘21.01∼12
		지방도611호 마서~계동 배수로정비	서천	마서	L=500m	130	‘21.01∼06.
		지방도629호 용경도로 교차로 개선공사	천안	광덕	L=220m	340	‘21.01∼12
		국지도96호 용천도로 교차로 개선공사	청양	비봉	L=300m	350	‘21.01∼12
		지방도611호 서천(군사)오거리 교차로 개선공사	서천	서천	L=600m	400	‘21.01∼12
		지방도799호 십자사거리 회전교차로 설치공사	부여	석성	L=200m	300	‘21.01∼12
		계룡 중장지구 회전교차로 설치공사	공주	계룡	1식	50	‘21.01∼12
		지방도606호 남양사거리 교차로 개선공사	청양	남양	1식	360	‘21.01∼12
		마서계동도로 선형개량공사	서천	마서	1식	300	‘21.01∼12
		안당도로(필당고개) 선형개량공사	서천	마산	1식	100	‘21.01∼12
		둔덕도로 위험도로 정비공사	서천	서천	1식	100	‘21.01∼12
		지방도617호 상좌리 선형개량공사	서천	판교	1식	100	‘21.01∼12
		탄천 덕지도로 선형개량공사	공주	탄천	1식	100	‘21.01∼12
		신풍 봉갑지구 선형개량공사	공주	신풍	1식	150	‘21.01∼12
		현내도로 선형개량공사	부여	석성	1식	700	‘21.01∼12
		종천도로 선형개량공사	서천	종천	1식	100	‘21.01∼12
		지방도606호 남양 봉우티고개 오르막차로 설치공사	청양	남양	1식	500	‘21.01∼12
		청양 비봉 중묵도로 위험구간 개선공사	청양	비봉	1식	100	‘21.01∼12
		국지도57호 기로도로 위험구간 개선공사	천안	입장	1식	300	‘21.01∼12
		지방도 교량 유지관리	공주지소		13개소	2,433	‘21.01∼12
		내진보강공사	공주지소		2개소	450	‘21.01∼12
							‘21.01∼12
						798
					1식
			논산	노성
		노성도로 선형개량공사
	소계	위 임 국 도	3개 지구			7,181
	위임국도	도로안전 및 환경개선	전노선		1식	4,074	21.01~21.12
		국도유지운영	전노선		1식	113	21.01~21.12
		도로유지보수	전노선		1식	2,994	21.01~21.12

<홍성지소>                                         (단위 : 백만원, 2021. 3. 1.현재)

사업명			위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
총 계			102개 지구			36,678
계(계속지구)			21개 지구			2,797
계속지구	소계	자 체 사 업	5개 지구			1,301
	자체사업	청사유지관리(리모델링)	홍성지소		1개소	520	20.10∼21.04	60	공사중
		신창교 재가설공사	서산	해미	1개소	478	20.08~21.08	30	공사중
		용현교 재가설공사	서산	운산	1개소	136	20.08~21.08	40	공사중
		삼송교 재가설공사	서산	해미	1개소	164	19.11∼20.12	80	특교세
		2021년 홍성, 아산지역 실시설계용역	홍성, 아산		1식	3	20.12.~21.02	30	용역중
	소계	재배정 사업	12개 지구			1,180
	재배정사업	지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.87km	19	19.11~22.12		공사중
		국지도 96호 용신도로 선형개량공사	태안	근흥	L=0.50km	7	20.08~21.12		용역중
		지방도610호 영보리 선형개량공사	보령	오천	L=0.48km	352	20.09~21.09		공사중
		서원교 재가설공사	아산	염치	1개소	86	20.04~21.04	60	공사중
		삼송교 재가설공사	서산	해미	1개소	96	19.11∼20.12	80	정지중
		지방도 교량유지관리(선인교)	아산	선장	1개소	31	20.06~20.10	90	정지중
		지방도645호 도산도로 재해복구 공사	아산	도고	1개소	198	20.12~21.06	-	공사중
		지방도606호 수부고개 자동염수분사장치 설치공사	보령	웅천	1개소	200	21.01∼21.03		공사중
		지방도602호 계정리 재해복구(사면보강) 사업	예산	응봉	1개소	90	21.01~21.12	-	공사중
		국지도70호 칠성암삼거리 회전교차로 설치공사	예산	신양	1개소	36	20.07~21.04	95	공사중
		지609호 운월도로 선형개량공사 실시설계용역	홍성	홍동	1식	52	20.08~21.02	80	용역중
		2021년 홍성지소 인도설치공사 실시설계용역	보령, 당진, 태안		3식	13	20.12~21.02	30	설계완료
	소계	위 임 국 도	4개 지구			316
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	50	20.01~21.12	50	공사중
		도로유지보수	전노선		1식	120	20.01~21.12	50	공사중
		도로병목지점개선	전노선		1식	10	20.01~21.12	50	공사중
		위험도로개선	전노선		1식	136	20.01~21.12	50	공사중
계(신규지구)			81개 지구			33,881
신규지구	소계	자 체 사 업	42개 지구			8,976
	자체사업	지방도645호 화산도로 포장도 보수공사	예산	대술	L=2.0km	250	21.01∼06		용역중
		지방도618호 신원도로 포장도 보수공사	예산	오가	L=2.0km	250	21.01∼06		용역중
		지방도619호 신가도로 포장도 보수공사	예산	삽교	L=1.0km	100	21.01∼06		용역중
		예산군 광시면, 봉산면 배수로 정비공사	예산	광시,봉산	L=1.0km	150	21.01∼06		용역중
		지방도624호 염치교차로 개선공사	아산	염치	1개소	200	21.03~21.06		용역중
		지방도 624호 금성초등학교 교차로 개선공사	아산	인주	1개소	200	21.03~21.06		용역중
		지방도 623호 수철도로 외 2개소 배수로 정비 공사	아산	배방	1개소	100	21.03~21.06		용역중
		지방도 645,616호 농은 ~ 화천도로 포장공사	아산	송악	L=2.5km	250	21.03~21.06		용역중
		국지도 96호 정죽도로 포장도 보수공사	태안	근흥	L=1.0km	150	21.01~21.12		용역중
		지방도603호 청산도로 포장도 보수공사	태안	원북	L=3.0km	300	21.01~21.12		용역중
		지방도634호 반계도로 포장도 보수공사	태안	원북	L=2.0km	200	21.01~21.12		용역중
		지방도603호 반계도로 소구조물 정비공사	태안	원북	1개소	50	21.01~21.12		용역중
		지방도603호 내리도로 배수시설 정비공사	태안	이원	1개소	50	21.01~21.12		용역중
		지방도634호 고남도로 배수로정비	서산	성연	1개소	30	21.01~21.12		용역중
		지방도634호 고남도로 포장도 보수공사	서산	성연	L=2.0km	200	21.01~21.12		용역중
		지방도609호 원평도로 포장도 보수공사	서산	운산	L=1.2km	120	21.01~21.12		용역중
		지방도647호 태봉도로 포장도 보수공사	서산	운산	L=2.0km	200	21.01~21.12		용역중
		지방도647호 삼송도로 포장도 보수공사	서산	해미	L=2.0km	200	21.01~21.12		용역중
		지방도606호 수부도로 포장도 보수공사	보령	웅천	L=2.5km	250	21.01~21.12		용역중
		지방도610호 장현도로 포장도 보수공사	보령	청라	L=1.5km	150	21.01~21.12		용역중
		지방도610호 성연도로 포장도 보수공사	보령	청소	L=2.0km	200	21.01~21.12		용역중
		지방도610호 황룡도로 포장도 보수공사	보령	청라	L=1.5km	150	21.01~21.12		용역중
		국지도96호 도산~소암리 포장도 보수공사	홍성	광천	L=4.0km	400	21.01∼06		용역중
		지방도616호 덕정~죽림 포장도 보수공사	홍성	금마	L=2.0km	200	21.01∼06		용역중
		국지도96호 성호도로 포장도 보수공사	홍성	결성	L=1.5km	150	21.01∼06		공사중
		서원교 재가설공사	아산	염치	1개소	274	20.04∼21.04	60	용역중
		지방도615호 광천도로 배수시설 개선공사	당진	순성	1개소	200	21.01∼21.12		용역중
		지방도619호 면천도로 포장도 보수공사	당진	면천	L=2.0km	200	21.01∼21.12		용역중
		지방도647호 신시도로 포장도 보수공사	당진	정미	L=1.5km	150	21.01∼21.12		용역중
							21.01∼21.12
						100
					L=1.0km
				우강
			당진
		국지도70호 송산도로 포장도 보수공사							용역중
		지방도622호 중흥도로 포장도 보수공사	당진	송악	L=1.0km	100	21.01∼21.12		발주예정
		터널 및 교량관리	전노선	1식		150	21.01∼21.12		입찰 공고중
		지방도 교량유지관리	중대교,용연교,해창교,둔당교,마교교		1식	626	21.01∼21.12		용역중
		비점오염저감시설 운영 유지관리	55개소		1식	120	21.01∼21.12		추진중
		안전시설 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	700	21.01∼12		추진중
		긴급도로보수공사	전노선		1식	150	21.01∼12		추진중
		지방도 제설 및 제초용역	전노선		1식	500	21.01∼12		추진중
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	350	21.01∼12		추진중
		도로유지보수 폐기물처리	전노선		1식	50	21.01∼12		추진중
		재해대책추진	전노선		1식	527	21.01∼12		추진중
		터널 및 교량관리(전기요금)	전노선		1식	200	21.01∼12		추진중
		도로 유지보수(인건비, 운영비, 직무수행경비, 부대비)	전노선		1식	79	21.01∼12		공사중
	소계	재배정사업	34개 지구			14,579
	재배정사업	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	20.01∼12		용역중
		지방도 표지판정비	전노선		1식	100	20.01∼12		용역중
		도로표지(LED) 개선사업	서산, 당진		1식	50	21.01∼12		용역중
		지방도변 마을주민 보호구역 정비사업	보령, 예산		2개소	160	21.01∼12		용역중
		운행방향 유도레인 설치	아산, 당진, 홍성		1식	30	21.01∼21.12		공사중
		터널 방재시설 설치	봉산터널		1식	200	21.01∼21.12		용역중
		지방도 안전시설(방호울타리) 정비	서산, 당진, 홍성		1식	1,000	21.01∼21.12		추진중
		로드킬 방지 시설	홍성, 예산		1식	100	21.01∼12		공사중
		횡단보도 바닥 매립형 유도등 설치	전노선		5개소	50	21.01∼12		추진중
		야생조류 투명 방음벽 충돌 저감 대책 추진	서산	부석	L=4km	100	21.01∼12		용역중
		국지도70호 문양도로 포장도 보수공사	서산	음암	L=5.0km	500	21.01~22.12		용역중
		지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.87km	1,500	21.01~22.12		위험 도로
		지방도603호 포지도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.84km	1,249	21.01~22.12		위험 도로
		국지도 96호 용신도로 선형개량공사	태안	근흥	L=0.50km	500	21.01~21.12		용역중
		지방도603호 내리도로 인도설치공사	태안	이원	L=0.15km	150	21.01~21.12		용역중
		지방도634호 황촌도로 인도설치공사	태안	원북	L=0.30km	150	21.01~21.12		용역중
		지방도610호 교성도로 인도설치공사	보령	오천	L=0.20km	165	21.01~21.12		용역중
		지방도606호 수부도로 인도설치공사	보령	웅천	L=0.35km	450	21.01~21.12		용역중
		지방도607호 황교도로 선형개량공사	보령	웅천	L=0.30km	450	21.01~21.12		공사중
		고풍2지구 급경사지 정비	서산	운산	1식	613	21.01~21.12		용역중
		지방도616호 도막사거리 회전교차로 설치사업	홍성	금마	1식	800	21.01~22.12.		보상중
		국지도96호 대평도로 인도설치공사	홍성	광천	L=0.2km	198	21.01∼21.06		용역중
		지방도609호 운월도로 선형개량공사	홍성	홍동	L=0.4km	625	21.01~22.12.		용역중
		서원교 재가설공사	아산	염치	1개소	670	20.04∼21.04	60	공사중
		지방도 교량유지관리	삼월1교 등 15개교		15개소	1,393	21.01∼21.12		추진중
		지방도 교량안전진단	전노선		16개소	743	21.01∼21.12		터널2 지하차도1포함
		도화담리 개선공사 실시설계용역	보령	미산	1개소	125	21.01∼21.12		발주예정
		당진지역 포장도 보수공사	당진		1식	1,000	21.01∼21.12		용역중
		지방도647호 장고항도로 인도설치공사	당진	석문	L=0.2km	200	21.01∼21.12		용역완료
		지방도615호 성북도로 인도설치공사	당진	순성	L=0.1km	100	21.01∼21.12		용역완료
		아산지역 포장도 보수공사	아산		L=4.0km	300	21.01∼21.06		용역완료
		지방도619호 신대리 배수로 정비공사	예산	광시	L=0.1km	70	21.01∼21.06		용역완료
		지방도616호 장복도로 재해복구 공사	예산	대술	L=0.1km	706	21.01∼21.06		공사중
		지방도645호 도산도로 재해복구 공사	아산	도고	1개소	112	20.12~21.06	-	공사중
	소계	위 임 국 도	5개 지구			10,326
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	4,553	21.01~21.12	-	공사중
		도로유지보수	전노선		1식	3,647	21.01~21.12	-	공사중
		도로병목지점개선	전노선		1식	507	21.01~21.12	-	공사중
		위험도로개선	전노선		1식	1,508	21.01~21.12	60	공사중
		국도유지운영(전기료 등)	전노선		1식	111	21.01~21.12		공사중

□ 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
종합건설사업소	소 장	지방기술서기관	최동석	2021.01.01.
	행정관리과장	지방행정사무관	최평근	2020.07.01.
	도로건설과장	지방시설사무관	이창로	2021.01.01.
	공공건축과장	지방시설사무관	김재균	2020.07.01.
	하천개발과장	지방시설사무관	이재원	2020.07.01.
공주지소	지 소 장	지방시설사무관	전상근	2020.02.24.
홍성지소	지 소 장	지방시설사무관	원종성	2020.07.01.