		2020. 5. 20(수), 10:30 108호 회의실 2016. 1.14(목) 08:30 도청 대회의실

- 내포문화권 발전을 위한 특별위원회 -

주요 업무추진상황 보고

충청남도•충청남도교육청

			순 서

	Ⅰ. 도청 소관 주요 업무 추진상황 2 □ 미래산업국 3 □ 문화체육관광국 16 □ 건설교통국 27 □ 해양수산국 33 Ⅱ. 도교육청 소관 주요업무 추진상황 38 □ 기획국 39

Ⅰ

도청 소관 주요업무 추진상황

1. 미래산업국

2. 문화체육관광국

3. 건설교통국

4. 해양수산국

□ 내포신도시 조성현황

❍ 위    치 : 홍성군 홍북읍, 예산군 삽교읍 일원

❍ 면    적 : 9,951,729㎡(홍성군 63%, 예산군 37%)

❍ 시 행 자 : 충남개발공사(38%), 한국토지주택공사(62%)

❍ 총사업비 : 2조 5,692억원(사업시행자 부담)

❍ 사업기간 : 2007. 7. 20. ~ 2020. 12. 31.

그 동안 추진상황

□ ’06. 2. 13. : 도청 이전 예정지 지정 공고

□ ’07. 7. 20. : 도시개발구역 지정

□ ’08. 5. 01. : 개발계획 수립 고시

□ ’09. 6. 16. : 공사착공(부지조성 및 도청사) → ’12. 12월 도청사 이전

□ ’20. 4월 말 현재 공정률 96.0%

▪부지조성 : 총 995㎡ 중 955만㎡사업완료

- 진입도로 : 6개 노선(20.8㎞) → 3개 (10.66㎞) 개통, 1개(3.39㎞) 준공, 1개(3.97㎞) 공사중

- 도시첨단 : 126만㎡ 조성 중 → 22개 기업 / 24만㎡ 유치

▪기관․단체 : 이전대상 107개소 → 이전완료 99개소, 이전추진 중 8개소

▪주택건설 : 건설완료 10단지/11,018세대,  건설중 2단지/ 3,413세대

▪교육시설 : 유․초․중․고․대 17개 → 개교 11개

▪편익시설 : 공원․광장 등 107개소, 대형마트․병의원․약국 등 782개소

▪인구변화 : ’12. 12월(509명) → ’14. 12월(6,088명) → ’20. 4월(26,852명)

※ 분양대상 : 1,716필지 5,610천㎡(공급 1,564필지 3,918천㎡, 매각 1,489필지 2,896천㎡, 분양률 74%)

□ 주요업무 추진현황

1		부지조성 사업 추진

□ 위치 / 규모 : 홍성군 홍북읍, 예산군 삽교읍 / 8개공구 995만㎡

- 충남개발공사 3개 공구 378만㎡(38%), LH공사 5개 공구 617만㎡(62%)

❍ 단계별 개발계획에 의하여 618만㎡ 사업준공 완료

* 1단계 184만㎡(‘14.2,3.), 2단계 404만㎡(‘16.4.11.), 3단계 1차 19만㎡(‘17.6.30.), 3단계 2차 5만㎡(‘18.12.31.), 3단계 3차 6만㎡(‘20.4.16.)

❍ ’20. 4월말 기준 전체 995만㎡ 중 955만㎡ 조성완료(96%)

앞으로
			•’20년까지 부지조성 사업 마무리 목표 추진

2		기관 ․ 단체 유치

□ 유치대상 : 107개 기관․단체

- 이전완료 99개소 (내포신도시 이전 84, 내포신도시 인근 이전 15)

- 이전진행 8개소 (공사중 4, 설계중 1, 부지확보 3)

※ 유치대상 외 7개소 추가 유치

• 공 사 중(4) : 정부지방합동청사(4)

- 충청남도 선거관리위원회, 홍성군 선거 관리위원회, 충청지방통계청 홍성사무소, 대전보호관찰소 홍성지소

• 설 계 중(1) : 한국농어촌공사충남지역본부

• 부지확보(3) : KBS내포방송국, 충남택시운송사업조합, 전국택시공제조합충남지부

※ 이전대상 외 추가유치(7)

- (설계2) :  내포우체국, 자동차대체부품인증지원센터

- (국비확보2) : TBN충남교통방송국(신설), 국민연금공단 홍성지사(이전)

- (부지확보1) : 충남콘크리트공업협동조합

- (이전완료2) : 한국양묘협회 충남지회, 한국국토정보공사 홍성지사

앞으로
			•부지매입 후 이전 추진이 미진한 3개 기관 조기이전 유도 •신규이전 대상기관 파악 및 지속적인 유치활동 노력

3		내포도시첨단산단 조성 및 기업유치

□ 면    적 : 126만㎡(신도시 995만㎡의 12.7%, 산업용지 654천㎡)

□ 유치업종 : IT․BT, 지식ㆍ문화산업

□ 사업기간 : 2016. 8.～2020. 12. (LH 시행)

❍ 첨단산단(126만㎡) 부지조성 공사 중 → 공정율 95.6% / 전체분양율 : 22.1%

❍ 4개 기관 : 부지매입 2, 계약준비 2

- 부지매입(2) : 자동차대체부품인증지원센터, 서해안기후대기센터

- 계약준비(2) : 내포지식산업센터, 충남진로융합교육원

❍ 18개 기업 :  준공 1, 착공 4, 부지매입 9, 계약준비(MOU) 4

- 준    공(1) : 한양로보틱스

- 착    공(4) : 동양테크윈 / 유니에어공조 / 지노아 이앤티 / 은성전장

- 부지매입(9) : 월산이앤씨 / 호라이즌퓨얼셀코리아 / 파로스 정보통신

콘크리트공업협동조합 / 솔리스아이디씨 / 대하 / 스마트코리아

내포벤쳐밸리베타 / 삼일엘레베이터

- 계약준비(MOU) (4) : 봉봉전자 / 한별 / 컴팩스알브이 / 디씨엠

앞으로
			•’20년 말까지 단지 조성, ‘21년까지 기업유치 완료 목표 ※ 도 경제통상실, 충남개발공사, LH, 홍성군 공조

4		자동차 대체부품 인증시험지원센터

□ 위    치 : 내포도시첨단산업단지 (부지면적 15,297㎡, 건물 2동, 장비 56종)

□ 사 업 비 : 353억원 (국 319.2, 지 33.8) ※ `20년 예산(국비 84.9억원)

□ 사업기간 : 2017. ~ 2022.

□ 시행주체 : 한국교통안전공단(국토교통부)

❍ 자동차대체부품인증지원센터 건립 제안(도→국토부, ’16. 4월)

❍ 자동차대체부품인증지원센터 타당성 결과(B/C=1.65)

❍ ’19. 12월 : 건축허가 및 기본・실시설계 완료

앞으로
		• ’20. 6. : 공사 착공(2020. 4.27 개찰 / 현재 업체 적격심사 중) • ’21.12. : 건축 준공(’22년까지 시험장비 구축 및 사업개시)예정

5		정부지방 합동청사 건립

□ 규  모 : 부지 10,000㎡/ 건축면적 8,134.29㎡ (지하1층, 지상5층)

□ 사업비 : 23,898 백만원(국유재산관리기금)

□ 사업기간 : 2017. 7. ~ 2020. 7.

□ 입주기관 : 4개 기관 (종사자 : 114명)

- 충남․홍성선관위, 충청지방통계청, 대전보호관찰소 홍성지소

❍ 공사 착공( ’18. 12.)

❍ 기공식( ’19. 04.) → ’20년 4월말 현재 공정율 80%

앞으로
			• ’20년 7월 준공 목표로 추진

6		TBN충남교통방송국 건립

□ 위    치 : 내포도시첨단산업단지 산학협력시설용지(산학1-①-4)

□ 사 업 량 : 부지면적 7,512㎡(1본부장 3국, 35명)

□ 사 업 비 : 250억원 (국250) ※ `20년 예산(국비 7억원)

□ 사업기간 : 2020. ~ 2022.

□ 시행주체 : 도로교통공단(경찰청)

❍ TBN충남교통방송국 설립 경찰청 건의(’19. 2)

❍ ’20년 국비 7억원(실시설계비) 반영(’19.12.)

❍ ’20. 4월 : 부지선정(공단 자체 부지선정위원회)

앞으로
			• ’20년 실시설계 완료 예정 • ’21년 부지매입 • ’22년 공사착공(’23. 12. 준공 목표 추진)

7		국민연금공단 홍성지사 사옥 신축

□ 위    치 : 예산군 삽교읍 커뮤니티시설부지

□ 사 업 량 : 부지 3,200㎡, 지하1층, 지상3층

□ 사 업 비 : 82억원 (국82) ※ `20년 예산(국비 39억원)

□ 사업기간 : 2020. ~ 2022.

□ 시행주체 : 국민연금공단(보건복지부)

❍ 국민연금공단 홍성지사 이전 건의(’19. 3)

❍ ’20년 국비 39억원(부지매입비) 반영(’19.12.)

앞으로
			•’20년 상반기 부지매입 •’21년 실시설계 추진 •’22년 공사 준공 목표로 추진

8		종합병원 건립

□ 위    치 : 내포신도시 내 의료시설용지(홍성군 홍북읍)

□ 면    적 : 병원용지 34,214㎡

□ 규    모 : 300병상 이상의 종합병원(11과목, 7개센터)

* 암 전문 치료과목 중심, 치과·소아과 등 일반과목과 특수질환과 운영

❍’15. ~ ’19. 9. : 주요 종합병원, 대학병원 및 굿모닝, PMC박병원,  중입자암치료센터 등 특화된 종합병원 유치활동 전개

❍’19. 10. : 한국중입자암치료센터 의료시설용지 매매계약(10.16) 및 MOU체결(10.25)

※ ’20.4.16. : 의료시설용지 매매대금 중 1회차 할부금 미납(2,874백만원)

앞으로
			• 병원 설립자의 당초 사업계획(‘20년~’22년)대로 사업이 정상 추진될 수 있도록 독려

9		충남대학교 내포캠퍼스 설립

□ 위    치 : 홍성군 홍북읍 내포신도시 대학2부지

□ 기간 / 면적 : 2021. ~ 2030.  / 66,000㎡(약 2만평정도)

□ 설립방향 : 4차 산업혁명 시대를 선도할 바이오경제 산학융합 캠퍼스 구축

* 융복합학과·대학원 설립, 지역연계 연구소 및 국제연수원 등 건립

❍ ’16. 3. ~ 현재까지 : 충남대 내포캠퍼스 설립 실무협의 개최(33회)

❍ 충남대학교와의 MOU체결(´17. 12. 14.), 추진 협의체 구성(´18. 3. 14.)

※ 추진협의체 : 추진단(행정부지사 외 7), 실무협의회(내포신도시건설과장 외 9)

❍ ’18. 12.  : 대학설립 지원 근거마련(도청이전특별법시행조례 개정)

❍ ’19. 12.  : 내포캠퍼스 설립을 위한 MOA 체결(도↔충남대↔홍성군)

❍ ’20. 4. 13 : 도 협력관 파견(4급 1명, 충남대학교)

❍ ’20. 5월 : 내포캠퍼스 설립 타당성 연구용역 예산심의(2회 추경, 25백만원)

앞으로
			•충남대학교 내포캠퍼스 부지확보(‘20년 하반기) •충남대와 내포캠퍼스 설립 타당성 연구용역 추진(‘20. 6. ~ 12.)

10		내포도시첨단산업단지 진입도로 개설사업

□ 위  치 : 홍성군 홍성읍 대교리 ~ 홍성군 홍북읍 대동리 일원

□ 사업량 : L=3.97㎞, B=20m(4차로, 교량 2개소, 교차로 6개소)

□ 사업비 : 49,880백만원 (국비 38,370 / 지방비 11,510)

□ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2022. 2.

❍ 기본 및 실시설계용역 착수(‘16. 4.)

❍ 공사 착공(‘18. 3.) ~ ’20. 4월말 기준 공정율 61.8%

❍ ’20. 4월말 편입대상 389필지(242천㎡) 중 373필지(207천㎡) 보상(96%)

앞으로
		•’20.12. : 전체(L=3.9km) 중 포장 1.5km 완료 목표(80%) •’22. 2. : 사업준공

11		애향공원 내 테마공간 조성사업

□ 위  치 : 예산군 삽교읍 목리(내포신도시 내 애향공원)

□ 사업량 : 테마공간 조성 1식(인공폭포, 야외무대, 수목식재 등)

□ 사업비 : 1,200백만원 (도비 600 / 군비 600)

□ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.  / □ 사업시행 : 예산군수

❍ 기본 및 실시설계용역 착수(’20. 3.)

❍ 애향공원 내 테마공간 조성사업 실시설계용역 중간보고(’20. 4.)

앞으로
		•’20. 6. : 설계 완료, 일상감사 및 계약심사 완료 •’20.12. : 사업준공

12		스마트도시 기반 구축

□ 사업량 : 7대 분야 19개 서비스 단계별 추진 및 통합운영센터 구축

①스마트전광판 ②교통정보제공(VMS) ③주정차위반단속 ④돌발상황감시 ⑤스마트횡단보드 ⑥스마트시티시설물관리 ⑦상수도원격검침 ⑧지능형안전감시 ⑨차량추적관리 ⑩이상음원안전감시 ⑪국민안전5대연계 ⑫U-자전거서비스 ⑬대중교통정보제공 ⑭스마트관광

⑮실시간신호제어 ⑯지하차도관리 ⑰풍수해재난감시 ⑱쓰레기투기감시 ⑲생태환경모니터링

※  볼드체(진하게) 표기 : 스마트도시 서비스 구축완료 6개 항목

□ 소요예산 : 390억(서비스항목 320, 통합운영센터 70)

□ 사업기간 : 2012. ~ 2021.

※ (스마트도시) 정보통신기술(IOT)과 인공지능(AI) 기술을 접목해 신도시 주민에게 안전하고 윤택한 삶을 제공하고자 하는 서비스

❍ 총 19개 서비스항목 중 현재까지 6개 항목을 구축

❍ 서비스항목 및 통합운영센터 실시설계 완료(’20.3)

❍ 스마트도시 기반구축 발주중(’20.5)

앞으로
			•’20.06. : 스마트도시 기반구축사업 착공 •’21년까지 스마트도시 기반 구축완료 및 운영

13		농수산물종합유통센터 건립

□ 위    치 : 예산군 삽교읍 신리 (내포신도시 유통시설용지)

□ 면    적 : 17,105㎡(건축면적 5,290㎡) □ 사 업 비 : 299억원

□ 사업내용 : 농협하나로마트, 로컬푸드매장, 고객편의시설 등

□ 사업기간 : 2017. 4.〜 2020. 11.  □ 사업시행 : 삽교농협

❍ 유통센터 부지 매입계약 체결(’17. 4.)

❍ 도 경관심의 완료(’19. 3. 28.)

❍ 건축공사 착공(’19. 11.), ’20. 4월말 공정율 40%

앞으로
			•’20년 하반기 건립공사 완료 목표

14		내포신도시 유휴지 경관 특화사업

□ 사업규모 : 약 61만㎡, 16개 블록(경관조성 15, 텃밭정원1)

□ 사 업 비 : 75백만원(국화동산 45, 경관조성 및 텃밭정원 30)

□ 추진방법 : 도청이전주민생계조합(주)에 위탁 운영

□ 사업내용 : 꽃단지 및 국화동산 조성, 텃밭정원 운영

□ 목    적 : 내포신도시 內 유휴지를 활용한 자연 친화적이고 매력 넘치는                  경관조성으로 신도시 이미지 제고 및 활기찬 정주여건 개선

❍ 계절 꽃 파종(꽃양귀비, 백일홍) 및 경관작물 식재

❍ 텃밭정원(주말농장) 개장(’20.4.4.)

※ 1,181세대 분양(세대당 약 16㎡ / 효성아파트 인근 RC-1)

앞으로
			•’20.11. : 계절별 경관단지 및 국화동산 조성 ※ 위탁운영자와 긴밀한 업무협조 및 행정지도 지속추진

15		쓰레기 자동집하시설

□ 사 업 량 : 집하장 2개소, 이송관로 40.2㎞, 투입구 586개소

- 수 거 량 : 70톤/일 - 일반33, 음식물37

□ 사업비 / 사업기간 : 966억원 / 2010. 10. ~ 2020. 12.

□ 시행자 / 시공사 : 충남개발공사 / ㈜포스코 건설 외 2개사

❍ 이송관로 40.2km, 집하장 2개소 설치완료, 3단계 투입구 설치중

❍ 시험가동(인력수거 병행) 중(’17. 6. 1. ~ ’20. 12. 31.)

- 총 18개소(분야) 중 15개소 시험가동 중(충남개발공사)

※ ’16년부터 관계기관 회의(14회)를 진행했으나 양군에서는 운영비용 문제로 인수에 부정적

앞으로
			•자동집하시설 인계인수 및 운영․관리방안 마련

16		내포신도시 한옥마을 조성

□ 위    치 : 내포신도시 블록형 단독주택용지(RD8블록)

□ 규    모 : 부지 45,713㎡(13,828평)

□ 건립호수 : 한옥 73동(주거용 65호, 근린생활시설 등 8호)

□ 주요시설 : 단독주택, 근린생활시설, 문화시설 등

❍ ’19.12. : 한옥마을 개발계획 및 실시계획 고시 완료

❍ ’20. 4. : 단지 조성공사 실시설계 완료

❍ ’20. 5. : 공사 발주 및 업체 선정(공사비- 1,869백만원 /18개월)

※ 한옥마을 첫사업 -「홍성군 신한옥형 체험관」설계 중, 8월 착공 예정 (홍성군)

앞으로
			•단지 조성공사 착공 및 준공(’20. 6. ~ ’21. 12.) •토지분양 공고 예정(’21. 6.)

17		내포신도시 아트빌리지 조성

□ 위    치 : 내포신도시 블록형 단독주택용지(RB6-⑧)

□ 규    모 : 대지면적 6,612㎡, 연면적 약2,723㎡

□ 주요시설 : 단독형 19세대, 부대시설(창작센터 및 갤러리카페 등)

❍ 주거형태 : 임대(10년 임대후 분양 전환)

❍ 입주자 선정현황 : 19세대 중 15세대 확정(잔여 모집 계획중)

❍ 경관심의(’19. 12.) 및 건축허가(’20. 2.) 완료

앞으로
			•건축공사 착공 및 준공(’20. 5. ~ 21. 4.) •입주 예정(’21. 5.)

18		내포집단에너지시설 추진

□ (규모/주주사) LNG열병합 495MW + 수소연료전지 60MW / 롯데건설, 남부발전

□ (기간/사업비) ’20.5 ~ ’22.12(32개월) / 총사업비 약 1조원 (LNG CHP 68백억원)

❍ 내포집단에너지시설 청정연료 전환 협약(’18.9.3.)

* 협약기관(기업) : 롯데건설, 남부발전, 충청남도, 산업통상자원부(지원)

❍ 사업장 부지 매입(69,483.1㎡, 433억원)후 사용허가(’19.3.6)

❍ 사업변경허가(SRF→LNG, 산통부 ’19.2.7.) 및 개발계획 변경고시(’19.4.29.)

❍ 대청댐계통 용수 충남서부권 광역상수도계획(K-water) 공급 반영(’19.7.2)

❍ 한국가스공사 LNG개별요금제 시행 확정(’20.1.3 산업부 승인)

❍ 주민수용성 위한 내포집단에너지시설 상생협력위원회 구성 운영(’20.1.9)

❍ 청정연료 전환에 따른 환경영향평가 완료(’20.2.28)

앞으로
			•’20. 5. : 산업부 공사계획 승인(인가) 및 하수계획 완료 •’20. 7. : 환경부 통합환경허가 및 예산군 건축허가 신청 •’20. 8. : PLB(열전용 보일러) 공사착공 추진 •’20.10. : 열병합발전시설 공사착공 목표

※ 주요사업 위치도

※ 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
미래산업국	국 장	부이사관	정 병 락	2019. 6. 24.
에너지과	과장	기술서기관	최 건 호	2019. 1. 1.
	에너지전환팀	환경사무관	공 상 현	2019. 1. 21.
내포신도시발 전 과	과 장	기술서기관	우 종 석	2020. 1. 1.
	신도시정책팀	시설사무관	임 형 균	2020. 1. 21.
	신도시투자유치팀	행정사무관	김 경 호	2019. 2. 11.
	신도시경관팀	시설사무관	강 남 식	2019. 1. 21.
	신도시정주기반팀	시설사무관	권 호 욱	2020. 1. 21.

Ⅰ. 내포문화권 지역개발사업 추진현황(문화국 소관)

지역개발사업을 통한 광역관광루트 조성 등 시․군간 연계 강화

지역특화산업 발굴을 통한 지역경제 활성화 등 지역 활력 제고

균형발전과 삶의 질이 보장된 행복한 충남 건설

1		사업개요

❍ (사업지역) 충남 7개 시․군(보령, 아산, 서산, 당진, 홍성, 서천, 예산)

❍ (사업기간) 2018. ~ 2027. (10년간)

❍ (총사업비) 29개 사업 3,539억원(국비 1,336, 지방비 2,203)

❍ (사업내용) 정신문화 창달, 역사문화유적 정비, 기반시설 확충

2		그동안 추진상황

❍ 충청남도 거점육성형 지역개발계획 승인(‘17.12, 국토부)

- (기존) 내포문화권 개발사업(문화국 소관 59개 사업) 중

(반영) 거점육성형 사업으로 29개 사업 반영(*30개 사업 완료․제척)

❍ 사업추진 현황(‘20년도 현재) : 29개 사업

- (완  료) 서산 해미읍성 정비사업 등 4개 사업

- (추진중) 홍성 홍주성 복원정비사업 등 23개 사업

- (미착수) 서천 장암진성 정비사업 등 2개 사업 / *정비계획 수립 중

□ ‘20년도 사업 : 7개 사업(김좌진 장군 생가지 성역화 사업 등)

- 예산 : 66.6억원(도비 33.3, 시군비 33.3)

※ 예산집행률 : 56.8%(사업비 3,539억원, 집행액 2,011억원)

3		거점육성형 지역개발사업 현황

□ 예산집행 현황

(단위: 백만원)

지역별	사 업 명	사업비(백만원)				기투자액 (2019년 까지)	2020년 예산	예 산 집행률 (%)	비고
		총사업비	국비	지방비
				도비	시군비
총 계 (29개 사업)		353,920	133,553	81,351	139,016	194,471	6,660	56.8
보령시 (3개소)	소 계	64,500	34,650	14,925	14,925	13,984	1,560	24.1	-
	보령 충청수영성 정비	38,000	26,600	5,700	5,700	11,938	-	31.4	문화유산
	보령 성주사지 정비	11,500	8,050	1,725	1,725	1,270	-	11.0	문화유산
	남포읍성 정비	15,000	-	7,500	7,500	776	1,560	15.6	문화유산
아산시 (1개소)	소 계	28,293	-	14,146.5	14,146.5	2,950	-	10.4	-
	아산 공세곶고지 발굴정비	28,293	-	14,146.5	14,146.5	2,950	-	10.4	문화유산
서산시 (6개소)	소 계	68,776	31,397	8,127	29,252	63,968	-	93.0	-
	서산 보원사지 정비	20,625	12,862	2,633	5,130	16,797	-	81.4	문화유산
	서산 해미읍성 정비	36,626	15,409	4,371	16,846	36,626	-	100.0	문화유산
	서산 천주교 순례지 정비	5,229	500	-	4,729	5,229	-	100.0	문화유산
	서산 개심사 정비	2,896	1,426	623	847	2,896	-	100.0	문화유산
	명종대왕태실 및 비 정비	1,000	-	500	500	20	-	2	문화유산
	서산 천주교 순례길	2,400	1.200	-	1,200	2,400	-	100.0	관광진흥
당진시 (7개소)	소 계	71,930	18,491	19,869.5	33,569.5	39,288	3,720	59.8	-
	당진면천읍성 복원정비	29,200	5,120	9,320	14,760	19,811	2,000	74.7	문화유산
	당진 합덕제 정비	20,000	2,500	5,640	11,860	13,793	1,600	77.0	문화유산
	당진 버그내 순례길	6,000	3,960	500	1,540	4,084	-	68.1	관광진흥
	남이홍 장군묘 일원 및 일가유품 정비	8,000	4,000	2,000	2,000	510	120	7.9	문화유산
	당진 안국사지 발굴 정비	2,730	1,911	409.5	409.5	870	-	31.9	문화유산
	당진포진성 복원정비	4,000	-	2,000	2,000	220	-	5.5	문화유산
	소난지도 의병총정비	2,000	1,000	-	1,000	-	-	-	문화유산
홍성군 (8개소)	소 계	99,697	44,991	16,673	38,033	68,820	200	69.2	-
	결성농요전수관	4.664	-	1,626	3,038	3,350	-	71.8	문화유산
	한성준 민속무용 전수관	6,490	2,210	1,795	2,485	730	-	11.3	문화정책
	홍주성 복원 정비	60,794	39,706	8,418	12,670	56,496	-	92.9	문화유산
	김좌진 장군 생가지 성역화	17,159	2,655	-	14,504	5,862	200	35.3	문화유산
	성삼문 선생 유허지(노은서원)정비	2,472	200	904	1,368	832	-	33.7	문화유산
	홍성 결성읍성 정비	3,430	110	1,660	1,660	1,102	-	32.1	문화유산
	홍성 임득의 장군묘 정비	1,760	110	825	825	410	-	23.3	문화유산
	김복한 선생 유적지 정비	2,928	-	1,445	1,483	38	-	1.3	문화유산
서천군 (특정지역 2개소)	소 계	8,690	-	4,345	4,345	1,000	880	21.6	-
	서천장암진성정비	4,880	-	2,440	2,440	-	-	-	문화유산
	한산읍성정비	3,810	-	1,905	1,905	1000	880	49.3	문화유산
예산군 (특정지역) 2개소)	소 계	12,034	4,024	3,265	4,745	4,461	300	39.6	-
	임존성 복원정비사업	7,734	4,024	1,115	2,595	3,461	-	44.8	문화유산
	가야사지(남연군묘)발굴 및 정비	4,300	-	2,150	2,150	1,000	300	30.2	문화유산

※  2020년부터 지방이양되어 도비보조사업(전환사업)으로 추진

□ 사업추진 현황

구 분	지역	사 업 명	추 진 현 황
완 료 (4건)	서산	해미읍성 정비	추진 완료
		개심사 정비	추진 완료
		천주교 순례지 정비	추진 완료
		천주교 순례길	추진 완료
추진중 (23건)	보령	충청수영성 복원 정비	영보정 건립 완료, 탐방로 정비 설계
		성주사지 정비	중심사역 정비, 예초작업
		남포읍성 복원 정비	토지매입, 시굴 및 발굴 조사
	아산	공세곶고지 발굴정비	시굴조사 및 발굴조사
	서산	보원사지 정비	석축 정비 및 목교 설치, 유구 및 탐방로 정비
		명종대왕태실 및 비 정비	정비계획 착수
	당진	면천읍성 복원정비	영랑효공원 조성, 객사 및 동벽 복원
		합덕제 정비	농촌테마공원 조성 완료, 체험공간 및 연호방죽 조경 조성
		버그네 순례길	안내표지판, 주변정비 쉼터 조성
		남이흥 장군묘 일원 및 일가 유품 정비	남씨양세충신정려 주변 보수
		안국사지 발굴정비	석불입상 주변 보호책 설치 등 주변정비공사
		포진성 복원 정비	정밀지표조사 완료
	홍성	결성농요 전수관	토지매입, 정비계획 변경, 공연장 준공
		한성준 민속무용 전수관	토지매입완료
		홍주성 복원 정비	탐방로 정비 및 시설물 보수정비
		김좌진 장군 생가지 성역화	정비계획 수립용역
		성삼문 선생 유허지(노은사원) 정비	토지매입, 정비계획 수립, 사당 신축
		결성읍성 정비	숲문화공원 조성공사, 발굴조사, 동문지정비
		임득의 장군묘 정비	묘역 석축 정비, 화장실 신축, 숭모제 재현
		김복한 선생 유적지 정비	정비계획 수립
	서천	한산읍성 정비	성곽보수 발굴조사 및 설계용역
	예산	임존성 정비	수목사업 실시설계
		가야사지 발굴정비	발굴조사 및 유적정비
미착수 (2건)	서천	장암진성 정비	미착수(‘20년 정비계획 수립 예정)
	당진	소난지도 의병총 정비	미착수(‘21년 정비계획 수립 예정)

Ⅱ. 주요사업 추진현황

1		보령 남포읍성 정비사업(충청남도기념물 제10호)

□ (위치/기간) 보령시 남포면 / ‘12~’27년

□ (총사업비) 150억원(도비 75, 시비 75)

□ (사업내용) 발굴조사, 성곽정비, 건물복원 등

❍ (그동안) 토지매입, 성곽 해체 및 보수공사 실시

- 예산집행률 : 15.6%(사업비 150억원, 집행액 23.4억원)

□ ‘20년도 사업 : 남~동 문루 발굴조사 및 성벽정비

- 예산 : 15.6억원(도비 7.8, 시비 7.8)

❍ (앞으로) 발굴조사 및 성곽정비

남포읍성 보수정비사업 조감도

2		아산 공세곶고지 발굴정비사업(충청남도기념물 제21호)

□ (위치/기간) 아산시 인주면 / ‘17~’22년

□ (총사업비) 283억원(도비 141.5, 시비 141.5)

□ (사업내용) 발굴조사, 성곽복원 및 주변정비 등

❍ (그동안) 종합정비계획 수립 및 성벽 일부 구간 보수공사 등

- 예산집행률 : 10.4%(사업비 282.93억원, 집행액 29.5억원)

□ ‘18년도 사업(이월) : 발굴조사 및 성곽복원

- 예산 : 20억원(도비 10, 시비 10)

❍ (앞으로) 토지매입, 성곽 및 유구 복원

아산 공세곶고지 전시관 조감도

3		당진 면천읍성 복원정비사업(충청남도기념물 제91호)

□ (위치/기간) 당진시 면천면 / ‘07~’20년

□ (총사업비) 292억원(국비 51.2, 도비 93.2, 시비 147.6)

□ (사업내용) 발굴조사, 문루․성곽․관아 복원정비 등

❍ (그동안) 토지매입, 발굴조사, 성벽(서벽, 남벽) 복원정비 등

- 예산집행률 : 74.7%(사업비 292억원, 집행액 218.1억원)

□ ‘20년도 사업 : 남~동 문루 발굴조사 및 성벽정비

- 예산 : 20억원(도비 10, 시비 10)

❍ (앞으로) 성벽(동벽 및 동치성 등) 복원정비

면천읍성 복원정비사업 조감도

4		당진 합덕제 정비사업(충청남도기념물 제70호)

□ (위치/기간) 당진시 합덕읍 / ‘07~’20년

□ (총사업비) 200억원(국비 25, 도비 56.4, 시비 118.6)

□ (사업내용) 합덕제 정비, 주차장 및 농촌테마공원 조성 등

❍ (그동안) 토지매입, 합덕제(연호방죽) 정비 등

- 예산집행률 : 77.0%(사업비 200억원, 집행액 153.9억원)

□ ‘20년도 사업 : 체험공간, 합덕제(연호방죽) 조경공사 등

- 예산 : 16억원(도비 8, 시비 8)

❍ (앞으로) 농촌테마공원 조성 등

합덕제 정비사업 조감도

5		김좌진 장군 생가지 성역화 사업(충청남도기념물 제76호)

□ (위치/기간) 홍성군 갈산면 / ‘10~’22년

□ (총사업비) 172억원(국비 27, 지방비 145)

□ (사업내용) 진입도로 및 백야공원 조성, 편의․체험시설 조성 등

❍ (그동안) 진입도로 및 백야공원 조성, 기념관 리모델링, 정비계획 수립

- 예산집행률 : 35.23%(사업비 172억원, 집행액 60.6억원)

□ ‘20년도 사업 : 도시관리계획 변경결정(농림지역→역사공원)

- 예산 : 2억원(도비 1, 군비 1)

❍ (앞으로) 편의시설(안내소 등) 및 체험시설(승마장, 국궁장 등) 조성

김좌진 장군 생가지 성역화 사업 배치도

6		서천 한산읍성 정비 사업(충청남도문화재자료 제134호)

□ (위치/기간) 서천군 한산면 / ‘16~’20년

□ (총사업비) 38억원(도비 19, 군비 19)

□ (사업내용) 성곽보수, 공원정비, 조경시설 등

❍ (그동안) 토지매입, 성곽보수, 서북치성 발굴조사 등

- 예산집행률 : 49.3%(사업비 38억원, 집행액 18.8억원)

□ ‘20년도 사업 : 서북치성 발굴조사 및 보수정비사업

- 예산 : 8.8억원(도비 4.4, 군비 4.4)

❍ (앞으로) 한산읍성 서북치성 보수정비 등

서천 한산읍성 정비 사업 관련 배치도

7		예산 가야사지 발굴 및 정비 사업(충청남도기념물 제150호)

□ (위치/기간) 예산군 덕산면 / ‘12~’25년

□ (총사업비) 43억원(도비 21.5, 군비 21.5)

□ (사업내용) 가야사지 건물지 시‧발굴 조사

❍ (그동안) 가야사지 시굴조사 및 제1~6차 발굴조사

- 예산집행률 : 30.2%(사업비 43억원, 집행액 13억원)

□ ‘20년도 사업 : 건물지 발굴조사

- 예산 : 3억원(도비 1.5, 군비 1.5)

❍ (앞으로) 발굴조사 및 유적정비 등

예산 가야사지(남연군묘) 전경

Ⅲ. 향후 추진계획

❍ 추진 중인 사업의 조속한 완료를 위해 도비 확보 총력

❍ 원활한 사업 추진을 위해 시․군과 긴밀한 협조체계 구축

Ⅳ. 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
문화체육관광국	국 장	지방부이사관	길 영 식	2020. 1. 1.
문화정책과	과 장	지방서기관	홍 은 아	2020. 1. 1.
	문화예술팀장	지방행정사무관	정 헌 웅	2020. 1. 1.
문화유산과	과 장	지방기술서기관	홍 연 숙	2019. 1. 1.
	문화재관리팀장	지방시설사무관	김 재 균	2019. 1. 21.
	문화권개발팀장	행정사무관	김 영 식	2021. 1. 21.
관광진흥과	과 장	지방서기관	허 창 덕	2020. 1. 1.
	관광개발팀장	지방행정사무관	조 정 림	2020. 1. 21.

건설교통국

Ⅰ. 내포문화권 지역개발계획(건설국 소관)

1		내포문화권 지역개발사업 현황

□ 범    위 : 7개 시‧군(보령·아산·서산·당진·서천·홍성·예산)

□ 사업기간 : 2018. ~ 2027.(10년 계획)

□ 사 업 비 : 33개 사업, 4,552억원(국비 1,859 도비 1,213, 시·군비 1,480)

□ 사업내용 : 정신문화 창달, 문화유적 정비 및 기반시설 확충

□ 그동안 추진상황

❍ 충청남도 발전촉진형·거점육성형 지역개발계획 승인(‘17. 12, 국토부)

- 내포문화권 지역개발사업(33건) 중 건설교통국 소관 3개 사업 추진

❍ 사업추진 현황 : 3개 사업(완료 2, 추진중 1)

- (완  료) 간월호 관광도로(’18년)

대련사 진입도로 개설사업(’19년)

- (추진중) 내포보부상촌 조성사업, ’20. 7월 준공예정(공정율 97%)

※ 총사업비 479억원(국비184, 도비236, 군비59)

□ 향후 추진계획

❍ 내포문화권 지역개발사업의 원활한 사업추진 및 조기 준공을 위해 관계 시․군과 긴밀한 협조체계 구축

2		주요사업 현황

□ 내포 보부상촌 조성 사업

□ 보부상의 근거지였던 예산 덕산지역에 보부상촌을 조성

- 보부상을 테마로 하여, 전통문화자원 관광‧상품화와 컨텐츠 개발을 통해 지역경제 및 내포문화권 관광 활성화 도모

1. 사업 개요

❍ 위    치 : 예산군 덕산면 사동리 일원

❍ 규    모 : 63,784㎡ / 건축연면적 5,382㎡

❍ 사 업 비 : 47,922백만 원(국비 18,367, 도비 23,644, 군비 5,911)

※ 예산 실집행률 : 92%(사업비 479억원 중 439억원 집행)

❍ 주요시설 : 전시관, 장터ㆍ어귀마당, 체험 공방, 보부상 이야기길 등

❍ 사업기간 : 2013. ~ 2020.(‘20. 4월 말 기준 공정률 97%)

❍ 시 행 자 : 예산군수

2. 추진 현황

❍ 내포문화권 특정지역 개발계획 확정(‘04.12.19, 국토부)

❍ 내포 보부상촌 조성 기본계획 수립(’07.12.30.)

❍ 내포 보부상촌 조성 종합계획 수립 용역 완료(’12.12.31.)

❍ 유통문화전시관 전시연출 설계 및 제작ㆍ설치용역 착수(’14.8.26.)

❍ 보부상촌 실시계획 승인(’15.11.23.) 및 건축공사 착수(’15.12.11.)

❍ 면적 확장에 따른 사업구역 지정 변경 및 실시계획 변경(’18.11.09.)

* 구역면적 확장 : 51,205㎡ → 63,784㎡(증 12,578㎡),

** 사업비 증액 : 44,700백만원 → 47,922백만 원(증 3,222), 국비 18,370백만원(확정금액)

❍ 준공 전 합동점검 실시(’20.5.18~5.22)

‣ ’20.5월 준공 전 합동검사 실시(관계기관 및 부서)

‣ ’20.6월 내포보부상촌 조성사업 최종 변경(확정측량 결과 반영)

‣ ’20.7월 사업 준공 및 개장 준비

향후

계획

위치도 및 조감도

Ⅱ 충남 혁신도시 지정 및 공공기관 이전 추진

□ 그동안 추진현황

❍ ‘18. 01. 30. : 혁신도시법 개정안 발의(道별 혁신도시지정, 양승조)

❍ ‘19. 08. 13. : 범도민추진위원회 발대식(문예회관)

❍ ’19.09.19., 10.29., 10.30. : 국가균형발전특별법 개정안 발의

❍ ‘19. 10. 31 : 100만인서명 달성 기념행사(충남도서관 강당)

❍ ’20. 03. 06. : 본회의 통과

❍ ’20. 03. 31. : 국무회의 심의․의결

❍ ’20. 04. 07. : 법안 공포(관보 고시)

□ 관계기관 동향

❍ (국토부) 국토연구원에서 수행중인 ‘혁신도시 성과 분석 및 발전방향 용역’(’19. 5. ~ ’20. 5.) 최종보고회 5월 중 예정

- 10개 혁신도시에 대한 성과분석 및 발전전략 검토 마무리

- 최근 이해찬 더불어민주당 대표는 총선 이후 공공기관 지방이전 시즌 2 본격화를 발표하였으나, BH 및 국토부는 특이 동향 없음.

□ 앞으로 대응전략

❍ 충남혁신도시 지정 추진(국가균형발전위원회 심의 준비)

- ’20. 7.~8월 지정 신청, 하반기 혁신도시 지정 목표 추진

* (심의자료) 지정 필요성, 개략적인 입지, 혁신도시 발전 전략에 관한 사항

❍ 수도권 소재 이전대상 공공기관 분석(148개 기관 전수조사)

- 종사자수, 예산액, 지역산업과의 연계성, 기관이전에 대한 적극성, 잔류가능성 등 배점기준에 의해 평가

- 충남혁신도시를 대표할 수 있는 대형 공공기관 2~3개를 선정하고 지역산업 연계 및 파급효과가 큰 기관(20개) 선정 추진

참고		내포문화권 지역개발사업(구,특정지역) 현황(거점육성형 33개소)

(단위 : 백만원 )

사 업 명		위치	기투자액 (`19년 까지)	2020년 예산	사업비(백만원)				추진 현황	비고
					총사업비	국비	지방비
							도비	시군비
총 계 (33개 사업)			293,721	6,660	455,210	185,878	121,275	148,057	-	-
정신문화 창달부문			4,080		11,154	2,210	3,421	5,523
1	결성농요전수관	홍성	3,350	-	4,664	-	1,626	3,038	진행	문화유산
2	한성준 민속무용 전수관	홍성	730	-	6,490	2,210	1,795	2,485	진행	문화정책
역사문화유적정비부문			231,789	6,660	382,288	144,550	101,074	136,664
1	보령 충청수영성 정비	보령	11,938	-	38,000	26,600	5,700	5,700	진행	문화유산
2	보령 성주사지 정비	보령	1,270	-	11,500	8,050	1,725	1,725	진행	문화유산
3	남포읍성 정비	보령	776	1,560	15,000	-	7,500	7,500	진행	문화유산
4	아산 공세곶고지 발굴정비	아산	2,950	-	28,293	-	14,146.5	14,146.5	진행	문화유산
5	서산 보원사지 정비	서산	16,797	-	20,625	12,862	2,633	5,130	진행	문화유산
6	서산 해미읍성 정비	서산	36,626	-	36,626	15,409	4,371	16,846	완료	문화유산
7	서산 천주교 순례지 정비	서산	5,229	-	5,229	500	-	4,729	완료	문화유산
8	서산 개심사 정비	서산	2,896	-	2,896	1,426	623	847	완료	문화유산
9	명종대왕태실 및 비 정비	서산	20	-	1,000	-	500	500	진행	문화유산
10	당진면천읍성 복원정비	당진	19,811	2,000	29,200	5,120	9,320	14,760	진행	문화유산
11	당진 합덕제 정비	당진	13,793	1,600	20,000	2,500	5,640	11,860	진행	문화유산
12	남이홍 장군묘 일원 및 일가유품 정비	당진	510	120	8,000	4,000	2,000	2,000	진행	문화유산
13	당진 안국사지 발굴 정비	당진	870	-	2,730	1,911	409.5	409.5	진행	문화유산
14	당진포진성 복원정비	당진	220	-	4,000	-	2,000	2,000	진행	문화유산
15	소난지도 의병총정비	당진	-	-	2,000	1,000	-	1,000	진행	문화유산
16	홍주성 복원 정비	홍성	56,496	-	60,794	39,706	8,418	12,670	진행	문화유산
17	김좌진 생가지 성역화	홍성	5,822	200	17,159	2,655		14,504	진행	문화유산
18	성삼문선생 유허지(노은서원)정비	홍성	832	-	2,472	200	904	1,368	진행	문화유산
19	홍성 결성읍성 정비	홍성	1,102	-	3,430	110	1,660	1,660	진행	문화유산
20	홍성 임득의장군묘 정비	홍성	410	-	1,760	110	825	825	진행	문화유산
21	김복한선생 유적지 정비	홍성	38	-	2,928	-	1,445	1,483	진행	문화유산
22	서천장암진성정비	서천	-	-	4,880	-	2,440	2,440	진행	문화유산
23	한산읍성정비	서천	1,000	880	3,810	-	1,905	1,905	진행	문화유산
24	임존성 복원정비사업	예산	3,461	-	7,734	4,024	1,115	2,595	진행	문화유산
25	가야사지(남연군묘)발굴 및 정비	예산	1,000	300	4,300	-	2,150	2,150	진행	문화유산
26	내포보부상촌	예산	47,922	-	47,922	18,367	23,644	5,911	진행	건설정책
기반시설확충부문			57,852		61,768	39,118	16,780	5,870
1	명종대왕태실 진입도로	서산	-	-	2,000	-	-	2,000	진행	문화유산
2	서산 천주교 순례길	서산	2,400	-	2,400	1,200	-	1,200	완료	관광진흥
3	간월호 관광도로	서산	49,488	-	49,488	33,958	15,530	-	완료	건설정책
4	당진 버그내 순례길	당진	4,084	-	6,000	3,960	500	1,540	진행	관광진흥
5	대련사 진입도로	예산	1,880	-	1,880	-	750	1,130	완료	건설정책

※ 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
건 설 교 통 국	국장	지방부이사관	박연진	2019. 7. 15.
건설정책과	과 장	지방기술서기관	이남재	2020. 1. 1.
	스마트혁신도시팀장	지방시설사무관	윤종한	2019. 7. 1.
	지역발전팀장	지방시설사무관	여형구	2019. 7. 1.

해 양 수 산 국

Ⅰ. 가로림만 국가해양정원 조성

◈ 해양생태환경의 보전가치가 높은 가로림만에 국가해양정원을 조성

- 천혜의 생태적 가치를 보전‧관리하면서 글로벌 해양생태관광 거점 구축

□ 사업개요

○ 위  치 : 서산 및 태안 가로림만 일원(159.85㎢)

○ 기  간 : 2019~2023(예타선정 및 사업착수), 2024~2030(조성 및 운영)

○ 사업비 : 2,715억(국비70% 지방비 30%)

○ 내  용 : 가로림만 해양생태복원 및 국가해양정원 조성

-  (건강한 바다환경) 국가해양정원센터, 갯벌 생태계 복원, 갯벌정원 등

-  (해양생태 관광거점) 해양생태학교, 점박이물범전시홍보관, 등대정원 등

-  (지역경제 활성화) 둘레길, 화합의 거리, 지역특산물 판매, 식도락거리 등

□ 추진현황

○ ’19. 6. 대통령 지역공약 반영 / 해수부 해양신산업 혁신전략 포함(’19.7)

○ ’19. 12. 국토부 제5차 국토종합계획(’20~’40) 가로림만 해양정원 포함

○ ’19. 12. 기재부 2019년 4차 예비타당성조사 대상사업 선정

○ ’19. 12. 가로림만 국가해양정원 예타 대응전략수립 용역 착수

○ ’20.  3. 가로림만 해양정원 국가사업화 기반구축 위탁협약(어촌어항공단)

○ ’20.  4. 예타기관 대상 사업설명 영상회의 개최

○ ’20.  5. 가로림만 해양정원 예비타당성조사 현장실사

□ 문제점 및 대책

○ 사업특성상(환경‧문화) 예타 조사시 경제성 분석(B/C)이 낮을 것으로 예상

되지만, 정책성 평가(AHP) 등에서 좋은 결과를 얻을 수 있도록 총력 대응

- 또한, 경제성 확보를 위한 추가 편익 산출 방안 등 발굴

⇨ 대국민 홍보, 결의대회 및 해양생태가치 계량 등을 통한 편익증대 노력

□ 향후 추진계획

○ 가로림만 결의대회 개최(6월), 기재부(재정사업평가위원회) 적극대응으로

’20년 하반기 예비타당성 조사 통과에 주력

참고 1	가로림만 해양정원 사업규모 및 주요사업

핵심전략	주요사업	면 적	내 용	사업비 (억원)
	소 계			2,715
건강한 바다환경	해양 정원센터	47,600㎡	해양보호구역 및 해양정원 총괄 관리지역 해양보호생물에 대한 보호,연구,교육 시설	1,098
	오지리 갯벌 생태계 복원	약21만	오지리 육상양식장 생태복원을 통한 갯벌해양생태계 복원사업	100
	갯벌정원	약 100만㎡	가로림만 갯벌, 습지자원을 활용한 해양생태정원 (6개소)	26
해양생태 관광거점조성	가로림만 생태학교	4,232㎡	가로림만의 해양 및 생태를 교육하는 체험·학습시설	47
	점박이물범 전시홍보관	1,681㎡	점박이물범 관련 전시 및 홍보, 교육을 위한 시설	68
	해양문화예술섬	56,000㎡	가로림만의 자연환경과 어우러진 문화예술전시공원	274
	예술창작공간	2,360㎡	지역 예술인을 위한 창작 ·전시공간	28
	해양힐링숲	연장 2km	가로림만 둘레길과 연계한 해양형힐링공간	59
	등대정원	1,700㎡	가로림만 진입부를 상징하는 등대정원	151
	가로림만 전망대	1,000㎡	가로림만과 서해를 조망할 수 있는 전망시설	4
지역경제 활성화	가로림만 둘레길	연장 128km	가로림만 해안을 연결하는 생태탐방로	564
	화합의 다리	350m	서산시와 태안군을 연결하는 지역협력 상징 보행교	224
	식도락 거리	815m	가로림만 지역의 특산물을 맛보고 체험할 수 있는 로컬푸드 테마거리 조성	25
	생태탐방뱃길	선박2척	가로림만 주요 항구를 연계하는 생태탐방뱃길	17
	가로림만 투어버스	버스4대	가로림만 전체를 둘러볼 수 있는 친환경 투어버스	25
	브랜드 및 상품개발	용역1식	가로림만 공동브랜드 개발 및 관광 / 산업 / 서비스 등 지역 통합상품 개발	5

※ 가로림만 해양정원 연계사업(현황 및 향후추진)

주요사업	내 용	사업비 (억원)	비 고
소 계		1,147
솔감저수지 하구 복원	솔감저수지 해수유통을 통한 해양생태계 복원사업	715	예타통과 후 별도추진
고파도 갯벌 생태계 복원	고파도 폐 염전 생태복원을 통한 갯벌 해양생태계 복원사업	67	공사 중
웅도 갯벌 생태계 복원	웅도 내 갯벌생태계 복원을 위한 해수유통 교량 설치	153	기본계획 수립 중
환경기초시설	수질환경 및 연안 오염원 관리를 위한 수질정화시설	105	향후 별도추진 (30년~)
유인도서 경관개선사업	가로림만 유인도서 내 전신주, 통신주 등이 없는 경관개선사업 추진	107

참고 2	가로림만 해양정원 종합계획도

※ 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
해양수산국	국장	지방부이사관	한준섭	2019. 7. 1
해양정책과	과장	지방서기관	심준형	2019. 7. 12
	해양생태복원팀장	지방시설사무관	이성남	2020. 1. 21

Ⅱ

도교육청 소관 주요업무 추진상황

1. 기획국

기 획 국

Ⅰ. 내포신도시 교육여건 개선

공동주택 개발에 따른 적기 학교 신설을 통한 과밀학급 해소 등
교육여건 조성과 입주민 정주 여건 도모

1

현황

□ 학교용지 시설결정 현황

구분	총세대	설립완료					설립예정
		유	초	중	고	계	유	초	중	고	계
예산	16,572		1	1	1	3	1	1			2
홍성	23,288	2	2	1	1	6		2	1		3
계	39,860	2	3	2	2	9	1	3	1	0	5

□ 학교설립 현황(유 2원, 초 3교, 중 2교, 고 2교)

(기준 : 2020. 5월 현재)

지역	학교명	설 립 연 월	학 급				학생수
			일반	특수	유	계	일반	특수	유	계
홍성	내포유치원	2015.03.		1	6	7		2	114	116
홍성	가람유치원	2017.03.		1	12	13		2	230	232
2 개원				2	18	20		4	344	348
홍성	내포초	2013.03.	48	1	3	52	1,402	5	61	1,468
홍성	한울초	2016.09.	36	2	3	41	927	14	60	1,001
예산	보성초	2018.03.	8	1	3	12	178	4	56	238
3 개교			92	4	9	105	2,507	23	177	2,707
홍성	내포중	2013.03.	29	1		30	869	6		875
예산	덕산중	2018.09.	11	1		12	310	4		314
2 개교			40	2	0	42	1,179	10	0	1,189
홍성	홍성고	2016.03.	30	3		33	788	18		806
예산	덕산고	2019.03.	11	2		13	266	9		275
2 개교			41	5	0	46	1,054	27	0	1,081
계 : 2개원 7개교			173	13	27	214	4,740	64	521	5,325

2

문제점

□ 과대 학교와 과밀 학급 운영

❍ 2012년부터 내포신도시 공동주택 개발에 따라 유입되는 학생 배치를 위하여 홍성지역에 2013년 내포초와 내포중, 2016년에 한울초 신설

<학생수 증가 추이>

구분	2013		2016		2018		2020		비고
	학급수	학생수	학급수	학생수	학급수	학생수	학급수	학생수
내포초	8 (3)	161 (65)	45 (4)	1,227 (100)	49 (3)	1,370 (61)	49 (3)	1,407 (61)	‘13.3.1.개교
한울초			18 (3)	379 (59)	34 (3)	825 (60)	38 (3)	991 (60)	‘16.9.1.개교
내포중	4	81	20	515	30	872	30	869	‘13.3.1.개교

※ (  )는 병설유치원

❍ 당초 학교설립 계획 수립 시 예측한 학생유발률 보다 많은 학생 유입과 2022년도 이후 4,262세대(초 317명, 중 122명) 입주 예정으로 홍성지역 초·중학교의 과밀학급 운영 예상

3

개선 방안(교육여건 개선)

□ 초등학교 신설 대체 이전(중학교 통합 학교 설립)

❍ 목적

내포지구내 학생배치 종합계획 재수립의 일환으로 인근 초등학교의 신설 대체 이전과 중학교 신설을 통한 초ㆍ중 통합학교 설립으로 내포초와 한울초, 내포중의 과밀학급 해소

❍ 추진 경과

- (2020.1월) 홍북초 신설대체 이전 학부모 투표 : 부결

- (2020.2~4월) 초ㆍ중 통합 이전 신설 후 중학교 분리 요청 민원 제기

- (2020.4월) 초등학교 이전 및 중학교 통합 신설 관련 협의회 개최

∙ 학부모 투표를 등교 개학 이후에 직접투표(우편투표 병행) 실시 등

❍ 추진 계획

- (2020.5.21.) 교육부 등과 초등학교 신설 대체 이전 및 중학교 통합 학교 설립에 대한 타당성 컨설팅 실시

- (2020.5월중) 등교 개학 후 학부모 설명회 및 학부모 투표 일정, 장소 등 결정

- (2020.6~8월) 학부모 투표 결과 및 교육부 컨설팅에 따라 자체투자심사 및 중앙투자심사 추진

□ 내포중 과밀학급 해소 및 덕산중 적정규모 학급 육성

❍ 목적

- 내포중학교 과밀학급 해소를 통한 학생의 학습권 보장

- 내포신도시로 이전한 덕산중학교의 적정규모 학급 조기 정착과 홍성ㆍ예산지역 상호 균형발전 도모

❍ 추진 내용

- (시내버스 증차) 예산군과 협의를 통한 시내버스 노선 증차

(통학시간 내 오전·오후 각 2회 운영)

- (학구조정) 2019학년도부터 내포학구 졸업생 중 희망자 덕산중학교 배정 가능(일방향)

- (통학차량 지원) 덕산중학교 통학차량(2대) 한시적 운영

4

향후 계획

❍ 도의회와 학부모, 지역주민 의견을 수렴하여 내포신도시내 학교 신설 대체 이전 등 교육여건 개선 적극 추진

❍ 교육부 등 학교설립 심사 유관 기관과 유기적인 협력을 통한 내포지구내 교육여건 개선 사항에 대하여 적극적인 의견 개진

첨부 1		내포신도시 학교시설 결정 현황 배치도

첨부 2		홍북초중 통합학교 신설 대체 이전 관련 개발 현황

홍북초중통합학교

※ 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
기획국	국 장	지방부이사관	유홍종	2019. 7. 1.
	학교지원과장	지방서기관	김종신	2019. 7. 1.
	학생배치팀장	지방교육행정사무관	최상렬	2020. 1. 1.