D-213

	제317회 충청남도의회 임시회 문화복지위원회[’20. 2. 18.(화) 10:00]

2020년도 주요업무 계획 보고

	계룡세계군문화엑스포 조 직 위 원 회

보 고 순 서

		Ⅰ. 엑스포 개요 [1] 추진 배경 1 [2] 행사 개요 1 Ⅱ. 그동안 추진상황 2 [1] 총 평 2 [2] 추진상황(완료) 3 Ⅲ. 향후 추진계획 6 [1] 세부 추진계획 6 [2] 엑스포 프로그램(안) 11 [3] 전시관 조성·운영(안) 12 Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황 13 Ⅴ. 참고자료 15 [1] 조직위 기본현황 15 [2] 조직위 임원 현황 및 간부 명단 17 [3] 행사장 조감도 및 상징마크 등 18

Ⅰ. 엑스포 개요

[1] 추진 배경

❖ 3軍 본부가 위치한 “국방수도” 계룡시의 특성을 살려

- 세계軍문화의 다양한 가치 공유 및 평화수호자로서 軍의 위상 향상

- 세계 유일의 분단국인 한반도에서 평화와 화합의 메시지 전달

- 6.25 전쟁을 딛고 일어선 대한민국 위상 제고와 지원국에 대한 보은

❖ 세계 軍문화 교류를 통한 軍문화의 긍정적 가치 공유 · 확산,

한반도 평화 · 번영 기원 및 세계 평화와 화합의 장 실현

[2] 행사 개요

❍ 행 사 명 : 2020 계룡세계軍문화엑스포

(2020 Gyeryong World Military Culture EXPO)

❍ 기     간 : 2020. 9. 18.(금) ~ 10. 4.(일), 17일간

❍ 장     소 : 충남 계룡시 일원 (계룡대 비상활주로 일원 / 330천㎡)

❍ 주최/주관 : 충청남도 · 계룡시 / 계룡세계군문화엑스포조직위원회

❍ 주     제 : “K-Military, 평화의 하모니”

❍ 관람목표 : 총 131만명  (내국인 124만, 외국인 7만)

❍ 사 업 비 : 155.4억원 (국비 28억, 도비 56.4억, 시비 38억, 자체재원 33억)

❍ 행사내용 : 공식행사 (개장식, 개막식, 폐막식), 전시행사 (세계평화관,

한반도희망관, 대한민국국방관, 세계군문화생활관, 군과학화

체험관, 미래관, 지역산업관)

❍ 후 원 (11) :  국방부, 국가보훈처, 교육부, 통일부, 문화체육관광부, 중소벤처

기업부, 산업통상자원부, 방위사업청, 한국관광공사, NH농협

은행, 중소기업중앙회

Ⅱ. 그동안 추진상황

[1] 총 평

□ 그 동안

○ 각종 행정절차 이행 완료, 금년은 본격적인 행사 준비 기반 마련

- 사업비 증액 및 행사기간 연장을 위한 중앙투자심사 완료 등

○ 국방부 엑스포지원단 발족, 조직위와 軍의 협력시스템 구축

- 국방부장관＋조직위원장(충남도지사) 間 업무협약(’18.12.17.)

- 국방부 소속 ｢계룡세계군문화엑스포지원단｣ 구성(’20.1.2.) 등

○ 충청권 시·도지사 및 교육감 등과 협력기반 마련 및 다양한 홍보

- 대전·세종·충남·북 교육청(’19. 12.) 및 시·도와 MOU(’20. 1.)

- 주관방송사 선정(대전KBS) 및 각종 계기성 홍보(30여회)

- 기업체 후원(NH농협은행 3억원[’20.1.], 중소기업중앙회 3천만원[’20.2.])

□ 앞으로

○ 세계 최초 군문화 엑스포 위상에 맞는 Program 준비·운영

- 위원총회 자문 등을 통해 다양하고 독특한 전시연출  및  프로그램 운영

- 상징조형물 및 킬러컨텐츠 등 국민이 공감하는 차별성 있는 행사 준비

○ 외국군악대, 국방수교국 등 초청으로 세계적인 군문화 EXPO로 승화

- EXPO 성공의 필수요건인 국방부와의 소통과 협력

○ 범도민협의회 및 범시민협의회 등 도민이 함께하는 EXPO로 자리매김

○ 다양한 매체를 활용한 다각적 홍보로 국 ․ 내외 관람객 유치

○ 특히, 각종 안전사고 Zero율 추구로 안전한 엑스포가 되도록 준비

⇨ 평화 · 화합 · 번영의 희망과 감동이 있는 EXPO로 성공

[2] 추진상황 (완료)

□ 추진체계 구축

2016. 7.	•『2020계룡세계軍문화엑스포』국제행사심사위원회 개최 - 심사결과(98억원,10일) : “정부 승인”(기재부)
2017. 9.	• 조직위원회 사무처 발족
2018. 12.	• 국방부 업무협약(MOU) 체결 (도지사 + 장관) - 엑스포 조직위 및 국방부간 협력 · 지원사항 합의
2018. 12.	• 김진호 민간조직위원장 위촉 (現대한민국재향군인회장)
2019. 3.	• 사업계획 변경 - 행사기간 : 10일간→17일간, 사업비 : 98억원→155억원 - 중앙투자심사위 개최 (’19. 3.) ⇒ 결과 : 승인(행안부)
2019. 7.	• 위원총회 구성 - 구성 : 관련 학문, 전문지식, 경험이 풍부한 인사들로 구성 - 인원 : 26명 (당연직 9 [위원장 3, 이사 6], 전문가 등 17) ※ 자문위원회 73명 임기만료(’19. 6.)에 따라, 정관에 의거 신규 위촉
2019. 7. ~	• 대행사 선정 (일괄계약 턴키방식 발주 / 조달청 의뢰) - ㈜ 유니원커뮤니케이션즈(계약체결, ’19.12.) / 세부실행계획 수립 中
2020. 1.	• 국방부 엑스포지원단 발족 - 단장(육군 준장) / 1단계(9명) : ’20.1.~3. / 2단계(24명) : ’20.4.~11. - 관람료 등 자체재원 협의 완료 및 軍 프로그램 협의 中
2020. 1.	• 부지사용 승인 (국방부 충청시설단) - 승인조건 : 영구시설물 축조 금지 및 행사 후 원상복구 - 임 대 료 : 공시지가 변경 고시 후, 임대료 산정 (’20. 5.)

□ 자체재원 확보 : 총 33억원 목표(관람료 23, 후원 ·협찬 5, 광고 2, 임대 2, 휘장 1)

① 관람료 확정(’19.11.20. / 제10차 이사회)

대 상 (국 내․외인 동일)		관 람 료 (원)			할인 내용
		권 종	요 금	지역상품권 반환
일 반 인		현 장	6,000	3,000 (50%)	※ 현장권 1천원 할인 - 만65~74세 - 기초생활수급자 등 ※ 무료 관람 - 국가유공자, 75세 이상 - 장애정도 1~3급 - 현역 사병 등
		예 매	5,000	2,500 (50%)
학생	중 ․ 고 생	현장/예매	3,000	1,000 (단일권)
	초 등 생	현장/예매	2,000

-  관람료 인터넷 판매 (사전 예매) 기반 구축 : 티켓링크와 계약 (’20.1.)

-  지역상품권 정산대행 협약 체결 (’19.12. / NH농협계룡시지부·논산계룡농협)

② 후원 ․ 협찬

-  NH 농협은행 후원금 3억원 기탁 : ’20. 1. 6.

-  중소기업중앙회 대전세종충남지역본부 MOU 및 3천만원 기탁 : ’20. 2. 10.

③ 휘장업체 : SR기획 (’20. 1. 계약), 계약금 (21백만원), 런닝개런티 (매출액의 5%)

□ 관람객 유치 및 홍보

① 관람객 유치 등을 위한 MOU
-  충남도교육청(’19. 9.), 충청권(대전․세종․충남․충북) 시․도 교육청(’19. 12.)

※ 전국 교육지원청 (107개소) 방문 홍보 및 각 급 학교 행정게시판 홍보 협조 (’20. 2.)

-  충남도 대학 및 지역인재육성지원협의회 (’19. 12.), 충청권 4개 시·도지사 (’20. 1.)

② 각종 계기성 홍보 (30여회)

-  전국 단위 및 도내 주요 행사·회의, 추석·설 맞이 고속도로 휴게소 등

③ 외국관람객 유치

-  UN 평화유지국 홍보부스 운영 협의, 국제한국전참전 연맹 총회 2020년

한국 개최 및 미국재향군인회 회장단과 가족 엑스포 방문 건의 등

④ 기타

-  주관방송사 선정(대전KBS) 및 업무협약(MOU) 체결 : ’20. 1.

-  前 한미연합사령관, 주한외국공관(대사 등) 국방부 기자 등 홍보 : ’19. 12.

-  홈페이지 개편 ․운영, 홍보동영상 제작 (유튜브 Posting, 계룡시 야외전광판(2곳) 송출)

-  한·미연합사령관, 주한미대사 방문 엑스포 홍보 및 협의 : ’20. 1.

□ 교통대책 : 도로 개설 및 확 ․ 포장

사 업 명	사 업 량	추 진 상 황	비 고
신도안 ~ 세동 광역도로 개설	□ L = 1.96km (계룡 1.24km, 대전 0.72km ) □ B = 20m	□ 사 업 비 : 222억원 (국 111, 도 37, 계룡 37, 대전 37) □ 사업기간 : ’19. 9. ~ ’21. 3. ※ ’20. 9 : 임시 개통	착공 및 공사 中
공군기상단 삼거리 ~ 괴목정 도로 확장	□ L = 2.09km □ B = 10m → 20m ( 2 → 4차선 )	□ 사 업 비 : 87억원 (국 8, 도 13, 시 66) □ 사업기간 : ’19. 8. ~ ’20. 8.	착공 및 공사 中
행사장 진입도로 및 보도정비 사업	□ 계룡IC ~ 행사장 (L=5.8km)	□ 사 업 비 : 17억원 (도 8.5, 시 8.5) □ 사업기간 : ’20. 3. ~ ’20. 8.

⇨ 엑스포 개최 前 인 ’20. 8월까지 도로 개설 ․ 확장 ․ 정비 되도록 최선

□ 기  타

➀ 해외군악대 초청 : 8 ~ 9개국 목표

구 분		계	대 상 국 가	비 고
참여 표명 (9개국)	참 가 확 정	8개국	영국, 프랑스, 말레이시아, 태국, 러시아, 필리핀, 네팔, 미국 (미8군)
	未확정	1개국	인도	협의 中
추가 (2개국 )	未확정	2개국	캐나다, 네덜란드	협의 中

② 후원명칭 사용 동의 : 11개 기관 (’20. 2.현재)

- 국방부, 국가보훈처, 교육부, 통일부, 문화체육관광부, 중소벤처기업부,

산업통상자원부, 방위사업청, 한국관광공사, NH농협은행, 중소기업중앙회

③ 회장관리

- EXPO 행사장 시설물(전시관, 게이트, 주·보조무대, 휴게존 등) 배치(안) 마련

- ｢전기통신 및 행사장 조성 설계용역｣ 추진 中 ( ’19. 12. ~ ’20. 3.)

④ 2019 군문화 정책토론회 개최 (’19. 9. 용산전쟁기념관, 1천여명 참석)

- ｢2020계룡세계軍문화엑스포｣의 발전방향 및 중장기 역할 제시

Ⅲ. 향후 추진계획

【1】세부 추진계획

□ 관람객 유치 및 홍보

관람객 유치 목표 : 단체관람객, 충청권, 초·중·고교 타겟 중심

		내국인 : 124만명(단체 52만, 학생단체 32만, 개인 40만)
- 유형별 (131만명)
		외국인 : 7만명(외국거주1.5만, 국내거주4.1만, 유학생1.4만)

❍ 단체관람객 유치 및 붐업 조성을 위한 MOU : ’19. 9.~ 12.
-  충남교육청(’19. 9. 6.), 대전․세종․충남․충북도 교육청(’19. 12. 11.)

-  충청남도 대학 및 지역인재육성지원협의회 (’19. 12. 13.)

-  대전․세종․충남․충북도 4개 시·도지사 (’20. 1. 16.)

❍ 국방홍보원 방문 업무협의 (’19. 3.) 및 각종 계기성 홍보 (30회)

❍ 미국, 캐나다 국방관계자 엑스포 홍보 실시(조직위원장) : ’19. 7. ~  8.

-  UN 평화유지국, 국제한국전참전연맹총회, 미국재향군인회 등

❍ 前 한미연합사령관, 주한외국공관(대사 등) 국방부 기자 등 홍보 : ’19. 12.

❍ 홈페이지 개편 , 홍보동영상 제작 (Youtube Posting, 계룡시 야외전광판 2곳 송출)

❍ 주관방송사 선정(대전KBS) : 업무협약(MOU) 체결(’20.1.30.)

앞으로
			• 국제홍보 기반 구축 (국제한국전참전연맹 등 11개 기관) : ’19. 7. ~ • 공립유치원·초·중·고등학교 안내 공문 발송(16,500여곳) : ’20.2. • 팸투어, 언론, 방송 · 옥외 광고, SNS, 유튜브 등 집중 홍보 : ’20.2.~ • 엑스포 홍보대사 확정 : ’20. 2.(위촉식 : ’20.3) • 도내 15개 시장 · 군수 MOU (충청남도 지방정부회의 時) : ’20.3.18. • ’20년 충청향우회 정기총회 엑스포 홍보 (서울 63빌딩) : ’20. 4월中

□ 회장관리

❍ 회장 기반시설 및 조경 : 설계용역 중

- 상·하수도 관로, 교통안전시설(라바콘, 주정차금지시설), 가스

공급 시설, 폐기물 처리, 가설울타리 등

- 쉼터(벤치, 파고라 등), 꽃탑, 조형물, 포토존, 초화류 등 식재

- 비상발전기, 조명등, 전기선로, 분전함, 전열시설 등

- 전화설비, LAN설치, 방송설비, CCTV, 인터넷선 · 전화회선 설치 등

※ 구역별로 다양한 휴게존을 운영하여 관람객들의 휴식과 편의 도모

※ 설계용역 조기 완료 후 조기 착공 및 준공으로 시행착오 최소화

❍ 인력운영

- 자원봉사자 : 1일 100명(안내 · 통역 등), 道 · 市 지원 인력 : 1일 180명

※ 자원봉사자 모집 인원 : 400명

- 행사진행요원 : 1일 43명(분야별), 도우미 : 1일 31명(의전 · 방송 등)

- 경비요원 : 1일 14명(잡상인 단속 등), 환경요원 : 1일 20명( 화장실 등 )

❍ 안전대책

- 행사장 119안전센터 운영, 임시파출소 설치, 현장 · 체험 사고 대책,

폭발 사고 대책, 전염병 예방 등 13개 분야 대책 수립

- 소방 안전교육, 비상대비 유관기관 (경찰서, 한전, KT 등) 협조체계 구축

❍ 주 차 장 : 기존 주차장 정비 및 軍 · 계룡시 협의를 통한 확보

조성면수	기존 활용	신규 조성	예비확보
	활주로 + 계룡시내	인쇄창 삼거리 등	입암산단 등
19,068	8,204	8,165	2,699

앞으로
			• 안전관리분야 유관기관 업무협의, 인력운영 방안 수립․착수 : ’20. 3. • 일부 전기, 통신공사 등 개별발주 및 회장조성 본격화 : ’20. 3.

□ 교통대책

❍ 도로 개설 및 확 · 포장

사 업 명	사 업 량	추 진 상 황	비 고
신도안 ~ 세동 광역도로 개설	□ L = 1.96km □ B = 20m (계룡 1.2km, 대전 0.7km )	□ 사 업 비 : 222억원 (국 111, 도 37, 계룡 37, 대전 37) □ 사업기간 : ’19. 9. ~ ’21. 3. ※ ’20. 9 : 임시 개통	착공 및 공사 中
공군기상단 삼거리~ 괴목정 도로 확장	□ L = 2.09km □ B = 10m → 20m ( 2차선 → 4차선 확장 )	□ 사 업 비 : 87억원 (국 8, 도 13, 시 66) □ 사업기간 : ’19. 8. ~ ’20. 8.	착공 및 공사 中
행사장 진입도로 및 보도정비 사업	□ 계룡IC~행사장 (L=5.8km)	□ 사 업 비 : 17억원 (도 8.5, 시 8.5) □ 사업기간 : ’20. 3. ~ ’20. 8.

⇨ 엑스포 개최 前 인 ’20. 8월까지 도로 개설 · 확장 될 수 있도록 노력

❍ 셔틀버스 운행 : 26대 (軍버스 활용 협의)

순 환 노 선	배 차	운행간격	운영주체	비 고
임시주차장 ⇄ 행사장	10대	20분	軍
계룡역 ⇄ 행사장	6대	30분	軍
현충원 ⇄ 행사장	5대	40분	軍
세종 ⇄ 행사장	5대	40분	조직위	휴일 2대 추가 운행

- 주차장 ↔ 행사장 간 교통혼잡 최소화 및 관람객 교통편의 제공

- 평일 / 휴일 구분, 시간대별 이용인원에 따라 배차 □ 운행 간격 결정

※ 관내 운행 및 시외버스(서울)가 행사장을 경유토록 노선조정 운행 협의

❍ 교통대책 확립 : 「교통대책 실무협의회」 및 「교통상황실」 운영

· 참석기관 : 조직위, 계룡시, 논산경찰서, 공주경찰서, 국방부, 계근단, 유관단체 등

· 교통대책 실무협의, 기관별 임무부여, 교통정보 수집, 주요도로 교통소통 등

앞으로
			• 관계기관 (市, 軍, 경찰서, 운송회사 등) 업무협의 지속 추진

□ 숙식대책

【숙식업체 현황】                                (2020.1.31.기준)

지 역		음 식 점	숙 박 업 소
			개 소	객실수
합 계		19,325	1,292	30,213
계룡시		512	25	712
주변지역	소 계	18,813	1,267	29,501
	논산시	2,225	156	2,364
	공주시	2,423	262	4,136
	부여군	1,071	55	1,292
	대전시 서구	7,296	794 (대전)	21,709 (대전)
	대전시 유성구	5,798

❍ 음식 대책

- 행사장내 및 행사장외 음식점 TWO-TRACK으로 대책 수립

(⇨ 행사장 內 : 조직위 / 행사장 外 : 계룡시 등)

· 행사장내 : 식음인원 · 소요좌석의 예측 · 분석을 통한 식음대책 준비

※ 1일 식음인원 : 6,614명 (77천명/일 ×  8%) / 좌석 : 1,775석 (6,614명 ÷ 회전율 3.7회)

· 행사장외 : 계룡시 및 인접 지자체 음식점 위생 점검, 시설개선 (식탁용)

※ 인근 공주, 논산, 부여 등 도내 음식점 이용 활성화를 위해 적극적으로 홍보

⇨ 향토음식점(추가), 구역별 푸드트럭 · 편의시설 배치로 원활한 식음 편의 제공

❍ 숙박 대책

- 1일 동시 숙박객 약 16,830명 예상 (2인 1실 기준 약  8,415객실 필요)

⇨ 계룡시 인근 시·군에 위치한 시설 및 도내 숙박업체 적극 이용 추진

(계룡시 · 충남도 협력, 엑스포 관람 이용객 인근 유명 숙소 이용안내 홍보 등)

앞으로
			• 계룡시 관내 및 관외 숙식업체에 대한 위생 정기점검 확행 • 업체 자정결의 대회 이행 등 청결한 이미지로 손님맞이 준비

□ 해외군악대 초청 : 8~9개국 목표 (초청 대상국 11개국 / ’20. 1. 현재)

구 분		계	대상국가	비 고
참여의사 표명국가 (9개국)	참가 확정	8개국	영국, 프랑스, 말레이시아, 태국, 러시아, 필리핀, 네팔, 미국 (미8군)
	未확정	1개국	인도	협의 中
추가초청 (2개국)	未확정	2개국	캐나다, 네덜란드	협의 中

앞으로
			• 대상 국가 협의사항 추진 및 초청대상국 확정 : ’20. 2. • 국가별 공식 초청장 발송(초청국 주한대사관, 주한외국대사관 등) • 협연 프로그램 제공, 행사 프로그램 안내 등 : ’20. 4.

□ 국방수교국 및 軍 관계자 초청 : 160개국 500여명

계	6 · 25 전쟁 참전 · 지원국	국방수교국
160개국	63개국 (전투 16, 의료 6, 물자 38, 지원의사표명 3)	97개국 (해외파견 무관 53, 겸임 44)

❍ 軍 관계자 (국가별 국방 장 · 차관 등) : 100명

❍ 보훈가족 (국내 · 외 참전용사 및 가족) : 144명

❍ 기관 · 단체 (세계제대군인연맹, 해외참전용사회, 미국재향군인회 등) : 250여명

앞으로
			• 6 · 25 70주년 사업 연계 국방부, 국가보훈처 등 중앙부처와 행사 연계 및 협력

□ 자체재원 확충 : 33억원 (관람료 23, 후원 ·협찬 5, 광고 2, 임대 2, 휘장 1)

❍ 지역산업체, 방산업체 등과 후원 · 협찬 추진

❍ 카드결제 가능 기반 마 련 및 휘장상품 개발 中

앞으로
			• 기업·기관 후원, 협찬 및 광고사업 협약 : ’20. 1. ~ • 관람권 사전예매 개시 및 예매권 배부 : ’20. 3. ~ • 휘장상품 개발 (’20. 1. ~ 4.) 및 판매 실시 (’20. 6. ~ 10.)

【2】엑스포 프로그램(안)

분 야 (7)

프로그램(41)

사전행사

·  D - 100 행사 : ’20.6.10. / 대전 / 야구장홍보 및 시구

· D - 30 행사 : ’20.8.19. / 계룡시청 / 라디오 공개방송

공식행사

· 개장식 : ’20. 9. 18 (09:00~11:00) / 개장세레모니

· 개막식 : ’20. 9. 18 (17:00~21:00) / 평화선언문 선포

· 폐막식 : ’20. 10. 4 (18:00~20:00) / 하이라이트 영상

공연행사

· 세계 군악대 공연, 엑스포 주제 공연, 로드

퍼포먼스, 프린지 공연 등

공

체험행사

· 야외 군장비 전시, 탑승 체험, 병영훈련 체험,

가상현실 사격 체험, 전투장비 분해 · 결합,

육군․해군 · 공군 · 해병대 체험 프로그램 등

경연·부대행사

· 기동훈련, 계룡산 안보등산, 계룡대 영내투어, 군식(食)

조리 경연대회, 국제드론 레이싱 대회, 밀리터리

댄싱 경연대회, K-Military댄싱경연대회, 전국

평생교육 동아리 경연대회 등

특별행사

· 육군의 날, 해군의 날, 공군의 날, 해병대의 날,

충청남도 시·군의 날, 한가위 행사 등

학술 및

국제회의

· 계룡세계평화포럼

※ 세부실행계획 수립 과정에서 프로그램 중 일부는 조정할 예정

※ 최고 Quality의 프로그램 운영과 완벽한 연출·공연을 위해 최선의 노력

【3】전시관 조성·운영(안) : 3개 Zone 7개 관

			① 세계평화관		주제 :『빛으로 밝히는 세계』
					어둠 속의 기억 : [전쟁의 슬픔] 어둠을 밝히는 빛 : [평화를 위한 노력] 빛으로 물들다 : [PKO활동], [평화의 메시지] 등
			② 한반도희망관		주제 :『평화의 길을 연결하다』
					세계평화의 중심, 한반도 평화의 길을 연결하다 다시 시작! 희망 한반도
주 제 Zone
			③ 대한민국국방관		주제 :『대한민국 국군을 경험하다』
					국군홍보 Zone : [3군 및 해병대 홍보관] 전국 부대 및 軍 관련 학교 소개
			④ 세계군문화생활관		주제 :『전시와 체험이 담긴 군복합문화공간』
					한국전쟁 당시 참전국 활약상 전시 한국전쟁 참전국 군의 의식주 체험 대한민국 軍의 의·식·주 체험
국 방 체 험 Zone
			⑤ 군과학화체험관		주제 :『軍의 과학화 전시·교육 및 체험』
					장비전시 Zone : [軍의 과학화 훈련장비 전시] 체험교육 Zone : [체험을 위한 안전교육 등] 체험 Zone : [현장감 있는 실내외 체험]
			⑥ 미래관		주제 :『軍과 新기술의 만남』
					세계 방위산업 트렌드 Zone 첨단기술의 발전 Zone 4차산업 Zone
산 업 Zone
			⑦ 지역산업관		주제 :『충청남도의 미래를 만나다』
					산업 Zone : [일반산업 전시의 공간 연출] 홍보 Zone : [충청남도와 계룡시 홍보]

※ 다양하고 풍부한 자료 확보 및 컨텐츠 사전 검증으로 국민이 공감하는 전시관 운영

※ 전시관 구성시 영유아, 노약자, 장애인 등 동선 고려 등 세심한 배치

※ 엑스포 개최 후, 활용가능한 전시콘텐츠는 市 · 軍 등에 이관 및 영구 활용

Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황

□ 2019년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황

< 총  괄 >

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
시정요구
처리요구	4	2	2	-	-
제안사항

< 추진완료 >

① 업무추진비 현금 지급 기준 검토(처리요구)

- 지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙[행정안전부령 제1호, 2017. 7. 26.] 제3조제1항과 관련하여 지방자치단체의 장 등 업무추진비

집행대상 직무활동 범위에 군부대 위문금 지급 가능 (한도액 기준 없음)

- 군부대  위문금은 3軍의 지원을 이끌어내기 위하여 협력 초기에 위문금을 집행한 사항으로 향후, 위문금 지급시에는 다양한 여건 검토 및 적정한 금액을 산정하여 투명하게 집행할 예정

② 군문화엑스포 방문객 유료화 관련 軍과 합의안 도출(처리요구)

- 계룡세계군문화엑스포는 관람료 23억원 등 자체재원 33억원의 확보방안을 전제로 정부승인을 받은 국제행사이므로 원활한 행사 개최 및 진행을 위해 관람료 유료화에 대한 軍과 적극적인 협의 · 협조 필요

- ❶ 국방부(3군 포함)관계자와의 지속적 실무협의 시 관람료 유료화 당위성 피력 (세부실행계획 용역보고회 3회, 軍과의 실무협의회 6회) ❷ 3軍 참모총장 방문 시 관람료 유료화 등 엑스포 협력 지원 요청 [계룡시장 (’19. 6. 5.) / 도지사 (’19. 6. 19.) / 김진호 위원장 (’19. 7. 3.)] ❸ 국방부장관 면담 시(면담자 김진호 위원장) 입장료 유료화 필요성 전달(’19.11.13)

❹ 엑스포 관람료 결정(안) 의결 : 제10차 조직위 이사회 (’19.11.20.)

※ 일반인 : 6천원, 학생 : 2~3천원, 관람료의 50% 지역상품권 환급

⇨ 국방부 엑스포지원단(’20.1.2.발족) 협의, 용어 정정 및 관람료 징수 수용

※ 입장료 → 관람료, 수익사업 → 자체재원

< 추진중 >

① 행사장 접근 교통망 등의 조기 준공 방안 마련(처리요구)

- 군문화엑스포 개막이 9월인데 행사장 접근 교통망 구축을 위한 광역도로 개설과 도로확장, 보도정비 등 준공과 정비 등이 8월 말로 너무 임박하니 완료시기를 앞당기는 방안 마련

- ❶ 신도안-세동간 광역도로 개설 : ’19. 9월, 공사 착공(보상 및 토공작업 추진 中) ❷ 기상단삼거리~괴목정 도로확장 : ’19. 8월, 공사 착공(벌목 및 토공작업 추진 中) ❸ 행사장 진입도로 및 보도 정비 : ’19. 9월, 설계용역 완료 / ’20. 3. : 공사 착공

- 사업추진부서(계룡시, 대전시)와 협의하여 사업조기 완공을 목표로 통행 및 행사 추진에 지장이 없도록 만전을 기하겠음.

② 관람객 유치목표 달성을 위한 다각적 대책 마련(처리요구)

- 행사기간에 초중고 학생들의 중간고사 기간이 있어 32만명의 유치목표 달성에 어려움 예상되나 대책을 강구하고 전국을 상대로 관람객을 최대로 유치할 수 있는 통로를 다각적으로 마련

- 충남교육청과 MOU 체결(’19.  9.  6.), 충청권(대전‧세종‧충남‧충북) 4개 교육청과 MOU 체결(’19. 12. 11.)

- 전국 교육지원청(107곳) 방문 엑스포 홍보 및 관람지원 요청(’19. 2.)

- 도지사 명의 전국 초·중·고등학교 등 참여 서한문 발송(16,500여곳, ’19.  2.)

- 충청권외 타 시‧도 교육청 대상 홍보 및 MOU 체결 요청

Ⅴ. 참고자료

[1] 조직위 기본 현황

□ 기 구

< 1사무총장 2본부 6부 / 39명 >

< 정 ․ 현원 현황 > 정원 39명 / 현원 38명

부별	계	일 반 직 (정원/현원)								민간인
		고위	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	39/38		1/1	2/2	6/6	10/10	11/11	5/5		4/3
행정관리부	9/8		1/1	1/1	1/1	1/1	2/2			3/2
대외협력부	4/4				1/1	1/1	1/1			1/1
홍보마케팅부	7/7				1/1	2/2	4/4
행사지원부	8/8			1/1	1/1	2/2	2/2	2/2
전시시설부	7/7				1/1	2/2	2/2	2/2
국제협력부	4/4				1/1	2/2		1/1

❍ 충남도 : 18명(3급 1, 4급 2, 5급 4, 6급 이하 11)  / 정원 18명, 현원 18명

❍ 계룡시 : 17명(5급 2, 6급 이하 15) / 정원 17명, 현원 17명

❍ 민간인 :  4명 (총감독 1, 대외협력관 1, 운전원 1, 사무보조 1명 [미채용]) / 정원 4명, 현원 3명

※ 정원 39명 외 軍 출신 보좌관·자문관 3명 별도 위촉

□ 기 능

	- 행정관리부
	❍ 사무처 조직, 인사 관리 및 각종 보고 · 지시사항 관리 ❍ 예산 편성 및 관리, 회계계약 및 지출 · 결산 ❍ 이사회 운영, 재단 정관 및 제규정 관리 등
	- 대외협력부
	❍ 軍 협력 · 지원(국방부, 지상군TF 등) 및 행사 의전 총괄 ❍ 정부 등 대외기관 및 유관기관 협력 ❍ 기관 · 단체 MOU 총괄 등
	- 홍보마케팅부
	❍ 언론보도 및 방송미디어 관리, 홈페이지 구축 · 운영 ❍ 국내·외 단체관람객 유치에 관한 사항 ❍ 입장권 판매, 임대 및 광고사업 등
	- 행사지원부
	❍ 공식행사 및 이벤트 프로그램 운영 ❍ 회장 운영 종합실행계획 수립 및 추진 ❍ 행사 안전관리(교통, 소방 등) 및 회장 운영 물자 관리 등
	- 전시시설부
	❍ 엑스포 행사장 시설 설치 및 전시 ․ 연출 ❍ 건축 · 조경 ․ 전기 · 통신 · 음향시설 설치 및 관리 ❍ 주차장 시설 조성, 복구 및 관리 등
	- 국제협력부
	❍ 국내외 軍 관계자, 군악대 등 초청 · 섭외 ❍ 심포지엄 ․ 국제학술대회 개최 ❍ 미래관 전시업체 유치 등

[2] 조직위 임원 현황 및 간부 명단

□ 조직위 임원 현황

구 분	소 속	직 위	성 명	비고
조직위원장 (3)	충청남도	도지사	양 승 조
	계 룡 시	시 장	최 홍 묵
	재향군인회	회 장	김 진 호
당연직 이 사 (6)	충청남도	문화체육부지사	이 우 성	이사장
	충청남도	기획조정실장	김 하 균
	충청남도	문화체육관광국장	길 영 식
	계 룡 시	부시장	류 재 승
	계 룡 시	정책예산담당관	한 현 복
	계 룡 시	군문화엑스포지원단장	유 원 호

□ 간부 명단

구 분	직 위	직 급	성 명	비 고
조직위원회 사무처	사무총장	지방부이사관	윤 동 현
	총괄지원본부장	지방서기관	양 승 록
	행사운영본부장	지방서기관	김 승 제
	총감독	민 간	전 인 근
	행정관리부장	지방행정사무관	백 승 석
	대외협력부장	지방행정사무관	김 기 영
	홍보마케팅부장	지방행정사무관	박 수 웅
	행사지원부장	지방행정사무관	신 현 무
	전시시설부장	지방시설사무관	석 민
	국제협력부장	지방행정사무관	김 경 희

[3] 행사장 조감도 및 상징마크 등

【 행사장 조감도 】

【 상징마크 및 캐릭터 】

상징마크 (엑스포 행사를 통해 평화와 화합의 장이 대한민국 계룡 에서 새로이 시작됨을 표현)		캐릭터 (비룡이) (비상하는 계룡의 줄임말로 계룡시의 상징인 용을 귀엽고 친밀하게 표현)