	2020. 11. 12.(목) 행정문화위원회

- 2020년도 행정사무감사 -

계룡세계군문화엑스포 추진상황 보고

	계룡세계군문화엑스포 조 직 위 원 회

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 1 □ 기구정원 1 □ 예산현황 1 Ⅱ. 엑스포 개요 2 □ 추진배경 2 □ 행사개요 2 Ⅲ. 그동안 추진상황 3 □ 총 평 3 □ 분야별 추진실적 및 계획 4 Ⅳ. 당면 현안사항 11 Ⅴ. 도의회 관련사항 처리상황 12 【참고 자료】 (1) 엑스포 프로그램(안) 14 (2) 전시관 조성․운영(안) 15 (3) 행사장 조감도(안) 16 (4) 조직위 임원현황 및 간부명단 17

Ⅰ. 기 본 현 황

1	기구․정원

[1사무총장 2본부 6부 / 정원 39명】

공동위원장
계룡시장	충청남도지사	재향군인회장

																		사무총장
					총괄지원본부장																						행사운영본부장																	총감독
행정관리부								대외협력부								홍보마케팅부								행사지원부										전시시설부								국제협력부

※ 국방부 군문화엑스포지원단, 충청남도지원단, 계룡시지원단은 별도 운영 중

【정․현원 현황】

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	임기직
	39/31	1/1	2/2	6/5	10/8	13/9	3/3		4/3

정원 39명 / 현원 31명(결원 △8명)

- (충남도) 정원 18명 / 현원 15명(3급 1, 4급 2, 5급 3, 6급 이하 9), ※ 결원 △3명

- (계룡시) 정원 17명 / 현원 13명(5급 2, 6급 이하 11),           ※ 결원 △4명

- (임기직) 정원  4명 / 현원  3명(총감독 1, 대외협력관 1, 운전원 1)  ※ 사무보조 미채용

2	예산 현황

(예산총액) : 15,540백만원(국비 2,800, 도비 5,640, 시비 3,800, 자체수익 3,300)

(출연금 현황)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2017년	2018년	2019년	2020년
합 계	15,540	2,500	1,500	2,840	8,700
소 계	12,240	2,500	1,500	2,840	8,700
국 비	2,800	500	500	1,800	0
도 비	5,640	1,000	500	540	3,600
시 군 비	3,800	1,000	500	500	1,800
자체수익	3,300				3,300

Ⅱ. 엑스포 개요

1	추진 배경

❖ 3軍 본부가 위치한 “국방수도” 계룡시의 특성을 살려

- 세계軍문화의 다양한 가치 공유 및 평화수호자로서 軍의 위상 향상

- 세계 유일의 분단국인 한반도에서 평화와 화합의 메시지 전달

- 6.25 전쟁을 딛고 일어선 대한민국 위상 제고와 지원국에 대한 보은

❖ 세계 軍문화 교류를 통한 軍문화의 긍정적 가치 공유 · 확산,

한반도 평화 · 번영 기원 및 세계 평화와 화합의 장 실현

2	행사 개요

(행 사 명) : 2021 계룡세계軍문화엑스포

(2021 Gyeryong World Military Culture EXPO)

(기    간) : 2021. 10. 1.(금) ~ 10. 17.(일), 17일간

(장    소) : 충남 계룡시 일원 (계룡대 활주로 일원 / 330천㎡)

(주최/주관) : 충청남도‧계룡시 / 계룡세계군문화엑스포조직위원회

(주    제) : “K-Military, 평화의 하모니”

(관람목표) : 총 131만명  (내국인 124만, 외국인 7만)

(사 업 비) : 155.4억원 (국비 28억, 도비 56.4억, 시비 38억, 자체재원 33억)

(행사내용) : 공식행사, 군문화 전시연출, 무기장비 체험 등

- 7개 전시관(세계평화관, 한반도희망관, 대한민국국방관, 세계군문화생활관, 미션서바이벌관, 4차산업융합관, 지역산업관

(기관후원 ) : 국가기관 및 軍, 일반법인

- 국가기관(12) : 국방부, 국가보훈처, 교육부, 통일부, 문화체육관광부, 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 방위사업청, 대한민국(육‧해‧공군본부 및 해병대)

- 일반법인(2) : 한국관광공사, 대한민국재향군인회

※ 기부후원(5) : NH농협은행, ㈜태유, 중소기업중앙회, JB(주), KB국민은행

Ⅲ. 그동안 추진상황

1	총 평

□ 주요 성과

국방부 엑스포지원단 발족, 조직위와 軍의 협력시스템 구축

* 도지사-국방부장관 MOU체결 (’18.12.), 국방부 엑스포지원단 구성(’20.1.)

충청권 시․도지사 및 교육감과 협력 기반 마련, 참여 및 홍보 지원

* 4개 시․도 MOU체결 (’20. 1.), 전국 교육지원청(107곳) 방문 홍보 등

관람료 확정, 정책토론회 개최, 자체재원 4.71억원 확보, 홍보대사 임명

코로나-19 감염병 확산 지속에 따른 엑스포 행사 1년 연기 결정

* 관계기관 합동회의  및 이사회 의결 (5. 26.), 기자회견-대외 언론브리핑(6.28)

➠ 2021계룡세계軍문화엑스포 / 2021. 10. 1.(금) ~ 17.(일)[17일간]

□ 애로 사항

엑스포 연기에 따른 조직위 운영경비 등 필수 경비 추가 소요

코로나-19 감염병 확산에 따른 대면 접촉 기피 등으로 대국민 홍보에

제한과 해외군악대 초청 및 외국인관람객 유치 등 어려움 예상

□ 향후 계획

세계 최초 군문화엑스포에 걸 맞는 업그레이드된 프로그램 기획·준비

국방부지원단과의 긴밀한 협업체계 지속 (행사 종료시까지 협업추진)

SNS등 다양한 매체를 활용한 다각적 홍보로 국 ․ 내외 관람객 유치 전력

특히, 각종 안전사고 Zero율 추구로 안전한 엑스포가 되도록 준비에 만전

⇨ 코로나-19 위기를 극복하고, 평화 · 화합 · 번영의 희망과 감동이 있는 EXPO를 준비하여 군문화의 긍정적 가치 공유 · 확산

2	분야별 추진실적 및 계획

1	엑스포 연기 및 후속조치 마련

◈ 엑스포 연기에 따른 사무처 직원 수당 등 제 경비를 조정하여

행정 운영경비 등 예산 절감을 통한 자구 노력 추진

- 업무추진비 10∼20% 절감, 특정업무추진비 8∼20% 절감

- 상임자문역 당초 3명에서 1명으로 감축 운영 등

【1】행사연기 및 개최시기 결정

(엑스포 연기 결정) : ’20. 5. 26.(이사회 심의‧의결) / 대외 공표 : 5.28.

- 중앙부처(기획재정부, 행정안전부) 협의(’20. 6.), 총회위원 및 도․ 계룡시 직원 설문조사(’20. 6.), 관계기관 합동회의( 軍․ 계룡시지원단 등) 3회

(명칭 및 개최시기 결정) : ’20. 6. 25.

- (행사명칭) : 2021계룡세계軍문화엑스포

- (개최시기) : 2021.10.1.(금) ∼ 10.17(일)까지 17일간(종전과 동일)

(사무처 인력감축 운영) :　38명 → 31명（도 △3, 계룡시 △4)

- (정원 38명) : 충남도 18, 계룡시 17, 임기직 3

- (현원 31명) : 충남도 15, 계룡시 13, 임기직 3

※ 상임 자문관 : 3명에서 1명으로 2명 감축 운영

앞으로
			□ 행사 연기에 따른 추가 소요사업비(출연금) 확보 □ 분야별 후속조치 마련 □ 조직위 연력 및 조직 운영 정상화 : ‘21. 1월중

	참 고
□ 추가소요 예산 : 총 22억 58백만원(도비 50% : 시비 50% → 각 11.29억원) ㅇ 필수 운영경비(12.88억원) / 추가사업비(9.70억원) ㅇ 증액사유 : 행사 연기에 따른 필수 운영경비, 코로나-19 방역물품 및 콘텐츠보강 등 추가 소요 사업비 필요

【2】자체재원 확보【목표 33억원 : 관람료 23, 후원협찬 5, 광고 2, 임대 2, 휘장 1】

◈ 엑스포 관람권 판매 활성화를 위한 MOU 체결 등 관람객 유치 붐 조성

◈ 후원․협찬, 광고유치 등을 활용한 재원 확보로 안정적 행사 준비

(관람권 판매대행 계약) 제작 및 온라인(’20.1월), 오프라인(’20.4월)

엑스포 연기에 따른 관람권 판매 중단 및 환불(1,301매) 완료(’20.6월)

기 제작 관람권(30만매) 후속조치계획 수립 및 폐기완료(’20.7월)

(후원․협찬 및 휘장사업 추진) 실적 : 4.71억원

- NH농협은행 3, 중소기업중앙회 0.3, ㈜태유 1, JB(주) 0.2, 휘장 0.21

(15개 시․군 등 협조업무 추진) 국내 기업브랜드 광고 유치 활동

- 한국방위산업진흥회 산하 방산기업, 15개 시군과 대표기업, 군인공제회 등

앞으로
			□ 관람권 판매개시 시점(코로나 19 대응상황에 따라 ’21 상반기중) □ 기부희망 기관 재협의 : 발전3사, 현대제철, 한화, 산림조합 등 □ 시‧군 대표기업과 대기업 후원 협찬 유치 및 협찬(진로) 등 MOU 추진

【3】임대사업 추진

◈ 다양한 먹거리 제공 및 기념품 판매장 설치로 관람객 편의 도모

◈ 충남도내에서 생산된 우수 농·수산 제품의 홍보 판매의 장 마련

(운영사업자 모집) 식음시설과 판매시설 유치를 위한 운영계획 등 마련

(판매부스 운영) 지역산업관 내 홍보․유치를 위한 업무협의(道 관련부서 등)

- 식음시설 : 엑스포음식관, 향토음식관, 카페테리아, 편의점, 푸드트럭

- 판매시설 : 기념품 판매, 도 공예품 판매, 산업관 판매(농․수산물)부스

(밀리터리 제품 발굴) 군문화와 연계한 다양하고 구매력 높은 제품

앞으로
			□ 시군 대표우수농수산물 사업자 모집(도 및 시군 추천) : ’21. 2 ~ 3. □ 임대사업자 모집 공고 및 선정 : ’21. 3.~ 5.

【4】엑스포 홍보 및 광고

◈ 다양한 홍보매체와 시기적, 장소적 홍보로 엑스포의 이미지 제고

◈ 코로나-19 시대에 대응해 온라인을 활용한 온택트 홍보 활동 강화

(주관 및 협력방송사 선정) 프로그램 재계약 추진

- 행사 연기로 주관(KBS)·협력(MBC, TJB)방송사 등과 프로그램 및

광고 송출 계약 원점에서 재추진(21년 재계약)

(온라인·오프라인 홍보) ‘20. 8.

- 유튜브 등 SNS채널을 통한 영상 제작 / 경품 이벤트 등 홍보 재개

- 전광판, 현수막, 버스 랩핑광고, 전국 행사장, 고속도로 휴게소 등

앞으로
			□ 방송사별 프로그램 및 광고 재협의 추진 : ‘21. 3. □ 방송사, 신문, IPTV, 인터넷라디오 광고 송출 : ’21. 8. □ 포털 광고 및 SNS 서포터즈 운영 : ‘21. 8. □ 홈페이지 사이버전시관 구축 및 콘텐츠 보강 : ’21. 9.

【5】국내·외 관람객 유치【목표 131만명 : 내국인 124, 외국인 7】

◈ 국내외 외국인유치를 위한 공공기관 및 지역축제 등 지속적 활동 추진

◈ 여행사 모객 및 단체관람객 유치상품 개발 추진(유치설명회, 팸투어 등)

(Two-Track 체계로 운영) 조직위 + 재향군인회

* 미8군사령관 및 6.25 참전국(우방국) 재향군인회장단 대상 홍보(16개국)

(단체 관람객 유치활동 전개)

- 기업, 학교, 유치원, 다문화지원센터, 사회단체, 산학연, 향우회 등

- 전국 군사학 관련 대학, 공공기관 대상 온라인 및 우편홍보(‘20. 9월)

앞으로
			□ 세계충청향우회 교류협력 엑스포 관람 및 홍보 : ‘21.3. □ 민간단체 네트워크 활용으로 엑스포 홍보 : ‘21.5. (자율방범대, 한국자유총연맹, 전국이통장연합회) □ 도·시 자매결연 도시 협력 관람객 유치 및 홍보 : ‘21.6.

2	편안하고 안전한 행사운영을 위한 인프라 구축

【1】관람객 교통편의 제공

◈ 엑스포 행사장 접근 교통망 구축 추진

- 계룡 신도안 ~ 대전 세동간 광역도로 개설(1.96km, ‘21. 6. 완료)

- 공군기상단 삼거리 ~ 괴목정 도로 확장   (2.09km, ‘21. 2. 완료)

- 행사장 진입도로 정비                   (5.75km, ‘20. 12. 완료)

◈ 관람객 교통편의 제공

- 교통근무인력(총 164명, 교통소통․주차 편의) 배치

- 셔틀버스 노선(2개), 정류장(14개소), 버스(평일 5대, 주말 7대)운영

그동안 추진현황

- 신도안 - 세동간 광역도로 개설 : ‘19. 9.(공사착공) / 공정율(55%)

- 기상단삼거리 - 괴목정 도로확장 : ‘19. 8.(공사착공) / 공정율(87%)

- 행사장 진입도로 정비공사 : ‘20. 4.(공사착공) / 공정율(70%)

- 교통대책실무협의회(군, 경, 도, 시) 합동회의 (2회) 등

앞으로
			□ 추진현황 모니터를 통한 조기완공으로 행사에 지장이 없도록 만전 □ 교통지원기관과 유기적인 협력체계를 유지 하여 행사 준비 철저

【2】안전한 행사운영

◈ 안전관리 유관기관(경찰, 소방 등)과 유기적인 협조체계 구축

◈ 행사장에서 발생 가능한 비상상황 예측, 대응방안 마련 및 운영

회장운영 안전관리기본계획수립 및 관계기관 협조체계 구축

- 소방안전, 천재지변, 전염병 예방 등 13개 분야 대책 수립 (‘20.3.)

- 안전관리분야 유관기관(소방서, 경찰서 등) 1·2차 업무협의 (‘20.2.~5.)

보건·위생관리 대책 마련 및 유관기관 협조체계 구축

- 의료지원, 감염병, 식중독, 코로나-19 예방 및 방역 대책 마련(‘20.5.)

- 환경관리(청소, 쓰레기, 화장실 관리 등)계획 수립 및 관계기관 협의(‘20.4.)

앞으로
			□ 엑스포 연기에 따른 안전관리기본계획 등 보완 : ‘20.12. □ 안전관리종합계획 수립·제출(조직위→市안전총괄과) : ‘21.8.

【3】전시연출 및 회장조성

◈‘軍 문화’란 독창성 있는 주제를 널리 알릴 수 있도록 수준 높은

전시연출 추진 및 품격 있는 회장 조성

세부실행계획 및 설계도서 작성 : ’20. 1. ~ 현재

- 전시연출(5개관 연출) 및 회장조성(입장시설, 대형텐트, 편의시설 등)을

위한 계획수립 및 실시설계도서 작성

※ 엑스포 연기에 따른 설계도서 성과물 납품(’20. 6.) 수정 및 보완 중

앞으로
			□ 관련기관(軍과 계룡시)의 지속적인 협의로 흥미있는 전시 연출 및 최신 전투장비 전시배치 □ 관람객 편의도모(동선계획 등) 전염병 예방계획 등 안전한 회장조성

【4】이벤트 프로그램 운영

◈ 軍 관련 다양한 프로그램 운영으로 관람객들에게 특별한 즐길 거리 제공

◈ 관람객이 직접 참여할 수 있는 프로그램 운영으로 다양한 계층의 관람객 유인

다양한 프로그램 운영 및 유치

- 육․해․공군, 해병대 방문의 날, 미군방문의 날, 군악콘서트, 군문화 갈라쇼

- 글로벌 K-POP 및 K-MILITARY 경연대회, E-Sports 대회, 드론 경연대회

- 밀리터리 코스프레 및 평생교육동아리 경연대회, 프린지 공연“고성방가” 등

道 주관 행사 프로그램 유치

- 도민의 날, 보육인 한마음대회, 충남예술제, 전국요리경연, 카운슬링, 다문화 페스티벌

부대행사 및 무료 체험프로그램 운영

- 계룡대 영내투어, 계룡산 안보등반, 기타 무료 체험프로그램 운영

앞으로
			□ 세부프로그램 연출계획 수정․보완 및 신규프로그램 발굴 지속 □ 2021년 유관기관․단체 행사프로그램 파악 및 사전 유치 협의 □ 각 軍 신규 이벤트 운영을 위해 국방부지원단과 지속적 협의

【5】기반시설 조성사업

◈ 행사장 조성 : 4개 분야(토목, 전기, 통신, 조경) 기반시설 조성공사

- 토목(울타리 설치 등), 전기(수배전 설비 등), 통신(통신망구축 등), 조경(휴게존 배수시설 정비)

◈ 주차장 정비 : 9,790면(기존 6,050, 신설 2,554, 예비 1,186) ※市 지원사업

엑스포 행사장 조성사업

- 충남도, 계룡시, 조직위 협의를 통한 기반시설 내용 검토 :   ‘18. ~ ‘19.

- 행사장 기반시설공사 설계용역 :              ‘19. 12. ~  ‘20. 4.

- 공사 착공(토목분야, 전기분야) ※ 공사중지(6. 8.)  :         ‘20.  6.

엑스포 주차장 정비사업(계룡시 지원사업)

- 주차장 조성사업 설계용역 완료 :              ‘19. 11. ~ ‘20. 4.

- 주차장 조성사업 공사 착공 :                           ‘20.  4.

- 주차장 조성사업 공사 완료 :                           ‘20.  9.

앞으로
			□ 토목, 전기, 통신 기반시설 공사 재추진 : ‘21. 3. ~ 9. □ 관람객 편의와 안전등을 위한 추가 조성 사업 추진 * 기동시범장 관람석 정비, 주차장 전관방송 설치 등

【6】숙박․식음 대책

◈ 외부 관람객들에게 숙박, 음식점 안내를 통한 엑스포 체류 유인

◈ 철저한 위생관리와 지도점검을 통한 방문객 편의 도모로 만족도 제고

행사장 인근지역(계룡, 대전, 공주, 논산 등)숙박시설 현황관리, 관람객 안내

* 총 1,338개소/26,324객실 (대전 913개소 / 19,719객실, 공주 246개소 / 3,581객실,

논산 157개소 /  2,392객실, 계룡 22개소 / 632객실)

행사장내․외 음식점 TWO-TRACK 대책 수립

- 행사장내 : 식음인원․소요좌석의 예측․분석을 통한 식음대책 마련 추진

- 행사장외 : 계룡시 및 인접 지자체 음식점 방역․위생 점검, 시설개선 추진

앞으로
			□ 엑스포 공식 홈페이지 숙박시설, 음식점 현황 지속 업데이트 □ 숙박․음식 방역․위생관리 분야 유관기관 협조체계 구축

【7】해외 군악대 초청

◈ 세계 군문화 교류를 통한 세계평화와 화합의 장 실현

◈ 군악제 참가국과 미래지향적 친선우호 관계 형성

해외군악대 9개국 초청 (러시아, 영국, 프랑스, 스웨덴, 말레이시아, 네팔, 필리핀, 태국, 베트남)

- ‘21년 행사 재초청 → 6개국 참가의사 확인 (러시아, 영국, 스웨덴, 네팔, 태국, 베트남)

신규 4개국 초청(캐나다, 독일, 네덜란드, 스위스) 추진

국제 군악제 공연 영상분석 및 군악대 프로그램 운영계획 수립

앞으로
			□ 군악대원 사증(visa)발급 및 통관절차 매뉴얼 수립 : ‘21.1월 □ 참가 확정국가 초대장 발송 및 공연 사전준비 : ‘21.3월 □ 추가 초청국 발굴 등 참여대상국 확정(최소5개국) : ‘21.3월

【8】4차 산업융합관 운영

◈ ‘軍과 신기술의 만남’이란 주제로 방위산업, 첨단기술, 밀리터리 등

관련 산업 테마별 주요업체 유치 추진

참가기업(기관) 유치 추진

- 1,112개 기업·기관 대상 홍보(전화, 이메일, 뉴스레터 등 발송)

- 중점유치대상 13개 기관(대기업, 군 연구기관, 관련협회 등) 유치 활동 전개

참가기업 유치 실적 : 24개 기업 (’20. 1~5월까지)

* 분야별 유치기업 (방위산업 12, 4차산업 4, 첨단기술 2, 밀리터리 4, 비방위 2)

앞으로
			□ 4차산업융합관 참여기업 유치활동 : ‘20. 11월~ □ 참여기업 모집 공고 : ‘21. 2~4월 □ 기업 배치결정 및 운영매뉴얼 제작·배부 : ‘21. 5~6월 □ 관 내·외부 시공 및 기업배치, 운영 등 : ‘21. 7~10월

Ⅳ. 당면 현안사항

□ 코로나19 상황에 따른 엑스포 운영방안

❖ ’20년 10월 현재 코로나-19의 전 세계적 확산이 지속됨에 따라

2021년 엑스포 개최 운영방안에 대한 검토 필요

□ 그동안 추진상황

도지사 코로나 대응방안 마련 지시            :        ’20. 5월

엑스포 연기에 따른 후속대책 마련            :    ’20. 5 ~ 10월

문화체육부지사 대응방안(초안) 검토 보고      :       ’20. 10월

	【코로나19 단계별 대응 방안 】
❶ 코로나가 현재보다 완화될 경우는 기존 계획에 따라 추진 가능 ❷ 사회적 거리두기 1.5단계 이하 시 행사운영 방안 전면개편 필요 ❸ 사회적 거리두기 2단계 이상 시 → 완전한 온택트 방식 ※ 기반시설 공사 착수 전(‘21.3월)까지 결정 필요

□ 향후 계획

각 분야별 후속조치 세부계획 수립             : ’20. 11월

의원총회 심의 및 변경계획 확정(안) 마련       : ’20.  12월

‘21년 본예산 편성 및 대행사업 변경계약 추진   : ’20.  12월

➠ 향후 코로나-19 감염병 확산 추이를 고려하되, 내년 상반기 최종 결정

Ⅴ. 도의회 관련사항 처리상황

□ 2019년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황

《 총    괄 》

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
	4	2	2
시정요구
처리요구	4	2	2
제안사항

《 완료된 사항 》

【1】업무추진비 현금지급 기준 검토 [시정] (정병기 의원)

업무추진비로 현금 900만원이 군부대 위문금으로 지급된 것은

통상적인 수준으로 보기에는 과도하지 않은지 기준검토 바람

- 군의 원활한 예산 · 인력 지원 협력을 도모하기 위하여 민간조직위원장이  육·해·공군 3軍 참모총장 방문(’19.7.3.) 時 엑스포 지원 협력 및 군부대

장병 격려를 위한 위문금 9백만원을 지급했음. (각각 3백만원씩 지급)

➠ 군부대 위문금은 3軍의 지원을 이끌어내기 위하여 협력 초기에

위문금을 집행한 사항으로 향후, 위문금 지급시 사안에 따라 다양한  여건 검토 및 적정한 금액을 산정하여 투명하게 집행할 예정

【2】군문화엑스포 방문객 유료화 관련 군과 합의안 도출[시정] (여운영 의원)

조직위는 입장권 발행 시기가 다가오는 만큼 빠른 시일 내 군과

합의안 도출 필요

- 3군 참모총장 방문 시 입장료 유료화 등 엑스포 협력 지원 요청

*  계룡시장 (’19. 6. 5.) / 도지사 (’19. 6. 19.) / 김진호 위원장 (’19. 7. 3.)

- 국방부장관과 민간위원장 면담시 입장료 유료화 필요성 전달(’19.11.13)

➠ 국방부 엑스포지원단 법령질의 및 답변 회신

- 입장료 징수 가능하며 입장료 징수에 따른 군 병력·장비 지원 등의 법령상 제한 없음(국방부 규제개혁법제담당관-1738(’20.2.27.)

* 향후, 관람권 판매 시 유료화 징수

《 추진 중인 사항 》

【1】관람객 유치목표 달성을 위한 다각적 대책 마련[시정](여운영 의원)

단체 관람객 유치를 위해 체험학습 및 자유학기제를 통한 학생

단체관람객 엑스포 참여 유도

- 충남교육청과 MOU 체결 : ’19.  9.  6.

- 충청권 4개 교육청(대전‧세종‧충남‧충북)과 MOU 체결 : ’19. 12.

- 前 한미 연합사령관(4명), 주한외국공관 관계자(대사 등) 엑스포 홍보 : ’19. 12.

- 전국 교육지원청 공문발송 및 방문 홍보 : ’20. 2.

- 육군훈련소, 자운대 및 계룡휴게소(간판, 현수막) 연기 홍보 : ’20. 6.~

- 군 통근버스(16대) 랩핑 엑스포 연기 홍보 : ’20. 6.~

- 도 공공기관 대상 엑스포 참여 홍보(21개 기관) : ’20. 9.

- 호남국제관광박람회 인바운드 여행사 대상 홍보 : ’20. 10.

- 2020 서울국제관광박람회 참여 홍보 : ’20. 11.

- 계기성 홍보(금산인삼축제, 대전오월드, 계룡산, 대둔산 등)(수시)

➠ 충청권 교육지원청 방문 엑스포 홍보 및 관람지원 협조 요청,

충청권외 타 시‧도 교육청 대상 홍보 및 MOU 체결 요청

【2】행사장 접근 교통망 등의 조기 준공 방안 마련[시정] (여운영 의원)

군문화엑스포 개막이 9월인데 행사장 접근 교통망 구축을 위한 광역도로 개설과 도로확장, 보도정비 등 준공과 정비 등이 8월말로 너무 임박하니 완료시기를 앞당기는 방안 마련

- 신도안 - 세동간 광역도로 개설(공사 중, 공사완료 ‘21. 6.)

- 기상단삼거리 - 괴목정 도로확장(공사 중, 공사완료 ‘21. 2.)

- 행사장 진입도로 및 도로정비(공사 중, 공사완료 ‘20. 12.)

➠ 사업추진부서(계룡시, 대전시)와 협의하여 사업조기 완공을 목표로      통행 및 행사 추진에 지장이 없도록 만전을 기하겠음.

【참고 자료】

(1) 엑스포 프로그램(안)

분 야 (7)

프로그램(41)

사전행사

· D - 행사 : 행사시기 및 세부행사 검토 필요

(100, 30 등)

공식행사

· 개장식 : ’21. 10. 1. (08:30~10:00) / 개장세레모니

· 개막식 : ’21. 10. 1. (17:00~21:00) / 평화선언문 선포

· 폐막식 : ’21. 10. 17. (18:00~21:00) / 하이라이트 영상

공연행사

· 세계 군악대 공연, 엑스포 주제 공연, 로드

퍼포먼스, 프린지 공연 등

공

체험행사

· 야외 군장비 전시, 탑승 체험, 병영훈련 체험,

가상현실 사격 체험, 전투장비 분해 · 결합,

육군․해군 · 공군 · 해병대 체험 프로그램 등

경연·부대행사

· 기동훈련, 계룡산 안보등산, 계룡대 영내투어,

국제드론 레이싱 대회, K-Military 경연대회,밀리터리 코스프레 경연대회, 전국평생교육 동아리 경연대회 등

특별행사

· 육군의 날, 해군의 날, 공군의 날, 해병대의 날,

충청남도 시·군의 날 등

학술 및

국제회의

· 계룡세계평화포럼

※ 최고의 Quality 있는 프로그램 운영과 완벽한 연출·공연을 위해 최선의 노력 경주

(2) 전시관 조성·운영(안) : 3개 Zone 7개 관

			① 세계평화관		『세계평화, 우리모두 Peacemaker가 되어야 이룰수 있습니다』
					콘텐츠 : 세계전쟁의 역사와 평화를 위한 노력 존구성 : [일상의 평화] [깨어진 평화] [전쟁의상처] [평화를 꿈꾸는 Peacemaker]
			② 한반도희망관		『Peacemaker를 꿈꾸는 평화와 희망의 한반도』
					콘텐츠 : 대한민국의 전쟁과 평화의 역사 존구성 : [상처입은 한반도][희망을 꿈꾸는 한반도] [미래로 향하는 한반도][Global Peacemaker, 한반도]
주 제 Zone
			③ 대한민국국방관		『평화실현을 위해 나아가는 대한민국 국군의 강한 힘과 미래』
					콘텐츠 : 대한민국 국방과 우리軍 존구성 : [국방정책 존] [육․해․공․해병대 등 국군 존]
			④ 세계군문화생활관		『세계군의 역사속에서 형성된 군문화의 과거와 현재』
					콘텐츠 : 대한민국 국군과 세계 軍의 의식주와 군문화 존구성 : [세계 군의 ‘식’ 문화] [세계 군의 ‘의’문화] [우리가 궁금했던 군문화]] [전쟁과 함께 발전한 과학]
국 방 체 험 Zone
			⑤ 미션 서바이벌관		『리얼 FPS 게임 스페이스』
					콘텐츠 : 리얼FPS 서바이벌 게임 존구성 : [서바이벌 준비] [리얼 FPS 서바이벌]
			⑥ 4차산업융합관		『軍과 新기술의 만남』
					콘텐츠 : 국방산업 대기업 및 4차산업을 비롯한 첨단기술 기업 제품 전시 존구성 : [세계방위산업트랜드 존] [첨단기술 발전 존] [4차 산업 존]
산 업 Zone
			⑦ 지역산업관		『충청남도의 미래를 만나다』
					산업 Zone : [일반산업 전시의 공간 연출] 홍보 Zone : [충청남도와 계룡시 홍보]

※ 다양하고 풍부한 자료 확보 및 콘텐츠 사전 검증으로 국민이 공감하는 전시관 운영

※ 전시관 구성시 영유아, 노약자, 장애인 등 동선 고려 등 세심한 배치

※ 엑스포 개최 후, 활용가능한 전시콘텐츠는 계룡시 · 軍 등에 이관 및 영구 활용

(3) 행사장 조감도 및 상징마크

【 행사장 조감도 】

【 상징마크 및 캐릭터 】

상징마크 (엑스포 행사를 통해 평화와 화합의 장이 대한민국 계룡에서 새로이 시작됨을 표현)		캐릭터 (비룡이) (비상하는 계룡의 줄임말로, 계룡시의 상징인 용을 귀엽고 친밀하게 표현)

(4) 임원 현황 및 간부 명단

□ 조직위 임원 현황

구 분	소 속	직 위	성 명	비고
조직위원장 (3)	충청남도	도지사	양 승 조
	계 룡 시	시 장	최 홍 묵
	재향군인회	회 장	김 진 호
당연직 이 사 (6)	충청남도	문화체육부지사	이 우 성	이사장
	충청남도	기획조정실장	김 하 균
	충청남도	문화체육관광국장	오 범 균
	계 룡 시	부시장	류 재 승
	계 룡 시	정책예산담당관	김 세 겸
	계 룡 시	군문화엑스포지원단장	유 원 호

□ 간부 명단

구 분	직 위	직 급	성 명	비 고
조직위원회 사무처	사무총장	지방부이사관	윤 동 현
	총괄지원본부장	지방서기관	양 승 록
	행사운영본부장	지방서기관	김 승 제
	총감독	계약직	전 인 근
	행정관리부장	지방행정사무관	이 종 철
	대외협력부장	지방행정사무관	박 수 웅
	홍보마케팅부장	지방행정사무관	김 기 영
	행사지원부장	지방행정사무관	신 현 무
	전시시설부장	지방시설사무관	석 민
	국제협력부장	지방행정사무관	(공 석)