《종합건설사업소》

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 □ 기구 및 기능 □ 예산현황 Ⅱ. 주요업무 추진상황 □ 총 평 □ 분야별 추진실적 및 계획 Ⅲ. 참고사항 □ 주요 사업별 예산확보 및 추진 현황 □ 간부명단

Ⅰ. 기본 현황

□ 기구 및 기능

① 기 구

								소 장
행정관리과				도로건설과				공공건축과						하천개발과					공주지소				홍성지소
행정경리팀				도로1팀				대형건축팀						지역개발팀					서무팀				서무팀
계약팀				도로2팀				건축사업팀						하천1팀					보수1팀				보수1팀
				도로보상팀				건축지원팀						하천2팀					보수2팀				보수2팀
								품질관리팀						하천보상팀					구조물 관리팀				구조물 관리팀
																			단속팀				단속팀

<정․현원 현황>

구 분		계	일 반 직(정원/현원)						비고
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계		114/107	1/1	6/6	25/27	37/31	36/24	9/18
본소		61/64	1/1	4/4	14/16	19/16	16/12	7/15
	행정관리과	13/13	1/1	1/1	2/2	5/4	3/3	1/2
	도로건설과	15/15	-	1/1	3/3	4/4	5/3	2/4
	공공건축과	21/21	-	1/1	5/7	7/5	5/2	3/6
	하천개발과	12/15	-	1/1	4/4	3/3	3/4	1/3
공주지소		27/20	-	1/1	5/5	8/8	12/4	1/2
홍성지소		26/23	-	1/1	6/6	10/7	8/8	1/1

* 공무직(70명) : 도로보수원 52, 사무보조 4, 과적단속요원 14

② 주요기능

	- 행정관리과
	❍ 조직, 예산, 청사관리 및 직원후생복지 ❍ 각종 건설공사 입찰 및 계약, 관급자재 구매
	- 도로건설과
	❍ 지방도 사업 집행계획 수립 및 조정 ❍ 국가지원지방도 및 지방도 확‧포장사업 시행
	- 공공건축과
	❍ 공공 건축물의 신축 및 보수사업 ❍ 건설공사 자재 품질검사 및 현장 안전점검
	- 하천개발과
	❍ 지방하천 정비사업 시행 및 집행계획 수립 ❍ 지역개발 기반시설사업 시행 ❍ 지방하천 재해복구사업 추진
	- 공주·홍성지소
	❍ 지방도·위임국도 유지관리 및 보수사업 시행 ❍ 자연 재해대책 수립 시행, 운행제한 위반 차량 단속

□ 2022년 예산현황

세입 세출
		∙ [세 입 예 산] 13,833백만원 - 수수료 100, 과태료 210, 지난년도 수입 30, 기타수입 61, 소방안전교부세 1,432, 예수금 12,000 ∙ [세 출 예 산] 29,796백만원 - 사업예산 18,193, 행정운영경비 11,603

❍ 재배정 예산 사업 : 318,803백만원

(단위 : 백만원)

도로 확･포장	공공건축	하천정비	재해복구사업	지역개발	도로유지 관리
67,632	65,192	52,140	32,623	12,318	88,898

Ⅱ. 주요업무 추진상황

□ 총   평

코로나19로 침체된 지역경제 활성화 및 도민중심 건설행정 구현

- 도내 건설업체 계약 및 자재구매를 통한 지역 소비 및 투자 순환 기여

안전하고 체계적인 도로·건축·하천정비사업을 통한 신뢰도 제고

□ 주요성과로는

사업분야

상반기 주요업무 추진성과

□ 도로건설 사업 분야

동해~부곡 지방도 설계용역 등 발주 32건,

294억원 집행

(도로 보상) 1,118건/105억 보상 완료

□ 공공건축 사업 분야

충남장애인가족힐링센터 설계용역 등 발주 26건,

190억원 집행

(품질시험) 상반기 105건 / 586종목 실시

□ 하천 지역개발 사업 분야

준공(1지구, 연산천), 발주(도곡천 등 18건),

471억원 집행

(하천 보상) 1,939건 / 128억 보상 완료

□ 도로유지 보수 사업 분야

신속한 지방도 유지보수사업 시행(232지구)

준공(109지구), 발주(232지구 중 123지구 추진중),

408억원 집행

□ 아쉬웠던 점은

❍ 신규직원 위주의 잦은 인사이동으로 건설사업 추진 애로

❍ 코로나19로 인한 주민설명회 등 지역주민의 의견수렴 및 소통 기회 축소

	앞으로
지역경제 특성을 반영·연계한 미래지향적 건설행정 추진 - 지역업체 우선 계약, 지역생산자재 우선 구매를 통한 지역경제 활성화 - 안전하고 체계적인 도로·하천·공공건축사업을 통한 신뢰도 제고

□ 분야별 추진실적 및 계획

【1】지역경제 활성화를 위한 재정집행 추진

지역건설업체 참여 증진 및 지역 생산자재 우선 구매

신속한 대가지급 등 신속집행을 통한 지역경제 활성화

□ 지역경제 활성화를 위한 건설공사 계약 추진

❍ 지역제한입찰, 지역의무공동도급계약 추진을 통한 지역업체 보호

❍ 직무성과 계약과제와 연계하여 공사 발주 및 관급자재 구매 시 지역업체 참여율 85% 달성 추진

※ (2022년 상반기) 지역업체 계약 현황                  (단위 : 억원, 건)

구분	건수		금액		비고 (건수, 금액 대비)
	총건수	지역업체	총금액	지역업체
총계	1,398	1,208	1,161	904	건수	86.4%
					금액	77.9%
공사	208	208	271	271	건수	100%
					금액	100%
용역	250	227	217	113	건수	90.8%
					금액	52.1%
물품	940	773	673	520	건수	82,2%
					금액	77.3%

□ 투명한 하도급 문화 정착 유도

❍ 하도급대금 직접 지불 적극 권고 및 지급보증제 실시

❍ 정기적인 하도급 현장점검과 건설업 관련 협회와의 협력을 통한 하도급 관리 철저

□ 신속한 재정집행 추진을 통한 지역경제 위축 완화

❍ 집중적인 선금·선고지 집행 등 지역경제 자금흐름 속도 촉진

❍ 조달청(G2B) 나라장터를 통한 신속한 비대면 대가집행

- 대금(선금, 기성금, 준공금) 지급 청구 시 3일내 지급

❍ 회계업무 처리기한 단축에 따른 적극 행정(’22.12월 限)

앞으로
			•지역업체 성장과 보호를 근간으로 하는 건설공사 계약 추진 •공사발주 및 관급자재 구매 시 도내업체 참여율 제고

【2】지역발전을 선도하는 도민 중심의 도로 구축

권역별 균형 발전을 견인하는 지역간 교통네트워크 구축

찾아가는 건설행정서비스 제공으로 도민 공감 도로건설 실현

□ 적극적인 도로건설사업 추진으로 지역경제 활성화 도모

【2022년 도로사업 : 38지구 / 67,632백만원】     (단위 : 백만원, 2022. 7. 1. 기준)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	38	67,632	3	57	34	61,589	1	5,986
국지도	10	18,114	1	57	8	12,071	1	5,986
지방도	23	42,912	1	-	22	42,912	-	-
기 타	5	6,606	1	-	4	6,606	-	-

⇒ 공사지구(20), 보상지구(5), 설계지구(13)

❍ 체계적인 사업 관리로 효율적인 예산집행 추진 *상반기 43%, 하반기 73% 목표

- 총사업비 676억원 중 294억원 집행(집행률 43.5% / 목표 대비 0.5%p↑)

- 현장별 시공계획 점검(1,2분기) 및 보상지구 예산 집중 투자

- 선지정측량 등 행정절차 간소화를 통해 예산 신속 집행 기여 (우성~이인 등 4지구)

❍ 집행 부진지구 원인 분석 등 집중 관리를 통한 이월 최소화 노력

- 월별 집행 점검 및 지구 간 사업비 조정으로 공사비(기성·자재대) 적기 집행

※ 하반기 집행 목표(73%) 달성 노력 [전년 집행률(68%) 대비 5%p↑]

- 하반기 신규 발주 건 신속집행 선금특례 적극활용(우성~이인, 노화~평촌)

- 사업 적기 준공을 위한 사업별 적정공사비 적기 배정 노력 (간접비 최소화)

↳ 지방도 정비사업 등 SOC사업 사업예산 감소 추세

▸ 최근 3년 지방도 예산: ’20년(639억) → ’21년(446) → ’22년(429) ⇨ 정상 추진 위해 매년 600~800억 소요

□ 지역주민 만족도 향상을 목표로 주민갈등 최소화 도로건설 추진

❍ 찾아가는 민원대응·주민설명회 등을 통해 도민과 소통하는 도로 건설

- (상반기) 주민설명회(간담회) : 두마~노성 등 3개지구 (4회 / 76명 참석)

❍ 현장 방문 협의보상 추진(8회)으로 주민 편의 개선 및 보상율 제고

앞으로
			• 계획 대비 부진사업 지속 점검 및 시공계획 관리 • 민원 수시 현장대응을 통한 도로공사 불편 최소화

【3】공정하고 신뢰받는 보상행정 추진

도로·하천사업에 편입되는 사유재산에 대한 객관적이고 공정한 보상

민원 발생 최소화 및 찾아가는 보상 협의로 도민 편의 제공

□ 2022년 도로·하천 하반기 보상: 48지구 / 79,808백만원

(단위 : 건 / 백만원)

구 분		2022년 보상계획		상반기 추진실적			하반기 보상계획		비고
		건수	금액	건수	금액	금액대비 비율(%)	건수	금액
합계 (48지구)		12,730	103,270	3,057	23,462	23%	9,673	79,808
도로	27지구	6,275	69,887	1,118	10,580	15%	5,157	59,307	위탁 포함
하천	21지구	6,455	33,383	1,939	12,882	39%	4,516	20,501

□ 토지소유자 직접 참여하는 보상행정 운영으로 공정성 확보

❍ 보상협의회 및 토지소유자 추천 감정평가법인 선정 등 적극 반영

- 토지소유자·감정평가사·사업시행자·지자체 등 8~16명으로 구성하는‘보상협의회’ 및 보상평가를 위한 ‘토지소유자(1/2이상, 과반수 동의)의 감정평가법인 추천제’운영으로 토지소유자 의견 적극 반영

□“찾아가는 보상팀”운영을 통한 대민서비스 강화 및 신뢰도 제고

❍ 직접 사업현장을 찾아가는 보상협의 등으로 도민의 행정편의 극대화

- 사업지구별 평균3~4회, 상반기 총 70회 ‘이동식 보상상담창구 개설’을 통해 보상협의를 원하는 도민의 접근성 향상, 불편 최소화

□ 보상인력 전문성 확보 및 신속하고 원활한 보상업무 추진

❍ 보상실무 매뉴얼 정비 및 전문교육참여, 보상기간단축을 위한 업무개선 추진

- 선지정측량 실시에 따른 편입 지역 조기 확정으로 보상 기간 단축

※선지정측량 선행시 보상준비기간 최대 1.5~2개월 소요/기존 3개월이상 소요

- 보상기간 단축을 위한 아이디어 발굴 및 제도개선 중앙부처 의견 개진(수시)

- 보상매뉴얼 수록자료 개선 및 보완(절차, 조서등 작성기준, 실무처리요령 등)

앞으로
			• 신속·정확한 행정절차 이행으로 공익사업 필요한 용지 공급 - 실무매뉴얼 활용을 통한 전문성 강화, 보상기간 단축을 통한 주민 피로도 최소화로 도민 사유재산권 보호 및 공익사업 적기 추진 지원

【4】충남을 대표하는 품격 있는 공공건축물 건립

품격 있는 디자인을 적용하여 공공건축물 가치 향상 도모

설계·시공분야 선진사례 연구 및 철저한 사전검토를 통한 전문성 강화

□ 건물 자체가 랜드마크가 되는 공공건축물 건립

【2022년 건축사업현황 : 33건 / 65,192백만원】            (단위 : 백만원)

총 괄		계속사업		준공사업		신규사업
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
33	65,192	16	44,742	9	15,730	8	4,720

❍ 독창적 건축디자인 선정을 위한 설계공모 추진(3건)

【 상반기 설계공모 당선작 】
충남장애인가족힐링센터	당진소방서	충남광역형 탄소중립연수원

❍ 공정하고 투명한 설계공모를 통해 최적의 건물 디자인 선정

- 심사위원 사전공개, 심사과정 생중계(유튜브) 등 투명한 설계공모 시행

- 능력 있는 설계자의 많은 참여를 통해 충남의 랜드마크 건축물 건립

□ 공공건축물 대형화에 따른 전문성 강화 및 기획 내실화

❍ 상반기 지식동아리 6회 추진으로 업무능력 전문성 강화

※ 중대재해 처벌법의 이해, 방수공법, 탄소중립과 목조건축의 이해 등

❍ 공공건축심의, 사업계획 사전검토 등을 통하여 건축물 품질 향상

앞으로
			• 향후 지속적인 지식동아리 추진으로 전문 업무능력 강화 • 기획단계부터 적극 참여 및 사업의뢰 부서와 소통 강화

【5】정확하고 철저한 품질관리로 안전한 건설공사 추진

건설현장 품질시험 대행을 통한 도내 건설현장 품질향상 기여

공사 현장별 품질·안전점검을 통한 안전한 건설현장 조성

□ 건설공사 품질향상을 위한 품질시험 실시

❍ 시험종목 : 성토용 흙, 아스콘, 콘크리트 등 총 20분야 108종목

- 시험추진 목표 : 300건 / 1,700종목(’21년도 실적: 301건 / 1,710종목)

- 상반기 추진실적 : 105건 / 586종목(목표: 35%달성)

구 분	성토용 흙		아스콘		콘크리트		기타
	건	종목	건	종목	건	종목	건	종목
105건 / 586종목	11	70	31	377	40	40	23	99

❍ 충청남도 건설공사 품질시험 종목 및 수수료 공고(’22. 2.)

- 시험수수료 목표 : 100백만원(’21년도 실적: 157백만원)

- 상반기 추진실적 : 53백만원(목표: 53%달성)

□ 건설공사 현장 품질·안전점검을 통한 안전사고 제로화

❍ 정기 안전점검(분기별 1회) 실시(계절적 특성을 반영한 점검 실시)

- 1분기(해빙기 대비) : 총 22개소 현장 중 7개소 현장 36건 지적사항 발생 및 조치완료  ※ PE드럼, 방호벽 보완 및 종합안전게시판 설치 미흡 등

- 2분기(우기 대비) : 총 28개소 현장 중 15개소 현장 42건 지적사항 발생 및 조치 중 ※ 우기 전 가도 철거 및 수방자재 확보 미흡 등

앞으로
			• 철저한 품질시험으로 건설공사 안전관리 및 신뢰성 확보 • 신속한 관련 부서 협업을 통해 안전 확보 및 부실시공 예방 • 폭염기(3분기) 및 동절기(4분기) 안전점검 추진

【6】자연과 어우러진 지방하천 정비사업 추진

자연환경과 조화를 이루는 지방하천 정비사업 추진

집중호우로 인한 제방 유실, 범람 등 피해지역 재해복구사업 추진

□ 견실한 지방하천 정비 및 신속한 예산 집행

【2022년 하천 사업 : 33지구 / 52,140백만원】             (단위 : 백만원)

총 괄		준공사업		계속사업		신규사업
지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
33	52,140	2	2,078	27	46,667	4	3,395

❍ (상반기) 준공(1지구 / 연산천),  발주(4지구 / 도곡천, 성연천, 구룡천, 삽교천), 계속(27개지구, 정상 추진 중)

❍ (하반기) 준공(1지구 / 석남천) 및 ’22년분 사업 완료

□ 지방하천 재해복구사업 추진

❍ ’20. 8. 아산지역 집중호우로 인한 제방유실 및 범람 등 피해로 인한 지방하천 재해복구사업 추진

【2022년 재해복구사업 : 3지구 / 32,623백만원】            (단위 : 백만원)

지구명			사업량 (km)	사 업 비				비고
	시군	읍면		합 계	기시행	2022년	장 차
계			15.2	68,277	35,654	32,623	0
금곡천	아산	배방	2.7	11,895	8,289	3,606	0
약봉천		송악	5.7	22,503	13,819	8,684	0
온양천		송악	6.8	33,879	13,546	20,333	0

❍ (상반기) 현재 공정률 : 금곡천(45%), 온양천(20%), 약봉천(15%)

❍ (하반기) 추진계획 : 신속한 수해복구를 위한 공정계획을 수립하여 공사 추진

□약봉천은 타절 준공에 따라 조속히 재계약을 추진하여 사업 추진(예정)

앞으로
			• 견실 시공 및 장마철 집중호우 대비 안전관리 철저 • 수생태계 보전 및 주변 경관과 조화되는 친환경 하천조성

【7】태안기업도시 연결도로 개설공사 추진

태안기업도시‐서산웰빙특구 연결 도로개설로 지역간 연계 강화

관광자원 활성화와 접근성 향상으로 지역 균형발전 기여

【2022년 지역개발 사업 : 1지구 / 12,318백만원】          (단위 : 백만원)

지구명	총사업비	기시행	2022년	장차	공사기간	진도 (%)	비고
태안기업도시 연결도로 개설공사	36,646	24,328	12,318	-	‘20. 02 ∼ ’23. 2.	55	공사중

❍ (상반기) 추진실적

- 태안기업도시 연결도로 개설공사(공정률 55%)

⇨ 교대 및 교각 설치 완료, 거더 설치(50%)

❍ (하반기) 추진계획

- 교량 주요 공정(구조물, 토공, 포장) 완료

⇨ 잔여 거더 설치, 슬라브 타설, 가도 철거, 아스콘포장 완료

앞으로
			• 원활한 사업 추진을 위하여 관련부서와 사전 협의 • 주기적 공정계획 점검으로 신속한 공사 추진

【8】고품질 인프라 구축을 위한 공사관계자 역량 강화

정기적 현장 소통을 통한 의견 교류 및 공사 관계자 역량 강화

청렴하고 전문적인 건설행정으로 고품질 도로·건축·하천 건설 실현

❍ 유기적인 현장 관리체계 구축을 위한 공사관계자 회의 개최(상반기 3회)

- 현장 애로사항 청취 및 피드백을 통한 상호 교류협력체계 구축

- 직무·안전관리 교육*을 통한 기술력 제고로 고품질·안전 시공 유도

* 신규제도·법령 개정사항, 현장 단계별 수행업무, 중대재해처벌법 등

앞으로
			• 공사관계자 역량강화를 위한 수시 교육 및 직무연찬 실시 • 전문기술(기술자문위원회) 적극 활용을 통한 완벽 시공 도모

【9】도민이 안심하고 통행할 수 있는 도로 유지관리 추진

선제적 도로 유지보수 추진으로 도로 이용자 편익 제공

철저한 자연재해 대비․대응으로 도민의 재산과 생명 보호

□ 2022년 도로 유지보수 사업 : 232지구 / 105,959백만원 (단위: 백만원)

구 분	합 계		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	232	105,959	61	37,687	171	68,272
자체사업	112	17,061	12	1,454	100	15,607
재배정사업	111	66,207	46	35,168	65	31,039
위임국도	9	22,691	3	1,065	6	21,626

❍ 계속사업(61건) : 준공 29건, 추진중 32건

- 준  공 : 서원지구 법면보강공사 등 29건 1,827백만원

- 추진중 : KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 등 32건 35,860백만원

❍ 신규사업(171건) : 준공 80건, 추진중 91건

- 준  공 : 성거도로 포장도 보수공사 등 80건 12,443백만원

- 추진중 : 지방도606호 수부도로 인도설치공사 등 91건 55,829백만원

□ 자연재해대책 수립 및 추진

❍ 완벽한 겨울철(‵21.11.15. ~ ‵22.03.15.) 재해대책 추진

- 강설․결빙으로 인한 대형 교통사고나 피해없이 제설대책 마무리

- 인력 155명, 제설장비 205대(임차포함), 소금 등 자재 8,046톤 투입

❍ 여름철(‵22.05.15. ~ ‵22.10.15.) 재해대책(비상근무체계) 수립

- 급경사지, 산사태 우려지역 등 재해 취약시설 상시점검 추진

- 유관기관 협조체계 구축 및 응급복구 장비‧인력‧자재 사전확보

앞으로
			• 추진 중인 도로 유지보수사업 완벽한 마무리 • 상시 비상근무체계 유지 및 재해 발생시 신속대응

【10】운행제한 위반차량 강력 단속

도로 파손방지 및 원활한 도로 유지관리를 위한 단속강화

대형공사장 등 과적 근원지 과적예방을 위한 사전계도 실시

운행제한 위반 과태료 체납에 대한 징수활동 강화

□ 도로 파손방지 및 원활한 도로 유지관리를 위한 단속강화

❍ 주요 과적발생 근원지(대형공사장 등), 위험교량 주변 노선 집중단속

- 도내 지방도, 국지도, 위임국도 62개 노선 수시 이동단속

❍ 휴일, 주간, 야간 불시 이동단속 : 민원발생 및 필요시

(2022. 06. 23. 기준)

구분	검 차 대 수			적 발 대 수
	2020년	2021년	2022년	2020년	2021년	2022년
합계	11,279	10,124	3,678	430	417	121
고정식	1,223	0	42	8	0	0
이동식	10,056	10,124	3,636	422	417	121

□ 유관기관 간 합동단속 강화

❍ 국토관리사무소, 시군, 경찰서 등 유관기관 간 합동단속 실시

❍ 단속기관 간 단속업무 공유 및 공조단속

※ 2022년 합동단속 실적 : 검차 198대 / 적발 11대

□ 대형공사장 등 과적 근원지 방문을 통한 과적예방 사전계도

❍ 대형공사장 등 과적 유발업체 방문 과적예방 협조

❍ 대형 화물차량 운전자 과적예방 홍보물 배포

□ 운행제한 위반 과태료 체납에 대한 징수활동 강화

❍ 과태료 체납자 재산조회 및 압류조치

- 재산조회 : 차량, 예금, 토지 등 / 수시

- 압류조치 : 재산 발견 즉시

- 징수활동 강화 : 문자, 전화, 방문을 통한 납부독촉 / 수시

※ 고액체납자(체납금액 100만원 이상) 주소지 방문 징수 및 전자예금압류 추진

앞으로
			• 대형공사장, 위험교량, 골재채취장 주변 노선 집중단속 • 체납 과태료 징수강화 및 징수불가 체납액 결손처분

【11】중대재해처벌법 관련 의무이행사항 추진

「중대재해처벌법」시행(’22.1.27.)에 따라 산업안전보건 관리체계 구축

안전관리계획 수립, 안전관리조직 구성 등 안전관리 강화로 중대산업재해 및 중대시민재해 발생 제로화 추진

□【소속직원 안전관리】안전·보건분야 의무 이행 철저

❍ 종합건설사업소 중대재해 안전관리 기본계획 수립(’22. 5. 6.)

- 안전관리체계 구축, 내용연수초과 시설장비 보강 등 의무이행사항 추진을 위한 예산 및 전담조직 구성 등

❍ 관리감독자 선임 및 안전·보건관리자 전문기관 위탁관리 용역 추진

❍ 상시 의견접수창구 등 종사자의 안전 관련 의견 청취절차 마련

□【건설사업현장 안전관리】무사고 건설현장 운영

❍ 중대재해관련 안전 및 보건조치 이행 상황 점검 완료 (상반기, 9지구)

❍ 안전·보건 전담인력(안전관리 기술인) 배치완료 (9지구/ 3.9억 추가 확보)

- 직접감독현장 2개지구(장평·정산지구): 시공사 자체 안전전담 조직 구성

❍ 안전관리 총괄 전담인력 확보 노력 (현행: 공사감독이 공정·안전관리 병행)

- 부서 조직진단 시 안전관리 총괄전담팀(4명 / 팀장1, 산업재해2, 시민재해1) 신설 건의

❍ 계절특성 취약시기(동·하절기) 및 특별기간(휴가철 등) 상시 안전점검 실시

- (상반기) 중앙, 자체, 민간 등 점검 6회(12지구) 실시 / (하반기) 점검 지속 추진

□【공중이용시설 안전관리】중대시민재해 발생 제로화 추진

❍ 연초(~2.15.限) 시설물 안전관리계획 수립 및 전수점검 실시

- 소관 시설물(교량, 터널, 옹벽, 절토사면)의 사전 안전점검 및 지속적 유지관리(보수·보강) 추진, 재해 대응‧사후조치 매뉴얼 마련

예 방		대 비		대 응		복 구
‣ 유해·위험요인 사전점검·개선		‣ 시민재해 대응 계획 마련		‣ 상황관리 및 전파		‣ 재해원인의 분석
‣ 위험요인 발견시 조치매뉴얼 마련		‣ 비상상황 대비 대피 훈련		‣ 구조·구급 ‣ 긴급복구		‣ 재발방지대책의 수립 및 이행

❍ 계절특성 고려 취약시기(동·하절기) 특별안전점검 실시

❍ 낙석․붕괴 등 사고에 대비, 신속한 상황관리체계 유지

앞으로
			• 중대재해 안전관리 의무이행을 위한 추가적인 예산 및 인력 확보 • 정기 현장 점검을 통한 안전사고 예방 및 안전교육 추진

참 고		종합건설사업소 중대재해 안전관리 이행계획 (요약)

구분	소속직원 안전관리		건설사업현장 안전관리	공중이용시설 안전관리
대상	청사 시설관리 공무원 도로유지보수 공무원 환경미화 공무직 도로보수원, 과적단속원 <본소‧지소 총 79명>		도로,건축,하천 분야 공사비 50억 이상 건설 현장 <28개 현장>	교량 380 터널 24 옹벽 10 절토사면 38 <총 452개 시설>
의무	•안전관리자 등 선임(위탁가능) •위험요인 조사‧점검 •관리자‧근로자 안전교육 •안전장비‧보호구 보강		•안전관리 전담인력 증원 -기존: 월 10.5인 -변경: 월 22인(증 11.5)	•안전관리계획 수립 •점검‧조치매뉴얼 마련 •주기적 점검 및 보고
조치 사항	의무 이행을 위한 추가적인 예산 및 인력 확보
	예산	•안전관리 용역 •근로자 현장근무복 •노후장비 교체 •이동검문소 개량 <약 94억원>	•안전관리 전담기술인 노무비 등 증액 <19지구 약 48억원>	•일제 안전점검 실시후 유지보수 소요비용 확보 추진
	인력	-	•안전관리팀 신설(4명) - 팀장 1, 주무관 3	•구조물관리팀 직원 증원 - 지소 시설7급 2명
추진 계획	- 안전보건관리 기본계획 수립 -안전관리 용역예산 확보 (`22년 1회추경) - 안전·보건관리자 전문기관 위탁관리 용역 추진 -노후장비 교체 및 검문소 개선예산 등 확보 (`22년 2회추경 및 `23 본예산)		- 재해 발생 대비 안전점검 전수시행 및 대응매뉴얼 수립 ⇒장기적으로 통합감리전환 검토 - `22년 2추경 및 `23 본예산 수립시 소요예산 확보 -`23년 조직개편 인력 반영	- 시설물 안전관리계획 수립 및 전수점검 실시 - `22년 2회추경 및 `23 본예산 수립시 소요예산 확보 -`23년 조직개편 인력 반영

Ⅲ. 참고사항

□ 주요 사업별 예산확보 및 추진 현황

【1】2022년 분야별 사업 현황

(2022. 07. 01. 기준)

분야별		지구수	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
총 계		340	375.044	335,864
도 로	계	38	192.334	67,632	도로건설과
	국 지 도	10	86.975	18,114
	지 방 도	23	96.169	42,912
	기타도로	5	9.19	6,606
공공건축		33	-	65,192	공공건축과
지방하천정비		33	166.9	52,140	하천개발과
재해복구		3	15.2	32,623
지역개발		1	0.61	12,318
도로유지관리 ※ 자체사업 포함		121	-	63,332	공주지소
		111	-	42,627	홍성지소

【2】도로 확·포장사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 7. 1. 기준)

총 괄		’21년 준공지구		계 속 지 구		’22년 신규지구
◀ 38건 / 67,632백만원 ▶		◀ 3건 / 57백만원 ▶		◀ 34건 / 61,589백만원 ▶		◀ 1건 / 5,986백만원 ▶
․국지도 10 / 18,114		․국지도 1 / 57		․국지도 9 / 12,071		․국지도 1 / 5,986
․지방도 23 / 42,912		․지방도 1 / -		․지방도22 / 42,912		․지방도 0 / -
․기 타 5 / 6,606		․기 타 1 / -		․기 타 4 / 6,606		․기 타 0 / -

사 업 명				사업량	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
					전 체	기시행	2022년	장 차
총 계				38지구 (192.334㎞)	1,832,444	619,568	67,632	1,145,245
국 지 도				10지구 (86.975km)	681,417	360,613	18,114	302,690
설계지구		계속	성환∼입장	연장=10.3km 폭=17.5m	99,100	2,928	405	95,767	2018.～2028.	-	설계
			진산～금산	연장=10.0km 폭=10.0m	48,300	386	5,986	41,928	2020.03. ~ 2023.01.	-	설계 (신규)
		신규
			선장∼염치	연장=11.34km 폭=20.0m	157,033	156,951	57	25	2010.03.03. ～ 2020.07.31.	100 (준공)	준공
공사 지 구		준공
		계속	효제리~ 위라리	연장=0.75km 폭=10.0m	3,000	1,200	100	1,700	2021.～2023.	-	공사
			우성∼이인	연장=0.89km 폭=10.0m	33,957	386	1,505	32,066	2019.～2029.	-	공사
			임천∼강경	연장=9.88km 폭=10.5m	49,615	1,486	4,106	44,023	2019～2027	-	공사
			장척∼목현	연장=3.67km 폭=17.5m	34,578	1,337	906	32,335	2019.～2029.	-	공사
			이호～양곡	연장=4.845km 폭=10.0m	25,111	23,095	370	1,646	2018.09. ~ 2023.08.	65	공사
			당진～서산	연장=19.1km 폭=17.5m	175,500	125,619	1,766	48,115	2019.04. ～ 2028.03.	2.8	공사
			청양～신양IC	연장=16.2km 폭=10.0m	55,223	47,225	2,913	5,085	2017.05. ~ 2023.06.	67	공사
지 방 도				23지구 (96.169km)	1,058,422	211,896	42,912	803,614
설계지구		계속	두마～노성	연장=9.25km 폭=10.0m	116,590	2,549	482	113,559	2018.～2030.	-	설계
			밀두～대음	연장=3.58km 폭=18.75m	49,170	970	200	48,000	2018.～2025.	-	설계
			산동～상덕	연장=7.55km 폭=19.5m	128,659	3,130	500	125,029	2018.～2027.	-	설계
			서면～비인	연장=4.92km 폭=19.5m	29,100	1,010	400	27,690	2019.～2027.	-	설계
			보산원도로	연장=0.7km 폭=9.5m	3,000	170	600	2.230	2017.～2023.	-	설계
			노화～평촌	연장=3.73km 폭=19.5m	34,723	190	200	34,333	2020.～2029	-	설계
			동해～부곡	연장=7.23km 폭=10.0m	44,021	220	200	43,601	2020.～2030	-	설계
			광시～운곡	연장=6.74km 폭=10.0m	46,490	290	700	45,500	2020.～2029	-	설계
			복수～진산	연장=3.90km 폭=19.5m	107,063	1,721	1,300	104,042	2020.～2030.	-	설계
			왕암도로	연장=1.0km 폭=10.0m	15,440	450	500	14,490	2020.～2025.	-	설계
보상지구		계속	삭선～원북	연장=6.08km 폭= 20.0m	46,514	7,760	6,500	32,254	2017.～2027.	-	보상
			고암～역재	연장=1.2km 폭=20.0m	11,000	100	200	10,700	2020.～2030	-	보상
			화성～장곡	연장=2.4km 폭=10.0m	13,306	900	500	11,906	2018.～2025.	-	보상
			구룡～용두	연장=1.3km 폭=10.0m	10,795	609	500	9,686	2018.～2025.	-	보상
			기지시～한진	연장=9.3km 폭= 18.0m	143,171	14,265	7,000	121,906	2017.～2030.	-	보상
공사지구		준공	서산～부석	연장=8.4km 폭=21.5m	100,792	100,792	-	-	2010.11.16. ～ 2020.12.29.	100 (준공)	준공
		계속	반계도로	연장=1.25km 폭=10.0~19.2m	9,783	663	-	9,120	2017.～2023.	-	공사
			대술～정안	연장=4.8km 폭=9.5～11.5m	22,501	13,430	3,500	5,571	2019.07. ～ 2023.07.	53	공사
			어천～공주 (4차)	연장=3.95km 폭=10.0m	48,900	18,846	4,700	25,354	2020.12. ～ 2026.12.	9	공사
			규암～청남	연장=2.509km 폭=10.0m	30,024	23,802	5,830	392	2018.03. ～ 2022.09.	90	공사
			무창포IC ～ 웅천	연장=1.4km 폭=21.75~23.0m	15,626	6,405	2,500	6,721	2020.06 ～ 2025.05.	7.7	공사
			웅천산단 진입도로	연장=1.0km 폭=20m	9,305	3,019	4,000	2,286	2020.06. ～ 2024.05.	1	공사
			오천우회	연장=3.98km 폭= 9.5m	22,449	10,605	2,600	9,244	2020.10. ~ 2026.10.	26	공사
국도				3지구 (6.29km)	50,405	4,859	6,606	38,940
설계 지 구		계속	합곡지구	연장=3.0km 폭=11.5m	18,000	267	221	17,512	2021.～2025.	-	설계
공사 지구	계속		원청사거리	연장=0.89km 폭=3.5～20m	18,905	1,250	1,680	15,975	2020.07. ～ 2024.05.	1	공사
			장평지구	연장=1.4km 폭=16.5~17.4m	5,500	1,437	2,805	1,258	2019.12. ～ 2022.07.	34	공사
			정산지구	연장=1.0km 폭=13.0~15.0m	8,000	1,905	1,900	4,195	2020.08. ～ 2023.08.	66	공사
기타				1지구 (2.9km)	42,200	42,200	-	-
공사지구	준공		안면도 관광지 연결도로	연장=2.9km 폭=27.0m	42,200	42,200	-	-	2018.03. ～ 2021.12.	100 (준공)	준공

※ 2022년 준공지구 해당없음

【3】공공건축사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01.기준)

총 계		’22년도 준공사업		계 속 사 업		’22년도 신규사업
33건 / 644,546		9건 / 33,392		16건 / 496,671		8건 / 114,483

사 업 명			사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
				전체	기시행	2022년	장차
합계				644,546	109,529	65,192	469,299
준공사업	연번	소계	9건	33,392	17,651	15,730	11
	1	충남지식 산업센터 건립공사	지하1층 지상6층 12,486㎡	29,346	15,671	13,675	0	’18.11.～’22.11.	31%	공사중
	2	천안서북소방서 다목적훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사	지상4층, 426㎡	784	784	0	0	’21.03.～’22.08.	45%	공사중
	3	태안소방서 다목적 훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사	지상4층 455㎡	859	42	817	0	’21.03.～’22.10.	-	공사중
	4	계룡소방서 다목적훈련탑 증축공사	지상4층 277㎡	495	304	191	0	’21.03.～’22.10.	5%	공사중
	5	당진 합덕119 안전센터 증축공사	지상1층 62㎡ 내·외부환경개선	865	850	15	0	’21.09.～’22.12.	-	공사중
	6	충남도립 요양원 기능보강공사	기능보강 공사	280	0	280	0	’22.01.～’22.12.	-	공사 발주 준비
	7	종건소 홍성지소 지붕교체공사	지붕교체 공사	203	0	203	0	’22.01.～’22.07.	30%	공사중
	8	아산지역 제설 전진기지 신축공사	신축 지상1층 400㎡	500	0	500	0	’22.05.～’22.12.		설계중
	9	충남역사문화연구원 태양광 발전장치 설치공사	태양광 발전설비 30kw 전기공사	60	0	49	11	’22.04.～’22.12.	-	설계중
계속사업	연번	소계	16건	496,671	91,280	44,742	360,123
	10	소방 복합시설 건립공사	지하1층 지상4층 17,042㎡	76,649	47,292	5,445	23,912	’17.10.～’24.04.	7%	공사중
	11	충남 스포츠센터 건립공사	지하1층 지상2층 13,344㎡	47,500	15,261	5,757	26,482	’18.08.～’23.04.	30%	공사중
	12	대천항 관공선 통합사무실 건립공사	지상2층 1,370㎡	4,878	772	1,952	2,154	’20.08.～’23.05.	-	공사중
	13	충남국제전시 컨벤션센터 건립공사	지하1층 지상4층 51,900㎡	160,300	4,708	361	155,231	’20.10.～26.02.	-	공사 발주 준비
	14	충남 사회적경제 혁신타운 건립공사	지하1층 지상3층 7,500㎡	28,000	12,440	-	15,560	’21.06.～’24.07.	-	설계중
	15	충남 육아종합 지원센터 건립공사	지하1층 지상3층 3,230㎡	13,871	984	6,643	6,244	’20.10.～’23.09.	-	설계중
	16	금산소방서 증축공사	지하1층 지상4층 2,300㎡	7,886	-	415	7,471	’21.01.～’24.12.	-	군관리 계획 용역중
	17	충남 장애인가족 힐링센터	지하1층 지상2층 6,250㎡	26,765	2,130	6,836	17,799	’21.07.～’24.12.	-	설계중
	18	당진소방서 증축공사	지하1층 지상4층 2,300㎡	7,664	394	4,038	3,232	’21.08.～’23.09.	-	설계중
	19	충남미술관 건립공사	지하2층 지상4층 6,680㎡	79,993	3,000	300	76,693	’21.04.～’25.09.	20%	설계중
	20	안면도 지방정원 가든센터 건립공사	지상2층 2,035㎡	14,000	1,500	4,000	8,500	’21.07.～’24.06.	-	설계중
	21	수산종자 연구센터 건립공사	지상3층 1,995㎡	7,220	305	3,920	2,995	’20.09.～’23.05.	-	공사중
	22	충남 광역형 탄소중립 연수원 조성사업	신축 1,650㎡ 리모델링 301㎡	19,800	2,450	3,500	13,850	’22.01.～’24.12.	-	설계중
	23	청양119구조구급센터 증축공사	증축 지상2층 252㎡	600	0	43	0	’22.02.～’23.07.	-	설계중
	24	공주소방서 비상대기소 증축공사	증축 191㎡	606	0	637	0	’22.03.～’23.03.	-	설계중
	25	공주소방서 다목적 훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사	지상4층 432㎡	939	44	895	0	’21.03.～’23.01.	-	공사중

사 업 명			사업량	사업비				의뢰 예정	공정률 (%)	비고
				전체	기시행	2022년	장차
신규사업	연번	소 계	8건	114,483	598	4,720	109,165
	26	통일 플러스센터 건립공사	신축 지하1층 지상3층 2,500㎡	10,000	0	800	9,200	‘22. 12.	-	-
	27	충남 소통협력 공간 조성공사	증축 1,450㎡ 리모델링 4,040㎡	6,000	598	0	5,402	‘22. 07.	-	-
	28	광역해양자원 순환센터 건립공사	지상2층 4,800㎡	15,000	0	180	14,820	‘22. 10.	-	-
	29	판교 119안전센터 건립공사	신축 지상3층 1,100㎡	3,063	0	0	3,063	‘23. 07.	-	-
	30	동학사 119안전센터 건립공사	신축 지상3층 1,100㎡	2,5 00	0	300	2,200	‘22. 07.	-	-
	31	여성가족 플라자 건립공사	신축 지상4층 7,650㎡	42,400	0	2,040	40,360	‘22. 10.	-	-
	32	청소년 진흥원 건립공사	신축 지상4층 6,511㎡	27,820	0	0	27,820	‘22. 08.	-	-
	33	노동안전 문화회관 건립공사	신축 지상3층 1,980㎡	7,700	0	1,400	6,300	‘22. 08.	-	-

【4】지방하천 정비사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

총 괄		‘22년 준공사업		계 속 사 업		‘22년 신규사업
36건 / 84,763		2건 / 2,078		30건 / 79,290		4건 / 3,395
지방하천 33 / 52,140		지방하천 2 / 2,078		지방하천 27 / 46,667		지방하천 4 / 3,395
재해복구 3 / 32,623		재해복구 - / -		재해복구 3 / 32,623		재해복구 - / -

<총  괄>

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

구 분	지구 수	사업량 (km)	사 업 비				비고
			계	기시행	2022년	장차
합 계	36지구	182.1	784,680	162,563	84,763	537,354
지방하천 정비사업	33지구	166.9	716,403	126,909	52,140	537,354	준공 2, 계속 27, 신규 4
지방하천 재해복구	3지구	15.2	68,277	35,654	32,623	-	계속 3

<지방하천 정비사업 세부 내역>

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2022년	장차
계	33지구			166.9	716,403	126,909	52,140	537,354
준 공 사업	소계 (2지구)			9.5	56,168	54,090	2,078	-
	석남천	서산	예천 석남	2.7	21,371	19,934	1,437	-	’17.05.∼’22.08.	95	공사중
	연산천	계룡 논산	엄사 연산	6.8	34,797	34,156	641	-	’18.03.∼’22.03.	100	준 공
계 속 사 업 계 속 사업	소계 (27지구)			145.3	578,010	72,819	46,667	458,524
	화산천	서천	기산 화양	4.3	38,748	25,858	6,258	6,632	’18.03.∼’23.05.	80	공사중
	병천천	천안	병천	7.3	25,093	6,274	6,656	12,163	’17.12.∼’23.07.	20	공사중
	광기천	천안	병천	6.8	25,823	4,560	5,356	15,907	’18.01.∼’23.11.	26	공사중
	주교천	부여	주교	6.7	23,972	2,559	2,500	18,913	’20.12.∼’24.03.	5	공사중
	명천천	서산	성연	1.1	3,047	819	2,001	227	’21.03.∼’23.03.	31	공사중
	중산천	공주	금흥	1.4	17,271	6,768	7,000	3,503	’20.10.∼’23.03.	33	공사중
	장승천	청양	청양	4.7	14,301	5,072	3,500	5,729	’20.12.∼’23.08.	10	공사중
	천안천 (장재천)	천안	백석 불당	2.5	23,170	1,844	3,100	18,226	’19.02.∼’23.12.	12	공사중
	신양천	논산	연무	8.6	29,199	1,768	2,600	24,831	’19.01.∼’23.12.	2	공사중
	석림천	서산	석림	0.5	711	278	433	0	’20.12.∼’22.12.	-	공사 정지
	와룡천	홍성	갈산 결성	7.7	25,247	1,676	300	23,271	2019.～2023.	-	설계중
	도마천	서천	문산	9.4	23,851	1,233	400	22,218	2019.～2025.	-	설계중
	용요천	태안	근흥	6.5	45,278	1,349	500	43,429	2019.～2026.	-	설계중
	왕대천	계룡	두마	3.4	6,497	495	500	5,502	2019.～2023.	-	설계중
	간치천	보령	주산	8.2	30,623	1,382	400	28,841	2019.～2024.	-	설계중
	판교천	서천	종천 서천	4.4	14,376	754	500	13,122	2020.～2024.	-	설계중
	청지천	서산	장홍 석림	5.9	29,431	1,005	500	27,926	2020.～2024.	-	설계중
	왕암천	논산	가야곡	9.0	23,314	925	500	21,889	2020.～2024.	-	설계중
	오봉천	당진	송악 신평	6.0	23,699	1,106	500	22,093	2020.～2024.	-	설계중
	칠산천	부여	임천	11.0	25,373	1,392	500	23,481	2020.～2024.	-	설계중
	진산천	금산	진산	4.9	7,420	750	500	6,170	2020.～2024.	-	설계중
	유등천	금산	복수	6.1	14,323	1,296	913	12,114	2018.～2022.	-	설계중 (하천과)
	둔포천	아산	둔포	4.5	40,222	843	250	39,129	2021.∼2025.	-	설계중
	솔리천	서천	장항	1.3	4,997	401	100	4,496	2021.∼2025.	-	설계중
	초대천	당신	신평	6.3	37,394	1,009	500	35,885	2021.∼2025.	-	설계중
	양촌천	논산	양천	3.4	15,832	802	200	14,830	2021.∼2025.	-	설계중
	판정천	천안	입장	3.4	8,798	601	200	7,997	2021.∼2025.	-	설계중
신규 사업	소계 (4지구)				82,225	-	3,395	78,830
	도곡천	계룡	엄사	2.5	15,086	-	815	14,271	2022.∼2026	-	신 규
	성연천	서산	성연	2.2	14,039	-	800	13,239	2022.∼2026	-	신 규
	구룡천	천안	신방	1.9	18,655	-	554	18,101	2022.∼2026	-	신 규
	삽교천	홍성	홍동	5.5	34,445	-	1,226	33,219	2022.∼2026	-	신 규

<지방하천 재해복구사업>

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2022년	장차
계	3지구			15.2	68,277	35,654	32,623	-
계속사업	금곡천	아산	배방	2.7	11,895	8,289	3,606	-	’20.11.∼’22.12.	45	공사중
	약봉천	아산	송악	5.7	22,503	13,819	8,684	-	’20.11.∼’22.12.	15	공사중
	온양천	아산	송악	6.8	33,879	13,546	20,333	-	’20.11.∼’22.12.	20	공사중

【5】지역개발사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

총 괄		‘22년도 준공사업		계 속 사 업		‘22년도 신규사업
1건 / 12,318		-		1건 / 12,318백만원		-

연번	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				공사기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2022년	장차
합 계		1지구		0.61	36,646	24,328	12,318	0
계속사업	태안 기업도시 연결도로 개설공사	태안 서산	태안 부석	연장=0.6 (폭=25.0m)	36,646	24,328	12,318	0	’20.02.∼’23.02.	55	공사중

【6】도로 유지관리사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01.기준)

총 괄		계속지구		신규지구
232지구 105,959백만원		61지구 37,687백만원		171지구 68,272백만원
․자체사업 112 / 17,061		․자체사업 12 / 1,454		․자체사업 100 / 15,607
․재배정사업 111 / 66,207		․재배정사업 46 / 35,168		․재배정사업 65 / 31,039
․균특사업 -		․균특사업 -		․균특사업 -
․위임국도 9 / 22,691		․위임국도 3 / 1,065		․위임국도 6 / 21,626

<공주․홍성지소>                                      (단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

사업 구분	총계		계속지구						신규지구
			합계		공주		홍성		합계		공주		홍성
계	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	232	105,959	61	37,687	36	31,482	25	6,205	171	68,272	85	31,850	86	36,422
자체사업	112	17,061	12	1,454	9	1,345	3	109	100	15,607	50	7,740	50	7,867
재배정사업	111	66,207	46	35,168	27	30,137	19	5,031	65	31,039	32	11,648	33	19,391
균특사업	0	0	0	0					0	0				0
위임국도	9	22,691	3	1,065			3	1,065	6	21,626	3	12,462	3	9,164

<공주지소>                                       (단위 : 백만원, 2022. 07. 01.현재)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
총 계			121개 지구			63,332
계(계속지구)			36개 지구			31,482
계속지구계속지구	소계	자 체 사 업	9개 지구			1,345
	자체사업	2022년 천안지구 유지관리사업 실시설계용역	천안		1식	33	21.12.~22.02.	100	준공
		2022년 공주지구 유지관리사업 실시설계용역	공주		1식	20	21.12.~22.02.	100	준공
		2022년 논산지구 유지관리사업 실시설계용역	논산		1식	28	21.12.~22.02.	100	준공
		2022년 서천지구 유지관리사업 실시설계용역	서천		1식	26	21.11.~22.01.	100	준공
		2022년 청양지구 유지관리사업 실시설계용역	청양		1식	28	21.11.~22.01.	100	준공
		2022년 오목도로 외 4개소 인도설치공사 실시설계용역	공주지소		1식	38	21.12.~22.02.	100	준공
		서천지구 지방도 위험구간 미끄럼방지시설 설치공사	서천		1식	78	21.12.~22.01.	100	준공
		교량 및 터널 정비사업	공주지소		1식	1,044	21.12.~22.12.	15	공사중
		재해대책 추진	공주지소		1식	50	21.11.~22.03.	100	준공
	소계	재배정 사업	27개 지구			30,137
	재배정사업	KTX공주역 진입지방도 선형개량사업	공주	이인	1식	4,263	19.01.~22.12.	45	공사중
		현내도로 선형개량공사	부여	석성	1식	1,060	21.11.~23.11.	20	공사중
		지방도611호 계동도로 선형개량공사	서천	마서	L=0.4km	439	21.12.~22.08.	10	공사중
		종천도로 선형개량공사	서천	종천	L=0.1km	449	22.03.~22.09.	70	공사중
		둔덕도로 선형개량공사	서천	서천	L=0.1km	352	22.03.~22.12.	20	공사중
		안당도로 위험도로 구조개선공사	서천	마산	1식	670	21.12.~22.12.	20	공사중
		광금도로 선형개량공사	청양	대치	1식	1,770	19.12.~23.02.	55	공사중
		남양 봉우티고개 오르막차로 설치공사	청양	남양	1식	520	21.04∼23.12.	0	발주중
		양촌 모촌지구 위험도로 개량공사	논산	양촌	1식	120	21.10.~22.08.	50	설계중
		갓길정비공사	청양	남양	L=1,6km	333	21.11∼22.08.	85	공사중
		터널방재시설 설치(곡두터널)	공주	정안	1식	70	21.12.∼22.09.	50	추진중
		계동도로 보행로 개설사업(명품도로)	서천	마서	L=1.4km	589	21.12.~22.08.	60	공사중
		군사도로 확포장공사	서천	서천	L=0.2km	237	21.05.~22.07.	80	공사중
		청양 비봉 중묵도로 위험구간 개선공사	청양	비봉	1식	100	22.11.~23.05.	0	계획중
		웅천교 재가설공사	논산	양촌	1식	583	21.12.~22.04.	100	준공
		공공시설물 내진보강	공주지소		4개소	800	21.11.~23.12.	30	공사중
		지방도 교량안전진단	공주지소		1식	30	22.01.~22.02.	100	준공
		지방도 7.28~8.11 수해복구 사업	공주지소		1개소	1,325	20.10.~22.12.	8	설계중
		우곤도로 위험도로 선형개량사업	논산	성동	1식	1,230	17.06.~23.03.	60	공사중
		석막도로 선형개량공사	금산	진산	1식	3,716	20.12.~24.01.	60	공사중
		천을도로 선형개량공사	금산	군북	1식	1,560	20.01.~23.12.	10	공사중
		노성도로 선형개량사업	논산	노성	1식	3,674	21.07.~23.12.	10	공사중
		광암교 재가설공사	청양	운곡	1식	2,100	22.07.~23.12.	10	공사중
		저곡지구 급경사지 붕괴위험지역 정비	금산	제원	1식	2,935	19.01.~22.08.	90	공사중
		서천지구 미끄럼방지 포장공사	서천	서	1식	38	21.12.~22.03.	100	준공
		주내사거리 회전교차로 설치공사	논산	상월	1식	574	22.07.~23.07.	0	발주중
		교량보수보강	부여	부여	1식	600	22.07.~22.12.	10	공사중
계(신규지구)			85개 지구			31,850
신규지구신규지구신규지구	소계	자 체 사 업	50개 지구			7,740
	자체사업자체사업	국지도70호 수향도로 배수로 정비공사	천안	성환	L=0.1km	52	22.03.~22.08.	10	공사중
		광덕도로 진입로 개선공사	천안	광덕	L=0.1km	85	22.03.~22.09.	10	공사중
		동해도로 배수로 정비공사	공주	유구	L=0.1km	27	22.03.~22.06.	100	준공
		안양도로 배수로 정비공사	공주	우성	L=0.1km	22	22.03.~22.12.	10	공사중
		문금도로 사면정비공사	공주	유구	L=0.1km	20	22.03.~22.06.	100	준공
		달산도로 배수로 정비공사	공주	이인	L=0.2km	26	22.03.~22.06.	100	준공
		봉현도로 배수로 정비공사	공주	우성	L=0.1km	140	22.03.~22.06.	100	준공
		월가도로 배수로 준설공사	공주	사곡	L=0.1km	10	22.05.~22.05.	100	준공
		외산도로 배수로 정비공사	부여	외산	L=0.2km	63	22.02.~22.06.	100	준공
		수원도로 배수로 설치공사	부여	양화	L=0.1km	11	22.02.~22.06.	100	준공
		경둔도로 외 2개소 배수로 정비공사	부여	은산	L=0.2km	57	22.02.~22.06.	100	준공
		제내교 안개상습지 개선	논산	채운	1식	28	22.02.~22.06.	100	준공
		2022년 상반기 포장도 보수공사 실시설계용역	공주지소		1식	10	22.02.~22.06.	100	준공
		운행제한 차량 이동검문소 개량사업 실시설계용역	천안	성거	1식	19	22.02.~22.06.	100	준공
		운행제한 차량 이동검문소 개량사업 실시설계용역	논산	연부	1식	20	22.02.~22.06.	100	준공
		석곡도로 노인보호구역 설치공사 실시설계용역	천안	성남	1식	6	22.02.~22.06.	100	준공
		이동 과적검문소 철거공사	천안	성거	1식	16	22.02.~22.06.	100	준공
		반곡도로 버드세이버 설치공사	논산	양촌	1식	10	22.02.~22.06.	100	준공
		관내 제설적치장 전기시설 공사	부여	장암	1식	16	22.02.~22.06.	100	준공
		2022년 공주지구 지방도 포장도 보수공사	공주		L=22km	1,804	22.06.~22.08.	10	공사중
		2022년 상반기 부여 포장도 보수공사	부여		L=7.2km	217	22.04.~22.07.	70	공사중
		용천도로 포장도 보수공사	청양		1식	109	22.01.~22.06.	100	준공
		논산지구 지방도 포장도 보수공사	논산		L=4.5km	360	22.01.~22.06.	100	준공
		지경도로 배수로 정비공사	논산	상월	L=0.9km	53	22.02.~22.05.	100	준공
		숙진도로 배수로 정비공사	논산	상월	L=0.3km	58	22.02.~22.04.	100	준공
		대촌도로 배수로 정비공사	논산	상월	L=1.1km	74	22.02.~22.04.	100	준공
		명암도로 배수로 정비공사	논산	양촌	L=0.1km	15	22.02.~22.04.	100	준공
		구석도로 배수로 개설공사	금산	남이	L=0.2km	66	22.02.~22.04.	100	준공
		구석도로 배수로 보수공사	금산	남이	L=0.1km	12	22.02.~22.04.	100	준공
		신천도로 배수로 정비공사	금산	남일	L=0.2km	15	22.02.~22.04.	100	준공
		신정도로 배수로 정비공사	금산	남일	L=0.2km	16	22.02.~22.04.	100	준공
		역평도로 배수로 정비공사	금산	남이	L=0.5km	62	22.02.~22.04.	100	준공
		두두도로 배수로 정비공사	금산	군북	L=0.3km	38	22.02.~22.04.	100	준공
		용화도로 배수로 정비공사	금산	제원	L=0.9km	45	22.02.~22.04.	100	준공
		구석도로 사면정비공사	금산	남이	L=0.1km	50	22.03.~22.05.	100	준공
		종천도로 외 1개소 배수로 정비공사	서천	종천	L=0.4km	99	22.03.~22.04.	100	준공
		문장도로 외 1개소 갓길 배수로 정비공사	서천	문산	L=0.1km	97	22.03.~22.04.	100	준공
		도둔도로 배수로 정비공사	서천	서	L=0.2km	10	22.03.~22.07.	10	공사중
		원수도로 유턴차로 및 배수로 정비공사	서천	장항	L=0.1km	250	22.03.~22.08.	10	공사중
		신원도로 외 1개소 배수로 정비공사	청양	비봉	L=0.2km	190	22.03.~22.07.	75	공사중
		제초작업	공주지소		1식	950	22.01.~22.06.	10	공사중
		이동검문소 개량사업	천안	성거	1식	250	22.01.~22.06.	10	준공
		부여 국유림 매입	공주	정안	1식	300	22.06.~22.11.	10	추진중
		긴급 도로 유지보수	전노선		1식	312	22.09.~22.12.	0	발주중
		도로유지보수에 따른 폐기물 처리	전노선		1식	30	22.07.~22.12.	0	발주중
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	22.01.~22.12.	30	추진중
		안전시설물 정비사업	전노선		1식	733	22.01.~22.12.	70	공사중
		재해대책 추진 장비임차료	전노선		1식	300	22.01.~22.12.	50	추진중
		재해대책 추진 자재구입	전노선		1식	227	22.01.~22.12.	20	추진중
		비점오염저감시설 운영 유지관리	전노선		1식	60	22.07.~22.12.	0	발주중
	소계	재배정사업	32개 지구			11,648
	재배정사업재배정사업	서북 성거도로 교차로 개선공사	천안	성거	1식	300	22.01.~22.09.	60	공사중
		덕학도로 교차로 개선공사	공주	의당	L=0.2km	250	22.01.~22.09.	30	공사중
		중장삼거리 교차로 개선공사	공주	계룡	L=0.1km	350	-	0	계획중
		팔충교차로 회전교차로 설치공사 실시설계용역	부여	충화	1식	50	22.01.~22.09.	50	설계중
		덕지도로 위험도로 구조개선공사	공주	탄천	L=0.4km	370	22.07.~23.07.	0	발주중
		하황도로 외 1개소 구조개선 공사	부여	장암	L=0.5km	350	22.01.~22.06.	100	준공
		오목도로외 1개소 인도설치공사	천안	성거	L=0.4km	200	22.01.~22.09.	10	공사중
		월산도로 인도설치공사	공주	정안	L=0.4km	300	22.05.~22.07.	80	공사중
		유마교 인도설치공사	공주	유구	L=0.2km	370	22.05.~22.06.	100	준공
		증산도로 인도설치공사	부여	석성	L=0.2km	100	22.06.~22.09.	10	공사중
		성거도로 포장도 보수공사	공주지소		1식	800	22.01.~22.06.	100	준공
		도로대장 유지관리	공주지소		1식	20	22.06.~22.09.	10	설계중
		운행방향 유도레인 설치	공주지소		1식	30	22.01.~22.08.	70	공사중
		지방도 안전시설(방호울타리)정비	공주지소		전노선	1,300	22.01.~22.12.	50	공사중
		지방도 표지판 정비	공주지소		1식	100	22.01.~22.06.	100	준공
		도로표지(LED) 개선사업	공주지소		1식	150	22.01.~22.06.	100	준공
		로드킬 방지시설 설치공사	공주지소		1식	200	22.06.~22.08.	30	공사중
		급경사지 붕괴위험지역 지정	공주지소		1식	100	22.06.~22.09.	10	설계중
		소음저감시설 설치	공주지소		1식	200	22.01.~22.06.	100	준공
		차선 시인성 개선사업	서천	마서	1식	200	22.07∼22.09.	10	공사중
		안개잦은곳 개선사업	공주지소		1식	78	22.06.~22.08.	10	공사중
		유산 회전교차로 개선공사	서천	한산	1식	250	22.03.~22.07.	90	공사중
		복수도로 포장도 보수공사	금산		1식	400	22.03.~22.04.	100	준공
		논산지구 포장도 보수공사	논산		1식	300	22.03.~22.06.	100	준공
		양촌도로 인도설치공사	논산	양촌	1식	230	22.05.~22.08.	10	공사중
		복수도로 인도설치공사	금산	복수	1식	220	22.01.~22.08.	10	공사중
		명품도로 조성 추진(남전도로)	서천	마서	L=2.9km	400	22.04~22.08	60	설계중
		인양도로 인도설치공사	청양	청남	L=0.7km	280	22.04~22.06	100	준공
		용마리 갓길정비공사(2차)	청양	남양	L=0.95km	400	22.07~22.12	0	발주중
		대치 탄정도로 교차로 개선공사	청양	대치	1식	50	22.04~22.10	30	추진중
		지방도 교량안전진단	공주지소		1식	1,450	22.01~22.12	70	추진중
		교량 보수보강(도로철도항공과)	공주지소		1식	1,850	22.01~22.12	10	공사중
	소계	위 임 국 도	3개 지구			12,462
	위임국도	도로안전 및 환경개선	전노선		1식	3,205	22.01~22.12	30	공사중
		도로유지보수	전노선		1식	8,072	22.01~22.12	20	공사중
		도로병목지점개선	전노선		1식	1,185	22.01~22.12	30	공사중

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음.

<홍성지소>                                      (단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
총 계			111개 지구			42,627
계(계속지구)			25개 지구			6,205
계속지구	소계	자체 사업	3개 지구			109
	자체사업	국지도70호 서원지구 법면보강공사	아산	염치	1식	88	21.10.~22.03.	100	준공
		지방도609,624호 도로구역 결정(변경) 고시용역	아산,홍성		1식	5	21.05.~22.03.	100	준공
		홍성,예산지역 보행자용 방호울타리 설치공사	홍성,예산		1식	16	21.12.~22.03.	100	준공
	소계	재배정 사업	19개 지구			5,031
	재배정사업	지방도617호 도화담교 재가설공사	보령	미산	1개소	2,707	21.12.~23.12.	35	공사중
		지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.87km	414	20.12.~23.02.	70	공사중
		지방도603호 포지도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.84km	668	21.05~23.04.	35	공사중
		지방도607호 황교도로 선형개량공사	보령	웅천	L=0.24km	476	21.10~22.12.	35	공사중
		지617호 도화담교 재가설공사 실시설계용역	보령	미산	1식	24	21.03.~22.03.	100	준공
		국지도70호 서원지구 법면보강공사	아산	염치	1식	30	21.10.~22.04.	100	준공
		지방도615호 교로도로 인도설치공사	당진	성문	L=0.53km	70	21.11.~22.05.	100	준공
		지방도634호 황촌도로 인도설치공사	태안	원북	L=0.36km	141	21.04.~22.06.	100	준공
		안개상습구간 개선공사	서산,홍성,예산,태안		1식	367	21.11.~22.03.	100	준공
		22년 예산지역 지방도 유지보수공사 설계용역	예산		1식	6	21.12.~22.03.	100	준공
		22년 아산지역 지방도 유지보수공사 설계용역	아산		1식	21	21.12.~22.03.	100	준공
		22년 태안지역 지방도 유지보수공사 설계용역	태안		1식	6	21.12.~22.03.	100	준공
		22년 서산지역 지방도 유지보수공사 설계용역	서산		1식	19	21.12.~22.03.	100	준공
		22년 보령지역 지방도 유지보수공사 설계용역	보령		1식	34	21.12.~22.03.	100	준공
		22년 홍성지역 지방도 유지보수공사 설계용역	홍성		1식	22	21.12.~22.03.	100	준공
		22년 당진지역 지방도 유지보수공사 설계용역	당진		1식	6	21.12.~22.03.	100	준공
		22년 아산홍성지역 인도설치공사 설계용역	아산, 홍성		2식	6	21.12.~22.03.	100	준공
		22년 서산당진지역 인도설치공사 설계용역	서산, 당진		2식	9	21.12.~22.03.	100	준공
		22년 보령태안지역 인도설치공사 설계용역	보령, 태안		2식	5	21.12.~22.03.	100	준공
	소계	위 임 국 도	3개 지구			1,065
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	447	22.01.~22.12.	50	공사중
		도로유지보수	전노선		1식	167	22.01.~22.12.	50	공사중
		위험도로개선	전노선		1식	451	21.05.~22.05.	100	준공
계(신규지구)			86개 지구			36,422
신규지구신규지구신규지구	소계	자 체 사 업	50개 지구			7,867
	자체사업자체사업	지방도607호 소황도로 포장도 보수공사	보령	웅천	L=0.90km	160	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도607호 황룡도로 포장도 보수공사	보령	청라	L=1.50km	230	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도610호 송학도로 포장도 보수공사	보령	주교	L=1.00km	170	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도617호 늑전도로 포장도 보수공사	보령	미산	L=1.20km	229	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도606,617호 이동과적검문소 용역	보령		1식	16	22.03.~22.06.	100	준공
		보령지역 지방도 유지보수공사(연간)	보령		1식	26	22.03.~22.11.	50	공사중
		지방도628호 냉정도로 포장도 보수공사	아산	인주	L=2.00km	300	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도623호 오목~대흥도로 포장도 보수공사	아산	인주	L=1.00km	150	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도628호 덕지~삼거도로 포장도 보수공사	아산	음봉	L=1.30km	170	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도616호 동화도로 배수시설 정비공사	아산	송악	L=0.30km	48	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도623호 이동과적검문소 공사 용역	아산		1식	16	22.03.~22.06.	100	준공
		아산지역 지방도 유지보수공사(연간)	아산		1식	43	22.03.~22.11.	50	공사중
		국지도96호 간월도로 포장도 보수공사	서산	부석	L=2.01km	310	22.04.~22.06.	100	준공
		지방도634호 팔봉도로 포장도 보수공사	서산	팔봉	L=1.99km	270	22.04.~22.06.	100	준공
		지방도634호 덕송도로 배수시설 정비공사	서산	팔봉	L=0.30km	51	22.04.~22.06.	100	준공
		지방도649호 통로박스 보안등 설치공사	서산	인지 부석	1식	130	22.05.~22.09.	70	공사중
		서산지역 지방도 유지보수공사(연간)	서산		1식	26	22.03.~22.11.	50	공사중
		국지도70호 신흥도로 포장도 보수공사	당진	합덕	L=1.30km	250	22.03.~22.06.	100	준공
		국지도70호 성상도로 포장도 보수공사	당진	면쳔	L=1.20km	220	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도615호 갈산도로 포장도 보수공사	당진	순성	L=1.70km	280	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도615호 통정도로 배수시설 정비공사	당진	석문	L=0.60km	37	22.03.~22.06.	100	준공
		당진지역 지방도 유지보수공사(연간)	당진		1식	44	22.03.~22.11.	50	공사중
		국지도96호 상정도로 포장도 보수공사	홍성	광천	L=1.70km	360	22.03.~22.06.	100	준공
		국지도96호 가송도로 포장도 보수공사	홍성	광천	L=1.70km	9	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도609호 송월도로 포장도 보수공사	홍성	홍성	L=2.40km	150	22.03.~22.06.	100	준공
		국지도96호 대평도로 배수시설 정비공사	홍성	광천	L=0.20km	59	22.03.~22.08.	80	공사중
		국지도96호 가송도로 배수시설 정비공사	홍성	장곡	L=0.10km	9	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도616호 봉서도로 배수시설 정비공사	홍성	금마	1식	13	22.03.~22.06.	100	준공
		국지도96호 대현도로 배수시설 정비공사	홍성	장곡	1식	10	22.03.~22.08.	80	공사중
		홍성지역 지방도 유지보수공사(연간)	홍성		1식	26	22.03.~22.11.	50	공사중
		지방도616호 월송도로 포장도 보수공사	예산	광시	L=1.80km	260	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도618호 대지도로 포장도 보수공사	예산	봉산	L=1.04km	200	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도619호 광시도로 포장도 보수공사	예산	광시	L=1.58km	220	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도645호 화산도로 포장도 보수공사	예산	대술	L=0.50km	79	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도619호 마교도로 배수시설 정비공사	예산	봉산	L=0.10km	60	22.03.~22.06.	100	준공
		예산지역 지방도 유지보수공사(연간)	예산		1식	26	22.03.~22.11.	50	공사중
		지방도603호 삭선도로 포장도 보수공사	태안	태안	L=1.10km	160	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도603호 장산도로 포장도 보수공사	태안	태안	L=2.10km	280	22.03.~22.06.	100	준공
		지방도634호 산후도로 포장도 보수공사	태안	태안	L=1.40km	240	22.03.~22.06.	100	준공
		국지도96호 신진대교 항로표지 위탁용역	태안	근흥	1식	9	22.03.~22.12	60	추진중
		국지도96호 용신도로 배수시설 정비공사	태안	근흥	L=0.35km	18	22.03.~22.06.	100	준공
		태안지역 지방도 유지보수공사(연간)	태안		1식	26	22.03.~22.11.	50	공사중
		지방도 풀깎기	전노선		1식	700	22.05.~22.12.	50	공사중
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	22.01.~22.12.	60	추진중
		도로유지보수에 따른 폐기물 처리	전노선		1식	30	22.01.~22.12.	60	추진중
		도로시설물 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	700	22.03.~22.06.	60	추진중
		설해 및 수해대책 장비 임차료	전노선		1식	300	22.01.~22.12.	70	추진중
		설해 및 수해대비 자재구입	전노선		1식	227	22.01.~22.12.	70	추진중
		터널 및 교량 정비사업	전노선		1식	100	22.01.~22.12.	50	공사중
		비점오염저감시설 유지관리	전노선		1식	120	22.01.~22.12.	50	추진중
	소계	재배정사업	33개 지구			19,391
	재배정사업재배정사업	지방도603호 관리도로 위험도로 구조개선공사	태안	이원	L=0.87km	4,208	22.01.~22.12.	75	공사중
		지방도603호 포지도로 위험도로 구조개선공사	태안	이원	L=0.84km	3,048	22.01.~22.12.	35	공사중
		도로대장 유지관리	보령, 홍성, 예산, 태안		1식	20	22.06.~22.09.	5	추진중
		운행방향 유도레인 설치	아산, 서산, 당진		1식	30	22.02.~22.03.	100	준공
		지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선		1식	1,300	22.03.~22.12.	75	공사중
		동물찻길사고 방지시설 설치	서산,아산, 당진,홍성		1식	200	22.01.~22.05.	100	준공
		도로 표지판 정비사업	전노선		1식	100	22.03.~22.05.	100	준공
		도로 표지판(LED) 개선사업	서산, 예산, 태안		1식	150	22.03.~22.11.	70	공사중
		야생조류 투명방음벽 충돌 저감 대책	서산	인지	1식	100	22.07.~22.12.	0	발주중
		지방도607호 월전도로 포장도 보수공사	보령	남포	L=2.7km	500	22.01.~22.06.	100	준공
		지방도628호 탕정도로 포장도 보수공사	아산	탕정	L=4.0km	500	22.01.~22.06.	100	준공
		국지도96호 서산~홍성 포장도 보수공사	홍성	서부	L=8.0km	1,000	22.01.~22.06.	100	준공
		지방도606호 수부도로 인도설치공사	보령	웅천	L=0.30km	300	22.01.~22.12.	50	공사중
		지방도624호 해암도로 인도설치공사	아산	인주	L=0.30km	300	22.01.~22.12.	50	공사중
		지방도634호 양길도로 인도설치공사	서산	팔봉	L=0.30km	300	22.07.~22.12.	5	발주중
		지방도647호 용장도로 인도설치공사	서산	용장	L=0.20km	200	22.06.~22.9.	10	공사중
		지방도647호 운산도로 인도설치공사	서산	용장	L=0.20km	400	22.07.~22.12.	5	발주중
		지방도649호 고대도로 갓길정비공사	당진	고대	L=0.30km	300	22.05.~22.08.	10	공사중
		지방도619호 천태도로 인도설치공사	홍성	장곡	L=0.30km	300	22.01.~22.12.	50	공사중
		지방도634호 방갈도로 인도설치공사	태안	원북	L=0.20km	200	22.01.~22.12.	50	공사중
		국지도96호 버드랜드 교차로 개선공사	서산	부석	1식	70	22.05.~22.12.	10	추진중
		서산지역 회전교차로 설치공사 용역	서산	운산,해미	2식	50	22.02.~22.08.	70	추진중
		지방도618호 갈산도로 교차로 개선공사	서산	운산	1식	350	22.09.~22.11.	5	설계중
		지방도647호 오학도로 교차로 개선공사	서산	해미	1식	350	22.09.~22.11.	5	설계중
		지방도616호 도막사거리 교차로 개선공사	홍성	금마	1식	100	22.08.~22.12.	0	계획중
		지방도619호 백석도로 선형개량공사 실시설계용역	당진	순성	L=0.50km	150	22.06.~22.12.	50	추진중
		지방도617호 도화담교 재가설공사	보령	미산	1개소	900	21.12.~23.12.	35	공사중
		중대교 외 4개소 보수보강공사	전노선		5개소	750	22.01.~22.12.	35	공사중
		내포지하차도 보수보강공사	홍성	홍북	1식	800	22.01.~22.08.	80	공사중
		교량 및 터널 안전진단 및 점검	전노선		1식	1,000	22.01.~22.12.	50	추진중
		지방도607호 월전도로 회전교차로 설치공사	보령	남포	1식	420	22.01.~22.12.	10	설계중
		안개잦은곳 개선사업	전노선		1식	875	22.01.~22.12.	5	설계중
		지방도유지관리 실시설계용역	전노선		1식	120	22.08.~22.12.	0	계획중
	소계	위 임 국 도	3개 지구			9,164
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	3,958	22.01.~22.12.	75	공사중
		도로유지보수	전노선		1식	4,376	22.01.~22.12.	75	공사중
		위험도로개선	전노선		1식	830	22.06.~23.03.	50	공사중

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음

□ 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
종합건설 사업소	소장	지방기술서기관	최동석	2021.01.01.
	행정관리과장	지방행정사무관	김동환	2022.01.12.
	도로건설과장	지방시설사무관	이창로	2021.01.01.
	공공건축과장	지방시설사무관	김재균	2020.07.01.
	하천개발과장	지방시설사무관	정성진	2022.01.12.
공주지소	지소장	지방시설사무관	김정흠	2021.07.01.
홍성지소	지소장	지방시설사무관	임형균	2021.07.01.

《충청남도교통연수원》

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 □ 일반현황 □ 기구 및 기능 □ 예산현황 Ⅱ. 주요업무 추진상황 □ 총 평 □ 분야별 추진실적 및 계획 Ⅲ. 참고사항 □ 당면 현안사항 □ 이사 및 직원 명단

Ⅰ. 기본 현황

□ 일반현황

교통안전 교육 및 계도를 위해 설립된 공직유관 단체(사단법인)로서 도민의 교통안전 의식 향상과 선진 교통문화 조기 정착 추진

❍ 법인형태 : 사단법인(설립등기 1987. 5. 13.)

❍ 설립근거 : ｢여객자동차운수사업법｣,｢화물자동차운수사업법｣,

｢충청남도교통연수원 설치 및 운영조례｣

❍ 소 재 지 : 충남 공주시 연수원길 83(금흥동 110-2번지)

❍ 임    원 : 17명(이사장 행정부지사, 이사 14명, 감사 2명)

※ 이사 15명(당연직 5, 선출직 10), 감사 2명(당연직 1, 선출직 1)

□ 기구 및 기능

① 기 구 : 2과 4팀

										이 사 장 (행정부지사)
															총회 및 이사회
										연수원장
			총무과														연수과
행정지원팀						정책개발팀								운수종사자 교육팀						교통안전 교육팀

<정․현원 현황>

구 분	계	일 반 직(정원/현원)							공무직
		원장	2급	3급	4급	5급	6급	기능직
정 원	15	1	2	4	2	2	2	2	3
현 원	15	1	2	4	2	2	2	2

② 주요기능

	- 운수종사자교육
	❍ 운수종사자의 자질과 안전의식 함양을 위한 교통안전교육 ❍ 안전한 교통문화 선도자 양성을 위한 교통안전교육
	- 교통안전교육
	❍ 어린이, 청소년, 어르신, 자가운전자 등 교통안전교육 ❍ 세종시민 등 위탁교육 ❍ 교통약자를 위한 특별교육
	- 교통안전계도활동
	❍ 교통약자(어린이, 어르신) 보호 의식 강화를 위한 계도 ❍ 명절 및 행락철 특별 캠페인 ❍ 교통문화 향상을 위한 캠페인
	- 시설/임대
	❍ 교육 시설 및 운동장(축구장) 임대 ❍ 운수단체(조합/협회) 사무실 임대

□ 예산현황

❍ 총규모 : 2,123,691천원

❍ 세  입 : 영업외수익 1,913,000(90%), 영업수익 116,320(5.5%)

자본적수입 94,371(4.5%)

※ 영업외수익 – 道 출연금 1,909,500천원 포함

❍ 세  출 : 기관운영비 1,330,047(62.6%),

교육사업운영비 778,810(36.7%), 예비비 14,834(0.7%)

Ⅱ. 주요업무 추진상황

□ 총   평

도내 교통사고의 발생 원인에 대한 전년도 데이터 분석자료를 근거로 교육을 추진[어르신·이륜차]하고 유관기관과 업무협력을 지속 추진하는 등 교통사고 감소를 위한 활동을 다각화함

충남형 온라인 교통안전 교육센터 구축(9월 완료)을 통하여 상시 교육지원체계를 마련하고 어린이 교육 저변 확대와 현안 대응 교육을 통해 교통안전 문화 확산을 위한 최접점 기관으로 역할을 수행하고 있음

□ 주요성과로는

❍ 환경 대응을 통한 운수종사자 교육의 지속가능성 제고

- 안전한 교육 운영으로 교육 간 코로나19 확진자 Zero 달성

- 온라인 플랫폼(LMS) 구축으로 교육 고도화 이룩(9월 완료)

❍ 민-관 협력을 통한 어르신 교통안전 거버넌스 구축[3건]

- 도로교통공단, 농협은행 충남세종지역본부, 노인종합복지관

❍ 계도 활동 다각화로 두바퀴 차량 교통안전 확보

- 배달 이륜차 교통사고 예방을 위한 안전운전 홍보 추진

- 안전한 캠퍼스 조성을 위한 대학생 교통사고 대응 강화

❍ 어린이 교통안전 문화 창달을 위한 저변 확대 및 전문성 강화

- 가정 內 교통안전 문화 확산 추진(충남녹색어머니연합회 협력)

- 충남형 어린이 교통안전 교육과정 개발을 통한 교육 체계화

❍ 사고 데이터 분석을 통한 맞춤형 대책 발굴 추진(어르신·이륜차)

□ 앞으로

❍ 차질 없는 법정 교육 완수 및 교통안전 교육 고도화 지속 추진

□ 분야별 추진실적 및 계획

□ 2022년도 상반기 교육운영 실적

<2022.06.30.기준>

구 분			계 획		실 적				비고
			횟수 (회)	인원 (명)	횟수 (회)		인원 (명)
						비율(%)		비율(%)
총 계			1,260	68,822	942	74.76	33,016	47.97
1. 운수종사자 교육
	합 계		35	20,332	15	42.86	1,062	5.22
	보수 교육	소 계	15	18,034	6	40.00	399	2.21
		집합과정	15	750	6	40.00	399	53.20
		온라인과정	-	17,284	-	-	-	-	9월
	신규 교육		15	720	7	46.67	280	38.89
	법령위반자 교육		(15)	-	(7)	(46.67)	165	-
	위험물질 운송차량 운전자 교육		5	200	2	40.00	93	46.50
	세종시 보수 교육		-	1,378	-	-	125	9.07
2. 교통약자 이동편의 증진 교육
	합 계		4	1,160	-	-	-	-
	특별교통수단 운전자 교육		4	160	-	-	-	-	9월
	저상버스 운전자 교육		-	1,000	-	-	-	-	10월
3. 도민 교육
	합 계		1,221	47,330	927	75.92	31,954	67.51
	일반 교육	소 계	1,190	46,000	926	77.82	31,679	68.87
		어린이	1,000	25,000	762	76.20	16,418	65.67
		청소년	50	5,000	50	100.00	7,078	141.56
		어르신	20	10,000	31	155.00	5,000	50.00
		자가운전자	20	1,000	12	60,00	872	87.20
		세종시민	100	5,000	71	71.00	2,311	46.22
	특별 교육	소 계	31	1,330	1	3.22	275	20.67
		다문화가정 교육	20	1,000	-	-	-	-	하반기
		녹색어머니 심화 교육	1	30	-	-	-	-	7월
		메타버스 기반 PM 교육	10	300	1	10.00	275	91.67	하반기

【1】환경 대응을 통한 운수종사자 교육의 지속가능성 제고

안전한 교통문화 확산을 위한 차질 없는 운수종사자 교육 운영

플랫폼 구축으로 교육방식의 고도화, 수요자 중심 교육 추진

□ 여객‧화물자동차 사고예방을 위한 운수종사자 교육 운영

❍ [교육대상] 여객‧화물 자동차 운수종사자 : 20,332명

- 버스(노선, 전세, 특수여객), 택시(법인, 개인), 화물(일반, 개별, 용달)

＊ 관련 근거 : 「여객자동차법」 제25조, 「화물법」 제59조, 「충청남도교통연수원 설치 및 운영 조례」

❍ [주요과정] 보수(4시간) 및 신규(16시간) 교육, 법령위반자 교육(8시간), 위험물질 운송차량 운전자 교육(8시간) 4개 과정

❍ [교육계획] 감염병 예방을 위한 소규모 교육과 온라인 교육을 병행 ⇨ 안전한 교육환경 조성 및 교육수요자 편의 제고

- (집합교육 과정) : 35회, (온라인 과정) 하반기 집중 교육

□ 시‧공간적 제약 없는 온라인 교육 서비스 제공

❍ [추진배경] 오프라인 교육 운영 시 지역을 이동(공주)하거나 생업 종사 및 일상 시간에 영향을 주는 등 애로 발생

- 누구든(Anyone), 언제든(Anytime), 어디서든(Anywhere) 이용 가능한 상시교육 지원 시스템 구축 추진

- 과정 및 대상별 맞춤형 콘텐츠를 제작 ⇨ 온라인 교육 실시

＊ [’21년 운수종사자 교육생 최다 의견] 상시학습 온라인 교육 개설요청 : 150건

❍ [운영과정] 운수종사자 보수 교육(17,284명)

❍ [추진일정] 플랫폼 구축 및 콘텐츠 개발(8월 限) ⇨ 9월부 집중‧관리 교육

앞으로
			•안심 교육환경 조성으로 교육생 감염자 ZERO 유지 •교육운영의 위기대응력 제고를 통한 법정교육 목표 완수

【2】교통약자 이동권 보장을 위한 안전한 교통 서비스 제공

장애인 인식 개선 등 안전한 교통복지 실현을 위한 교육 운영

교육과정 신설로 교통약자의 대중교통 이용 편의성 제고 도모

□ 특별교통수단 운전자 교육 과정 운영을 통한 교통복지 실현

❍ [특별교통수단] 가정 外 이동에 제약이 많은 교통약자의 이동을 지원하기 위한 휠체어 전용 탑승 차량

❍ [교육대상] 충남 광역이동지원센터 소속 운전자 : 160명

❍ [교육내용] 장애인 인식 개선 및 인권 보호, 상황별 응급처치, 교통법규 및 안전운전 요령 등(4시간)

❍ [교육계획] 소규모 집합교육 4회(주말 및 평일 편성), 9월부 운영

□ 안전 공유가치 확산을 위한 저상버스 운전자 교육 과정 신설

❍ [저상버스] 고령자, 장애인 등 교통약자의 대중교통 편의성을 높이기 위하여 차체가 낮고 출입문에 경사로가 설치된 버스

❍ [신설배경] 저상버스 운전원 대상 교육 미흡으로 인한 장애인 이동권 및 인격권 침해 건 발생 ⇨ 道 인권센터의 교육 권고 명령

＊ 근거 : 「교통약자법」 제13조의2, 「道 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례」

❍ [교육대상] 도내 저상버스 운행업체 소속 운전자 : 1,000명

❍ [교육내용] 장애인 인식 개선 및 인권 보호, 상황별 응급처치, 리프트 사용방법 및 장애인 탑승요령 등(2시간) 교육을 통한 충남형 선진 교통복지 실현 기반 마련

＊ 충청남도 인권센터 장애인분과 측과 교과 내용 의견수렴 완료(04.22.)

❍ [교육계획] 온라인을 통한 영상 교육, 10월부 교육 실시

앞으로
			•과정별‧대상별로 현장형 대면교육과 비대면 온라인 교육을 병행한 양질의 교육 서비스 제공 •교통안전 취약계층에 대한 균등한 안전 보장 노력 추진

【3】민-관 협력으로 어르신 교통안전 거버넌스 구축

교통약자(어르신) 보호를 위한 유관기관 협력 체계 구축

온·오프라인 양방향 교육을 통한 안전 시너지 효과 기대

□ 道-도로교통공단-교통연수원 교통안전교육 공동 추진

❍ 충남 전체 교통사고 사망자 대비 고령자 교통사고 사망자 비율은 43.7%로 매우 높은 수준

＊ 道 교통사고 사망자 수 : 265명, 고령자 교통사고 사망자 수 : 116명[’21년 기준]

❍ 道, 도로교통공단, 교통연수원 공동 어르신 교통사고 예방 대책  ⇨ 자동차 운전면허 갱신 대상자에 고령 운전자 교통안전교육 추진

＊ [상반기] 고령운전자 대상 시‧군 순회 집합교육 실시(14개 시‧군, 2,512명)

□ 농협 충남세종지역본부와 연계한 어르신 교통안전 활동 전개

❍ 연수원-농협중앙회 충남세종지역본부 간 MOU 체결(’21년 6월) 후속 조치로 금년도 도내 농·축협 조합원 대상 홍보 지속 추진

❍ 65세 이상 조합원을 대상으로 교육 추진 ⇨ 교통안전 홍보 영상(농기계 등)을 문자메시지로 발송하여 시청 유도

＊ 65세 이상 조합원 대상 온라인 홍보 콘텐츠 배포 실적 : 107,615명(’21년)

□ 어르신 표적(Target) 교육을 위한 노인종합복지관 협력 실시

❍ 교육 대상 표적화(수요자 명확화)를 위한 돌봄서비스 연계 추진

- 돌봄서비스를 지원받는 65세 이상 어르신 대상 교육 및 용품 지원

- 생활지원사를 통한 1대1 대면 교육으로 효과성 증진 기대

＊ 노인돌봄서비스 생활지원사 대상 교통안전 전문성 강화 교육 실시(예정)

❍ 공주시노인복지관과 업무협약 체결 완료(06.27.) ⇨ 어르신 교육 추진 예정(7월부, 670명)

앞으로
			• 코로나19 상황 완화에 따라 유관기관 협력을 지속 추진하고 하반기 어르신 교육 재개

【4】계도 활동 다각화로 두바퀴 차량 교통안전 확보

MZ세대 맞춤형 온라인 교육 콘텐츠 제작 및 배포

道 교통문화지수 향상을 위한 교통안전 계도 대상 확대

□ 지역 대학과 연계한 대학생 대상 개인형 이동장치 안전 교육

❍ 최근 3년간 개인형 이동장치 사고 건수는 총 1,569건으로 연평균 100% 증가, 잦은 법령 개정에 따른 규정 미숙지 및 안전의식 부족

＊ (’18년) 225건 → (’19년) 447건 → (’20년) 897건

- 주요 사고연령층은 20~30대로 544건(약 35%)이 발생, 20대 이하 연령층의 연평균 교통사고 증가율은 189%로 급격히 증가

❍ 교통사고 예방을 위하여 공주대학교와 업무협약 체결(’21.10.)

❍ 공주대학교에 개인형 이동장치(PM) 교통안전 홍보 영상(2편) 제공

❍ 공주대 축제 시 교통안전 홍보(부스 운영) 실시(’22.05.)

＊ 메타버스를 활용한 개인형 이동장치 교육(275명), 음주운전 체험 교육(102명) 완료

□ 안전배달문화 조성을 위한 이륜차 안전운전 홍보

❍ ’21년 道 이륜차 교통사고 사고 건수와 부상자 수는 감소추세이나, 사망자는 오히려 증가함

＊ 사망 : 37명 → 45명, 부상 : 910명 → 747명, 사고 : 737건 → 636건(’20년 → ’21년)

❍ 안전한 배달문화 정착과 교통사고 사망자 제로화를 위하여 배달종사자 대상 교통안전 분야 활동 전개 추진

❍ 특히 공주시, 서천군, 청양군이 사고 건수와 사망자 수, 부상자 수에서 상위권으로 집중 홍보 필요

＊ (사고) 청양>서천>공주, (사망자) 예산>서천>태안, (부상자) 청양>공주>논산

❍ 도내 배달대행업체와 업무협의(6월)를 통하여 교통안전 홍보 문자 발송 및 방문 계도 추진(하반기)

앞으로
			• 공주대학교 캠퍼스를 순회하며 개인형 이동장치 체험교육 전개(천안시, 예산군) • 이륜차 교통사고 다발지역 內 배달대행업체 협력 추진

【5】어린이 교통안전 문화 창달을 위한 저변 확대

학교-가정을 잇는 교통안전 활동으로 안심 등하굣길 조성

교육과정 개발을 통해 생애주기별 교통안전 교육의 초석 마련

□ 꿈나무 미래를 위한 가정 內 교통안전 문화 확산 추진

❍ 어린이 교통안전을 위한 교육 및 홍보활동을 지속 수행하고 있으나, 학교 밖 계도 추진을 위한 한계 봉착 ⇨ 녹색어머니연합회와 연계한 교통안전 교육 다각화

- 연간 1회 추진하던 녹색어머니 역량강화 워크숍을 녹색어머니 심화 교육으로 전환(’21년 부)

- 교육 전문성 개발 및 가정 내 교통안전 지킴이 역할 강화

＊ [기존] 등굣길 계도 중심 → [개선] 가정 내 자발적 교육 확대

❍ 온라인 교통안전 가정통신문 발송

- 비대면 매체를 활용한 홍보활동으로 학부모와 아이가 함께하는 교통안전 문화활동 전개

＊ 일선 학교·유치원 교사·학부모·학생 대상 홍보물 전송 완료(5월)

□ 충남형 어린이 교통안전 교육과정 개발을 통한 교육 체계화

❍ 道 교통사고 원인 분석 결과(’21년 10월)를 활용, 교통환경 변화 대응 및 교육과정 고도화를 위한 표준안 마련 추진

- [대상] 취학 전 아동, 초등학교 저학년, 고학년(교육대상 세분화)

- [내용] 도내 어린이 교통사고 예방을 위한 맞춤형 교수법 개발

❍ 민‧관‧학 심포지엄 개최를 통한 전문가 의견수렴 완료(03.31.)

- [참여기관] 道 교육청, 공주대학교, 도로교통공단, 도내 초등교사, (사)한국생활안전연합

❍ 교육과정 개발 완료 및 표준안 전문가 자문·검수(10월 限) ⇨ 교육 표준안 기반 어린이 교통안전 지도서 배포(12월 限)

앞으로
			• 도내 모든 유치원, 초등학교 학생들이 전문적이고 체계적인 교통안전 교육을 받을 수 있도록 유도

【6】어르신, 이륜차 교통사고 대응 방안 마련

道 주요 교통사고(어르신, 이륜차)에 대한 데이터 분석을 통해 사고 감소를 위한 효과적인 대응 방안 마련

□ 어르신, 이륜차 교통사고 데이터 분석을 통한 맞춤형 대책 발굴

❍ 전년도 데이터 분석 결과, 어르신과 이륜차 부문 교육 집중 필요 ⇨ 도민 교육과정 內 어르신 교육 [강화], 이륜차 교육 [신설] 반영

❍ (그동안 추진 상황) 교통사고 관련 자료 공유(협조)를 위해 관련 기관(道 자치경찰위원회, 도로교통공단, 교통안전공단 등)과의 공조

❍ (중간 분석 결과)

- [이륜차 교통사고] : 사망자의 49.1%(전국 35.9%)가 65세 이상 어르신, 이륜차 음주운전 교통사고 발생비율은 10.3%(전국 6.4%)로 높은 편

- [어르신 교통사고] : 법규위반 교통사고 중 중앙선 침범이 8.42%(전국 4.9%)로 높은 것으로 분석됨(금산 16.3%, 논산 14.3%, 태안 12.3% 순)

앞으로
			• 사고 심층 분석과 전문가 자문을 통한 맞춤형 대책 발굴

【7】의사결정 체제 혁신 및 일하기 좋은 직장문화 조성

직원 아이디어를 연수원 운영에 반영하여 경영합리화 도모

□ 원장-직원 간 소통 채널 구축 및 의사결정 참여 독려

❍ (주니어보드 ‘Between’ 운영) 실무 담당 젊은 직원(직원 중 20~30대 비율 38.9%)의 역량 활용 및 의견 수렴을 통해 ①신규사업 발굴, ②불요 업무관행 타파, ③조직문화 개선을 추진(6월부)

- 창의적·혁신적 아이디어를 원장 및 간부진과 논의 후 시행

❍ (직원 제안제도 시행) 직원의 우수제안을 기관 운영에 반영함으로써 全직원이 주인의식을 갖고 근무할 수 있도록 장려 ⇨ 업무혁신 및 우수제안 포상을 통한 사기 앙양

앞으로
			• 조직문화 개선과 신사업 아이디어 발굴을 통한 역동적이고 미래지향적 연수원 구축

Ⅲ. 참고사항

□ 당면 현안사항

【1】안전한 학교 환경 조성을 위한 교직원 교통안전 교육 추진

스쿨존 관련 논란(민식이놀이) 지속으로 학교 주변 안전문화 확산 필요

안전담당 교사를 대상으로 교통안전 교육 프로그램 제공

❍ 최근 스쿨존 내 어린이 보행자의 교통안전 문제(민식이놀이)가 지적되고 있으며, 민식이법 시행 이후 사고 감소세 둔화

＊ 스쿨존 내 어린이 교통사고 : (’20년) 483건 → (’21년) 523건

❍ 어린이의 안전한 통학로 확보와 교내 사고예방을 목적으로 전문화된 교통안전 교육 제공 필요(이론 및 체험 병행)

□ 진행상황

❍ 道 교육청과 연계, 안전담당 교사를 대상으로 교통안전 교육 추진

❍ 연수원-道 교육청 간 제1차 실무자 협의 완료(06.20.)

□ 향후계획

❍ 교통안전 교육 확대를 위한 연수원-道 교육청 간 업무협약 체결 추진(7월 중)

❍ 교육계획 수립 및 세부사항 논의를 위한 제2차 실무자 협의회 개최(7월 중)

❍ 개인형 이동장치 관련 이론과 체험교육, 스쿨존 관련법령 등 교육 실시(8월 중)

❍ 교육결과 보고 및 사업 환류(12월 限)

【2】시·군 교통안전 담당자(공무원) 대상 역량 강화 교육 추진

道 교통문화지수 향상을 위하여 각 시·군과 대응체계를 강화하고, 전문가 초빙 교육을 통한 담당자 역량 강화 추진

❍ ’21년 교통문화지수 실태조사 결과 우리 道는 하위권으로 평가

- 조사항목 : 3개 분야

(운전행태) : 신호 준수, 안전띠 착용, 안전모 착용 등

(보행행태) : 횡단 중 스마트기기 사용률, 무단횡단 여부 등

(교통안전) : 지자체 교통안전 전문성 확보, 정책 이행 정도 등

구 분	문화지수	운전행태	보행행태	교통안전
전 국	80.87	46.43	16.90	17.54
충 남	78.04	45.64	16.77	15.63

□ 진행상황

❍ 道(교통정책과), 공주대학교 교수(교통분야), 교통안전공단 관계자 등과 교통문화 개선을 위한 대응방안 논의(’22.03.)

□ 향후계획

❍ 운전 및 보행행태 개선과 교통문화 향상을 위한 교육 실시(8월 限)

- 시·군 공무원(교통안전 담당자) 수요 조사

- 시·군별 교육 참여 협조 요청

- 교통문화지수 관련 지표 전문가를 초빙하여 역량 강화 교육 추진(하반기)

□ 이사 및 직원 명단

① 교통연수원 이사 명단

(정원 : 이사15/감사2)

구 분	소 속	직 위	성 명	비 고
이 사 장	충 청 남 도	행정부지사	이 필 영
부이사장	충 청 남 도	건설교통국장	이 동 민
	개인(개별)화물협회	이 사 장	안 철 진
상임이사	교통연수원	원 장	차 창 모
이 사	충 청 남 도	자치행정국장	조 원 갑
″	충 청 남 도	예산담당관	구 기 선
″	버 스 조 합	이 사 장 (사 장)	이 준 일
″	금 남 고 속	대표이사	조 성 일
″	택 시 조 합	이 사 장 (대표사원)	강 철 식
″	화 물 협 회 (경일화물(주))	이 사 장 (대표이사)	최 일 운
″	개인택시조합	이 사 장	홍 선 기
″	개인(용달)화물협회	이 사 장	전 영 수
″	전세버스조합 (세 계 관 광)	이 사 장 (사 장)	최 근 수
″	도이현법률사무소	변 호 사	도 이 현
″	공주대학교	교 수	김 인 희
감 사	충 청 남 도	교통정책과장	한 상 호
	개인(개별)화물협회	사 장	맹 광 호

② 교통연수원 직원 명단

(정원 : 15명/현원: 15명, 2022.06.30. 기준)

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일	최초임용일
연수원	연수원장	연수원장	차창모	2021.02.01.	2021.02.01.
연수과	연수과장	사무 2급	유강호	2016.10.01.	1996.03.08.
총무과	총무과장	사무 2급	서애림	2016.10.01.	1999.04.01.
연수과	운수종사자 교육팀장	사무 3급	박민웅	2019.11.01.	2008.01.01.
총무과	행정지원팀장	사무 3급	김미현	2019.11.01.	2001.04.06.
연수과	교통안전 교육팀장	사무 3급	오정주	2019.11.01.	2009.10.05.
총무과	시설담당	기능 3급	신학수	2008.07.01.	1995.10.10.
총무과	정책개발팀장	사무 3급	윤지연	2021.03.01.	2009.04.06.
총무과	정책개발담당	사무 4급	유준일	2019.11.01.	2017.04.01.
총무과	총무담당	사무 4급	조영희	2022.05.01.	2012.06.27.
연수과	연수담당	사무 5급	이명호	2019.09.01.	2017.04.01.
연수과	연수담당	사무 5급	김기성	2021.04.01.	2018.08.01.
연수과	연수담당	사무 6급	장범희	2019.06.01.	2019.06.01.
총무과	회계담당	사무 6급	김진교	2019.11.01.	2019.11.01.
연수과	연수담당	기능 5급	이권섭	2022.01.01.	2012.01.01.