《건설본부》

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2023년도 업무여건과 운영방향 Ⅲ. 2023년 주요업무 추진계획 Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황 □ 2022년도 행정사무감사결과 처리상황 Ⅴ. 참고사항 □ 각종 위원회 및 기관․단체 현황 □ 주요 사업별 예산확보 현황 □ 간부명단

Ⅰ. 기본 현황

□ 기구 및 기능

① 기 구 : 5개 과, 2개 사무소, 24개 팀

			건 설 본 부
행정 관리과		도로 건설과			공공 건축과		시설유지 관리과		하천 개발과		동부 사무소		서부 사무소
행정경리		도로1			대형건축		시설유지 관리		지역개발		서무		서무
계약		도로2			건축사업		품질관리		하천1		보수1		보수1
		도로보상			건축지원				하천2		보수2		보수2
									하천보상		구조물 관리		구조물 관리
											단속		단속

<정․현원 현황>

( 2023. 1. 16. 字 )

구 분		계	일 반 직(정원/현원)						비고
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계		116/113	1/1	7/7	26/28	44/28	28/31	10/18
본부		68/67	1/1	5/5	15/17	25/14	14/17	8/13
	행정관리과	13/13	1/1	1/1	2/2	5/2	3/5	1/2
	도로건설과	15/15	-	1/1	3/3	7/5	3/5	1/1
	공공건축과	17/16	-	1/1	4/5	7/5	3/2	2/3
	시설유지관리과	8/8		1/1	2/3	1/0	1/1	3/3
	하천개발과	15/15	-	1/1	4/4	5/2	4/4	1/4
동부사무소		24/23	-	1/1	5/5	9/6	7/8	2/3
서부사무소		24/23	-	1/1	6/6	10/8	7/6	0/2

※ 공무직(76명) : 행정실무 3, 시험□검사실무 1, 도로보수원 56, 과적단속요원 16

② 주요기능

	- 행정관리과
	❍ 조직 □ 예산 □ 청사관리 및 직원 후생 □ 복지 ❍ 각종 건설공사 입찰 및 계약, 관급자재 구매
	- 도로건설과
	❍ 지방도 사업 집행계획 수립 및 조정 ❍ 국가지원지방도, 지방도 확 □ 포장공사 및 보상업무
	- 공공건축과
	❍ 공공 건축물의 신축 및 보수사업 ❍ 건축현장 관리감독 업무
	- 시설유지관리과
	❍ 시설물 유지관리의 통합체계 구축 ❍ 건설공사 자재 품질검사 및 현장 품질·안전점검 및 교육
	- 하천개발과
	❍ 지방하천 정비 및 재해복구 □ 보상업무 추진 ❍ 지역개발 기반시설 사업 추진
	- 동부□ 서부사무소
	❍ 지방도 □ 위임국도 유지관리 및 보수사업 시행 ❍ 자연 재해대책 수립 시행, 운행제한 위반차량 단속

□ 예산현황

세입 □ 세출
		∙ [세 입 예 산] : 1,570백만원 - 수수료 150백만원, 과태료 180백만원, 지난년도 수입 40백만원, 지방교부세 1,200백만원 ∙ [세 출 예 산] : 31,521백만원 - 사업예산 19,265백만원, 행정운영경비 12,256백만원

❍ ’23 재배정 예산 사업		: 330,289백만원		(단위 : 백만원 / ’23. 1. 기준)
도로 확･포장	공공건축	하천정비	재해복구	지역개발	도로유지 관리
145,832	54,918	71,319	0	0	58,220

※ 재해복구 및 지역개발사업은 이월 예산으로 사업 추진 (이월액 : 37,009백만원)

Ⅱ. 2023년도 업무여건과 운영방향

	업 무 여 건
◈ 「민선 8기 」 건설본부 출범에 따른 도민 중심 건설사업 추진 - 대규모 예산 확보에 따른 지역 교통망 확충 기대 ◈ post-코로나19에 따른 침체된 지역경제 활성화 노력 ◈ 안전하고 실용적인 도로□하천□건축공사에 대한 기대감 상승 ◈ 공무원의 공정성 및 청렴도 요구 증대

운 영 방 향

◈ 참여와 소통을 바탕으로 지역별 특성을 고려한 건설사업 추진

◈ 지역업체 및 지역자재 우선 계약을 통한 지역경제 활성화

◈ 고품질 건설사업을 위한 철저한 공정관리 및 관리 감독

◈ 투명과 청렴을 바탕으로 도민에게 신뢰받는 건설행정 추진

⇨

충남 발전을 선도하고 미래지향적인 사회기반시설 구축

Ⅲ. 2023년 주요업무 추진계획

□ 지역경제 활성화 □ 공정성 확보를 위한 계약행정 추진

지역업체 수주율 향상을 위한 계약업무 추진

신속한 대가 지급으로 지역경제에 활력을 공급하는 회계업무 추진

공정한 건설환경 구축을 위한 임금체불 방지 및 하도급 질서 확립

【1】지역업체 수주를 최우선으로 하는 계약업무 수행

❍ 100억 미만 종합공사 지역제한입찰로 지역 중소업체 보호

❍ 지역제한 비대상 입찰 시 지역의무 공동도급 49% 의무화로
대형업체 기술이전을 통한 지역 기업 경쟁력 확보

❍ 관급자재 지역업체 생산품 우선 구매 및 경쟁구매 시
지역 가점 최대치 부여(도내 5점, 도외 2점)로 지역업체 수주기회 제공

【2】세출 예산 신속·적극 집행으로 지역경제 활성화

❍ 대금 청구일로부터 3일 이내 신속한 대가 지급(법적 기준 : 5일 이내)

❍ 최대 80% 선금 지급으로 지역업체의 경영활동 지원

【3】하도급 질서 확립 및 임금체불 방지로 공정한 건설환경 구축

❍ 표준하도급 계약서 사용 및 하도급 대금 직불제, 지급보증제 적극 반영 등

❍ 하도급계약 관련 준수사항 관리 철저 및 하도급 이행실태 상시 점검

❍ 노무비 구분관리제 시행으로 건설근로자 임금체불 방지

□ 지역발전을 선도하는 안전한 교통 인프라 구축

속도감 있는 교통 인프라 확충으로 지역 발전 촉진 도모

체계적이고 적극적인 사업관리로 계획 기간 내 사업 완공

【1】2023년 도로사업 : 40지구 / 145,832백만원

(단위 : 백만원, ’23. 1. 기준)

구 분	총계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	40	145,832	6	14,288	30	128,258	4	3,286
국지도	11	14,299	2	6,731	8	7,282	1	286
지방도	25	127,861	2	7,557	20	117,304	3	3,000
국 도	4	3,672	2	-	2	3,672	-	-

⇒ 준공지구(6), 공사지구(11), 보상지구(5), 설계지구(18)

【2】속도감 있는 도로건설사업 추진으로 지역발전 선도

❍ 지구별 전략에 맞는 사업계획 수립·관리로 집행률 향상

- (설계지구) 도로구역 결정을 위한 인·허가 협의기간 단축 노력

- (보상지구) 찾아가는 보상협의 등 적극적인 보상행정 서비스 강화

- (공사지구) 예산 집행이 가능한 지구에 집중투자해 공기단축 등 SOC 사업 효과 극대화 노력

※ ’23년 상반기 발주 : 공사(우성~이인 등 4건) / 용역(건설사업관리 3건, 설계 3건)

【3】체계적인 사업관리로 도로사업 조기 착수 및 개통

❍ ’23년 도로사업 대규모 예산투입으로 속도감 있는 교통 인프라 구축

- 6개 지구* 적기 개통 및 4개 지구 신규 착수**로 지역 교통망 확충

* ’23년 개통 : ➊규암~청남(부여), ➋청양~신양IC(청양·예산), ➌이호~양곡(홍성),
➍대술~정안(예산), ➎정산지구(청양), ➏장평지구(청양)

** 신규지구 : ➊도계~탑원(천안) ➋홍동우회(홍성), ➌무창포IC~웅천(2차)(보령), ➍대봉~흥산(청양)

□ 도로건설사업 안전관리 및 건설행정 전문성 강화

지속적인 안전점검으로 현장 안전관리 강화 및 안전의식 제고

도로건설공사 감독자 역량강화 및 공사관계자 소통 강화 추진

공정하고 투명한 건설공사 추진을 위한 전문가 자문

【1】안전사고 제로화를 위한 상시 현장점검 및 안전관리체계 구축

❍ 계절별 취약시기(동·하절기) 및 특별기간(휴가철·명절) 집중 안전점검 실시

- 취약분야(안전·품질·시공관리), 근로자 안전 등 합동점검* 실시

* 중앙부처 · 道(건설본부) · 책임건설사업관리기술인 · 현장대리인 등

❍ 기상 특보 발효(태풍·폭우·폭염) 등 상시 대응 보고체계 구축

- 현장 상주인력(감리, 현장소장)을 활용한 상시 안전체계 수립

- 비상근무반 편성□운영 및 SNS 활용(자연재해대응 단톡방) 등 상시 보고체계를 구축하여 자율과 책임에 기반한 안전 체계 형성 및 안전의식 강화 유도

【2】도로건설공사 현장 관계자 및 지역주민 소통 활성화

❍ 공사관계자(발주청, 감리단, 시공사) 간담회 개최(분기별 4회)

- 현장별 추진상황 점검(공정계획, 예산집행)과 애로사항 청취를 통해 발주청, 공사관계자 소통을 활성화하여 상호 협력체계 구축

※ 직무·안전관리 교육을 병행하여 기술력 제고 및 고품질·안전 시공 유도

❍ 지역주민 의견을 적극 수렴하여 주민 참여형 도로건설 추진

- 주민설명회·간담회 개최 □ 민원사항에 대한 수시 현장대응 등
도민과 적극적인 소통으로 도로공사로 인한 주민 불편 최소화

【3】도로건설공사 견실시공 및 공사분야 전문성 강화

❍ 기술자문위원회 구성·운영으로 합리적인 건설공사 기술·공법 적용

- 고효율·고품질 공법선정 및 시공을 위한 분야별 외부전문가* 자문 실시

* 도로, 교통, 토질, 구조 등 관련 분야 조교수급 이상, 기술사 자격 이상 전문가로 구성

- 공정하고 투명한 기술자문위원회를 운영하여 설계 타당성,
주요자재 공법(신기술·특허) 선정 등 건설행정 전문성 강화

□ 찾아가는 보상협의 및 신뢰받는 보상행정 추진

민원발생 최소화 및 찾아가는 보상 협의로 도민 중심 보상행정 실현

도로·하천사업에 편입되는 사유재산에 대한 객관적이고 공정한 보상

【1】2023년 도로·하천 보상 추진계획

❍ 총 40개 지구 (직접시행 32 / 위탁사업 8 ) / 89,508백만원

(단위 : 백만원)

구 분		합 계		계속지구		신규지구
		지구	보상비	지구	보상비	지구	보상비
합 계		40	89,508	24	25,610	16	63,898
도로	자체	17	28,579	11	8,929	6	19,650
	위탁	8	51,303	2	7,903	6	43,400
하천		15	9,626	11	8,778	4	848

【2】찾아가는 보상 협의를 통해 대민서비스 강화 및 민원 최소화

❍ 직접 사업 현장을 찾아, 보상 협의 등 도민 행정편의 극대화

- 신규 사업지구별 평균 3~4회 이상‘찾아가는 이동식 보상 상담창구’개설을 통해 도민 접근성 향상 및 불편 최소화 ※ ’22년 총 90회 이상 방문

【3】토지소유자의 참여로 공정하고 신뢰받는 보상행정 추진

❍ 토지소유자 □ 감정평가사 □ 사업시행자 □ 지자체공무원 등 8명 이상16명 이하로 구성되는‘보상협의회’운영 및 보상 협의 시
‘토지소유자 감정평가법인 추천제’적극 홍보로 신규 사업지구의 토지소유자 의견 적극 반영

【4】보상인력 전문성 확보 및 적극적인 보상 행정 실현

❍ 보상 실무 매뉴얼 정비 및 전문교육참여로 공익사업 토지 신속 확보

- 보상 매뉴얼 수록자료 개선 및 보완 (절차, 조서 작성 기준, 실무 처리요령 등)

- 선지정 측량에 따른 편입용지(면적 등) 조기 확정으로 보상 기간 단축

※ 선지정 측량 선행 시 보상준비기간 최대 1.5 ~ 2개월 소요 / 기존 3개월 이상 소요

□ 디지털 기술을 활용한 탄소중립 건축사업 추진

스마트 건설기술(BIM)을 적용하여 건설과정 디지털화 전환

디지털 녹색전환과 탄소중립 건설기술을 활용한 친환경 건설환경 조성

【1】2023년 공공건축 사업 : 26건 / 54,918백만원

(단위: 백만원, ’23. 1. 기준)

총 괄		준공사업		계속사업		신규사업
건	사업비	건	사업비	건	사업비	건	사업비
26	54,918	8	21,292	12	32,196	6	1,430

【2】건설산업 디지털화 전환

❍  기존 종이도면 및 인력 중심에서 스마트 건설기술 BIM (3차원 정보 활용 디지털 모델링 기술)을 적용하여 건설공사 품질 확보 및 생산성과 안전성 향상

※  국토교통부「스마트 건설 활성화 방안」에 따라 공사금액 1,000억 이상 BIM 의무적용

【3】디지털 기술을 활용한 탄소중립 실현

❍ 디지털 기술(BIM, 공장제작건설, 건설자동화 등)을 적용하여 건설과정(제작, 설치, 사용)의 폐기물 저감 및 탄소중립 실현

【4】신재생 에너지 확대 및 에너지 절약

❍ 기존 화석에너지에서 벗어나 건물 지붕, 벽면, 유휴부지 등에
신재생 에너지(태양광□지열 등)적용 범위를 확대하고
에너지 효율화 □ 절약을 위한 에너지관리시스템(BEMS) 적극 활용

【5】공사 담당자 역량 및 전문성 강화

❍  공공사업 발주 및 공사감독 업무 전문성 확보를 위해 자체적으로 지식동아리 운영 및 민관합동 연찬회 추진

□ 공공건축물 통합 유지관리 및 건설현장 품질관리 강화

道 소유 공공건축물 유지관리 체계 일원화로 적기에 개량·보강하여 건축물 내구성 향상 및 안전관리 강화 기틀 마련

건설 현장별 품질·안전점검 실시로 안전한 건설 현장 조성

【1】공공건축물 통합 유지관리 시스템 구축

❍ 道 소유 공공건축물 유지관리 현황

(’23.1. 기준)

합계 (69개소 625동)		본청 (23개소, 238동)		직속기관 (28개소 170동)		사업소 (18개소 217동)
자체관리	민간위탁	자체관리	민간위탁	자체관리	민간위탁	자체관리	민간위탁
55개소 (424동)	14개소 (201동)	9개소 (37동)	14개소 (201동)	28개소 (170동)	-	18개소 (217동)	-

❍ 본청·직속기관 등 자체관리 중인 건축물 유지관리업무 통합 추진

- (상반기) 업무추진지침 마련 및 업무매뉴얼 작성

※ 유지관리사업 수요조사·실태조사·사업계획 수립·사업예산 편성 등

- (하반기) 도면·하자 등 공공건축물 DB 통합관리(본청 등→건설본부)
기술직 미배치 및 보수 □ 보강 시급 건축물 우선 유지관리

- (’24년 ~ ) 유지관리사업 단계별 확대 추진

⇨ 공공건축물의 전문적·효율적 관리를 위한 통합 유지관리 시스템 구축

【2】정확하고 철저한 품질관리로 안전한 건설공사 추진

❍ 품질 □ 검사시험을 통한 공종별 품질관리 추진

- 성토용 흙, 아스콘, 콘크리트 등(20분야 108종목) 품질시험 실시

- 품질시험 정밀성 향상을 위한 품질 시험기기 교정검사 실시

❍ 체계적이고 철저한 품질 □ 안전관리단 운영으로 안전사고 예방 시스템 구축 및 품질관리 강화

❍ ’23년도 신규사업으로써 본부 내 직접 감독하는 공사 대상으로
기성 및 준공 합동 검사반(토목, 건축)을 시범적으로 운영

□ 자연재해에 대비한 하천정비사업 추진

자연환경과 조화를 이루는 지방하천 정비사업 추진

집중호우로 인한 제방유실 및 범람 등 피해지역 재해복구사업 추진

【1】2023년 하천 사업 : 38지구 / 71,319백만원

(단위: 백만원, ’23. 1. 기준)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	38	71,319	8	16,638	26	52,681	4	2,000
지방하천	35	71,319	5	16,638	26	52,681	4	2,000
재해복구	3	-	3	-	-	-	-	-

【2】신속한 사업 추진으로 예산 조기집행 및 재정집행률 향상

❍ 공사지구 : 철저한 사업계획 수립 및 공정관리로 연내 계획된 사업 정상 추진

❍ 설계지구 : 지역주민과의 소통을 강화하여 공사 중 민원 발생 최소화 및 신규지구 설계용역 조기 발주 추진 (3월 중)

【3】자연재해 대비한 하천정비 및 재해복구사업 추진

❍ 자연재해 대비한 하천정비사업 추진으로 치수적 안전성 확보

❍ 친환경 자재사용을 통하여 자연과 조화로운 하천 생태계 조성

❍ 3개 재해복구사업 ’23년 내 마무리(금곡천, 약봉천, 온양천)

【4】투명한 건설행정 구현 및 안전사고 예방 노력

❍ 하천사업 설계단계부터 주민참여 확대로 도민 신뢰도 향상

❍ 공법선정위원회를 통한 투명하고 효율적인 자재 및 공법 선정

❍ 안전사고 예방을 위한 점검 및 안전교육 강화

□ 균형있는 발전을 위한 지역개발사업 추진

태안기업도시와 서산웰빙특구를 연결하여 지역간 연계기능 확보

산업지역 교통 여건 개선으로 도로 이용자 편의 도모

【1】2023년 지역개발사업 : 2지구 /  - 백만원

(단위: 백만원, ’23. 1. 기준)

구 분	사업량 (km)	사 업 비				비고
		합 계	기시행	2023년	장 차
계	2.51	66,646	37,152	0	29,494
태안기업도시 연결도로 개설공사	0.61	36,646	36,646	-	-	준공지구 * 공정률 80%
음봉 일반산업단지 진입도로 개설공사	1.90	30,000	506	-	29,494	설계 중

※ 이월예산으로 사업 추진 (이월액 : 6,593백만원)

【2】태안 기업도시 연계 기능 강화로 지역경제 활성화

❍ 공사 준공으로 서해안 지역발전 및 관광 활성화에 기여

⇨ ‘23년 상반기 준공을 위해 역점 추진

❍ 서산웰빙특구 및 태안기업도시 연결도로 개설로 관광 거점지역 육성

❍ 서해안 관광산업 및 지역경제 활성화로 지역 균형발전 기여

【3】음봉 일반산업단지 진입도로 개설

❍ 산업단지 개발 등 교통 유발 요인에 대비한 확□포장사업 추진으로 도로 간선 기능 확보, 이용자 편의 및 지역경제 활성화 도모

⇨ ‘23년 내 최적노선 선정 및 실시설계용역 추진

※ 설계 착수(’22. 12.) → 설계 완료(’24. 12.)

□ 편리하고 안전한 도로환경 조성

도로의 기능 보전과 이용자 편의를 위한 적기 유지보수 추진

자연재해에 대한 철저한 대비․대응으로 안전한 도로환경 조성

【1】2023년 도로 유지보수 사업 : 164지구 / 58,220백만원

(단위: 백만원, ’23. 1. 기준)

사업 구분	신규지구
	합계		동부사무소		서부사무소
계	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	164	58,220	81	31,312	83	26,908
자체사업	92	16,340	46	8,090	46	8,250
재배정사업	66	31,807	31	17,623	35	14,184
위임국도	6	10,073	4	5,599	2	4,474

※ 계속지구 : 46지구 / 29,561백만원은 이월 예산으로 사업 추진

【2】예방적 도로 유지보수를 통한 위험 요소 사전 제거

❍ 교량□터널 등 주요 시설물에 대한 안전점검 및 유지관리 추진

- 주기적으로 각종 점검, 안전진단 실시 및 보수․보강공사 추진

❍ 도로 유지보수 사업의 조기 발주 및 시공 ․ 품질관리 철저

- 위험도로 구조개선, 인도 설치, 차선도색, 안전시설 정비 등

❍ 체계적인 포장 관리 및 도로 순찰 강화로 노면 평탄성 확보

- 스마트 도로유지관리시스템 우선순위에 따른 포장도 보수 추진

- 해빙기, 장마철에 대비한 수시 도로순찰 및 포트홀 등 소파보수

【3】자연재해에 대비한 철저한 사전 준비 및 신속 대응

❍ 겨울철 : 신속하고 선제적인 제설작업 추진으로 교통불편 최소화

- 충분한 제설자재․장비 확보 및 단계별 비상근무 철저

- 환경오염 예방 및 시설물 부식 방지를 위해 친환경제설재 사용 확대

- 자동염수분사장치 확충을 통한 첨단 제설시스템 구축

❍ 여름철 : 재해 취약구간에 대한 사전정비 및 응급복구 태세 확립

- 급경사지 등 위험구간 수시 순찰 및 상습 퇴적지역 배수로 준설

- 응급복구 장비‧인력‧자재의 사전확보 및 유관기관 협조체계 구축

운행제한 위반차량 강력 단속

도로 파손방지 및 원활한 도로 유지관리를 위한 단속강화

대형공사장 등 과적근원지 과적예방을 위한 사전계도 실시

운행제한 위반차량 과태료 체납에 대한 징수활동 강화

【1】도로 파손방지 및 원활한 도로 유지관리를 위한 단속강화

❍ 주요 과적 근원지(대형공사장 등) 및 위험 교량 노선 이동단속

❍ 휴일 □ 조간 □ 야간 이동단속 : 민원 발생 및 필요시

< 최근 3년간 검차 및 적발 현황>

(’22. 12. 기준)

구분	검 차 대 수			적 발 대 수
	2020년	2021년	2022년	2020년	2021년	2022년
합계	11,279	10,124	7,224	430	417	265
고정식	1,223	-	42	8	-	-
이동식	10,056	10,124	7,182	422	417	265

【2】유관기관 합동단속 강화

❍ 국토관리사무소, 시·군, 경찰서 등 유관기관 합동단속 실시

※ ’22년 합동단속 실적 : 검차 480대 / 적발 24대

【3】대형공사장 등 과적근원지 방문을 통한 과적예방 사전계도

❍ 대형공사장 등 과적 유발업체를 방문하여 과적 예방 협조 요청

❍ 운행제한 차량 단속 시 화물차량 운전자에 과적 예방 홍보물 배포

【4】단속 근무자 안전 확보를 위한 이동검문소 개량사업 추진

❍ 충분한 진입차로 확보 및 운행제한 차량 연속 측정으로 업무능률 향상

❍ 계측대와 차도 구분을 위한 가드레일 설치로 단속지점 근무환경 개선

- ’22년 4개소 준공(천안2, 아산2) / ’23년 5개소 설치 예정(논산2, 부여1, 보령2)

【5】운행제한 위반차량 과태료 체납에 대한 징수활동 강화

❍ 체납고지서 수시 발송 및 전화·문자·거주지 방문 등을 통한 징수 활동 강화

❍ 체납자 재산조회(예금·차량·부동산)를 통한 압류실시

※ ’22년 기준 전년대비 건수 기준 61%, 수납액 기준 58%로 체납 징수율 향상

Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황

□ 2022년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황

< 총  괄 >

(단위 : 건)

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
	7	6	1	-	-
시정요구	-	-	-	-	-
처리요구	2	2	-	-	-
제안사항	5	4	1	-	-

< 완료사항 >

① 운행제한 위반차량 단속 철저 및 과태료 미수납액 징수 대책 마련 (처리요구)

❍ 운행제한 위반차량 단속 강화에 대한 적극적인 조치로

- 과적 발생 근원지, 위험 교량 지역 등 취약지역 수시 이동단속 실시

- 국토관리사무소, 경찰서 등 유관기관 간 월 1회 이상 합동단속 실시

- 연중 대형공사장, 골재채취장 등 해당업체 방문 과적예방 홍보

- 노후 장비(차량, 측정기) 교체로 단속 실적 저해요인 제거 및
이동검문소 개량사업 추진으로 위반(과적)차량 단속 강화

❍ 체납액 징수 강화에 대한 적극적인 조치로

- 차량 압류(재산권 제한)에도 재산처분 이전까지 체납자의 고의 과태료 미납 문제점 보완을 위해 전자예금압류시스템을 적극 활용

- 전자예금압류시스템 사용자 교육 2회 실시(’22. 1. 7. / 5. 20.)

< 체납액 징수강화 실적 >

구분	2021년(A)		2022년(B)		증가율(B/A, %)
	건수	수납액 (천원)	건수	수납액 (천원)	건수 기준	금액 기준
합계	36	26,521	58	41,927	161%	158%
동부사무소	14	7,890	27	16,262	192%	206%
서부사무소	22	18,631	31	25,665	141%	138%

② 장기간 내용연수 초과된 도로보수장비 관리 철저(처리요구)

- 2023년 도로보수용 장비 관리 운영계획 수립(’23년 1월)

- 매월 도로보수용 장비 점검 실시(차량·건설기계)

- 수시로 내용연수 초과 대상 물품 관리전환 조회 후 불용처리 진행

- 한정된 예산의 효율적 사용을 위해 사용빈도가 높고, 내용연수가
초과된 순으로 장비 교체 추진 中

□ 향후 사용 가치가 손실된 물품은 즉시 불용 처리 하고, 교체가 필요한 물품의 경우 차기 예산에 반영될 수 있도록 적극 대응하겠음.

③ 폭설 등 매뉴얼 재정비 및 동절기 공사중지 관리 강화(제안사항)

- 자체적 겨울철 도로 제설대책을 수립하여 단계별 비상근무 및 제설작업을 시행하고 있으며, 대규모 피해발생이 우려되는 경우, ｢풍수해 현장조치 행동매뉴얼｣에 따라 재난에 적극 대응 中

□ 폭설 등 기상 악화에 도민의 생명과 재산을 지킬 수 있도록 폭설대책 매뉴얼을 재정비하고, 동절기 기온 강하로 인한 건설공사 품질 저하 및 부실시공 방지를 위해 공사 중지 관리도 철저히 하겠음.

④ 친환경 제설재 사용 및 상습결빙지역 안전 대책 마련(제안사항)

- 환경오염예방과 도로시설물 등 부식방지를 위해 매년 친환경제설재 사용을 확대 시행 中 (’20년 199톤, ’21년 709톤, ’22년 1,203톤)

□ 향후 예산 범위 내에서 사용량을 늘리도록 노력하겠음.

- 현재 도내 16개 구간의 자동염수분사장치를 설치․운용하고 있으며, 4개소를 추가적으로 설치할 계획

□ 앞으로도 상습 결빙지역에 동시설을 확충해 나갈 수 있도록
예산확보 등 최선의 노력을 다 하겠음.

⑤ 안전한 도로교통환경을 위한 포토홀 저감 대책 마련(제안사항)

- 스마트 도로유지관리시스템 우선순위에 따라 체계적인
포장·유지관리를 시행하고, 아스콘 포장 시에는 철저한 시공·품질 관리를 통해 포트홀이 발생되지 않도록 노력

□ 중차량 통행량이 많아 포트홀 발생이 잦은 구간은 순찰을 강화하고 신속히 보수하여 도로 이용자의 불편이 최소화되도록 노력하겠음.

⑥ 적극적인 민원해결 및 소통하는 조직문화 구축 필요(제안사항)

- 적극적인 민원 해결을 위해 협의 기간 중 주 1회 이상 사업지구를 방문하여 현장 협의를 실시하는 등 도민 의견 적극 수렴

- 소통하는 조직문화 구축을 위해 본부 내 브레인스토밍 형식의 자유로운 지식동아리 운영 및 업무 연찬회 등 개최

□ 앞으로 도민 □ 도의원 □ 이해관계인과의 사전 협의를 통해 민원 사항을 능동적으로 해결하고 세대 간 직급 간 소통장벽을
해소해 화합하는 조직문화를 구축해 나아가겠음.

< 추진중인 사항 >

① 수의계약 대상 금액 상향 및 지역업체 활성화 방안 마련(제안사항)

- 수의계약 금액 하향은 충남도가 ʼ20년 공공기관 청렴도에서 외부청렴도(공사분야) 하락(ʼ19년 2등급, ʼ20년 3등급)으로 제도 개선 추진(ʼ21.5월)

⇒ ʼ21년 충청남도 외부 청렴도 상승(ʼ20년 3등급, ʼ21년 2등급)

□ ʼ22년도 외부 청렴도 평가 결과에 따라 종합적으로 검토한 후 추진하겠음.

		2019년	2020년	2021년
공공기관 청렴도 (권익위 매년 평가)	종합	2등급	3등급	2등급
	외부	2등급	3등급	2등급
	내부	3등급	2등급	3등급

Ⅴ. 참 고 사 항

□ 각종 위원회 및 기관‧단체 현황

【1】충청남도건설본부 기술자문위원회

❍ 목  적 : 충청남도 건설본부에서 추진하는 건설공사에 대한 설계 및 시공 검토, 공사 방법 등 기술적 제언 및 자문

❍ 구   성 : 총 56명(당연직 8명, 외부위원 48명)

- (당 연 직) 건설본부장(위원장), 행정관리과장, 도로건설과장,
공공건축과장, 시설유지관리과장, 하천개발과장,
동부사무소장, 서부사무소장

- (외부위원) 건설분야 6급 이상 공무원, 대학의 조교수급 이상 및 기술사 자격을 취득한 자

(’23. 1. 기준)

구분	합계	도로	교통	토질	구조	하천	건축	조경	기계전기소방	환경
계	48	7	5	9	10	7	4	1	2	3

□ 주요 사업별 예산확보 현황

【1】 분야별 사업추진 내역 (총괄표)

(’23. 1. / 본예산 기준)

분야별		지구수	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
총 계		270	380.65	330,289	-
도 로	계	40	190.68	145,832	도로건설과
	국 지 도	11	90.58	14,299
	지 방 도	25	95.42	127,861
	기타도로 (국도포함)	4	4.68	3,672
공공건축		26	-	54,918	공공건축과
지방하천정비		35	172.27	71,319	하천개발과
재해복구		3	15.2	※이월예산으로 사 업 추진 中(37,009백만원)
지역개발		2	2.5
도로유지관리		164	-	58,220	동부사무소 서부사무소

【2】도로 확·포장사업 현황

(단위 : 백만원, ’23년 1월 기준)

총 괄		’23년 준공지구		계 속 지 구		’23년 신규지구
◀ 40건 / 145,832 ▶		◀ 6건 / 14,288▶		◀ 30건 / 128,258 ▶		◀ 4건 / 3,286 ▶
국지도 11 / 14,299		국지도 2 / 6,731		국지도 8 / 7,282		국지도 1 / 286
지방도 25 / 127,861		지방도 2 / 7,557		지방도 20 /117,304		지방도 3 / 3,000
국 도 4 / 3,672		국 도 2 / -		국 도 2 / 3,672		국 도 0 / -
기 타 0 / -		기 타 - / -		기 타 0 / -		기 타 0 / -

사 업 명			사업량	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
				전 체	기시행	2023년	장 차
총 계			40지구 (190.68㎞)	1,623,233	408,891	145,832	1,068,510
국 지 도			11지구 (90.58km)	578,860	219,391	14,299	345,170
준공지구	공사	이호~양곡	연장=4.85km	26,787	23,479	1,646	1,662	’18.09. ~’23.08.	85	공사
		청양 ~신양IC	연장=16.2km	57,274	50,138	5,085	2,051	’17.05. ~’23.06.	73	공사
계속지구	설계	성환~입장	연장=10.3km	99,100	3,334	714	95,052	’20.~’29.	-	설계
		효제리 ~위라리	연장=0.75km	3,000	1,300	1,000	700	’21.~’24.	-	설계
		금산~진산	연장=10.0km	48,300	5,985	287	42,028	’20.03. ~’23.01.	-	설계
	신규	충북도계 ~탑원	연장=3.6km	50,100	-	286	49,814	’23~’30	-	설계 (신규)
	사후	선장~염치	연장=11.34km	132	107.0	25	0	’20.10. ~’23.07.	100	사후환경
	공사	우성~이인	연장=0.89km	33,957	792	714	32,451	’21.~’28.	-	공사 발주
		임천~강경	연장=9.88km	49,615	5,592	1,914	42,109	’21~’29	-	공사
		장척~목현	연장=3.67km	34,578	1,278	1,914	31,386	’21.~’29.	-	공사
		당진~서산	연장=19.1km	176,017	127,386	714	47,917	’19.04. ~’28.03.	8	공사
지 방 도			25지구 (95.42km)	993,968	176,617	127,861	689,490
준공지구	공사	대술~정안	연장=4.8km	22,501	18,147	4,354	-	’19.07. ~’23.07.	73	공사
		규암~청남	연장=2.51km	30,025	26,822	3,203	-	’18.03. ~’23.04.	90	공사
계속지구	신규	무창포IC ~웅천2	연장=1.3km	8,400	-	1,000	7,400	’23.~’29.	-	설계 발주
		대봉~흥산	연장=4.6km	19,400	-	1,000	18,400	’23.~’29.	-	설계 발주
		홍동우회	연장=1.2km	8,500	-	1,000	7,500	’23.~’27.	-	설계 발주
	설계	산동~상덕	연장=7.74km	128,659	3,438	3,000	122,221	’18.~’30.	-	설계
		서면~비인	연장=5.09km	29,100	1,140	5,000	22,960	’20.~’27.	-	설계
		보산원도로	연장=0.7km	3,000	795	750	1,455	’17.~’26.	-	설계
		노화~평촌	연장=3.48km	34,723	440	1,500	32,783	’20.~’29	-	설계
		동해~부곡	연장=7.23km	44,021	920	1,000	42,101	’20.~’29	-	설계
		광시~운곡	연장=6.74km	46,490	1,071	700	44,719	’20.~’29	-	설계
		복수~진산	연장=4.28km	107,100	1,746	1,000	104,354	’20.~’30.	-	설계
		왕암도로	연장=1.0km	15,440	50	3,000	12,390	’20.~’25.	-	설계
		두마~노성	연장=9.25km	116,590	13,242	12,400	90,948	’18.~’30.	-	설계
		밀두~대음	연장=3.58km	49,170	1,000	16,000	32,170	’18.~’27.	-	설계
계속지구	보상	삭선~원북	연장=6.08km	46,514	14,560	14,600	17,354	’17.~’27.	-	보상
		고암~역재	연장=1.2km	11,000	300	4,000	6,700	’21.~’25.	-	공사
		화성~장곡	연장=2.4km	13,306	1,400	3,000	8,906	’18.~’25.	-	보상
		구룡~용두	연장=1.3km	10,795	1,285	3,000	6,510	’18.~’25.	-	보상
		기지시~한진	연장=9.36km	143,171	37,698	30,000	75,473	’17.~’30.	-	보상
	공사	반계도로	연장=1.25km	9,783	663	-	9,120	’17.~’26.	-	공사
		어천~공주 (4차)	연장=3.95km	48,900	24,116	6,211	18,573	’20.12. ~’26.12.	18	공사
		무창포IC ~웅천	연장=1.4km	15,626	9,965	4,000	1,661	’20.06 ~’25.05.	19	공사
		웅천산단 진입도로	연장=1.0km	9,305	5,860	1,143	2,302	’20.06. ~’24.05.	13	공사
		오천우회	연장=3.98km	22,449	11,959	7,000	3,490	’20.10. ~ ’26.10.	43	공사
국도			4지구 (4.68km)	50,405	12,883	3,672	33,850
준공지구	공사	장평지구	연장=1.4km	5,500	5,040	-	460	’19.12. ~’23.04.	80	공사
		정산지구	연장=1.0km	8,000	4,705	-	3,295	’20.08. ~’23.08.	85	공사
계속지구	설계	합곡지구	연장=1.39km	18,000	488	650	16,862	’21.~’25.	-	설계
	공사	원청사거리	연장=0.89km	18,905	2,650	3,022	13,233	’20.07. ~’24.11.	5	공사

【3】공공건축사업 현황

(단위 : 백만원, ’23년 1월 기준)

총 괄		‘23년도 준공사업		계속사업		‘23년도 신규사업
◀ 26건 / 54,918 ▶		◀ 8건 / 21,292 ▶		◀ 12건 / 32,196 ▶		◀ 6건 / 1,430 ▶

사 업 명				사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
					전체	기시행	2023년	장차
합계					718,219	170,822	54,918	492,479
구분	공정	연번	소계	8건	63,555	42,263	21,292	0
준공	공사	1	당진 합덕119 안전센터 증축공사	지상1층 62㎡ 내·외부 환경개선	865	865	0	0	’21.07.～ ’23.02.	90	공사중 (내부마감)
		2	아산지역 제설 전진 기지 신축공사	신축 지상1층 400㎡	530	30	500	0	’22.05.～ ’23.09.	0	공사 발주 준비
		3	대천항 관공선 통합 사무실 건립공사	지상2층 1,370㎡	4,878	2,725	2,153	0	’20.08.～ ’23.08.	45	동절기 일시 정지
		4	수산종자 연구센터 건립공사	지상3층 1,995㎡	7,220	4,220	3,000	0	’20.09.～ ’23.08.	36	동절기 일시 정지
		5	공주 소방서 다목적 훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사	지상4층 432㎡	939	939	0	0	’21.03.～ ’23.07.	20	동절기 일시 정지
		6	공주 소방서 비상대기소 증축공사	증축 191㎡	637	637	0	0	’22.04.～ ’23.07.	90	설계중
		7	청양119구조구급센터 증축공사	증축 지상2층 275㎡	986	986	0	0	’22.02.～ ’23.08.	95	설계중
		8	충남 스포츠센터 건립공사	지하1층 지상2층 13,344㎡	47,500	31,861	15,639	0	’18.08.～ ’23.06.	35	동절기 일시 정지

사 업 명				사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
					전체	기시행	2023년	장차
구분	공정	연번	소계	12건	457,334	122,637	32,196	302,501
계속	공사	9	소방 복합시설 건립공사	지하1층 지상4층 17,042㎡	76,649	60,522	8,065	8,062	’17.10.～ ’24.04.	26	공사중 (토공사 등)
		10	충남국제 전시 컨벤션센터 건립공사	지하1층 지상4층 52,223㎡	160,300	5,869	447	153,984	’20.10.～26.11.	0	공사 발주 준비
		11	충남 육아종합 지원센터 건립공사	지하2층 지상3층 3,459㎡	12,330	9,643	0	2,687	’20.10.～’2404.	0	동절기 일시 정지
	설계	12	충남 사회적 경제 혁신타운 건립공사	지하1층 지상4층 7,333㎡	28,780	12,440	0	16,340	’21.05.～ ’24.09.	0	공사 발주 중
		13	금산 소방서 증축공사	지하1층 지상4층 2,300㎡	9,871	396	5,306	4,169	’21.01.～ ’24.12.	31	설계중
		14	당진 소방서 증축공사	지하1층 지상4층 2,300㎡	9,864	4,432	2,000	3,432	’21.08.～ ’24.05.	80	설계중
		15	충남 장애인 가족 힐링센터	지하1층 지상2층 6,250㎡	26,765	7,184	0	19,581	’21.07.～ ’24.12.	60	설계중
		16	충남 미술관 건립공사	지하2층 지상4층 26,680㎡	79,993	9,800	0	70,193	’21.04.～’25.12.	74	설계중
		17	안면도 지방정원 가든센터 건립공사	지상2층 2,035㎡	13,500	4,931	8,569	0	’21.06.～ ’24.06.	40	설계중

사 업 명				사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
					전체	기시행	2023년	장차
구분	공정	연번	소계	12건	457,334	122,637	32,196	302,501
계속	설계	18	충남 광역형 탄소중립 연수원 조성사업	신축 1,650㎡ 리모델링 301㎡	19,800	4,950	7,425	7,425	’22.01.～’24.04.	70	설계중
		19	통일 플러스 센터 건립공사	신축 지하1층 지상3층 2,500㎡	13,700	2,470	0	11,230	‘22.12.~ ’25.07	0	설계 공모중
		20	동학사 119안전 센터 건립공사	신축 지상3층 1,100㎡	5,782	0	384	5,398	’22.10.～’25.01.	0	설계 공모중

<신규지구>

사 업 명				사업량	사업비				의뢰예정	공정률 (%)	비고
					전체	기시행	2023년	장차
구분	공정	연번	소계	6건	197,330	5,922	1,430	189,978
신규	-	21	광역 해양자원 순환센터 건립공사	지상2층 4,800㎡	15,000	870	0	14,130	‘23. 07.	-	-
		22	여성가족 플라자 건립공사	지상4층 13,735㎡	49,440	4,789	1,430	43,221	‘23. 07.	-	-
		23	충남 예술의전당 건립공사	지하2층 지상4층 16,398㎡	124,489	263	0	124,226	‘23. 07.	-	-
		24	동물위생 시험소 당진지소 신축사업	지상3층 1,200㎡	6,172	0	0	6,172	‘23. 01.	-	-
		25	축산기술 전문교육관 건립공사	지상2층 1,000㎡	1,980	0	0	1,980	‘23. 02.	-	-
		26	충남연구원 태양광 발전시설 설치사업	태양광발전설비 136kW	249	0	0	249	‘23. 03.	-	-

【4】지방하천 정비사업 현황

(단위 : 백만원, ’23년 1월 기준)

총 괄		’23년 준공사업		계 속 사 업		‘23년 신규사업
◀ 38건 / 71,319 ▶		◀ 8건 / 16,638 ▶		◀ 26건 / 52,681 ▶		◀ 4건 / 2,000 ▶
지방하천 35 / 71,319		지방하천 5 / 16,638		지방하천 26 / 52,681		지방하천 4 / 2,000
재해복구 3 / -		재해복구 3 / -		재해복구 - / -		재해복구 - / -

<총  괄>

(단위 : 백만원, 2023. 01. 기준)

구 분	지구 수	사업량 (km)	사 업 비				비고
			계	기시행	2023년	장차
합 계	38지구	187.47	833,757	191,397	71,319	571,041
지방하천 정비사업	35지구	172.27	760,388	118,028	71,319	571,041	준공 5, 계속 26, 신규 4
지방하천 재해복구	3지구	15.2	73,369	73,369	0	0	준공 3

<지방하천 정비사업 세부 내역>

(단위 : 백만원, ’23년 1월 기준)

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2023년	장차
계	35지구			172.27	760,388	121,933	71,319	567,136
준 공 사업	소계 (5지구)			12	74,077	57,200	16,638	239
	중산천	공주	금흥	1.4	17,271	13,098	4,173	0	’20.10. ~’23.12.	51	준공
	화산천	서천	기산 화양	4.3	38,748	32,585	6,163	0	’18.03. ~’23.05.	85	준공
	명천천	서산	성연	1.1	3,047	2,070	977	0	’21.03. ~’23.05.	38	준공
	석림천	서산	석림	0.5	710	471	0	239	’20.12. ~’23.12.	-	정지중
	장승천	청양	청양	4.7	14,301	8,976	5,325	0	’20.12. ~’23.05.	25	준공
계 속 사 업 계 속 사업	소계 (26지구)			145.3	597,148	64,733	52,681	479,734
	병천천	천안	병천	7.3	35,149	16,474	9,000	9,675	’17.12. ~’23.11.	25	공사
	광기천	천안	병천	6.8	29,007	10,960	9,000	9,047	’17.12. ~’24.03.	38	공사
	주교천	부여	세도	6.7	23,972	5,540	6,000	12,432	’20.12. ~’24.09.	8	공사
	천안천 (장재천)	천안	백석 불당	2.5	23,170	4,944	9,000	9,226	’19.02. ~’24.06.	25	공사
	신양천	논산	연무	8.6	27,084	4,080	8,000	15,004	’19.01. ~’24.06.	5	공사
	와룡천	홍성	갈산 결성	7.7	25,247	1,050	0	24,197	’19.~’23.	-	설계
	도마천	서천	문산 시초	9.4	23,851	1,200	2,000	20,651	’19.~’25.	-	설계
	용요천	태안	근흥	6.5	45,278	1,349	4,132	39,797	’19.~’25.	-	설계
	왕대천	계룡	두마	3.4	6,497	568	0	5,929	’19.~’23.	-	설계
	간치천	보령	주산 웅천	8.2	30,623	2,404	5,000	23,219	’19.~’23.	-	설계
	판교천	서천	종천 서천	4.4	14,376	754	0	13,622	’20.~’24.	-	설계
	청지천	서산	장홍 석림	5.9	29,431	1,118	549	27,764	’20.~’24.	-	설계
	왕암천	논산	가야곡	8.9	23,370	1,124	0	22,246	’20.~’24.	-	설계
	오봉천	당진	송악 신평	6.0	23,699	1,091	0	22,608	’20.~’24.	-	설계
	칠산천	부여	임천	11.0	25,373	1,602	0	23,771	’20.~’24.	-	설계
	진산천	금산	진산	4.9	7,420	945	0	6,475	’20.~’24.	-	설계
	유등천	금산	복수	6.1	14,323	1,296	0	13,027	’18.~’24.	-	설계 (하천과)
	둔포천	아산	둔포	4.5	40,222	843	0	39,379	’21.~’24.	-	설계
	솔리천	서천	장항	1.3	4,997	901	0	4,096	’21.~’25.	-	설계
	초대천	당신	신평	6.3	37,394	1,410	0	35,984	’21.~’24.	-	설계
	양촌천	논산	양촌	3.4	15,832	803	0	15,029	’21.~’25.	-	설계
	판정천	천안	입장	3.4	8,598	603	0	7,995	’21.~’25.	-	설계
	도곡천	계룡	엄사	2.5	15,086	835	0	14,251	’22.~’26.		설계
	성연천	서산	성연	2.2	14,039	1,036	0	13,003	’22.~’26.		설계
	구룡천	천안	신방	1.9	18,665	781	0	17,884	’22.~’26.		설계
	삽교천	홍성	홍동	5.5	34,445	1,022	0	33,423	’22.~’26.		설계
신규 사업	소계 (4지구)			14.97	89,163	0	2,000	87,163
	남성천	부여	임천	2.5	12,696	0	300	12,396	’23.~’27.	-	신 규
	유구천	공주	유구	3.1	28,517	0	700	27,817	’23.~’27.	-	신 규
	갈두천	태안	원북	6.87	27,845	0	600	27,245	’23.~’27.	-	신 규
	읍내천	청양	정산	2.5	20,105	0	400	19,705	’23.~’27.	-	신 규

<지방하천 재해복구사업>

(단위 : 백만원, ’23년 1월 기준)

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2023년	장차
계	3지구			15.2	73,369	73,369	0	-
준공사업	금곡천	아산	배방	2.7	11,895	11,895	0	0	’20.11. ~’23.12.	70	준공
	약봉천	아산	송악	5.7	24,711	24,711	0	0	’20.11. ~’23.12.	30	준공
	온양천	아산	송악	6.8	36,763	36,763	0	0	’20.11. ~’23.12.	65	준공

【5】지역개발사업 현황

(단위 : 백만원, ’23년 1월 기준)

총 괄		’23년도 준공사업		계 속 사 업		’23년도 신규사업
◀ 2건 / - ▶		◀ 1건 / - ▶		◀ 1건 / - ▶		◀ - / - ▶

연번	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2023년	장차
합 계		2지구		2.5	66,646	37,152	0	29,494
준공사업	태안 기업 도시 연결도로 개설공사	태안 서산	태안 부석	연장=0.6	36,646	36,646	0	0	’19.12. ~’23.12.	80	준공
계속사업	음봉 일반산업단지 진입도로 개설공사	아산	음봉	연장=1.9 (4→8차로)	30,000	506	0	29,494	’22.10. ~’25.12.	0	설계

【6】도로 유지관리사업 현황

<동부․서부사무소>

(단위 : 백만원, ’23년 1월 기준)

사업 구분	신규지구
	합계		동부		서부
계	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	164	58,220	81	31,312	83	26,908
자체사업	92	16,340	46	8,090	46	8,250
재배정사업	66	31,807	31	17,623	35	14,184
위임국도	6	10,073	4	5,599	2	4,474

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음.

<동부사무소>

(단위 : 백만원, ’23년 1월 기준)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
계(신규지구)			81개 지구			31,312
신규지구신규지구	소계	자 체 사 업	46개 지구			8,090
	자체사업	천안지역 포장도 보수공사	천안		1식	475	23.01.~23.06.	-	용역중
		국지도23호 망향도로 배수로 정비공사	천안	성거	L=7.2km	75	23.01.~23.06.	-	용역중
		국지도70호 대홍도로 차선도색공사	천안	성환	L=2.4km	35	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도691호 용원도로 차선도색공사	천안	성남	L=6.8km	65	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도623호 매당교차로 실시설계용역	천안	광덕	1식	50	23.01.~23.06.	-	-
		공주지역 포장도 보수공사	공주		1식	570	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도691,697호 계룡지구 배수로정비공사	공주	계룡	L=0.10km	40	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도604,629호 사곡지구 배수로정비공사	공주	사곡	L=0.15km	50	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도604호 덕학지구 배수로정비공사	공주	의당	L=0.10km	20	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도629호 동해지구 배수로정비공사	공주	유구	L=0.10km	20	23.01.~23.06.	-	용역중
		논산지역 포장도 보수공사	논산		1식	410	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도799호 병촌지구 사면정비공사	논산	성동	L=0.10km	20	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도697호 대우지구 배수로 정비공사	논산	상월	L=0.15km	40	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도691호 송산지구 배수로 정비공사	논산	연산	L=0.10km	30	23.01.~23.06.	-	용역중
		국지도68호 육곡지구 보행로 정비공사	논산	가야곡	L=0.70km	200	23.01.~23.06.	-	용역중
		금산지역 포장도 보수공사	금산		1식	430	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도635호 남이도로 배수로 정비공사	금산	남이	L=0.25km	50	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도635호 구억도로 배수로 정비공사	금산	제원	L=0.30km	70	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도635호 백암도로 배수로 정비공사	금산	복수	L=0.10km	20	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도601호 신평도로 배수로 정비공사	금산	추부	L=0.10km	30	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도601호 두두지구 배수로 정비공사	금산	군분	L=0.27km	70	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도635호 석막도로 사면정비공사	금산	진산	1식	30	23.01.~23.06.	-	용역중
		부여지역 포장도 보수공사	부여		1식	570	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도723호 팔충지구 배수로정비공사	부여	충화	L=0.43km	50	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도606호 전장지구 배수로정비공사	부여	외산	L=0.20km	30	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도799호 증산도로 인도설치공사	부여	석성	L=0.40km	50	23.01.~23.06.	-	용역중
		서천지역 포장도 보수공사	서천		1식	397	23.01.~23.06.	-	용역중
		국지도68호 장암도로 배수로 정비공사	서천	장항	L=0.12km	50	22.01.~22.06.	-	용역중
		지방도611호선 둔덕도로 배수로 정비공사	서천	둔덕	L=0.15km	35	22.01.~22.06.	-	용역중
		지방도611호선 태월도로 배수로 정비공사	서천	서천	1식	10	22.01.~22.06.	-	용역중
		지방도611호 은곡도로 배수로 정비공사	서천	문산	1식	70	22.01.~22.06.	-	용역중
		지방도611호선 지원도로 배수로 정비공사	서천	문산	L=0.27km	50	22.01.~22.06.	-	용역중
		국지도68호 창선도로 인도정비공사	서천	장항	L=0.15km	50	22.01.~22.06.	-	용역중
		지방도611호 군사도로 차선도색공사	서천	서천	L=0.25km	3	22.01.~22.06.	-	용역중
		지방도611호 화천도로 차선도색공사	서천	장항	L=2.40km	35	22.01.~22.06.	-	용역중
		청양지역 포장도 보수공사	청양		1식	206	23.01.~23.06.	-	용역중
		청양지구 지방도 사면 및 배수로 정비공사	청양	청양	1식	359	23.01.~23.06.	-	용역중
		청양지구 지방도 차선도색공사	청양	청남	L=10.6km	135	23.01.~23.06.	-	용역중
		지방도 풀깎기	전노선		1식	1,100	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		도로유지보수에 따른 폐기물 처리	전노선		1식	30	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		도로시설물 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	600	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		설해 및 수해대책 장비 임차료	전노선		1식	500	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		설해 및 수해대비 자재구입	전노선		1식	400	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		터널 및 교량 정비사업	전노선		1식	200	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		비점오염저감시설 유지관리	전노선		1식	60	23.01.~23.12.	-	발주준비중
	소계	재배정사업	31개 지구			17,623
	재배정사업재배정사업	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		운행방향 유도레인 설치	전노선		1식	30	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선		1식	1,300	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		동물찻길사고 방지시설 설치	전노선		1식	200	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		도로 표지판 정비사업	전노선		1식	100	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		도로 표지판(LED) 개선사업	전노선		1식	150	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		지방도 포장도 보수공사	전노선		1식	1,750	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		마을주민보호구역 정비	부여	구룡	1식	200	23.01.~23.12.	-	발주준비중
		국지도68호 천내도로 인도설치공사	금산	제원	L=0.40km	600	23.01.~23.12.	-	용역중
		지방도799호 증산도로 인도설치공사	부여	석성	L=0.40km	500	23.01.~23.12.	-	용역중
		지방도617호 남전도로 인도설치공사	서천	마서	L=1.80km	900	23.01.~23.12.	-	용역중
		지방도613호 지현도로 인도설치공사	서천	한산	L=0.30km	75	23.01.~23.12.	-	용역중
		지방도607호 신합도로 인도설치공사	서천	서	L=0.25km	750	23.01.~23.12.	-	용역중
		지방도610호 대봉도로 인도설치공사	서천	서	L=1.10km	600	23.01.~23.12.	-	용역중
		지방도699호 탑동교차로 교차로 개선	부여	석성	1식	370	23.01.~24.12.	-	용역중
		지방도723호 황골교차로 외1지구 교차로 개선	부여	양화	1식	100	23.01.~24.12.	-	용역중
		지방도625호 석동교차로 개선	부여	장암	1식	50	23.01.~24.12.	-	용역중
		지방도799호 응평교차로 개선	부여	초촌	1식	50	23.01.~24.12.	-	용역중
		지방도645호 청양 탄정도로 회전교차로	청양	대치	1식	400	22.01.~23.03.	90	공사중
		국지도96호 청양 중묵도로 교차로개선	청양	비봉	1식	200	22.09.~23.12.	-	용역중
		지방도697호 KTX공주역 진입도로 선형개량	공주	이인	1식	2,400	19.01.~23.12.	70	공사중
		지방도697호 모촌도로 위험도로 개량공사	논산	양촌	L=0.70km	500	23.01.~24.12.	-	용역중
		지방도691호 덕평도로 위험도로 개량공사	논산	부적	L=0.27km	100	23.01.~24.12.	-	용역중
		지방도799호 부여 현내도로 선형개량	부여	석성	1식	1,000	21.11.~23.11.	30	공사중
		지방도625호 북고도로 선형개량공사	부여	장암	L=1.23km	100	23.01.~24.12.	-	용역중
		지방도606호 청양 봉우티고개 오르막차로	청양	남양	1식	2,000	21.04∼23.12.	-	용역중
		교량 및 터널 안전진단 및 점검	전노선		1식	1,491	23.01.~23.12.	-	용역중
		광암교 재가설공사	청양	운곡	1개소	500	22.07.~23.07.	5	공사중
		상일교 재가설공사	서천	판교	L=0.28km	300	23.01.~24.12.	-	용역중
		황산대교 등 8개교 보수보강공사	전노선		1식	800	23.01.~23.12.	-	용역중
		정안교 내진성능보강공사	공주	정안	1식	87	22.11.~23.06.	50	공사중
	소계	위 임 국 도	4개 지구			5,599
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	3,576	23.01.~23.12.		발주준비중
		도로유지보수	전노선		1식	1,403	23.01.~23.12.		발주준비중
		도로병목지점개선	전노선		1식	360	23.01.~23.12.		발주준비중
		위험도로개선	전노선		1식	260	23.01.~23.12.		발주준비중

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음

<서부사무소>

(단위 : 백만원, ’23년 1월 기준)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
계(신규지구)			83개 지구			26,908
신규지구	소계	자 체 사 업	46개 지구			8,250
	자체사업	보령지역 포장도 보수공사	보령		1식	560	23.01.~23.06.		용역중
		지방도606호 수부도로 배수시설 정비공사	보령	웅천	L=0.15km	40	23.01.~23.06.		용역중
		지방도606호 구룡도로 배수시설 정비공사	보령	웅천	L=0.10km	20	23.01.~23.06.		용역중
		지방도610호 정전도로 외 1개소 배수시설 정비공사	보령	청소	L=0.15km	40	23.01.~23.06.		용역중
		보령지역 도로 유지보수 단가계약	보령		1식	40	23.01.~23.12.		용역중
		아산지역 포장도 보수공사	아산		1식	530	23.01.~23.06.		용역중
		지방도628호 냉정도로 외 1개소 배수시설 정비공사	아산	인주	L=0.40km	40	23.01.~23.06.		용역중
		지방도645호 화천도로 외 1개소 배수시설 정비공사	아산	도고	L=0.30km	30	23.01.~23.06.		용역중
		지방도624호 도흥도로 진출입로 배수시설 정비공사	아산	인주	L=0.15km	30	23.01.~23.06.		용역중
		국지도70호 소동도로 배수시설 정비공사	아산	음봉	L=0.10km	20	23.01.~23.06.		용역중
		아산지역 도로 유지보수 단가계약	아산		1식	50	23.01.~23.12.		용역중
		서산지역 포장도 보수공사	서산		1식	595	23.01.~23.06.		용역중
		지방도634호 양길도로 배수시설 정비공사	서산	팔봉	L=0.20km	25	23.01.~23.06.		용역중
		지방도634호 고남도로 배수시설 정비공사	서산	팔봉	L=0.10km	20	23.01.~23.06.		용역중
		지방도647호 신창도로 배수시설 정비공사	서산	운산	L=0.10km	20	23.01.~23.06.		용역중
		서산지역 도로 유지보수 단가계약	서산		1식	40	23.01.~23.12.		용역중
		당진지역 포장도 보수공사	당진		1식	410	23.01.~23.06.		용역중
		지방도615호 광천도로 배수시설 정비공사	당진	순성	L=0.02km	30	23.01.~23.06.		용역중
		지방도615호 성북도로 배수시설 정비공사	당진	순성	L=0.25km	60	23.01.~23.06.		용역중
		국지도70호 석우도로 배수시설 정비공사	당진	합덕	L=0.10km	50	23.01.~23.06.		용역중
		지방도649호 도산도로 배수시설 정비공사	당진	정미	L=0.20km	50	23.01.~23.06.		용역중
		지방도615호 고대도로 배수시설 정비공사	당진	고대	L=0.20km	50	23.01.~23.06.		용역중
		당진지역 도로 유지보수 단가계약	당진		1식	50	22.01.~22.12.		용역중
		홍성지역 포장도 보수공사	홍성		1식	560	23.01.~23.06.		용역중
		지방도609호 운월도로 배수시설 정비공사	홍성	홍동	L=0.40km	40	23.01.~23.06.		용역중
		국지도96호 상송도로 배수시설 정비공사	홍성	장곡	L=0.20km	60	23.01.~23.06.		용역중
		홍성지역 도로 유지보수 단가계약	홍성		1식	40	23.01.~23.12.		용역중
		예산지역 포장도 보수공사	예산		1식	340	23.01.~23.06.		용역중
		지방도619호 몽곡도로 외 3ᅟᅢᆨ소 배수시설 정비공사	예산	고덕	L=0.90km	200	22.01.~22.06.		용역중
		지방도618호 발연도로 외 2개노선 배수시설 정비공사	예산	예산	L=0.40km	120	22.01.~22.06.		용역중
		예산지역 도로 유지보수 단가계약	예산		1식	40	23.01.~23.12.		용역중
		태안지역 포장도 보수공사	태안		1식	588	23.01.~23.06.		용역중
		국지도96호 도황도로 배수시설 정비공사	태안	근흥	L=0.12km	36	23.01.~23.06.		용역중
		지방도634호 어은도로 배수시설 정비공사	태안	태안	L=0.10km	16	23.01.~23.06.		용역중
		지방도603호 내리도로 배수시설 정비공사	태안	이원	L=0.05km	20	23.01.~23.06.		용역중
		태안지역 도로 유지보수 단가계약	태안		1식	40	23.01.~23.12.		용역중
		지방도 풀깎기	전노선		1식	700	23.01.~23.12.		발주준비중
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	23.01.~23.12.		발주준비중
		도로유지보수에 따른 폐기물 처리	전노선		1식	30	23.01.~23.12.		발주준비중
		도로시설물 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	600	23.01.~23.12.		발주준비중
		설해 및 수해대책 장비 임차료	전노선		1식	500	23.01.~23.12.		발주준비중
		설해 및 수해대비 자재구입	전노선		1식	400	23.01.~23.12.		발주준비중
		응급복구	전노선		1식	100	23.01.~23.12.		발주준비중
		터널 및 교량 정비사업	전노선		1식	100	23.01.~23.12.		발주준비중
		아산지역 전진기지(제설창고) 구축사업	아산	염치	1식	500	23.01.~23.12.		발주준비중
		비점오염저감시설 유지관리	전노선		1식	120	23.01.~23.12.		발주준비중
	소계	재배정사업	35개 지구			14,184
	재배정사업	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	23.01.~23.12.		발주준비중
		회전교차로 설치	전노선		1식	500	23.01.~23.12.		발주준비중
		운행방향 유도레인 설치	전노선		1식	30	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선		1식	1,300	23.01.~23.12.		발주준비중
		동물찻길사고 방지시설 설치	전노선		1식	200	23.01.~23.12.		발주준비중
		도로 표지판 정비사업	전노선		1식	100	23.01.~23.12.		발주준비중
		도로 표지판(LED) 개선사업	전노선		1식	150	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도 포장도 보수공사	전노선		1식	1,750	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도645호 화천도로 마을주민보호구역 정비	아산	도고	1식	50	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도645호 농은도로 마을주민보호구역 정비	아산	도고	1식	50	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도619호 홍원도로 마을주민보호구역 정비	홍성	홍동	1식	50	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도616호 봉서도로 마을주민보호구역 정비	홍성	금마	1식	50	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도610호 관창도로 인도설치공사	보령	주교	L=0.30km	300	23.01.~23.12.		용역중
		지방도623호 수철도로 인도설치공사	아산	배방	L=0.60km	600	23.01.~23.12.		용역중
		지방도634호 팔봉도로 인도설치공사	서산	팔봉	L=0.40km	400	23.01.~23.12.		용역중
		지방도619호 반촌도로 인도설치공사	당진	송악	L=0.50km	500	23.01.~23.12.		용역중
		지방도616호 봉서도로 인도설치공사	홍성	금마	L=0.13km	225	23.01.~23.12.		용역중
		지방도616호 녹문도로 인도설치공사	예산	신양	L=0.20km	200	23.01.~23.12.		용역중
		지방도616호 화천도로 인도설치공사	예산	대술	L=0.20km	200	23.01.~23.12.		용역중
		지방도603호 관리도로 인도설치공사	태안	이원	L=0.40km	400	23.01.~23.12.		용역중
		지방도619호 백석도로 위험도로 개량공사	당진	순성	1식	700	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도647호 조금도로 위험도로 개량공사	당진	대호지	1식	400	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도634호 고남도로 위험도로 개량공사	서산	성연	1식	200	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도603호 관리도로 위험도로 개량공사	태안	이원	1식	700	23.01.~23.12.	69	발주준비중
		지방도634호 안산삼거리 교차로 개선공사	태안	원북	1식	200	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도615호 순성사거리 교차로 개선공사	당진	순성	1식	200	23.01.~23.12.		발주준비중
		국지도96호 산성삼거리 교차로 개선공사	홍성	장곡	1식	200	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도647호 오학도로 교차로 개선공사	서산	해미	1식	300	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도618호 대천사거리 교차로 개선공사	예산	고덕	1식	200	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도603호 내리도로 선형개량공사	태안	이원	1식	600	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도624호 동산교(아산) 보수보강공사	아산	탕정	1식	200	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도616호 동산교(예산) 보수보강공사	예산	광시	1식	70	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도623호 선창교 보수보강공사	아산	선장	1식	100	23.01.~23.12.		발주준비중
		지방도617호 도화담교 재가설공사	보령	미산	1개소	2,000	21.12.~24.01.	68	공사중
		교량 및 터널 안전진단 및 점검	전노선		1식	1,039	23.01.~23.12.		발주준비중
	소계	위 임 국 도	2개 지구			4,474
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	3,728	23.01.~23.12.		발주준비중
		도로유지보수	전노선		1식	746	23.01.~23.12.		발주준비중

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음

□ 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
건설본부	본부장	지방기술서기관	최동석	2021.01.01.
	행정관리과장	지방행정사무관	이학규	2023.01.16.
	도로건설과장	지방시설사무관	박중호	2023.01.16.
	공공건축과장	지방시설사무관	나윤주	2023.01.16.
	시설유지 관리과장	지방시설사무관	안동수	2023.01.16.
	하천개발과장	지방시설사무관	정성진	2022.01.12.
	동부사무소장	지방시설사무관	김정흠	2021.07.01.
	서부사무소장	지방시설사무관	이재흥	2023.01.16.